ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Город Москва                                                                     Дело № А40-86658/2020

 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июля 2021 года 

Полный текст постановления изготовлен  26 июля 2021 года

 

Арбитражный суд Московского округа в составе: 

председательствующего судьи Тутубалиной Л.А.,

судей: Бочаровой Н.Н., Стрельникова А.И.,   

при участии: 

от истца – ФИО1, дов. от 25.11.2019, 

от ответчика – ФИО2, дов. от 17.05.2021, 

рассмотрев 19.07.2021 в судебном заседании кассационную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Центррегионстрой»

на решение Арбитражного суда города Москвы 

от 27 ноября 2020 года

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда

от 05 апреля 2021 года,

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Центррегиострой»

к Акционерному обществу «Экспедиция №2»

о взыскании задолженности в размере 17 250 564, 96 руб. 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Центррегионстрой» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы  с исковым заявлением к Акционерному обществу «Экспедиция №2»  (далее – ответчик) о взыскании основного долга по договору №17/01 от 21.02.2017 в размере 17 250 564,96 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2020,  постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2021,  в иске отказано.  

Не согласившись с принятыми решением и  постановлением, истец подал кассационную жалобу,  в которой просит их отменить в связи с нарушением норм материального права, несоответствием изложенных в них выводов обстоятельствам дела и принять по делу новый судебный акт.

Истец указывает, что ответчиком не конкретизировано, какие работы не соответствуют по стоимости приложению №3договора субподряда№17/01 от 21.02.2017, в материалы дела не представлены доказательства, что предъявленные к оплате работы ответчиком не выполнялись.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал кассационную жалобу по изложенным в ней доводам.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы по изложенным в отзыве доводам. 

Заслушав представителей сторон, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права  и соблюдение норм процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в оспариваемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены решения и постановления в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судами,  21.02.2017 между Акционерным обществом «Экспедиция №2» (далее – генподрядчик, ответчик) и Обществом с ограниченной ответственностью  «Центррегионстрой» (далее – субподрядчик, истец) заключен договор субподряда №17/01, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «Цетррегионстрой» выполняет строительно-монтажные работы на объекте 700 (остров Новая Земля).

Разделом 5 вышеназванного договора предусмотрен порядок приема работ в котором указанно, что субподрядчик предоставляет генподрядчику до 22 числа отчетного месяца акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах на бумажном и электронном носителях, счета и счета-фактуры. Акты по форме КС-2 составляются в ЕРЕР-1984 г. для островов Новая Земля с переводом в цены 1991 года и последующим пересчетом в текущие цены 2017 года с индексом 110,72  (пункт 5.2 договора).

Генподрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать выставленные субподрядчиком акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, или направить письменный мотивированный отказ в адрес субподрядчика.

Судами установлено, что от истца 22.11.2017 поступили указанные в пункте 5.2. договора документы. Рассмотрев представленные документы, ответчиком письмом от 27.11.2017 № 294м/17 был направлен мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ, со ссылкой, что  не оформлены журналы производства работ по объектам с начала работ и до их завершения. Предъявляемые в актах КС-2 по договору субподряда работы по их стоимости не соответствуют указанным в расчете (приложение № 3) данного договора. Расценка на демонтаж плит согласно пункту 8 акта № 45 применена по сборнику № 46 ошибочно и не соответствует составу выполняемых работ, предложено применить расценку Е27-96 с коэффициентом на демонтаж. 

Судами также установлено, что из актов по форме КС - 2 не представляется возможным установить, на каких объектах выполнялись работы, учитывая что перечень объектов и видов работ представлен в приложении № 1 к договору.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований в полном объеме, руководствуясь статьями 309, 310, 753, Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из того, что истец в нарушение пункта 4.3.15. договора не обеспечил выполнение работ по договору и оформление исполнительной документации в полном объеме в соответствии с технической документацией и строительными нормами и правилами, поскольку из предоставленных истцом документов невозможно сделать однозначный вывод, из  каких материалов, на каких объектах, по какой цене и в каком объеме производились работы, что в результате не предоставления истцом всей документации по объекту капитального строительства, ответчик не может принять выполненные работы, поскольку невозможно оценить объём выполненных работ, а именно таких документов как: акт сдачи-приемки строительной площадки; общий журнал работ, журналы специальных работ. 

Выводы суда первой инстанции поддержаны судом апелляционной инстанции.

Судами также установлено, что заявленные к оплате работы не соотносятся с предметом договора, поскольку являются дополнительными, однако дополнительное соглашение к договору сторонами не заключалось, стоимость и объем таких работ не согласовывались.

Выводы судов не противоречат имеющимся в деле доказательствам, которым судами дана надлежащая оценка в их совокупности, и соответствуют закону. 

Доводы кассационной жалобы подлежат отклонению, как аналогичные доводам, заявленным в судах первой и апелляционной инстанции, и не опровергающие выводы судов. 

Нарушений норм материального и процессуального права, которые бы привели или могли привести к неправильному рассмотрению дела, судами не допущено. 

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является безусловным основанием для отмены решения и постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом первой и апелляционной инстанций не нарушены. 

Таким образом, предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены решения и постановления в кассационном порядке не имеется. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московского округа 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 ноября 2020 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05 апреля 2021 года по делу А40-86658/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения. 

Председательствующий судья                                                  Л.А. Тутубалина     

 

Судьи:                                                                                              Н.Н. Бочарова 

 

                                                                                                          А.И. Стрельников