АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

300041 Россия, 

<

...>

тел. 

<

***>, E-mail: info@tula.arbitr.ru, http://www.tula.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А68-9339/2024

город Тула

15 января 2026 г.

- дата изготовления резолютивной части решения

27 января 2026 г. – дата изготовления решения в полном объеме

Арбитражный суд Тульской области в составе: Судьи Нестеренко С. В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Паршиковой О. Г., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Тульский промышленный технопарк» ИНН (7100009955) ОГРН (

<

***>) 301247, 

<

...> зд. 121г, офис 3 к обществу с ограниченной ответственностью «Технарь» ИНН (7118507920) ОГРН (

<

***>) 301212, Тульская область, Щекинский район, р. 

<

...> о взыскании 2 000 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 24 808 руб. 74 коп., расходов по уплате государственной пошлины, расходов по оплате экспертизы,

а также встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Технарь» к обществу с ограниченной ответственностью управляющая компания «Тульский промышленный технопарк» о расторжении договора № КС-ТП/23-1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту 03.02.2023; о взыскании убытков в размере 10 813 507 руб., расходов по уплате государственной пошлины,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Щекинское инженерно-технологическое предприятие" (ООО "Щекинское ИТП"),

в судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Тульский промышленный технопарк» при использовании веб-конференции - ФИО1 по доверенности от 19.06.2024, диплом рег. ном. 29ю,

от общества с ограниченной ответственностью «Технарь» - ФИО2 по доверенности, удостоверение адвоката 71/974,

от ООО "Щекинское ИТП"- ФИО3 по доверенности, диплом,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Тульский промышленный технопарк» обратилось в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью «Технарь» с исковым заявлением о взыскании 2 000 000 рублей уплаченных по договору № КС-ТП/23-1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту 03.02.2023, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 04.07.2024 по 31.07.2024 в размере 24 808 руб. 74 коп.

Общества с ограниченной ответственностью «Технарь» обратилось в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью управляющая компания «Тульский промышленный технопарк» с исковым заявлением о расторжении договора № КС-ТП/23-1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту 03.02.2023; о взыскании фактических затрат по договору № КС-ТП/23-1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту 03.02.2023 в размере 10 813 507 рублей. Исковым требованиям присвоен номер дела А68-14175/2024.

Определением суда к рассмотрению приняты уточненные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Технарь» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью управляющая компания «Тульский промышленный технопарк» о расторжении договора № КС-ТП/23-1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту 03.02.2023; о взыскании фактических затрат по договору № КС-ТП/23-1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту 03.02.2023 в размере 10 750 000 рублей.

Определением арбитражного суда от 05.12.2024 дела А68-9339/2024 и А68-14175/2024 объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

Изучив материалы дела, суд установил.

Между ООО «Ленинский РЭС» (после переименования – ООО «Технарь) (сторона-1) и ООО УК «Тульский промышленный технопарк» (сторона-2) заключен договор № КС-ТП/23-23-1 от 03.02.2023 г. (далее – Договор) по которому ООО «Ленинский РЭС» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО УК «Тульский промышленный технопарк»: производственного здания/помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 2500 кВт;

-категория надежности – II;

-класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 6 кВ;

-максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Согласно условиям Договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии 5 000 метров от границы участка стороны-2, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты стороны-2.

Согласно техническим условиям (приложение №1 к Договору) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 2500 кВт к объектам электросетевого хозяйства ООО «Ленинский РЭС» возможна при выполнении следующих технических условий:

1. Согласно проекту провести монтаж ВЛ 6 кВ (ориентировочная протяженность 5 км).

2. Точка присоединения – опора №12 фид. 6кВ яч. №19 РУ 6 кВ ПС 110 кВ КС-9,

3. Произвести монтаж необходимого количества ТП-6/0,4кВ общей трансформаторной мощностью не более 2 500 кВА.

4. Произвести замену КЛ 0,6 кВ яч. №19 на большее сечение (выполняется силами сетевой организации).

5. Учет активной и реактивной электрической энергии выполнить в проектируемой РУ 6 кВ, находящейся на территории стороны-2.

6. Проектирование электроснабжения произвести в соответствии с ПУЭ изд.7, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

7. Проект согласовать со стороной-1.

8. Сторона-1 производит осмотр энергопринимающих устройств стороны-2 и фактическое присоединение энергопринимающих устройств стороны-2.

9. Сторона-1 осуществляет подготовку документции об осуществлении технологического присоединения.

10. Сторона-2 предъявляет электроустановки к осмотру представителям стороны-1. Проектные и монтажные работы выполняет владелец объекта электросетевого хозяйства (сторона-1).

11. Сроки проектирования и монтажа согласовываются сторонами путем заключения договора.

В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Соглашением о намерениях от 22.01.2023 г. и составляет 17 000 000,00 рублей (семнадцать миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 2 833 333,33 рублей (два миллиона восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки).

Исходя из условий п. 11 Договора сторона-2 обязалась осуществлять оплату в следующем порядке :

-15%, что составляет 2 550 000 рублей, в срок до 18.02.2023;

-30%, что составляет 5 100 000 рублей, в срок до 02.08.2023;

-30%, что составляет 5 100 000 рублей, в срок до 01.09.2023;

-25%, что составляет 4 250 000 рублей, в течение 15 дней со дня технологического присоединения.

Платежным поручением № 114 от 02.03.2023, ООО УК «Тульский промышленный технопарк» перечислил в адрес ООО «Ленинский РЭС» денежные средства в размере 1 млн рублей. Платежным поручением № 154 от 28.03.2023, ООО УК «Тульский промышленный технопарк» перечислил в адрес ООО «Ленинский РЭС» денежные средства в размере 1 млн рублей.

Письмом б/д и б/н ООО УК «Тульский промышленный технопарк» уведомило ООО «Ленинский РЭС» о наличии плана расположения РП 6 кВ на земельном участке ООО УК «Тульский промышленный технопарк» и попросило ООО «Ленинский РЭС» произвести проектно-изыскательские работы, подготовить проект и произвести монтаж ЛЭП 6 кВ до проектируемой РП 6 кВ разрешенной мощностью 2 500 кВА.

15 февраля 2023 между ООО «Ленинский РЭС» (заказчик) и ООО «Щекинский РЭС» (подрядчик) (после переименования – ООО «Щекинское ИТП) заключен договор подряда №15/02-2023 по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик выполняет и сдает работы, в целях осуществления заказчиком технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО УК «Тульский промышленный технопарк» производственного здания/помещения, расположенного по адресу: 

<

...> в соответствии с заключенным между заказчиком и ООО УК «Тульский промышленный технопарк» договора № КС-ТП/23-1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту 03.02.2023, а также урегулирует отношения и заключает сделки с третьими лицами с целью обеспечения готовности объектов электросетевого хозяйства заказчика, включая проектно-изыскательские работы, закупку необходимого оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, реконструкцию, модернизацию электросетевого хозяйства заказчика, с учетом характеристик присоединяемого объекта, указанных в договоре № КС-ТП/23-1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту 03.02.2023 и технических условиях (приложение №1 к Договору).

20 марта 2023 между ООО «Щекинский РЭС» (заказчик) и ООО «Эл СКАТ» (подрядчик) заключен договор №6 согласно которому, заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по электроснабжению производственного здания/помещения, расположенного по адресу: 

<

...>.

В соответствии с техническим заданием к договору подрядчик должен был подготовить рабочую документацию по проектированию ВЛ 6 кВ/ КЛ 6 кВ со следующими характеристиками:

Место расположения объекта - 

<

...>.

Вид строительства- реконструкция отдельных участков существующей ВЛ 6 кВ в двухцепном исполнении, выполненное защищенными проводами. Новое строительство КЛ 6 кВ.

Источник электроснабжения – ВЛ 6 кВ от ПС №096 КС-9.

Схема подключения – отпайку ВЛ 6 кВ выполнить от существующей опоры У 110-2 №б/н, находящейся на пересечении ул. Пирогова г. Щекино и трассы М-2 «Крым». В месте отпайки установить линейный разъединитель. Проектируемую линию выполнить в воздушно-кабельном исполнении.

Основные характеристики объекта – максимальная мощность 2 500 кВт, номинальное напряжение в точке отпайки 6 кВ, категория надежности электроснабжения – III.

Требования к электротехническим, архитектурно-строительным и конструктивным решениям – проектирование ВЛ 6 кВ и Кл 6 кВ выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, согласование выполнить с заинтересованными лицами, при необходимости получения технических условий, в том числе, с гражданами, интересы которых могут быть затронуты в ходе реализации проекта.

Во исполнение указанного договора ООО «Эл СКАТ» подготовлен рабочий проект (документация) шифр ЭЛ 23.07.00-ЭС «Электроснабжение производственного здания/помещения, расположенного по адресу: 

<

...>».

Работы были сданы и приняты 01.11.2023 согласно акта №31 сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

Рабочий проект (документация) шифр ЭЛ 23.07.00-ЭС «Электроснабжение производственного здания/помещения, расположенного по адресу: 

<

...>» доведен до сведения ООО УК «Тульский промышленный технопарк» согласно резолюции на проекте главного энергетика ООО УК «Тульский промышленный технопарк» ФИО4

03 июля 2023 между ООО «Ленинский РЭС» и ООО «Газпром энерго» подписан акт об осуществлении технологического присоединения №57-07/АТП-23/08 по условиям которого за ООО «Ленинский РЭС» в яч. 19 и яч.12 ЗРУ 6 кВ в ПС110/6 кВ №096 КС-9 зарезервирована мощность 2 342,81 кВт, в том числе, максимальная мощность (без учета ранее присоединенной мощности) 342,81 кВт, совокупная величина максимальной мощности присоединенной сети к трансформаторов 4150 кВА, по третьей категории надежности.

21 августа 2023 г. между ООО «Щекинский РЭС» (заказчик) и ООО «Эл Скат» (подрядчик) заключен договор подряда №18 согласно которого заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по реконструкции ВЛ 6 кВ при выходе из ПС 110/6 кВ №096 КС-9.

Согласно техническому заданию на ПИР по реконструкции ВЛ 6 кВ при выходе из ПС 110/6 кВ №096 КС-9 подрядчику необходимо спроектировать проектированию ВЛ 6 кВ/ КЛ 6 кВ со следующими характеристиками:

Место расположения объекта - Тульская область, Щекинский район, пос. Первомайский ПС 110/6 кВ №096 «КС-9».

Вид строительства- реконструкция выходов КЛ/ВЛ 6 кВ с ПС 110/6 кВ №096 «КС-9».

Источник электроснабжения – ПС 110/6 кВ №096 «КС-9».

Схема подключения – выполнить замену кабеля от ячейки №19 ЗРУ6 кВ ПС 110/6 кВ №096 «КС-9» до опоры №1 на кабель сечением 150 мм2, выполнить проектирование новой линии от ячейки №12 ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №096 «КС-9» до проектируемой опоры №1 кабелем сечением 240 мм2 , далее воздушной линией с сечением провода марки СИПЗ 1?120 до металлической опоры У 110-2 расположенной в СНТ «Заря-1».

Основные характеристики объекта – максимальная передаваемая мощность по линии от ячейки №19 – 800 кВт, максимальная передаваемая мощность по линии от ячейки №12 – 2 500 кВт, номинальное напряжение в ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №096 «КС-9» - 6,3 кВ. Категория надежности – III.

Требования к электротехническим, архитектурно-строительным и конструктивным решениям – проектирование ВЛ 6 кВ и Кл 6 кВ выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, согласование выполнить с заинтересованными лицами, при необходимости получения технических условий, в том числе, с гражданами, интересы которых могут быть затронуты в ходе реализации проекта.

Во исполнение указанного договора ООО «Эл СКАТ» подготовлен рабочий проект (документация) шифр ЭЛ 23.10.00-ЭС «Реконструкция ВЛ 6 кВ при выходе из ПС 110/6 кВ №096 КС-9 Тульская область, Щекинский район, пос. Первомайский». Проект доведен до сведения ООО УК «Тульский промышленный технопарк» согласно резолюции на проекте главного энергетика ООО УК «Тульский промышленный технопарк» ФИО4

17.11.2023 работы ПИР по реконструкции ВЛ 6 кВ при выходе из ПС 110/6 кВ №096 КС-9 были сданы и приняты согласно актов КС-2 и КС-3.

07.12.2023 между ООО «Щекинский РЭС» (заказчик) и ООО «ТПК Недра» (подрядчик) заключен договор подряда №07/12-2023 согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы по прокладке внеплощадочных сетей, на объекте : электроснабжение промышленного технопарка, находящегося по адресу 

<

...>. Стоимость и виды работ согласованы сторонами в приложении №1.

Общий срок выполнения работ составляет 35 календарных дней от даты начала выполнения работ.

Согласно приложению №1 к договору подрядчик обязался выполнить следующие работы:

Вырубка кустарника, расчистка снега;

Разработка грунта, рытье траншени, ручная доработка грунта;

Устройства постилающего слоя из песка;

Укладка кабеля силового АСБл-10 3?240 однопроволочный - 400 п.м.;

Укладка кабеля силового АСБл-10 3?185 ож - 400 п.м.;

Прокол ГНБ - 60 п.м.;

Труба ф160мм – 60 п.м.;

Устройство защитного слоя из песка;

Плита для защиты кабеля ПЗК 480?240 – 1 200 шт.;

Шурфление, ручные земляные работы;

Установка стойки ВС 140-257-1;

Рулонный уплотнитель;

Лента сигнальная;

Обратная засыпка траншеи местным грунтом.

Согласно актам формы КС-2 от 30.12.2023 и формы КС-3 от 30.12.2023, платежным поручениям работы были приняты в полном объеме и оплачены.

11.12.2023г. между ООО «Щекинский РЭС» (покупатель) и ООО «ПСК Групп» (продавец) заключен договор поставки №11/12/23 в соответствии с которым поставщик обязуется в соответствии с заявкой покупателя поставить покупателю, а покупатель обязуется оплатить и принять электротехническое оборудование.

В спецификации к договору поставки стороны определили к поставке распределительное устройство РП-10 кВ УХЛ1 в количестве 1 шт.

Согласно товарной накладной №1 от 02.07.2024 распределительное устройство РП-10 кВ УХЛ1 в количестве 1 шт. принято, а платежными поручениями №132 от 15.12.2023, №46 от 08.04.2024 поставленный товар оплачен.

В связи с необходимость выполнения дополнительных работ между сторонами заключено дополнительное соглашение №1 от 22.01.2024 к договору подряда №07/12-2023 г. от 07.12.2023г.

Согласно приложению №1 к дополнительному соглашению №1 от 22.01.2024 к договору подрядчик обязался выполнить следующие работы:

Вырубка кустарника, расчистка от снега подъездных путем к месту монтажа и выгрузке опор;

Шурфление, ручные земляные работы;

Установка стойки ВС-164-20 -13 шт.;

Песок горный.

Согласно актам формы КС-2 от 22.02.2024 и формы КС-3 от 22.02.2024, платежным поручениям работы по дополнительному соглашению №1 от 22.01.2024 были приняты в полном объеме и оплачены.

В связи с необходимость выполнения дополнительных работ между сторонами заключено дополнительное соглашение №2 от 30.01.2024 к договору подряда №07/12-2023 г. от 07.12.2023 г.

Согласно приложению №1 к дополнительному соглашению №2 от 30.01.2024 к договору подрядчик обязался выполнить следующие работы:

Крепление подкоса У5, траверса ТМ71а, траверса ТМ-2, хомут Х-60, хомут Х-42, хомут Х-37, кронштейн РА-4, болт М22?280, гайка М22, заземляющий проводник ЗП-1, прокат стальной, зажим прокалывающий RР150, зажим плашечный стальной ПС-2-1, изолятор стеклянный подвесной ПС-70ЕС, зажим анкерный болтовой НБ-2-6А, ушло лапчатое У-1-7-16, звено промежуточное ПРТ-7-1, изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г, колпачек К-6, спиральная связка усиленная СВ-70, СВ-120, доставка хранение, аренда автовышки.

Согласно актам формы КС-2 от 01.06.2024 и формы КС-3 от 01.06.2024, платежным поручениям работы по дополнительному соглашению №2 от 30.01.2024 были приняты в полном объеме и оплачены.

Письмом №ТП188 от 29.12.2023 директор ООО УК «Тульский промышленный технопарк» ФИО5 направил в адрес ООО «Ленинский РЭС» дополнительное соглашение №1 от 08.11.2023 к Договору о продлении сроков осуществления технологического присоединения до 01.07.2024 г. согласно которому, ООО УК «Тульский промышленный технопарк» предлагает изменить срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 01.07.2024 г., возместить ООО «Ленинский РЭС» затраты на проектно-изыскательские работы технологического присоединения в размере 5,88% от общей суммы 17 000 000 рублей до 30.11.2023г.; изменить сроки и порядок внесения платы за технологическое присоединение на следующих условиях : 32,35% процентов за технологическое присоединение вносится до 01.04.2024, условием является наличие согласованного проекта, 30% платы за технологическое присоединение вносятся до 01.06.2024 – строительно-монтажные работы согласно проектно-сметной документации; 20% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического технологического присоединения – окончательный расчет за выполнение работ и осуществление фактического технологического присоединения.

ООО «Ленинский РЭС» не отрицает подписание дополнительного соглашения №1 от 08.11.2023 к Договору о продлении сроков осуществления технологического присоединения до 01.07.2024 г.

По мнению ООО УК «Тульский промышленный технопарк», выполненные подрядчиками ООО «Ленинский РЭС» не подтверждают фактическое выполнение работ в соответствии с согласованными сторонами техническими условиями к Договору, поскольку проектная документация между сторонами не согласовывалась. В материалы дела ответчиком была представлена проектная документация, исполнительная документация, которая была исследована экспертом ФИО6 в соответствии с определением арбитражного суда Тульской области от 07.08.2025 о назначении судебной экспертизы. В соответствии с заключением эксперта № Э-ИЕ/Г-25 от 06.09.2025 г., на текущий момент выполнение договора № КС-ТП/23-1 находится на незавершенном третьем этапе (на этапе незавершенного строительства) – услуга технологического присоединения к электрическим сетям не выполнена. По мнению ООО УК «Тульский промышленный технопарк», результаты выполненных работ потенциально могут быть использованы для подключения иного (стороннего) потребителя, не являющегося стороной договора (земельный участок, на котором находится распределительный пункт РП-10кВ УХЛ1, находится у ООО «Фортуна»). ООО «Ленинский РЭС» знал с 06.06.2023 о том, что проход трассы на участке км 206+000 – км 217+000 автомобильной дороги М-2 «Крым» на сегодняшний день невозможен, завершить проект не представляется возможным, поскольку размещение инженерных коммуникаций и их охранная зона попадают в зону производства работ на участке км 206+000 – км 217+000 автомобильной дороги М-2 «Крым».

Поскольку ООО УК «Тульский промышленный технопарк» нарушило сроки установленные договором для внесения оплаты за технологическое присоединение, ООО «Ленинский РЭС» направил в адрес ООО УК «Тульский промышленный технопарк» соглашение о расторжении договора, согласно которому, стороны пришли к соглашению расторгнуть договор с 03.08.2024; в связи с расторжением договора, сторона-2 обязуется не позднее 04.08.2024 оплатить стороне-1 фактически понесенные расходы в размер 12 813 507 рублей. Указанное соглашение о расторжении договора ООО УК «Тульский промышленный технопарк» не подписало, указав в ответе на претензию, что ни первичной, ни проектной документации не представлено.

Получив соглашение о расторжении договора и досудебную претензию с требованием о расторжении договора и оплате понесенных расходов, ООО УК «Тульский промышленный технопарк» обратилось в суд с настоящим исковым заявлением.

Исковые требования ООО УК «Тульский промышленный технопарк» к ООО «Технарь» (бывший ООО «Ленинский РЭС) мотивированы наличием совокупности обстоятельств неисполнения сторонами Договора по причине несогласованной между сторонами проектной документации, в отсутствии потребительской ценности выполненных ООО «Ленинский РЭС» работ для ООО УК «Тульский промышленный технопарк», в отсутствии результат указанных услуг в виде технологического присоединения объекта находящегося по адресу 

<

...>, в связи с чем работы не подлежат оплате, и 2 000 000 рублей подлежат возврату, как неосновательное обогащение.

Встречное исковое ООО «Технарь» к ООО УК «Тульский промышленный технопарк» о расторжении Договора и взыскания стоимости фактических выполненных работ по Договору в размере 10 750 000 рублей (12 750 000 – 2 000 000) основано на заключении № Э-ИЕ/Г-25 от 06.09.2025 г. эксперта ФИО6, который установил размер фактически понесенных расходов в соответствии с условиями Договора на сумму 10 750 000 рублей, установил фактический объем выполненных работ по Договору на участке ВЛ-6 кВ при выходе из ПС 110/6 кВ №096 КС-9 до участка пересечения трассы линии автодорогой М-2 «Крым» и установкой РП-10 кВ УХЛ1, то есть 75 % от фактического объема работ установленного техническим заданием к Договору для ООО «Технарь».

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителей сторон, суд приходит к следующим выводам по заявленным исковых требованиям и встречным исковым требованиям.

В силу абзаца 2 пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 25.10.2024) "Об электроэнергетике" владелец энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке, по согласованию с сетевой организацией вправе технологически присоединить к принадлежащим ему энергопринимающему устройству или объекту электроэнергетики энергопринимающее устройство или объект электроэнергетики иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий и самостоятельного обеспечения указанным владельцем энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики и владельцем присоединяемых энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики технической возможности введения раздельного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении данных энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики. В этом случае между указанным владельцем энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики и владельцем присоединяемых энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики заключается договор технологического присоединения. Размер платы по такому договору устанавливается в соответствии с требованиями настоящей статьи. Деятельность по осуществлению технологического присоединения и оказанию услуг по передаче электрической энергии регулируется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для сетевых организаций.

Между ООО «Ленинский РЭС» (после переименования – ООО «Технарь) (сторона-1) и ООО УК «Тульский промышленный технопарк» (сторона-2) заключен договор № КС-ТП/23-23-1 от 03.02.2023 г. (далее – Договор) по которому ООО «Ленинский РЭС» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО УК «Тульский промышленный технопарк»: производственного здания/помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 2500 кВт;

-категория надежности – II;

-класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 6 кВ;

-максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Согласно условиям Договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии 5 000 метров от границы участка стороны-2, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты стороны-2.

Согласно техническим условиям (приложение №1 к Договору) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 2500 кВт к объектам электросетевого хозяйства ООО «Ленинский РЭС» возможна при выполнении следующих технических условий:

1. Согласно проекту провести монтаж ВЛ 6 кВ (ориентировочная протяженность 5 км).

2. Точка присоединения – опора №12 фид. 6кВ яч. №19 РУ 6 кВ ПС 110 кВ КС-9,

3. Произвести монтаж необходимого количества ТП6/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью не более 2 500 кВА.

4. Произвести замену КЛ 0,6 кВ яч. №19 на большее сечение (выполняется силами сетевой организации).

5. Учет активной и реактивной электрической энергии выполнить в проектируемой РУ 6 кВ, находящейся на территории стороны-2.

6. Проектирование электроснабжения произвести в соответствии с ПУЭ изд.7, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

7. Проект согласовать со стороной-1.

8. Сторона-1 производит осмотр энергопринимающих устройств стороны-2 и фактическое присоединение энергопринимающих устройств стороны-2.

9. Сторона-1 осуществляет подготовку документации об осуществлении технологического присоединения.

10. Сторона-2 предъявляет электроустановки к осмотру представителям стороны-1. Проектные и монтажные работы выполняет владелец объекта электросетевого хозяйства (сторона-1).

11. Сроки проектирования и монтажа согласовываются сторонами путем заключения договора.

В соответствии с пунктом 5 Договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 08.11.2023 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 01.07.2024г.

В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Соглашением о намерениях от 22.01.2023 г. и составляет 17 000 000,00 рублей (семнадцать миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 2 833 333,33 рублей (два миллиона восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки).

Исходя из условий п. 11 Договора сторона-2 обязалась осуществлять оплату в следующем порядке :

-15%, что составляет 2 550 000 рублей, в срок до 18.02.2023;

-30%, что составляет 5 100 000 рублей, в срок до 02.08.2023;

-30%, что составляет 5 100 000 рублей, в срок до 01.09.2023;

-25%, что составляет 4 250 000 рублей, в течение 15 дней со дня технологического присоединения.

Дополнительным соглашением №1 от 08.11.2023 к Договору о продлении сроков осуществления технологического присоединения до 01.07.2024 г. изменили сроки и порядок внесения платы за технологическое присоединение на следующих условиях : 32,35% процентов за технологическое присоединение вносится до 01.04.2024, условием является наличие согласованного проекта, 30% платы за технологическое присоединение вносятся до 01.06.2024 – строительно-монтажные работы согласно проектно-сметной документации; 20% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического технологического присоединения – окончательный расчет за выполнение работ и осуществление фактического технологического присоединения.

Платежным поручением № 114 от 02.03.2023, ООО УК «Тульский промышленный технопарк» перечислил в адрес ООО «Ленинский РЭС» денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Платежным поручением № 154 от 28.03.2023, ООО УК «Тульский промышленный технопарк» перечислил в адрес ООО «Ленинский РЭС» денежные средства в размере 1 000 000 рублей.

Проанализировав условия Договора, суд приходит к выводу, что по всем существенным условиям Договор соответствует договору о возмездном оказании услуг, следовательно, правоотношения сторон регулируются специальными нормами положения главы 39 ГК РФ, а также общими положениями об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

В соответствии с условиями Договора сторона-1 принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств стороны-2 максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 2500 кВт, в том числе, мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами, в свою очередь, сторона-2 вносит стороне-1 плату в сроки, установленные в Договоре, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка и выполняет технические условия, касающиеся обязательств стороны-2.

Согласно пункту 8 Договора сторона-2 обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства стороны-2, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ земельного участка, уведомить сторону-1 о выполнении технических условий и предоставить копии разделов проектной документации, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была предоставлена стороне-2 в адрес стороны-1 до направления стороной-1 в адрес стороны-2 уведомления о выполнении технических условий; принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств Ростехнадзором; получить разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов.

Из пункта 5 Договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 08.11.2023 вытекает, что ООО УК «Тульский промышленный технопарк» и ООО «Ленинский РЭС» обязаны выполнить все свои обязательства, предусмотренные условиями подключения, не позднее 01.07.2024 г.

Срок, указанный в пункте 5 Договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 08.11.2023, является сроком фактического подключения объекта, принадлежащего стороне-2.

Таким образом, ООО УК «Тульский промышленный технопарк» в установленные Договором сроки не выполнены мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств производственного здания/помещения, расположенного по адресу: 

<

...>.

При изложенных обстоятельствах ООО УК «Тульский промышленный технопарк» существенно нарушен Договор.

По ходатайству ООО УК «Тульский промышленный технопарк» судом назначена экспертиза. Эксперту судом обозначены следующие вопросы:

1. Установить фактический объем выполненных работ в соответствии с условиями договора № КС-ТП/23-1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту 03.02.2023.

2. Установить размер фактически понесенных расходов ООО «Технарь» в соответствии с условиями договора № КС-ТП/23-1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту 03.02.2023.

В заключении № Э-ИЕ/Г-25 от 06.09.2025 г. эксперт ФИО6, указал размер фактически понесенных расходов ООО «Ленинский РЭС» в соответствии с условиями Договора на сумму 12 750 000 рублей, и установил фактический объем выполненных работ ООО «Ленинский РЭС» по Договору на участке ВЛ-6 кВ при выходе из ПС 110/6 кВ №096 КС-9 до участка пересечения трассы линии автодорогой М-2 «Крым» и установкой РП-10 кВ УХЛ1.

Экспертное заключение № Э-ИЕ/Г-25 от 06.09.2025 г. соответствует требованиям статей 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и признается судом надлежащим доказательством по делу.

При указанных обстоятельствах, объем фактически выполненных работ и размер фактических затрат понесенных ООО «Технарь» (ранее - ООО «Ленинский РЭС») доказан.

Доказательства, свидетельствующие, что объем фактических работ и затраты ООО «Технарь» в ином размере и не относятся к исполнению Договора, ООО УК «Тульский промышленный технопарк» не предоставлены.

Доводы ООО УК «Тульский промышленный технопарк», о том, что построенные объекты электроэнергетики могут быть использованы для подключения иного (стороннего) потребителя, не являющегося стороной Договора, по мнению суда, являются голословными. Услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ООО УК «Тульский промышленный технопарк» оказываются в рамках индивидуального проекта, из технической документации следует, что за ООО «Ленинский РЭС» в яч. 19 и яч.12 ЗРУ 6 кВ в ПС110/6 кВ №096 КС-9 зарезервирована мощность 2 342,81 кВт, в том числе, максимальная мощность (без учета ранее присоединенной мощности) 342,81 кВт, совокупная величина максимальной мощности присоединенной сети к трансформаторов 4150 кВА, по третьей категории надежности. Из технических условий к Договору следует, что точка присоединения – опора №12 фид. 6кВ яч. №19 РУ 6 кВ ПС 110 кВ КС-9, из объема фактических работ следует, что участок ВЛ-6 кВ при выходе из ПС 110/6 кВ №096 КС-9 до участка пересечения трассы линии автодорогой М-2 «Крым» и установкой РП-10 кВ УХЛ1 является вновь созданным линейным объектом. Таким образом, зарезервированная у ООО «Газпром энерго» мощность и построенная ВЛ-6 кВ с установкой РП-10 кВ УХЛ1 предназначены для присоединяемых энергопринимающих устройств ООО УК «Тульский промышленный технопарк» мощностью 2500 кВт.

Довод ООО УК «Тульский промышленный технопарк» о несогласованной между сторонами проектной документации опровергается показаниями опрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО4

Свидетель пояснил, что работал в организации без оформленного трудового договора, регулярно выполнял поручения директора ФИО5, в должности энергетика проработал с 30.11.2022 по конец декабря 2023г. В его обязанности входило выполнение поручений директора ФИО5 по вопросам энергоснабжения, при взаимоотношении с Россетями, Щекинской горсетью, Ленинским РЭС представлялся энергетиком, выступал и действовал в интересах директора ФИО5 По просьбе ФИО4 директор ФИО5 выдал ему доверенность от ООО УК «Тульский промышленный технопарк» (имеется в материалах дела). Совместно с ФИО5 и его заместителем ФИО7 участвовал в еженедельных совещаниях. На вопросы относительно обстоятельств технологического присоединения производственного здания/помещения, расположенного по адресу: 

<

...> свидетель пояснил, что совместно с директором ФИО5 участвовал во всех совещаниях с участием ООО «Ленинский РЭС», ООО «Щекинский РЭС», выполнял поручения директора ФИО5, согласовывал проектную документацию, проставлял на документации свою подпись, проверял выполнение работ ООО «Ленинский РЭС», ООО «Щекинский РЭС» по Договору. В процессе опроса свидетель ФИО4 осмотрел проекты и подтвердил, что на представленных в материалах дела документах содержится его подпись. Подписанные ФИО4 документы предъявлялись им ФИО5, каких-либо замечаний от ФИО5 он не получал. Относительно визирования документов в феврале и июне 2024 свидетель ФИО4 пояснил, что по просьбе ФИО5 проверил указанные в документе сведения, после чего проставил свою подпись.

Довод ООО УК «Тульский промышленный технопарк» о том, что с 06.06.2023 проход трассы на участке км 206+000 – км 217+000 автомобильной дороги М-2 «Крым» на сегодняшний день невозможен, завершить проект не представляется возможным, поскольку размещение инженерных коммуникаций и их охранная зона попадают в зону производства работ на участке км 206+000 – км 217+000 автомобильной дороги М-2 «Крым» судом признается несостоятельным, поскольку фактическое прохождение линии трассы (трассировка) не предполагает использование полосы отвода автомобильной дороги М-2 «Крым».

С учётом вышеуказанного, суд приходит к выводу о том, что фактическое подключение производственного здания/помещения, расположенного по адресу: 

<

...> к объектам электросетевого хозяйства ООО «Технарь» (ранее – ООО «Ленинский РЭС») может быть осуществлено при выполнении ООО УК «Тульский промышленный технопарк» своих обязательств, с учётом чего, Договор неисполним по причине невыполнения ООО УК «Тульский промышленный технопарк» своих обязательств.

При применении к отношениям сторон п. 2 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации о праве исполнителя отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков, суд руководствуется следующим.

Поскольку ООО УК «Тульский промышленный технопарк» нарушило сроки установленные договором для внесения оплаты за технологическое присоединение, ООО «Ленинский РЭС» направил в адрес ООО УК «Тульский промышленный технопарк» подписанное стороной-1 соглашение о расторжении договора, согласно которому, стороны пришли к соглашению расторгнуть договор с 03.08.2024; в связи с расторжением договора, сторона-2 обязуется не позднее 04.08.2024 оплатить стороне-1 фактически понесенные расходы в размер 12 813 507 рублей. Указанное соглашение о расторжении договора ООО УК «Тульский промышленный технопарк» не подписало.

В связи с невыполнением ООО УК «Тульский промышленный технопарк» договорных обязательств в части оплаты за оказанные услуги по подключению (технологическому присоединению) в срок, что, по мнению суда, является существенным нарушением условий Договора со стороны ООО УК «Тульский промышленный технопарк», Договор должен быть расторгнут, а фактические расходы понесенные истцом подлежат возмещению со стороны ООО УК «Тульский промышленный технопарк».

В соответствии с пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно статье 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о расторжении договора может быть заявлено в суд после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

Как следует из материалов дела и не оспаривается ООО УК «Тульский промышленный технопарк» именно невнесение платы по договору об осуществлении технологического присоединения в установленные сроки и размере явилось основанием для отказа ООО «Ленинский РЭС» от Договора.

Из фактических обстоятельств спора следует, что исполнение Договора ООО УК «Тульский промышленный технопарк» невозможно ввиду утраты интереса к исполнению Договора.

В силу п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Согласно п. 5 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причинённых расторжением договора.

В соответствии со статьей 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу разъяснений, содержащимся в пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Поскольку ООО УК «Тульский промышленный технопарк» существенно нарушило Договор, а ООО «Технарь» добросовестно понес расходы на его исполнение в размере 12 750 000 рублей, при расторжении Договора ко взысканию подлежит сумма в размере 10 750 000 рублей (12 750 000 – 2 000 000).

Наличие и размер понесенных убытков установлен заключенными подрядными договорами со стороны ООО «Технарь» (ранее – ООО «Ленинский РЭС»), сметами, актами сдачи-приемки выполненных работ и платежными поручениями, подтверждающими факт несения расходов, а также разработанной проектной документацией. Указанные документы имеются в материалах дела.

Суд руководствуется тем, что расчет ООО «Технарь» арифметически обоснован, а возражения ООО УК «Тульский промышленный технопарк» судом отклоняются, поскольку в нарушение ст. 8, 9, 65 АПК РФ контррасчет в обоснование заявленных им возражений не представил, ограничившись лишь ходатайством о назначении экспертизы, без какого-либо документального обоснования своей правовой позиции.

Рассмотрев исковые требования ООО УК «Тульский промышленный технопарк» к ООО «Технарь» о взыскании задолженности в размере 2 000 000 рублей, процентов за пользование денежными средствами в размере 24 808 рублей 74 коп. по состоянию на 31.07.2024, суммы процентов за пользование денежными средствами рассчитанными на сумму задолженности с 01.08.2024 по день фактической оплаты задолженности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения, поскольку ООО УК «Тульский промышленный технопарк» нарушило свои обязательства по Договору, при этом переплата по Договору в размере 2 000 000 рублей судом не установлена.

Учитывая принятое решение, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины в размере 33 124 рублей (платежное поручение №588 от 06.08.2024) за рассмотрение исковых требований ООО УК «Тульский промышленный технопарк» к ООО «Технарь», а также расходы ООО УК «Тульский промышленный технопарк» по оплате судебной экспертизы в размере 190 000 рублей (платежное поручение №136 от 22.04.2025г.) относятся на ООО УК «Тульский промышленный технопарк» в полном размере.

За рассмотрение исковых требований ООО «Технарь» в доход федерального бюджета уплачена государственная пошлина в размере 383 135 рублей (платежное поручение №274 от 29.11.2024г.).

Определением арбитражного суда от 03.12.2024г. исковые требования ООО «Технарь» к ООО УК «Тульский промышленный технопарк» о расторжении договора и о взыскании фактических затрат по Договору на сумму 10 813 507 рублей приняты к производству и возбуждено производство по делу А68-14175/2024.

За рассмотрение уточненного искового заявления в доход федерального бюджета подлежит уплате государственная пошлина в размере 50 000 рублей за неимущественное требование о расторжении договора и государственная пошлина в размере 332 500 за рассмотрение требования имущественного характера.

Учитывая принятое решение, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины в размере 382 500 рублей относятся на ООО УК «Тульский промышленный технопарк».

Кроме того из федерального бюджета подлежит возврату в пользу ООО «Технарь» государственная пошлина в размере 635 рублей (383135-382500), как уплаченная в большем размере, чем требуется.

Руководствуясь статьями 49, 101, 110, 136, 137, 167-171,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Тульской области

Р Е Ш И Л:

Принять к рассмотрению уточненное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тульский промышленный технопарк» (ОГРН : 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Технарь» (ОГРН : 

<

***>) о взыскании задолженности в размере 2 000 000 рублей, процентов за пользование денежными средствами в размере 24 808 рублей 74 коп. по состоянию на 31.07.2024, суммы процентов за пользование денежными средствами рассчитанными на сумму задолженности с 01.08.2024 по день фактической оплаты задолженности.

Принять к рассмотрению уточненное встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Технарь» (ОГРН : 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тульский промышленный технопарк» (ОГРН : 

<

***>) о взыскании задолженности в размере 10 750 000 рублей, о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту от 03.02.2023г. №КС-ТП/23-1.

В исковых требованиях общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тульский промышленный технопарк» (ОГРН : 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Технарь» (ОГРН : 

<

***>) о взыскании задолженности в размере 2 000 000 рублей, процентов за пользование денежными средствами в размере 24 808 рублей 74 коп. по состоянию на 31.07.2024, суммы процентов за пользование денежными средствами рассчитанными на сумму задолженности с 01.08.2024 по день фактической оплаты задолженности - отказать полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тульский промышленный технопарк» (ОГРН : 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Технарь» (ОГРН : 

<

***>) фактические затраты по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту от 03.02.2023г. №КС-ТП/23-1 в размере 10 750 000 рублей.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту от 03.02.2023г. №КС-ТП/23-1 заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тульский промышленный технопарк» (ОГРН : 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Технарь» (ОГРН : 

<

***>).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тульский промышленный технопарк» (ОГРН : 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Технарь» (ОГРН : 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 382 500 рублей.

Отнести на общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тульский промышленный технопарк» (ОГРН : 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 33 124 рублей, расходы по оплате судебной экспертизы в размере 190 000 рублей.

Возвратить из федерального бюджета в пользу общества с ограниченной ответственностью «Технарь» (ОГРН : 

<

***>) государственную пошлину в размере 20 635 рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок не превышающий месяца с даты принятия решения.

Судья С.В. Нестеренко