АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

20 июня 2019 года

Дело № А33-14450/2019

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 17 июня 2019 года.

В полном объёме решение изготовлено 20 июня 2019 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Красовской С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческое предприятие "ЯрЭнергоСервис" (ИНН 2466111285, ОГРН 1032402967080)

к акционерному обществу "Красноярская региональная энергетическая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании долга, неустойки,

в присутствии:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности от 09.01.2017,

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 15.11.2018, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческое предприятие "ЯрЭнергоСервис" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к акционерному обществу "Красноярская региональная энергетическая компания" (далее – ответчик) о взыскании 29 109 003 руб. 08 коп. долга по договору подряда от 25.12.2017 №1743-16/17, 551 898 руб. 46 коп. неустойки.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 28.01.2019 года возбуждено производство по делу № А33-1726/2019.

Определением от 04.03.2019 встречное исковое заявление акционерного общества "Красноярская региональная энергетическая компания" к обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческое предприятие "ЯрЭнергоСервис" о  взыскании неустойки в размере 3 512 320 руб. 18 коп. по договору подряда № 1743-16/17 от 25.12.2017 принято к производству для рассмотрения совместно с первоначальным иском.

Определением от 15.05.2019 в отдельное производство с присвоением номера дела А33-14450/2019 выделено исковое требование общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческое предприятие "ЯрЭнергоСервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу "Красноярская региональная энергетическая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о взыскании 20 302 428 руб. 78 коп. долга по договору подряда от 25.12.2017 №1743-16/17, 551 898 руб. 46 коп. неустойки за период с 18.09.2018 по 15.01.2019.

Представитель истца в судебном заседании представил дополнительные документы, которые приобщены судом к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ООО ПКП «ЯрЭнергоСервис» (подрядчик) и АО «КРАСЭКО» (заказчик) заключен договор подряда от 25.12.2017 № 1743-16/17 (договор), по условиям которого подрядчик принял на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы на объекте: «Оптимизации системы теплоснабжения. Магистральные тепловые сети от котельной по ул. Доры Кваш в г Енисейске» в соответствии со сводным расчетом стоимости строительства (Приложение № 1 в Договору), проектной документацией и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить их в порядке определенном договором (п.3.1. договора).

Общая стоимость подлежащих выполнению работ подтверждается сводным расчетом стоимости строительства (Приложение № 1 к договору) и составляет 53 218 502 руб. 68 коп., в том числе НДС 18% -8 118 076,68 руб. (пункт 4.1. договора).

Сдача результата работ по договору производится подрядчиком заказчику по акту с приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), исполнительной документации на выполненные работы (пункт 11.3. договора).

В соответствии с пунктом 11.4. договора, заказчик в течение 20 дней с момента получения от подрядчика акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки  о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписывает указанные документы либо возвращает   их    с    письменным   мотивированным    отказом    с   указанием   замечаний   и несоответствий, которые подрядчик обязан устранить в согласованные сторонами сроки. 

Условия оплаты и порядок расчетов установлен разделом 4 договора:

-Заказчик перечисляет подрядчику в течение 30 дней с момента подписанияактов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) стоимость выполненных работ, указанную в них, но не более 95% от общей стоимости работ.

- Оставшаяся часть в размере 5% оплачивается заказчиком подрядчику в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) без замечаний, предоставления комплекта исполнительной документации без замечаний и счета-фактуры.

В соответствии с пунктом 17.2. договора, заказчик за нарушение сроков окончательной оплаты уплачивает подрядчику пеню за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени, от стоимости неисполненного обязательства по договору.

Согласно пункту 16.1. договора стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из договора или в связи с ним, путем направления друг другу претензий.

На основании пункта 16.6. договора, в    случае    полного   или    частичного   отказа   в   удовлетворении    претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию спор или разногласия подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в судебном порядке. Если стороны не смогут прийти к согласию путем переговоров, то возникшие разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

В рамках договора от 25.12.2017 № 1743-16/17 истцом выполнены, а ответчиком приняты без замечаний работы на общую сумму 42 255 843,66 руб.

По факту выполнения работ сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ (форма КС-2): № 1 от 30.05.2018 на сумму 4 455 038,08 руб.; № 2 от 30.05.2018 на сумму 136 157,84 руб.; № 3 от 30.05.2018 на сумму 4 926 772,58 руб.: № 1 от 17.07.2018 на сумму 6 901 338,56 руб.; № 2 от 17.07.2018 на сумму 3 629 049,88 руб.; № 3 от 17.07.2018 на сумму 4 100 217,98 руб.; № 1 от 15.08.2018 на сумму 8 617 643,84 руб.; № 2 от 15.08.2018 на сумму 3 719 951,18 руб.; № 3 от 15.08.2018 на сумму 5 769 673,72 руб. и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3): № 1 от 30.05.2018 на сумму 9 517 968,50 руб.; № 2 от 17.07.2018 на сумму 14 630 606,42 руб.; № 3 от 15.08.2018 на сумму 18 107 268,74 руб.

Ответчик частично оплатил выполненные работы по договору в размере 21 953 414,88 руб. платежными поручениями № 9910 от 03.07.2018 на сумму 3 780 266,88 руб.; № 11143 от 27.07.2018 на сумму 5 737 701,62 руб.; № 11789 от 03.08.2018 на сумму 9 435 446,38 руб.; № 19098 от 26.10.2018 на сумму 3 000 000,00 руб.

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по оплате выполненных работ по договору составляет 20 302 428,78 руб.

За просрочку оплаты ответчику начислены пени в размере 551 898,46 руб. за период с 18.09.2018 по 15.01.2019.

Претензией от 20.11.2018 № 671-18 истец предлагал ответчику погасить задолженность.

Требования истца оставлены ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).

Правоотношения сторон регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В подтверждение факта выполнения работ истцом представлены подписанные ответчиком без замечаний акты о приемке выполненных работ: № 1 от 30.05.2018 на сумму 4 455 038,08 руб.; № 2 от 30.05.2018 на сумму 136 157,84 руб.; № 3 от 30.05.2018 на сумму 4 926 772,58 руб.: № 1 от 17.07.2018 на сумму 6 901 338,56 руб.; № 2 от 17.07.2018 на сумму 3 629 049,88 руб.; № 3 от 17.07.2018 на сумму 4 100 217,98 руб.; № 1 от 15.08.2018 на сумму 8 617 643,84 руб.; № 2 от 15.08.2018 на сумму 3 719 951,18 руб.; № 3 от 15.08.2018 на сумму 5 769 673,72 руб. и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3): № 1 от 30.05.2018 на сумму 9 517 968,50 руб.; № 2 от 17.07.2018 на сумму 14 630 606,42 руб.; № 3 от 15.08.2018 на сумму 18 107 268,74 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Ответчик частично оплатил выполненные работы по договору в размере 21 953 414,88 руб. платежными поручениями № 9910 от 03.07.2018 на сумму 3 780 266,88 руб.; № 11143 от 27.07.2018 на сумму 5 737 701,62 руб.; № 11789 от 03.08.2018 на сумму 9 435 446,38 руб.; № 19098 от 26.10.2018 на сумму 3 000 000,00 руб.

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по оплате выполненных работ по договору составляет 20 302 428,78 руб.

Доказательств уплаты долга в указанном размере ответчиком в материалы дела не представлено.

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства и доводы сторон в совокупности с фактическими обстоятельствами по делу, суд приходит к выводу, что истцом доказано возникновение у ответчика обязательств по оплате выполненных работ  по рассматриваемому договору.

С учетом изложенного и установленных судом обстоятельств, поскольку в настоящем деле документально подтвержден факт выполнения истцом работ и их принятия без каких-либо замечаний к качеству со стороны ответчика, обязательство по оплате ответчиком не исполнено, долг по оплате стоимости работ составляет 20 302 428,78 руб., суд приходит к выводу о наличии у ответчика обязанности по оплате выполненных работ и удовлетворяет требование истца о взыскании указанного долга.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 17.2. договора, заказчик за нарушение сроков окончательной оплаты уплачивает подрядчику пеню за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени, от стоимости неисполненного обязательства по договору.

Проверив расчет неустойки, суд приходит к выводу о том, что расчет произведен ошибочно (исходя из значения ключевой ставки - 7,75% годовых).

При добровольной уплате неустойки ее размер по общему правилу подлежит исчислению по ставке, действовавшей на дату фактического платежа.

При взыскании неустойки в судебном порядке, подлежит применению ставка рефинансирования, действующая на день вынесения решения суда.

Значение ключевой ставки по информации Банка России с 17.06.2019 составило 7,50% годовых.

С учетом изложенного, расчет неустойки подлежит корректировке судом.

Согласно расчету суда, с учетом алгоритма расчета истца, за период 18.09.2018 по 15.01.2019 неустойка составит 547 572 руб. 85 коп.

Следовательно, в указанной части требования истца подлежат удовлетворению частично, в сумме - 547 572 руб. 85 коп.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления в арбитражном суде относятся на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества "Красноярская региональная энергетическая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческое предприятие "ЯрЭнергоСервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 20 302 428 руб. 78 коп. основного долга, 547 572 руб. 85 коп. неустойки, а также 127 247 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

С.А. Красовская