17_1531004  

 

 Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-2693/2023

23 августа 2023 года

город Южно-Сахалинск

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Кучкиной С.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием  средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению  

муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>  

к обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по муниципальному контракту, понуждении к исполнению  гарантийных обязательств,  

при участии: от истца –ФИО2 по доверенности от 22.12.2022, диплом 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить недостатки в выполненных работах по  муниципальному контракту № 032-085-19 от 17.07.2019 в многоквартирном жилом доме  по адресу: 

<

...>, в течение 10 календарных дней с момента  вступления решения суда в законную силу, а именно:  

- восстановить отделку, устранить сколы, трещины фасада и цоколя; - восстановить входную дверь, установить замок входной двери во 2 подъезде; 

- установить водосточный ж/б поток в проектное положение (северная сторона);  - восстановить облицовку вентиляционной шахты на кровле.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения  городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) штраф в размере 1 052 767 рублей 26 копеек.  

В случае неисполнения решения суда о понуждении к выполнению работ, взыскать  с общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения городского округа  «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 3000 рублей за каждый  день неисполнения решения суда, начиная с 11-го календарного дня со дня вступления  решения суда в законную силу, но не свыше суммы 1 000 000 рублей.  

В удовлетворении заявления о взыскании судебной неустойки в большей сумме –  отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 14 055 рублей.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в  полном объеме путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Сахалинской области.  

Судья С.В. Кучкина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 12.03.2023 18:47:00

 Кому выдана Кучкина Светлана Валерьевна