ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Резолютивная часть РЕШЕНИЯ

 от 08.08.2018 

по делу № А32-43049/2016 

Суд в составе судьи ______А.Г. Позднякова 

Руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного заседания –  отказать.  

Обязать ООО «Телеком-Монтаж-Юг» в течение 30 рабочих дней с момента  вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить выявленные экспертом  недостатки на объекте: «Строительство резервуара чистой воды в районе ул. Косоногова  г. Новороссийска, объемом 3000 м.куб.», расположенного по адресу: г. Новороссийск,  район ул. Косоногова, а именно:  

- отслоение и набухание окрасочного слоя (потолок помещения контрольно- пропускного пункта) - обязать произвести окрашивание водоэмульсионными составами  поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой  старой краски до 35%, в объеме 25,0 м2;  

- протечки, конденсат, намокание стропил, отсутствие ОМД и гидроизоляции  внутренней поверхности кровли, частичное отсутствие теплоизоляции перекрытия,  пароизоляция выполнена с технологическими нарушениями (кровля контрольно- пропускного пункта) - обязать произвести разборку покрытий кровель из листовой стали. В  объеме 52,0 м2. Разборку деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков  с прозорами. В объеме 9,0 м2. Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или  перлита на битумной мастике в один слой. В объеме 29,0 м2. Устройство пароизоляции  прокладочной в один слой. В объеме 35,0 м2. Устройство кровель различных типов из  металлочерепицы. В объеме 52,0 м2. Устройство мелких покрытий (брандмауэры,  парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. В объеме 2,0 м2;  

- вздутие и отставание кровельного покрытия, растрескивание и частичное  разрушение кровельного покрытия. Отсутствие дефлектора вытяжной трубы (кровля  фильтров-поглотителей) - обязать произвести ремонт отдельными местами рулонного  покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя. В объеме 21,0 м2.  Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм. В  объеме 1 шт.  

Взыскать с ООО «Телеком-Монтаж-Юг» в пользу МКУ «Управление  строительства» 39 500 руб. расходов по оплате судебной экспертизы.  

Взыскать с ООО «Телеком-Монтаж-Юг» в доход Федерального бюджета РФ  госпошлину в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции  в течение месяца со дня его принятия, в арбитражный суд кассационной инстанции - в  течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение  было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если  арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.Г. Поздняков