ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994 Москва, ГСП-4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№09АП-56244/2023

Дело № А40-114024/23

г. Москва

19 сентября 2023 года

Резолютивная часть постановления оглашена: 18 сентября 2023 года

Полный текст постановления изготовлен: 19 сентября 2023 года

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семёновой А.Б.,

судей: Бодровой Е.В., Кузнецовой Е.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "КМ-Строй" на решение Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2023 по делу № А40-114024/23 по иску ООО "Спецстройпроект" (392028, Россия, Тамбовская обл., город Тамбов г.о., Тамбов г., Ипподромный 

<

...>, ком. 16, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.04.2021, ИНН: 

<

***>, КПП: 682901001) к ООО "КМ-Строй" (121087, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, Новозаводская 

<

...>, помещ. 8/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.03.2010, ИНН: 

<

***>, КПП: 773001001) о взыскании 11 534 544, 24 руб., процентов в размере 988 688, 35 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 10.01.2023,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 09.01.2023. 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "Спецстройпроект" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы исковым заявлением к ООО "КМ-Строй" (далее – ответчик) о взыскании задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в размере 11 534 544, 24 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 988 688, 35 руб.

Решением от 21.07.2023 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с судебным актом, ответчик обратился с краткой апелляционной жалобой, в которой просит суд решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-114024/2023 по иску общества с ограниченной ответственностью «Спецстройпроект» к обществу с ограниченной ответственностью «КМ-Строй» о взыскании задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в размере 11 534 544, 24 руб., процентов в размере 988 688, 35 руб. отменить полностью и принять новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Спецстройпроект» отказать.

Срок на подачу полной апелляционной жалобы, с учетом даты публикации решения истёк, 28.08.2023.

В судебном заседании апелляционного суда ответчик поддержал апелляционную жалобу. Истец по доводам апелляционной жалобы возражал, просил оставить решение без изменения.

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, судебная коллегия установила следующее.

Как следует из материалов дела, 21.07.2021 между обществом с ограниченной ответственностью «КМ-Строй» (далее – ответчик, генподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СпецСтройПроект» (далее – истец, субподрядчик) заключен договор № РТС236А210065-СУБ на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - договор).

В соответствии с условиями договора (п. 1.1.) субподрядчик обязуется в установленные настоящим договором сроки выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - работы) в соответствии с перечнем, видами и стоимостью работ согласно приложению № 1 к настоящему договору, с условиями настоящего договора, утвержденной и согласованной в установленном законодательством порядке проектной документацией, локально-сметным расчетом, техническими регламентами и иными нормативными документами, а генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненный надлежащим образом объем работ в порядке, установленным настоящим договором и законодательством.

Приложением № 1 к договору предусмотрены следующие работы:

1. 

<

...>, ремонт фасада на сумму 2 066 578,92 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.

2. 

<

...> ремонт крыши на сумму 3 676 433,40 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.

3. 

<

...> д. 4 ремонт крыши на сумму 3 156 678,00 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.

4. 

<

...>, ремонт крыши на сумму 4 368 526,56 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.

5. Воронежская область, Россошанский район, п. Опытной плодово-ягодной станции, д. 24, ремонт крыши на сумму 6 268 390,20 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.

6. 

<

...>, ремонт крыши на сумму 3 819 135,96 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.

7. 

<

...>, ремонт крыши на сумму 2 771 474,40 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.

8. 

<

...>, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения на сумму 477 528,48 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.; установка коллективных приборов учета холодного водоснабжения на сумму 5 722,92 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021. Итого: 483 251,40 руб.

9. Воронежская область, Подгоренский район, пгт, Подгоренский, ул. Ленина, д. 26, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения на сумму 803 218,68 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.

10. Воронежская область, Подгоренский район, пгт, Подгоренский, ул. Ленина, д. 46, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения на сумму 666 976,68 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021; ремонт крыши на сумму 1 682 643,24 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021. Итого: 2 349 619,92 руб.

11. 

<

...>, ремонт фасада на сумму 10 797 643,44 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.

12. 

<

...> ремонт внутридомовых    инженерных систем водоотведения на сумму 1 709 949,96 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.

13. 

<

...> ремонт внутридомовых    инженерных систем водоотведения на сумму 1 149 142,68 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.

14. 

<

...>, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения на сумму 1 064 851,92 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.

15. 

<

...>, ремонт крыши на сумму 8 065 418,40 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.

16. 

<

...>, ремонт подвального помещения на сумму 965 953,08 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021; ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения на сумму 5 137 760,88 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021; ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения на сумму 1 061 513,64 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021. Итого: 7 165 227,60 руб.

17. 

<

...> ремонт фасад на сумму 6 808 709,88 руб. с 15.08.2021 по 30.11.2021.

Всего работы согласованы на сумму 66 524 251,32 руб.

Согласно доводам иска истец выполнил следующие виды работ, подтверждённые подписанными со стороны истца и ответчика документами:

1. Капитальный ремонт здания многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>; капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: 

<

...> - на общую сумму работ и затрат, включаемых в стоимость работ по акту о приемке выполненных работ № 1.1 от 15.09.2021 за период с 21.07.2021 по 15.09.2021 (справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.09.2021 в размере 10 267 132,32 рублей (в том числе НДС);

2. Капитальный ремонт здания многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>; капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: 

<

...>; капитальный ремонт здания многоквартирного жилого дома по адресу: Воронежская область Россошанский район, п. Опытной плодово-ягодной станции, д. 24 - на общую сумму работ и затрат, включаемых в стоимость работ по акту о приемке выполненных работ № 2.1 от 04.10.2021 за период с 16.09.2021 по 04.10.2021 (справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 04.10.2021 в размере 5 615 821,80 рублей (в том числе НДС);

3. Капитальный ремонт здания многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...> - на общую сумму работ и затрат, включаемых в стоимость работ по акту о приемке выполненных работ № 3 от 30.11.2021 за период с 16.09.2021 по 30.11.2021 (справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.11.2021 в размере 1 691 434,44 рублей (в том числе НДС);

4. Капитальный ремонт здания многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...> (ремонт фасада) - на общую сумму работ и затрат, включаемых в стоимость работ по акту о приемке выполненных работ № 4 от 17.11.2021 за период с 21.07.2021 по 17.11.2021 (справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 17.11.2021 в размере 1 737 752,40 рублей (в том числе НДС).

Указанные выше акты по форме КС-2 и КС-3 подписаны сторонами в двухстороннем порядке и оплачены в полном объеме.

В соответствии с п. 2.6. договора генподрядчик обязан в течении 3 дней с момента получения от субподрядчика актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 подписать их, либо представить письменный мотивированный отказ от подписания. Если генподрядчик письменный мотивированный отказ от подписания актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 в течении 3 (трех) дней, то работы, отраженные в данных актах выполненных работ, считаются принятыми генподрядчиком.

Пунктом 2.5. договора определено: расчет за выполненные работы осуществляется в валюте Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств поэтапно по видам работ в течение 3 банковских дней с момента подписания генподрядчиком актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета генподрядчика.

Согласно доводам иска субподрядчиком в рамках исполнения договора выполнены иные виды работ и в качестве подтверждения исполненных обязательств в адрес генподрядчика направлены и переданы путем нарочного вручения акты КС-2 и справки КС-3 с приложениями закрывающих документов, а именно:

1.  Сопроводительным письмом № 27/11 от 01.12.2021 с отметкой о вручении ответчику от 01.12.2021 следующие документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 14 от 30.11.2021 на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 776 566,00 рублей (в том числе НДС) за период с 18.11.2021 по 30.11.2021; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 14 от 30.11.2021 по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 776 566,00 рублей (в том числе НДС) за период с 18.11.2021 по 30.11.2021; счет-фактура № 16 от 30.11.2021;

2. Сопроводительным письмом № 26/11 от 30.11.2021 с отметкой о вручении ответчику от 01.12.2021 следующие документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 15 от 30.11.2021 на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 859 534,80 рублей (в том числе НДС) за период с 18.11.2021 по 30.11.2021; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 15 от 30.11.2021 по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 859 534,80 рублей (в том числе НДС) за период с 18.11.2021 по 30.11.2021; счет-фактура № 15 от 30.11.2021 года; счет № 15 от 30.11.2021;

3. Сопроводительным письмом № 25/11 от 30.11.2021 с отметкой о вручении ответчику от 01.12.2021 следующие документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 11 от 30.11.2021 на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 328 826,40 рублей (в том числе НДС) за период с 18.11.2021 по 30.11.2021; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 13 от 30.11.2021 по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 328 826,40 рублей (в том числе НДС) за период с 18.11.2021 по 30.11.2021; счет-фактура № 14 от 30.11.2021; счет № 14 от 30.11.2021;

4. Сопроводительным письмом № 09/11 от 17.11.2021 с отметкой о вручении ответчику от 17.11.2021 следующие документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 6 от 17.11.2021 на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 2 580 932,16 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 по 17.11.2021; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 6 от 17.11.2021 по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 2 580 932,16 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 по 17.11.2021; счет-фактура № 13 от 17.11.2021;

5. Сопроводительным письмом № 03/11 от 17.11.2021 с отметкой о вручении ответчику от 17.11.2021 следующие документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 12 от 17.11.2021 на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (ремонт системы электроснабжения) на сумму 789 361,20 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 по 17.11.2021; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 12 от 17.11.2021 по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (ремонт системы электроснабжения) на сумму 789 361,20 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 по 17.11.2021; счет-фактура № 12 от 17.11.2021; счет № 12 от 17.11.2021;

6. Сопроводительным письмом № 07/11 от 17.11.2021 с отметкой о вручении ответчику от 17.11.2021 следующие документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 8 от 17.11.2021 на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт кровли) на сумму 1 607 851,08 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 по 17.11.2021; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 8 от 17.11.2021 по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу 

<

...>   (капитальный   ремонт   кровли)   на сумму 1 607 851,08 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 по 17.11.2021; счет-фактура № 11 от 17.11.2021, счет № 11 от 17.11.2021;

7. Сопроводительным письмом № 05/11 от 17.11.2021 с отметкой о вручении ответчику от 17.11.2021 следующие документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 10 от 17.11.2021 на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт кровли) на сумму 776 585,88 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 по 17.11.2021; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 10 от 17.11.2021 по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт кровли) на сумму 776 585,88 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 по 17.11.2021; счет-фактура № 9 от 17.11.2021;

8. Сопроводительным письмом № 08/11 от 17.11.2021 с отметкой о вручении ответчику от 17.11.2021 следующие документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 7 от 17.11.2021 на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Воронежская область, Россошанский район, п. Опытной плодово-ягодной станции, д. 29 (капитальный ремонт кровли) на сумму 459 572,40 рублей (в том числе НДС) за период с 05.10.2021 по 17.11.2021; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 7 от 17.11.2021 по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Воронежская область, Россошанский район, п. Опытной плодово-ягодной станции, д. 29 (капитальный ремонт кровли) на сумму 459 572,40 рублей (в том числе НДС) за период с 05.10.2021 по 17.11.2021; счет-фактура № 8 от 17.11.2021; счет № 8 от 17.11.2021;

9. Сопроводительным письмом № 04/11 от 17.11.2021 с отметкой о вручении ответчику от 17.11.2021 следующие документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 11 от 17.11.2021 на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (ремонт системы электроснабжения) на сумму 433 391,04 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 по 17.11.2021; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 7 от 17.11.2021 по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (ремонт системы электроснабжения) на сумму 433 391,04 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 по 17.11.2021; счет-фактура № 10 от 17.11.2021; счет № 10 от 17.11.2021;

10. Сопроводительным письмом № 06/11 от 17.11.2021 с отметкой о вручении ответчику от 17.11.2021 следующие документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 9 от 17.11.2021 на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> д. ПА (капитальный ремонт кровли) на сумму 2 062 368,00 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 по 16.11.2021; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 9 от 17.11.2021 по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> д. 11А (капитальный ремонт кровли) на сумму 2 062 368,00 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 по 16.11.2021; счет-фактура № 7 от 17.11.2021; счет № 7 от 17.11.2021;

11. Сопроводительным письмом № 10/11 от 17.11.2021 с отметкой о вручении ответчику от 17.11.2021 следующие документы: справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 5 от 17.11.2021 на выполнение работ и затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт кровли) на сумму 859 535,28 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 по 17.11.2021; акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 5 от 17.11.2021 по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт кровли) на сумму 859 535,28 рублей (в том числе НДС) за период с 21.07.2021 по 17.11.2021; счет-фактура № 6 от 17.11.2021; счет № 6 от 17.11.2021.

Согласно иску выполнено работ и понесено затрат на общую сумму 11 534 544,24 рублей, в том числе НДС, что подтверждено ответчиком в судебном заседании. Между тем, до настоящего времени ответчиком претензий по выполненным работам не представлено, акты о выполненных работах не подписаны и не оплачены, в связи с чем задолженность ответчика составила 11 534 544,24 руб.

В адрес ответчика направлена путем нарочного вручения претензия № 15/12 от 15.12.2021 с требованиями осуществить оплату задолженности в срок 7 дней. Однако, ответчик сумму задолженности не оплатил, что послужило основанием для обращения истца с требованиями в суд. Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции руководствовался ст. 309, 310, 395, 702, 708, 709, 711, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда».

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 260 АПК РФ в апелляционной жалобе должны быть указаны требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства.

Из разъяснений, изложенных в абзаце 3 пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", следует, что арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет судебный акт в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ.

Обжалуя решение арбитражного суда первой инстанции по настоящему делу, ответчик подал в апелляционный суд краткую апелляционную жалобу, в которой им не указаны основания, по которым он обжалует решение, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу                                  части 4 статьи 270 АПК РФ безусловными основаниями для отмены решения, апелляционным судом не установлено.

Поскольку в материалы дела не представлено доказательств уплаты государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы, расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб. 00 коп. относятся на ООО "КМ-Строй" и подлежат взысканию в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2023 по делу № А40-114024/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Взыскать с ООО "КМ-Строй" в доход федерального бюджета  государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3 000 рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

Председательствующий судья                                                              А.Б. Семёнова

 

Судьи                                                                                                       Е.В. Бодрова

 

Е.Е. Кузнецова