Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

09. 02. 2024 года.                                                                                    Дело № А40-254833/23-43-2015

Резолютивная часть решения объявлена 05. 02. 2024 года.

Решение изготовлено в полном объеме 09. 02. 2024 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " И-технологии " (ОГРН 

<

***>) к ООО " Ставан-М " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 2 045 626  руб. 37 коп. – долга, процентов, проценты по день фактической уплаты суммы долга

с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность № 037 от 30.10.2023 г., от ответчика – не явился.

Заслушав представителя, изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 2 045 626  руб. 37 коп. – долга, процентов, проценты по день фактической уплаты суммы долга, на основании статей 309-310, 314, 711, 746ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, представил истребованные судом документы; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Между ООО «И-технологии» (Подрядчик, Истец) и ООО «СТАВАН-М» (Заказчик, Ответчик) были заключены договоры на выполнение работ по монтажу и пусконаладке средств измерения и оборудования узла учета расхода природного газа № ИТ/123-2020 от 20.11.2020, № ИТ/124-2020 от 20.11.2020, № ИТ/103-2021 от 13.09.2021, № ИТ/124-2021 от 14.10.2021, № ИТ/125-2021 от 14.10.2021, № ИТ/126-2021 от 14.10.2021, № ИТ/127- 2021 от 14.10.2021, № ИТ/005-2022 от 21.01.2022.

1. В соответствии с пунктами 1.1-1.5 Договора № ИТ/123-2020 от 20.11.2020 Подрядчиком были выполнены работы по Договору в полном объеме, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ № ИТ-39 от 18.01.2021, № ИТ-41 от 18.01.2021, подписанными без замечаний.

Пунктом 5.1.8, 5.1.10 Договора предусмотрена обязанность Заказчика своевременно и в полном объеме принять выполненную работу и подписать Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, принять Акт (отчет), Акт сдачи- приемки оказанных услуг, произвести оплату выполненных и принятых работ в размере, сроки и порядке, установленном Договором.

В соответствии с разделом 3 Договора цена всего объема выполняемых работ и услуг по Договору составляет 132 405, 36 руб. (п.3.1 Договора), при этом работы выполняются в три этапа.

Стоимость работ за первый этап составляет 72 405, 36 руб. (п.3.2 Договора), стоимость работ за второй этап (организация экспертизы) составляет 30 000, 00 руб. (п.3.3 Договора), стоимость работ за третий этап (организация приемки узла учета расхода природного газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз) составляет 30 000,00 руб. (п.3.4 Договора). Порядок оплаты выполняемых по Договору работ установлен в п. 3.5 Договора.

В полном объеме Заказчиком произведена оплата по второму этапу Договора. Оплата по первому этапу Договора произведена Заказчиком частично, в размере 54 304, 02 руб., оплата по третьему этапу Договора Заказчиком не произведена.

Согласно п. 3.8 Договора окончательный расчет за выполненные работы (первый этап) производится Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ № ИТ-39 от 18.01.2021. Задолженность Заказчика по первому этапу работ составляет 18 101, 34 руб.,

Согласно п. 3.5.3 Договора оплата за третий этап составляет 100% от стоимости третьего этапа, то есть 30 000, 00 руб., и должна была быть произведена Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг по организации приемки узла учета газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз» № ИТ-41 от 18.01.2021. Задолженность Заказчика по третьему этапу Договора составляет 30 000, 00 руб.

Общая сумма задолженности по 1,3 этапу Договора составила 48 101, 34 руб.

В соответствии с п. 3.5.3,3.8 Договора окончательный расчет по 1,3 этапам Заказчик должен был произвести не позднее 25.01.2021. Таким образом период просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 26.01.2021 по 02.11.2023 составил 1011 к.д.

Согласно с п. 7.2 Договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 составил 11 329, 82 руб.

Таким образом, задолженность по Договору № ИТ/123-2020 составляет 59 431, 16 руб. и включает в себя сумму долга в размере 48 101, 34 руб., а также проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 11 329, 82 руб.

В целях соблюдения предусмотренного ст. 4 АПК РФ и Договором № ИТ/123-2020 от 20.11.2020 досудебного порядка урегулирования спора Истец 22.08.2023 направил в адрес Ответчика досудебную претензию № 049 от 18.08.2023 с требованием оплатить задолженность по Договору. До настоящего времени Ответчик на претензию Истца не ответил, денежные средства в счет оплаты задолженности на расчетный счет Истца не перечислил.

В соответствии с пунктами 1.1-1.5 Договора № ИТ/124-2020 от 20.11.2020 Подрядчиком были выполнены работы по Договору в полном объеме, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ № ИТ-42 от 18.01.2021, № ИТ-44 от 18.01.2021, подписанными без замечаний.

Пунктом 5.1.8, 5.1.10 Договора предусмотрена обязанность Заказчика своевременно и в полном объеме принять выполненную работу и подписать Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, принять Акт (отчет), Акт сдачи- приемки оказанных услуг, произвести оплату выполненных и принятых работ в размере, сроки и порядке, установленном Договором.

В соответствии с разделом 3 Договора цена всего объема выполняемых работ и услуг по Договору составляет 132 405,36 руб. (п.3.1 Договора), при этом работы выполняются в три этапа.

Стоимость работ за первый этап составляет 72 405, 36 руб. (п.3.2 Договора), стоимость работ за второй этап (организация экспертизы) составляет 30 ООО, 00 руб.(п.3.3 Договора), стоимость работ за третий этап (организация приемки узла учета расхода природного газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз) составляет 30 000,00 руб. (п.3.4 Договора).

Порядок оплаты выполняемых по Договору работ установлен в п. 3.5 Договора.

В полном объеме Заказчиком произведена оплата по второму этапу Договора.

Оплата по первому этапу Договора произведена Заказчиком частично, в размере 54 304, 02 руб., оплата по третьему этапу Договора Заказчиком не произведена.

Согласно п. 3.8 Договора окончательный расчет за выполненные работы (первый этап) производится Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ № ИТ-42 от 18.01.2021. Задолженность Заказчика по первому этапу работ составляет 18 101, 34 руб.,

Согласно п. 3.5.3 Договора оплата за третий этап составляет 100% от стоимости третьего этапа, то есть 30 000, 00 руб., и должна была быть произведена Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг по организации приемки узла учета газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз» № ИТ-44 от 18.01.2021. Задолженность Заказчика по третьему этапу Договора составляет 30 000, 00 руб.

Общая сумма задолженности по 1,3 этапу Договора составила 48 101, 34 руб.

В соответствии с п. 3.5.3,3.8 Договора окончательный расчет по 1,3 этапам Заказчик должен был произвести не позднее 25.01.2021. Таким образом период просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 26.01.2021 по 02.11.2023 составил 1011 к.д.

Согласно с п. 7.2 Договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 составил 11 329, 82 руб.

Таким образом, задолженность по Договору № ИТ/124-2020 составляет 59 431, 16  и включает в себя сумму долга в размере 48 101, 34 руб., а также проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 11 329, 82 руб.

В целях соблюдения предусмотренного ст. 4 АПК РФ и Договором № ИТ/124-2020 от 20.11.2020 досудебного порядка урегулирования спора Истец 22.08.2023 направил в адрес Ответчика досудебную претензию № 050 от 18.08.2023 с требованием оплатить задолженность по Договору. До настоящего времени Ответчик на претензию Истца не ответил, денежные средства в счет оплаты задолженности на расчетный счет Истца не перечислил.

В соответствии с пунктами 1. 1-1.5 Договора № ИТ/103-2021 от 13.09.2021 Подрядчиком были выполнены работы по Договору в полном объеме, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ № ИТ-1517 от 29.10.2021 подписанным без замечаний.

Пунктом 5.1.8, 5.1.10 Договора предусмотрена обязанность Заказчика своевременно и в полном объеме принять выполненную работу и подписать Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, принять Акт (отчет), Акт сдачи- приемки оказанных услуг, произвести оплату выполненных и принятых работ в размере, сроки и порядке, установленном Договором.

В соответствии с разделом 3 Договора цена всего объема выполняемых работ и услуг по Договору составляет 449 571,24 руб. (п.3.1 Договора), при этом работы выполняются в три этапа.

Стоимость работ за первый этап составляет 369 571, 24 руб. (п.3.2 Договора), стоимость работ за второй этап (организация экспертизы) составляет 40 000, 00 руб. (п.3.3 Договора), стоимость работ за третий этап (организация приемки узла учета расхода природного газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз) составляет 40 000,00 руб. (п.3.4 Договора).

Порядок оплаты выполняемых по Договору работ установлен в п. 3.5 Договора.

Оплата по первому и второму этапу Договора произведена Заказчиком в полном объеме, оплату третьего этапа работ по Договору Заказчик не произвел.

В соответствии с п. 3.5.3 Договора оплата за третий этап Договора производится из расчета 100% от цены услуги, то есть в размере 40 000, 00 руб. в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг по организации приемки узла учета газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз» № ИТ-1517 от 29.10.2021. Оплата по третьему этапу Договора Заказчиком не произведена, задолженность составляет 40 000, 00 руб.

В соответствии с п. 3.5.3 Договора оплату по третьему этапу Договора Заказчик обязан был произвести не позднее 08.11.2021. Таким образом период просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 09.11.2021 по 02.11.2023 составил 724 к.д.

Согласно с п. 7.2 Договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 по третьему этапу Договора составил 7 688, 77 руб.

Таким образом, задолженность по Договору № ИТ/103-2021 составляет 47 688, 77 руб. и включает в себя сумму долга в размере 40 000, 00 руб., а также проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 7 688, 77 руб.

В целях соблюдения предусмотренного ст. 4 АПК РФ и Договором № ИТ/103-2021 от 13.09.2021 досудебного порядка урегулирования спора Истец 22.08.2023 направил в адрес Ответчика досудебную претензию № 051 от 18.08.2023 с требованием оплатить задолженность по Договору. До настоящего времени Ответчик на претензию Истца не ответил, денежные средства в счет оплаты задолженности на расчетный счет Истца не перечислил.

В соответствии с пунктами 1.1-1.3 Договора № ИТ/124-2021 от 14.10.2021 Подрядчиком были выполнены работы по Договору в полном объеме, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ№ ИТ-72 от 18.01.2022, № ИТ-73 от 18.01.2022, № ИТ- 92 от 20.01.2022, подписанными без замечаний.

Пунктом 5.1.8,5.1.10 Договора предусмотрена обязанность Заказчика своевременно и в полном объеме принять выполненную работу и подписать Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, принять Акт (отчет), Акт сдачи- приемки оказанных услуг, произвести оплату выполненных и принятых работ в размере, сроки и порядке, установленном Договором.

В соответствии с разделом 3 Договора цена всего объема выполняемых работ и услуг по Договору составляет 730 650, 56 руб. (п.3.1 Договора), при этом работы выполняются в три этапа.

Стоимость работ за первый этап составляет 650 650, 56 руб. (п.3.2 Договора), стоимость работ за второй этап (организация экспертизы) составляет 40 000, 00 руб.(п.3.3 Договора), стоимость работ за третий этап (организация приемки узла учета расхода природного газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз) составляет 40 000,00 руб. (п.3.4 Договора).

Порядок оплаты выполняемых по Договору работ установлен в п. 3.5 Договора. Оплата первого этапа работ произведена Заказчиком в полном объеме, оплата второго этапа произведена Заказчиком частично, оплата третьего этапа работ по Договору Заказчиком не произведена.

Согласно п. 3.5.2 Договора Оплата за второй этап Договора производится Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта (отчета) об оказании услуг по организации проведения метрологической экспертизы № ИТ-73 от 18.01.2022 из расчета 100% от цены услуг, то есть в размере 40 000, 00 руб.

Согласно п. 3.5.3 Договора оплата за третий этап Договора производится из расчета 100% от цены услуги, то есть в размере 40 000, 00 руб. в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг по организации приемки узла учета газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз» № ИТ-92 от 20.01.2022.

Задолженность во второму этапу составляет 25 650, 56 руб., задолженность по третьему этапу составляет 40 000, 00 руб.

В соответствии с п. 3.5.2 Договора оплату по второму этапу Договора Заказчик обязан   был произвести не позднее 25.01.2022. Таким образом период просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 26.01.2021 по 02.11.2023 составил 1011 к.д.

В соответствии с п. 3.5.3 Договора оплату по третьему этапу Договора Заказчик обязан  был произвести не позднее 27.01.2022. Таким образом период     просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 28.01.2021 по 02.11.2023 составил 1009 к.д.

Согласно с п. 7.2 Договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 по второму этапу Договора составил 6 041, 76 руб.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 по третьему этапу Договора составил 9 412,31 руб.

Таким образом, задолженность по Договору № ИТ/124-2021 составляет 81 104, 63 руб. и включает в себя сумму долга в размере 65 650,56 руб., а также проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 15 454, 07 руб.

В целях соблюдения предусмотренного ст. 4 АПК РФ и Договором № ИТ/124-2021 от 14.10.2021 досудебного порядка урегулирования спора Истец 22.08.2023 направил в адрес Ответчика досудебную претензию № 052 от 18.08.2023 с требованием оплатить задолженность по Договору. До настоящего времени Ответчик на претензию Истца не ответил, денежные средства в счет оплаты задолженности на расчетный счет Истца не перечислил.

В соответствии с пунктами 1.1-1.3 Договора № ИТ/125-2021 от 14.10.2021 Подрядчиком были выполнены работы по Договору в полном объеме, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ № ИТ-93 от 20.01.2022.

Пунктом 5.1.8, 5.1.10 Договора предусмотрена обязанность Заказчика своевременно и в полном объеме принять выполненную работу и подписать Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, принять Акт (отчет), Акт сдачи- приемки оказанных услуг, произвести оплату выполненных и принятых работ в размере, сроки и порядке, установленном Договором.

В соответствии с разделом 3 Договора цена всего объема выполняемых работ и услуг по Договору составляет 649 093,28 руб. (п.3.1 Договора), при этом работы выполняются в три этапа.

Стоимость работ за первый этап составляет 569 093, 28 руб. (п.3.2 Договора), стоимость работ за второй этап (организация экспертизы) составляет 40 000, 00 руб.(п.3.3 Договора), стоимость работ за третий этап (организация приемки узла учета расхода природного газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз) составляет 40 000, 00 руб. (п.3.4 Договора).

Порядок оплаты выполняемых по Договору работ установлен в п. 3.5 Договора.

Оплата первого и второго этапа работ произведена Заказчиком в полном объеме.

Оплата третьего этапа работ произведена Заказчиком частично, а именно в размере 25 906, 72 руб.

В соответствии с п. 3.5.3 Договора оплата за третий этап Договора производится из расчета 100% от цены услуги, то есть в размере 40 000, 00 руб. в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг по организации приемки узла учета газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз» № ИТ-93 от 20.01.2022. Задолженность по 3 этапу составляет 14 093,28 руб.

В соответствии с п. 3.5.3 Договора оплату по третьему этапу Договора Заказчик обязан был произвести не позднее 27.01.2022. Таким образом период просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 28.01.2021 по 02.11.2023 составил 644 к.д.

Согласно с п. 7.2 Договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 по третьему этапу Договора составил 2 462, 26 руб.

Таким образом, задолженность по Договору № ИТ/125-2021 составляет 16 555, 54 руб. и включает в себя сумму долга в размере 14 093, 28 руб., а также проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 2 462, 26 руб.

В целях соблюдения предусмотренного ст. 4 АПК РФ и Договором № ИТ/125-2021 от 14.10.221 досудебного порядка урегулирования спора Истец 22.08.2023 направил в адрес Ответчика досудебную претензию № 053 от 18.08.2023 с требованием оплатить задолженность по Договору. До настоящего времени Ответчик на претензию Истца не ответил, денежные средства в счет оплаты задолженности на расчетный счет Истца не перечислил.

В соответствии с пунктами 1.1-1.3 Договора № ИТ/126-2021 от 14.10.2021 Подрядчиком были выполнены работы по Договору в полном объеме, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ № ИТ-77 от 18.01.2022, № ИТ-78 от 18.01.2022, № ИТ- 94 от 20.01.2022 подписанными без замечаний.

Пунктом 5.1.8, 5.1.10 Договора предусмотрена обязанность Заказчика своевременно и в полном объеме принять выполненную работу и подписать Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, принять Акт (отчет), Акт сдачи- приемки оказанных услуг, произвести оплату выполненных и принятых работ в размере, сроки и порядке, установленном Договором.

В соответствии с разделом 3 Договора цена всего объема выполняемых работ и услуг по Договору составляет 649 093, 28 руб. (п.3.1 Договора), при этом работы выполняются в три этапа.

Стоимость работ за первый этап составляет 569 093, 28 руб. (п.3.2 Договора), стоимость работ за второй этап (организация экспертизы) составляет 40 000, 00 руб.(п.3.3 Договора), стоимость работ за третий этап (организация приемки узла учета расхода природного газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз) составляет 40 000,00 руб. (п.3.4 Договора).

Порядок оплаты выполняемых по Договору работ установлен в п. 3.5 Договора.

Оплата первого этапа работ произведена Заказчиком частично, а именно в размере 150 000, 00 руб., задолженность по первому этапу договора составляет 419 093,28 руб., оплата второго, третьего этапа работ по Договору Заказчиком не производилась.

Согласно п. 3.5.1 Договора окончательный расчет за выполненные работы по первому этапу Договора Заказчик производит в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг по организации приемки узла учета газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз» № ИТ-94 от 20.01.2022. Таким образом, Заказчик был обязан оплатить первый этап работ по Договору не позднее 27.01.2022, период просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 28.01.2021 по 02.11.2023 составил 644 к.д.

Оплата за второй этап Договора производится Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта (отчета) об оказании услуг по организации проведения метрологической экспертизы № ИТ-78 от 18.01.2022 из расчета 100% от цены услуг, то есть в размере 40 000, 00 руб. Оплата по второму этапу Договора Заказчиком не произведена, задолженность составляет 40 000, 00 руб.

В соответствии с п. 3.5.2 Договора оплату по второму этапу Договора Заказчик обязан был произвести не позднее 25.01.2022. Таким образом период просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 26.01.2021 по 02.11.2023 составил 646 к.д.

Оплата за третий этап Договора производится из расчета 100% от цены услуги, то есть в размере 40 000,00 руб. в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг по организации приемки узла учета газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз» от 20.01.2022 Оплата по третьему этапу Договора Заказчиком не произведена, задолженность составляет 40 000, 00 руб.

В соответствии с п. 3.5.3 Договора оплату по третьему этапу Договора Заказчик обязан был произвести не позднее 27.01.2022. Таким образом период просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 28.01.2021 по 02.11.2023 составил 644 к.д.

Согласно с п. 7.2 Договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 по первому этапу Договора составил 73 220, 78 руб.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 по второму этапу Договора составил 7 007, 13 руб.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 по третьему этапу Договора составил 6 988, 50 руб.

Таким образом, задолженность по Договору № ИТ/126-2021 составляет 586 309, 69 руб. и включает в себя сумму долга в размере 499 093, 28 руб., а также проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 87 216, 41 руб.

В целях соблюдения предусмотренного ст. 4 АПК РФ и Договором № ИТ/126-2021 от 14.10.2021 досудебного порядка урегулирования спора Истец 22.08.2023 направил в адрес Ответчика досудебную претензию № 054 от 18.08.2023 с требованием оплатить задолженность по Договору. До настоящего времени Ответчик на претензию Истца не ответил, денежные средства в счет оплаты задолженности на расчетный счет Истца не перечислил.

В соответствии с пунктами 1.1-1.3 Договора № ИТ/127-2021 от 14.10.2021 Подрядчиком были выполнены работы по Договору в полном объеме, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ № ИТ-79 от 18.01.2022, № ИТ-80 от 18.01.2022, № ИТ- 95 от 20.01.2022 подписанными без замечаний.

Пунктом 5.1.8, 5.1.9 Договора предусмотрена обязанность Заказчика своевременно и в полном объеме принять выполненную работу и подписать Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, принять Акт (отчет), Акт сдачи- приемки оказанных услуг, произвести оплату выполненных и принятых работ в размере, сроки и порядке, установленном Договором.

В соответствии с разделом 3 Договора цена всего объема выполняемых работ и услуг по Договору составляет 673 263, 68 руб. (п.3.1 Договора), при этом работы выполняются в три этапа.

Стоимость работ за первый этап составляет 593 263, 68 руб. (п.3.2 Договора), стоимость работ за второй этап (организация экспертизы) составляет 40 000, 00 руб.(п.3.3 Договора), стоимость работ за третий этап (организация приемки узла учета расхода природного газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз) составляет 40 000,00 руб. (п.3.4 Договора).

Порядок оплаты выполняемых по Договору работ установлен в п. 3.5 Договора.

Оплата первого этапа работ произведена Заказчиком частично, а именно в размере 150 000, 00 руб., задолженность по первому этапу договора составляет 443 263,68 руб., оплата второго, третьего этапа работ по Договору Заказчиком не производилась.

Согласно п. 3.5.1 Договора окончательный расчет за выполненные работы по первому этапу Договора Заказчик производит в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг по организации приемки узла учета газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз» № ИТ-95 от 20.01.2022. Таким образом, Заказчик был обязан оплатить первый этап работ по Договору не позднее 27.01.2022, период просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 28.01.2022 по 02.11.2023 составил 644 к.д.

Оплата за второй этап Договора производится Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта (отчета) об оказании услуг по организации проведения метрологической экспертизы № ИТ-80 от 18.01.2022 из расчета 100% от цены услуг, то есть в размере 40 000, 00 руб. Оплата по второму этапу Договора Заказчиком не произведена, задолженность составляет 40 000, 00 руб.

В соответствии с п. 3.5.2 Договора оплату по второму этапу Договора Заказчик обязан был произвести не позднее 25.01.2022. Таким образом период просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 26.01.2022 по 02.11.2023 составил 646 к.д.

Оплата за третий этап Договора производится из расчета 100% от цены услуги, то есть в размере 40 000,00 руб. в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг по организации приемки узла учета газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз» от 20.01.2022 Оплата по третьему этапу Договора Заказчиком не произведена, задолженность составляет 40 000, 00 руб.

В соответствии с п. 3.5.3 Договора оплату по третьему этапу Договора Заказчик обязан был произвести не позднее 27.01.2022. Таким образом период просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 28.01.2022 по 02.11.2023 составил 644 к.д.

Согласно с п. 7.2 Договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 по первому этапу Договора составил 77 443, 68 руб.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 по второму этапу Договора составил 7 007, 13 руб.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 по третьему этапу Договора составил 6 988, 50 руб.

Таким образом, задолженность по Договору № ИТ/127-2021 составляет 614 702, 99 (шестьсот четырнадцать тысяч семьсот два рубля 99 копеек) и включает в себя сумму долга в размере 523 263,68 руб., а также проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 91 439,31 руб.

В целях соблюдения предусмотренного ст. 4 АПК РФ и Договором № ИТ/127-2021 от 14.10.2021 досудебного порядка урегулирования спора Истец 22.08.2023 направил в адрес Ответчика досудебную претензию № 055 от 18.08.2023 с требованием оплатить задолженность по Договору. До настоящего времени Ответчик на претензию Истца не ответил, денежные средства в счет оплаты задолженности на расчетный счет Истца не перечислил.

В соответствии с пунктами 1.1-1.5 Договора № ИТ/005-2022 от 21.10.2022 Подрядчиком были выполнены работы по Договору в полном объеме, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ № ИТ-1262 от 18.08.2022, № ИТ-1814 от 07.11.2022, № ИТ-1815 от 07.11.2022 подписанными без замечаний.

Пунктом 5.1.8, 5.1.10 Договора предусмотрена обязанность Заказчика своевременно и в полном объеме принять выполненную работу и подписать Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, принять Акт (отчет), Акт сдачи- приемки оказанных услуг, произвести оплату выполненных и принятых работ в размере, сроки и порядке, установленном Договором.

В соответствии с разделом 3 Договора цена всего объема выполняемых работ и услуг по Договору составляет 935 872, 37 руб. (п.3.1 Договора), при этом работы выполняются в три этапа.

Стоимость работ за первый этап составляет 815 872, 37 руб. (п.3.2 Договора), стоимость работ за второй этап (организация экспертизы) составляет 70 000, 00 руб.(п.3.3 Договора), стоимость работ за третий этап (организация приемки узла учета расхода природного газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз) составляет 50 000,00 руб. (п.3.4 Договора).

Порядок оплаты выполняемых по Договору работ установлен в п. 3.5 Договора.

Оплата первого этапа работ произведена Заказчиком частично, а именно в размере 412 800, 00 руб., задолженность по первому этапу договора составляет 403 072, 37 руб., оплата второго, третьего этапа работ по Договору Заказчиком не производилась.

Согласно п. 3.8 Договора окончательный расчет за выполненные работы по первому этапу Договора Заказчик производит в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ № ИТ-1262 от 18.08.2022. Таким образом, Заказчик был обязан оплатить первый этап работ по Договору не позднее 25.08.2022, период просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 26.08.2022 по 02.11.2023 составил 434 к.д.

В соответствии с п. 3.5.2 оплата за второй этап Договора производится Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора (21.01.2022) из расчета 100% от цены услуг, то есть в размере 70 000, 00 руб. Оплата по второму этапу Договора Заказчиком не произведена, задолженность составляет 70 000, 00 руб.

В соответствии с п. 3.5.2 Договора оплату по второму этапу Договора Заказчик обязан был произвести не позднее 28.01.2022. Таким образом период просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 29.01.2022 по 02.11.2023 составил 643 к.д.

Оплата за третий этап Договора производится из расчета 100% от цены услуги, то есть в размере 50 000,00 руб. в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг по организации приемки узла учета газа в эксплуатацию в АО «Мособлгаз» №ИТ-1815 от 07.11.2022. Оплата по третьему этапу Договора Заказчиком не произведена, задолженность составляет 50 000, 00 руб.

В соответствии с п. 3.5.3 Договора оплату по третьему этапу Договора Заказчик обязан был произвести не позднее 14.11.2022. Таким образом период просрочки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ с 15.11.2022 по 02.11.2023 составил 353 к.д.

Согласно с п. 7.2 Договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 по первому этапу Договора составил 40 892, 52 руб.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 по второму этапу Договора составил 12 213,57 руб.

Размер процентов по ст. 395 ГК РФ на 02.11.2023 по третьему этапу Договора составил 4 223, 97 руб.

Таким образом, задолженность по Договору № ИТ/005-2022 составляет 580 402,43 руб. и включает в себя сумму долга в размере 523 072, 37 руб., а также проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 57 330, 06 руб.

В целях соблюдения предусмотренного ст. 4 АПК РФ и Договором № ИТ/005-2022 от 21.01.2022 досудебного порядка урегулирования спора Истец 22.08.2023 направил в адрес Ответчика досудебную претензию № 056 от 18.08.2023 с требованием оплатить задолженность по Договору. До настоящего времени Ответчик на претензию Истца не ответил, денежные средства в счет оплаты задолженности на расчетный счет Истца не перечислил.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик - принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Статьей 746 ГК РФ определено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает пли позволяет определить день его исполнения пли период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Требование истца о взыскании долга в сумме 1 761 375 руб. 85 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, в соответствии с которой, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Требование истца о взыскании процентов в сумме 284 250 руб. 52 коп. – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению в соответствии с представленным истцом расчетом.

Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами из расчёта ключевой ставки Банка России за соответствующие периоды от 1 761 375 руб. 85 коп. за каждый день просрочки платежа в период с 03.11.2023 г. по день фактической уплаты суммы долга, также подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 395 ГК РФ, проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок, в соответствии с  п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Требование истца об отнесении на ответчика судебных расходов, связанных с оплатой юридических услуг  в сумме 80 000 руб. 00 коп. - подтверждено имеющимися в деле документами (договор на оказание юридических услуг №2023/10-25/1 от 25.10.23г., платежное поручение №1515 от 09.11.23г., №1713 от 14.12.23г.), не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению в размере 50 000 руб. 00 коп., в соответствии со статьями 106, 110, 112 АПК РФ. В остальной части требование удовлетворению не подлежит в связи с несоразмерностью заявленного требования.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика  в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 395, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 106, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " Ставан-М " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " И-технологии " (ОГРН 

<

***>) 2 045 626  руб. 37 коп., в том числе: 1 761 375 руб. 85 коп. – долга, 284 250 руб. 52 коп. - процентов, проценты за пользование чужими денежными средствами из расчёта ключевой ставки Банка России за соответствующие периоды от 1 761 375 руб. 85 коп. за каждый день просрочки платежа в период с 03.11.2023 г. по день фактической уплаты суммы долга, а также судебные издержки на оплату услуг представителя в сумме 50 000 руб. 00 коп. и расходы по уплате госпошлины в сумме 33 158 руб. 00 коп.

Требование истца об отнесении на ответчика судебных издержек на оплату услуг представителя в сумме 30 000 руб. 00 коп. оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

 

Судья

ФИО1