Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №  А76-5020/2022

г. Челябинск

28 июля 2022 года

Резолютивная часть решения вынесена 21 июля 2022 года

Решение изготовлено в полном объеме 28 июля 2022 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Соцкая Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска», ОГРН 

<

***>, к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 8 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области», ОГРН 

<

***>, о взыскании  146 588 руб. 33 коп.

при участии в судебном заседании представителей: 

От истца: ФИО2– представитель, действующая на основании доверенности от 10.01.2022, личность удостоверена паспортом, представлен диплом о наличии высшего юридического образования;

От ответчика: ФИО3– представитель, действующая на основании доверенности от 13.07.2022, личность удостоверена паспортом, представлен диплом о наличии высшего юридического образования;

УСТАНОВИЛ:

муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» (далее – истец, МБУ «ЭВИС»), обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 8 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» (далее – ответчик, ФГУ ИК-8 ГУФСИН России по Челябинской области), о взыскании  задолженности в размере 146 588 руб. 33 коп.

В обоснование исковых требований истец ссылается на нарушение ответчиком сроков выполнения работ по муниципальным контрактам в нарушение положений статей 330, Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 24.02.2022 исковое заявление принято к производству по общим правилам искового производства, предварительное судебное заседание назначено на 11.04.2022 (л.д. 1-2). 

Отзывом ответчик исковые требования отклонил, указал на своевременное выполнение предусмотренных контрактами работ, в удовлетворении требований просил отказать (т. 2 л.д. 116-117). 

Истец в судебном заседании на удовлетворении исковых требований настаивал, представил письменные возражения по доводам отзыва.

Ответчик в судебном заседании в удовлетворении исковых требований просил отказать по доводам изложенным в отзыве .

В судебном заседании 14.07.2022 на основании ст. 163 АПК РФ был объявлен перерыв до 21.07.2022 г.

Информация о перерыве размещена на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области www.chel.arbitr.ru.

Рассмотрев материалы дела, заслушав истца, ответчика, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Как видно из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен муниципальный контракт  от 04.08.2021 № 199 ИКЗ 213744816494274480100101530014321244 (далее – контракт), по условиям п. 1.1. которого Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-восстановительные работы наружного освещения города Челябинска в соответствии с Техническим заданием (Приложение № I к контракту), Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом,

В соответствии с п. 1.2. контракта, место выполнения работ: 

<

...>.

В соответствии с п. 1.3. контракта, выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативных документов, установленных Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту).

 Цена Контракта составляет 1 005 528 рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен (п.2.1).

На основании выставленного Подрядчиком счета, Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 30% от цены Контракта, что составляет 301 658 рубля 90 копеек в течение 30 календарных дней с даты выставленного Подрядчиком счета (п.2.3.).

Оплата оставшейся суммы в размере 70 % от цены Контракта, указанная в п. 2.1. Контракта, что составляет 703 869 рубля 60 копеек, производится Заказчиком в течение 30 дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за фактически выполненный объем работ.

В соответствии с п. 3.1. контракта , сроки выполнения работ: срок начала работ: с даты заключения контракта; срок окончания работ: 15 ноября 2021 года

Для реализации настоящего контракта Подрядчик обязан выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями Контракта, в объеме и сдать результат выполненных работ Заказчику в срок установленный в п. 3.1. настоящего Контракта (п.4.1.1.).

Сдача выполненных работ Подрядчиком Заказчику осуществляется по факту завершения выполнения работ на объекте, Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика и приложить к извещению оформленные в установленном порядке акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в двух экземплярах, справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 в двух экземплярах, а также исполнительную документацию на выполненные работы, исходя из предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) (п.6.1.).

В соответствии с п. 6.3. контракта, Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика прилагаемых документов, указанных в пунктах 6.1, 6.2 Контракта:

-осуществляет осмотр выполненных работ при участии Подрядчика;

-осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие видов и объемах работ, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему контракту);

-подписывает представленный акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или/ замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации]

В соответствии с п. 6.4. контракта, в случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение двух дней со дня принятия решения об отказе составляется двусторонний акт выявленных недостатков с перечнем замечали и необходимых доработок, сроков их выполнения, в случае отказа Подрядчика от его подписания или составления, Заказчика в срок для составления акта направляет Подрядчику уведомление об устранении недостатков с перечнем замечаний и необходимых доработок, сроков их выполнения.

Подрядчик за свой счет и в указанный в Акте выявленных недостатков срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации (п.6.5.).

После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренными пунктами 6.1, 6.2 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком. Срок устранения недостатков не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Подрядчиком Акта выявленных недостатков (п.6.6.).

В соответствии с п. 7.8. контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В силу с п. 7.9. контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

15.11.2021 исх. № 76/54/19/5-10530 ответчик уведомил заказчика о выполнении предусмотренных контрактом работ.

30.11.2021 сторонами составлен двусторонний акт выявленных недостатков (т.2, л.д. 127), согласно которому, объем выполненных работ не соответствует объему выполненных работ, указанном в акте приемки выполненных работ. 

06.12.2021 в адрес подрядчика направлен мотивированный отказ от приемки выполненных работ, с требованием устранить выявленные недостатки.

Как следует из акта выполненных работ формы КС-2 № 1 от 04.12.2021 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 № 1 от 04.12.2021, подписанные со стороны заказчика 09.12.2021 (т.2, л.д. 128-133), работы выполнены ответчиком с нарушение предусмотренного контрактом срока.

16.12.2021 Истцом в адрес ответчика направлено требование об оплате неустойки в связи с нарушением срока выполнения работ, предусмотренного контрактом (т.2, л.д. 134).

20.12.2021 Сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 о расторжении контракта № 199 от 04.08.2021 ИКЗ 213744816494274480100101530014321244 (т.2, л.д. 125).

Также между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен муниципальный контракт от 17.08.2021 № КО-98/2021 ИКЗ 213744816494274480100101560034321244 (т.3, л.д. 1-8, далее – контракт), по условиям п. 1.1. которого  Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-восстановительные работы наружного освещения города Челябинска в соответствии с Техническим заданием (Приложение № I к контракту), Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Челябинск, Металлургический район, в соответствии с адресами, указанными в Техническом задании (Приложение №1 к контракту) (п.1.2.).

В соответствии с п. 1.3. контракта, выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативных документов, установленных Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту).

В соответствии с п. 2.1. контракта, цена Контракта составляет       4 142 849 (четыре миллиона сто сорок две тысячи восемьсот сорок девять) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

В соответствии с п. 2.3. контракта, на основании выставленного Подрядчиком счета, Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 30% от цены Контракта, что составляет 1 242 854,90 (один миллион двести сорок две тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек в течение 30 календарных дней с даты выставленного Подрядчиком счета.

Оплата оставшейся суммы в размере 70 % от цены Контракта, указанная в п. 2.1. Контракта, что составляет 2 899 994,10 (Два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 10 копеек, производится Заказчиком в течение 30 дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за фактически выполненный объем работ.

В соответствии с п. 3.1. контракта, сроки выполнения работ: срок начала работ: с даты заключения контракта; срок окончания работ: 15 ноября 2021 года.

Для реализации настоящего контракта Подрядчик обязан выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями Контракта, в объеме и сдать результат выполненных работ Заказчику в срок установленный в п. 3.1. настоящего Контракта (п.4.1.1.).

Разделы 6, 7 данного контракта идентичны условиям контракта  от 04.08.2021 № 199 ИКЗ 213744816494274480100101530014321244.

 

К контракту сторонами подписаны дополнительное соглашение №1/226 от 03.09.2021, Дополнительное соглашение № 2/939 от 20.12.2021 (т.3, л.д. 61-63)

15.11.2021 исх. № 76/54/19/5-10527 ответчик уведомил заказчика о выполнении предусмотренных контрактом работ.

29.11.2021 в адрес подрядчика направлен мотивированный отказ от приемки выполненных работ, с требованием устранить выявленные недостатки (т.3. л.д. 86).

30.11.2021 сторонами составлен двусторонний акт выявленных недостатков (т.3, л.д. 87), согласно которому, объем выполненных работ не соответствует объему выполненных работ, указанном в акте приемки выполненных работ. 

Как следует из акта выполненных работ формы КС-2 № 1 от 03.12.2021 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 № 1 от 04.12.2021, из акта выполненных работ формы КС-2 № 2 от 03.12.2021 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 № 2 от 03.12.2021, подписанных со стороны заказчика 08.12.2021, из акта выполненных работ формы КС-2 № 3 от 03.12.2021 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 № 3 от 04.12.2021, из акта выполненных работ формы КС-2 № 4 от 03.12.2021 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 № 4 от 03.12.2021, подписанных со стороны заказчика 08.12.2021 (т.3, л.д. 68-85), работы выполнены ответчиком с нарушение предусмотренного контрактом срока.

16.12.2021 Истцом в адрес ответчика направлено требование об оплате неустойки в связи с нарушением срока выполнения работ, предусмотренного контрактом (т.3, л.д. 88).

20.12.2021 Сторонами подписано дополнительное соглашение № 2/395 о расторжении контракта № КО-98/2021 ИКЗ 213744816494274480100101560034321244 (т.3, л.д. 67).

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен муниципальный контракт от 06.08.2021 № КО-94/21/2003 ИКЗ 213744816484274480100101560024321244 (т.3, л.д. 90-97, далее – контракт), по условиям п. 1.1. которого, Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-восстановительные работы наружного освещения города Челябинска в соответствии с Техническим заданием (Приложение № I к контракту), Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

В соответствии с п. 1.2. контракта, место выполнения работ: Российская Федерация, г. Челябинск, Металлургический район, от дома 3а по улице 50-летия ВЛКСМ до дома 52а по улице Жукова.

В соответствии с п. 1.3. контракта, выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативных документов, установленных Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту).

В соответствии с п. 2.1. контракта, цена Контракта составляет 1286 412,00(один миллион двести восемьдесят шесть тысяч четыреста двенадцать) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

В соответствии с п. 2.2.контракта, источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

На основании выставленного Подрядчиком счета, Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 30% от цены Контракта, что составляет 385 923,60 (триста восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 60 копеек в течение 30 календарных дней с даты выставленного Подрядчиком счета.

Оплата оставшейся суммы в размере 70 % от цены Контракта, указанная в п. 2.1, Контракта, что составляет 900 488,40 (девятьсот тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 40 копеек, производится Заказчиком в течение 30 дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за фактически выполненный объем работ (п.2.3.).

В соответствии с п. 3.1.контракта срок начала работ: с даты заключения контракта; срок окончания работ: 15 ноября 2021 года.

В соответствии с п. 4.1.1 контракта, для реализации настоящего контракта Подрядчик обязан выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями Контракта, в объеме и сдать результат выполненных работ Заказчику в срок установленный в п. 3.1. настоящего Контракта.

Разделы 6, 7 данного контракта идентичны условиям контракта  от 04.08.2021 № 199 ИКЗ 213744816494274480100101530014321244.

К контракту сторонами подписаны дополнительное соглашение №1/225 от 03.09.2021, Дополнительное соглашение № 2/246 от 05.10.2021, Дополнительное соглашение № 3/360 от 01.12.2021, Дополнительное соглашение № 4/392 от 20.12.2021 (т.3, оборот л.д. 116-117, л.д. 120,)

15.11.2021 исх. № 76/54/19/5- ответчик уведомил заказчика о выполнении предусмотренных контрактом работ.

29.11.2021 в адрес подрядчика направлен мотивированный отказ от приемки выполненных работ, с требованием устранить выявленные недостатки (т.3. л.д. 133).

30.11.2021 сторонами составлен двусторонний акт выявленных недостатков (т.3, л.д. 134), согласно которому, объем выполненных работ не соответствует объему выполненных работ, указанном в акте приемки выполненных работ. 

Как следует из акта выполненных работ формы КС-2 № 1 от 06.12.2021 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 № 1 от 06.12.2021, подписанных со стороны заказчика 08.12.2021 (т.3, л.д. 129-132), работы выполнены ответчиком с нарушение предусмотренного контрактом срока.

16.12.2021 Истцом в адрес ответчика направлено требование об оплате неустойки в связи с нарушением срока выполнения работ, предусмотренного контрактом (т.3, л.д. 135).

20.12.2021 Сторонами подписано дополнительное соглашение 

№ 5/394 о расторжении контракта № КО-94/21/203 ИКЗ 213744816484274480100101560024321244 (т.3, л.д. 128).

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен муниципальный контракт от 01.09.2021 № КО-100/21/222 ИКЗ 213744816494274480100101590014321244 (т.2, л.д. 1-4, далее – контракт), по условиям п. 1.1. контракта, Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-восстановительные работы наружного освещения города Челябинска в соответствии с Техническим заданием (Приложение № I к контракту), Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

В соответствии с п. 1.2. контракта, место выполнения работ: Российская Федерация, г. Челябинск, Советский район, в соответствии с адресами, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).

В соответствии с п. 1.3. контракта, выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативных документов, установленных Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту).

В соответствии с п. 2.1. контракта, цена Контракта составляет 17 204 290 (Семнадцать миллионов двести четыре тысячи двести девяносто) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

 Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (п.2.2.).

В соответствии с п. 2.3. контракта, на основании выставленного Подрядчиком счета, Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 30% от цены Контракта, что составляет 5 161 287 (Пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят семь) рублей 00 копеек в течение 30 календарных дней с даты выставленного Подрядчиком счета.

Оплата оставшейся суммы в размере 70 % от цены Контракта, указанная в п. 2.1. Контракта, что составляет 12 043 003 (Двенадцать миллионов сорок три тысячи три) рубля 00 копеек, производится Заказчиком в течение 30 дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за фактически выполненный объем работ. 

В соответствии с п. 3.1. контракта сроки выполнения работ:  срок начала работ: с даты заключения контракта; срок окончания работ: 15 ноября 2021 года.

Для реализации настоящего контракта Подрядчик обязан выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями Контракта, в объеме и сдать результат выполненных работ Заказчику в срок установленный в п. 3.1. настоящего Контракта (п.4.1.1.).

Разделы 6, 7 данного контракта идентичны условиям контракта  от 04.08.2021 № 199 ИКЗ 213744816494274480100101530014321244.

К контракту сторонами подписаны дополнительное соглашение № 1/358 от 15.11.2021, Дополнительное соглашение № 2/359 от 03.12.2021, Дополнительное соглашение № 3/391 (т.2, оборот л.д. 39-40)

15.11.2021 исх. № 76/54/19/5-10531 ответчик уведомил заказчика о выполнении предусмотренных контрактом работ.

29.11.2021 в адрес подрядчика направлен мотивированный отказ от приемки выполненных работ, с требованием устранить выявленные недостатки (т.2. л.д. 101).

30.11.2021 сторонами составлен двусторонний акт выявленных недостатков (т2, л.д. 102), согласно которому, объем выполненных работ не соответствует объему выполненных работ, указанном в акте приемки выполненных работ. 

Как следует из актов выполненных работ формы КС-2 № 1, №2, № 3,№ 4,№ 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 от 06.12.2021, и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 № 1, №2, № 3,№ 4,№ 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, подписанных со стороны заказчика 09.12.2021 (т.2, л.д. 43-100), работы выполнены ответчиком с нарушение предусмотренного контрактом срока.

16.12.2021 Истцом в адрес ответчика направлено требование об оплате неустойки в связи с нарушением срока выполнения работ, предусмотренного контрактом (т.2, л.д. 105).

20.12.2021 Сторонами подписано дополнительное соглашение № 4/397 о расторжении контракта КО-100/21/222 ИКЗ 213744816494274480100101590014321244 (т.2, оборот л.д. 112).

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен муниципальный контракт от 06.08.2021 № КО-93/21 ИКЗ 213744816494274480100101560014321244 (т.1, л.д. 118-121, далее – контракт), по условиям п. 1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-восстановительные работы наружного освещения города Челябинска в соответствии с Техническим заданием (Приложение № I к контракту), Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

В соответствии с п. 1.2. контракта, место выполнения работ: Российская Федерация, г. Челябинск, Центральный район, в соответствии с адресами, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).

В соответствии с п. 1.3. контракта, выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативных документов, установленных Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту).

В соответствии с п. 2.1. контракта, цена Контракта составляет 5 854 323,00(пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать три) рубля 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (п.2.2.).

В соответствии с п. 2.3. контракта, на основании выставленного Подрядчиком счета, Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 30% от цены Контракта, что составляет 1 756 296,90 (один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч двести девяносто шесть) рублей 90 копеек в течение 30 календарных дней с даты выставленного Подрядчиком счета.

Оплата оставшейся суммы в размере 70 % от цены Контракта, указанная в п. 2.1. Контракта, что составляет 4 098 026,10 (четыре миллиона девяносто восемь тысяч двадцать шесть) рублей 10 копеек, производится Заказчиком в течение 30 дней с даты подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за фактически выполненный объем работ. 

В соответствии с п. 3.1. контракта сроки выполнения работ: срок начала работ: с даты заключения контракта; срок окончания работ: 15 ноября 2021 года.

Для реализации настоящего контракта Подрядчик обязан выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями Контракта, в объеме и сдать результат выполненных работ Заказчику в срок установленный в п. 3.1. настоящего Контракта (п.4.1.1.).

Разделы 6, 7 данного контракта идентичны условиям вышеуказанного контракта  от 04.08.2021 № 199 ИКЗ 213744816494274480100101530014321244.

К контракту сторонами подписано Дополнительное соглашение № 2/390 от 03.12.2021, Дополнительное соглашение № 3/391 (т.1, л.д. 145)

15.11.2021 исх. № 76/54/19/5-10528 ответчик уведомил заказчика о выполнении предусмотренных контрактом работ.

29.11.2021 в адрес подрядчика направлен мотивированный отказ от приемки выполненных работ, с требованием устранить выявленные недостатки (т.1. л.д. 146).

30.11.2021 сторонами составлен двусторонний акт выявленных недостатков (т.1, л.д. 147), согласно которому, объем выполненных работ не соответствует объему выполненных работ, указанном в акте приемки выполненных работ. 

Как следует из актов выполненных работ формы КС-2 № 1, №2, № 3, № 4 от 06.12.2021, и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 № 1, № 2, № 3, № 4 подписанных со стороны заказчика 08.12.2021 и 09.12.2021 (т.1, л.д. 148-167), работы выполнены ответчиком с нарушение предусмотренного контрактом срока.

16.12.2021 Истцом в адрес ответчика направлено требование об оплате неустойки в связи с нарушением срока выполнения работ, предусмотренного контрактом (т.1, л.д. 168).

20.12.2021 Сторонами подписано дополнительное соглашение № 2/390 о расторжении контракта от 06.08.2021 № КО-93/21 ИКЗ 213744816494274480100101560014321244 (т.1, оборот л.д. 145).

Поскольку требование истца об оплате неустойки по всем вышеуказанным 5 контрактам ответчиком не исполнено, истец обратился в суд с настоящим иском.

Правоотношения сторон по контракту регулируются главой 37 ГК РФ, а также ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить для другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядные строительные работы (статья 740 Гражданского кодекса Российской Федерации), проектные и изыскательские работы (статья 758 Гражданского кодекса Российской Федерации), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд (статья 768 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким законом в системе права Российской Федерации является Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

По смыслу приведенных норм права, определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком. Приемка выполненных работ является важным моментом в договоре подряда, осуществляется с учетом акта выполненных работ и является обязанностью заказчика при условии сообщения подрядчика о готовности его к сдаче.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств является неустойка (пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Истцом произведен расчет пени по всеми пяти контрактам, размер которой составляет 146 588 руб. 33 коп. (т. 1 л.д.4-7).

Ответчик контррасчет неустойки не представил.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 69 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7, подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ)

Ответчиком мотивированных возражений по размеру пени не заявлено, контррасчет неустойки не представлен, равно как и не предоставлены доказательства ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства, и не заявлено ходатайство о снижении неустойки.

При таких обстоятельствах суд не усматривает оснований для снижения неустойки по основаниям ст. 333 ГК РФ.

Таким образом, исследовав представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что требования истца о взыскании пени являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Доводы отзыва об отсутствии нарушений срока, установленного муниципальными контрактами для выполнения работ, судом отклоняются на основании следующего.

В соответствии с п. 6.4. контрактов, в случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение двух дней со дня принятия решения об отказе составляется двусторонний акт выявленных недостатков с перечнем замечали и необходимых доработок, сроков их выполнения, в случае отказа Подрядчика от его подписания или составления, Заказчика в срок для составления акта направляет Подрядчику уведомление об устранении недостатков с перечнем замечаний и необходимых доработок, сроков их выполнения.

В соответствии с п. 6.5. указанных контрактов,  Подрядчик за свой счет и в указанный в Акте выявленных недостатков срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации.

В соответствии с п. 6.6. контрактов, после устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренными пунктами 6.1, 6.2 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком. Срок устранения недостатков не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Подрядчиком Акта выявленных недостатков.

В материалы дела представлены мотивированные отказы от приемки работ по каждому из вышеназванных муниципальных контрактов, а также двусторонние акты о выявленных недостатках, составленные с участие представителя ответчика и ответчиком не оспоренные.

Ответчиком не оспаривается факт выполнения работ с недостатками, факт устранения недостатков не ранее 03.12.2021, как даты подписания актов выполненных работ.

Поскольку судом установлен факт нарушения обязательств ответчиком, исковые требования о взыскании пени по контракту являются законными, обоснованными и подлежащими  удовлетворению в заявленном истцом размере 146 588 руб. 33 коп.

Истцом при подаче иска в суд оплачена государственная пошлина в размере 5 398 руб. 00 коп. (т.1, л.д. 9).

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 8 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» в пользу муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» неустойку за нарушение сроков выполнения работ по муниципальным контрактам в размере 146 588 руб. 33 коп., а также в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 5 398 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья                                                                                   Е.Н. Соцкая

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.arbitr.ru.