Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

http://tambov.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А64-8198/2020

г. Тамбов

23 декабря 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 21.12.2020.

Полный текст решения изготовлен 23.12.2020.

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.В. Истомина,   

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Д. Комаровой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Ас-Нова», г. Тамбов                              (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к 

обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Компания козерог», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании задолженности

 

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО1, представитель по доверенности от 02.11.2020, 

от ответчика - не явился, извещен. 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Ас-Нова» (далее – ООО «Ас-Нова», Проектировщик, истец) обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Компания козерог» (далее – ООО «специализированный застройщик «Козерог», Застройщик, Заказчик, ответчик) о взыскании основного долга по договору на выполнение проектных работ №16-19 от 06.05.2019,  договору № 14-19 на выполнение проектных работ от 06.05.2019 в размере 2 880 000 руб. и пени в размере 374 560 руб.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте слушания дела, явку уполномоченного представителя в судебное заседание не обеспечил, как и не обеспечил представление в материалы дела отзыва на исковое заявление.

С учетом мнения представителя истца полагавшего возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие ответчика, положений ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ), рассмотрение дела продолжено в отсутствие ответчика.

Вместе с тем судом учтено, что представитель ответчика, принимавший участие в предварительном судебном заседании не оспаривал сумму основного долга и заявил лишь чрезмерности размера пени. 

При исследовании обстоятельств, послуживших основанием для обращения в арбитражный суд области с настоящим иском установлено, что 06 мая 2019 г. по инициативе Застройщика, между обществом с ограниченной ответственностью «АС-нова» (Проектировщик, истец) и обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Компания Козерог» (Заказчик, ответчик) заключен Договор на выполнение проектных работ №16-19 (далее - Договор1), по условиям которого Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию Заказчика подготовить проект многоквартирного жилого дома по ул.Пахотная 18 в г. Тамбове (далее - работы), а Заказчик, согласно п. 1.2 - обязуется принять и оплатить выполненную Проектировщиком работу.

Согласно п. 2.1 Договора1- срок начала работ 06.05.2019.

Срок сдачи работ: согласно календарного плана работ, является неотъемлемой частью договора (п. 2.2). 

Согласно п. 3.1, п. 3.2 Договора1, за выполненные работы указанные в п. 1.1 настоящего договора, согласно договорной цены, Заказчик обязан уплатить Проектировщику 2 400 000 рублей без НДС. Оплата аванса по первому этапу проектирования согласно календарного плана работ, производится в размере 800 000 рублей до 14 мая 2019 года.

Согласно п. 3.3. Договора1, оплата работ по второму этапу проектирования производится согласно календарного плана работ в размере 800 000 рублей, до 22июля2019 года.

Согласно п. 3.4. Договора1, оплата работ по третьему этапу проектирования производится согласно календарного плана работ в размере 800 000 рублей, после подписанного Акта сдачи-приемки работ в пятидневный срок.

В соответствии с п. 3.5. Договора1, оплата счетов Проектировщика производится Заказчиком по безналичному расчету.

Согласно п. 6.3. Договора1, Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ обязан направить Проектировщику подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания. 

При мотивированном отказе, Заказчик предоставляет аргументированные замечания и обязуется возвратить экземпляр рабочего проекта Проектировщику для их устранения в отдельно согласованные сроки (п. 6.4). 

Истец свои обязательства по Договору1 выполнил в полном объеме, что подтверждается материалами дела: актами сдачи –приемки работ/продукции № б/н от 16.09.2019, на сумму 800 000 руб., № б/н от 01.11.2019 на сумму 800 000 руб., № б/н от 05.02.2020 на сумму 800 000 руб. (л.д. 12- 14). 

По Договору1 общая сумма выполненных работ составляет 2 400 000 рублей.

Ответчик частично оплатил задолженность по Договору 1 в размере 400 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 2575 от 31.07.2020 года.

Задолженность ответчика перед истцом по Договору1 составила 2 000 000 руб. 

Также по инициативе Заказчика, 06 мая 2019 г. между истцом и ответчиком был заключен Договор на выполнение проектных работ № 14-19 (далее -Договор 2).

В соответствии с пунктами Договора2 Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить: проект многоквартирного жилого дома по ул. Пахотная 20 в г. Тамбове (далее - работы), а Заказчик, согласно п. 1.2 - обязуется принять и оплатить выполненную Проектировщиком работу.

Согласно п. 3.1, п. 3.2 Договора2, за выполненные работы указанные в п. 1.1 настоящего договора, согласно договорной цены, Заказчик обязан уплатить Проектировщику 2 400 000 рублей без НДС.

Оплата аванса по первому этапу проектирования согласно календарному плану работ, производится в размере 800 000  рублей до 14 мая 2019 года.

Согласно п. 3.3. Договора2, оплата работ по второму этапу проектирования производится согласно календарному плану работ в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, до 31 мая 2019 года.

Согласно п. 3.4. Договора2, оплата работ по третьему этапу проектирования производится согласно календарного плана работ в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, после подписанного Акта сдачи-приемки работ в пятидневный срок.

В соответствии с п. 3.5. Договору2 оплата счетов Проектировщика производится Заказчиком по безналичному расчету.

Согласно п. 6.3. Договора2, Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ обязан направить Проектировщику подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания. 

При мотивированном отказе Заказчик предоставляв (аргументированные замечания и  обязуется возвратить  экземпляр рабочего проекта Проектировщику для их устранения в отдельно согласованные сроки (п. 6.4). 

С момента заключения Договора2, Проектировщиком со своей стороны надлежащим образом выполнялись его условия. Основные этапы выполнения работ истцом оказаны в срок, в соответствии с условиями «Календарного плана работ» являющегося неотъемлемой частью Договора2.

Факт выполнения работ зафиксирован путем подписания без разногласий актов сдачи-приемки работ по итогам каждого этапа в рамках действия Договора. 

Акты сдачи- приемки работ/ продукции № б/н от 16.09.2019, на сумму 800 000 руб., № б/н от 09.10.2019 на сумму 800 000 руб., № б/н от 21.02.2020 на сумму 800 000 руб. (л.д. 17- 19). 

По Договору2 общая сумма выполненных работ составляет 2 400 000 рублей.

В нарушение условий Договора2 оплата за выполненные истцом работы ответчиком не была произведена в полном объеме, а производилась лишь частичная оплата:

500 000 (пятьсот тысяч) рублей по платежному получению №1762 от 14.05.2019 года;

190 000 (сто девяносто) тысяч рублей по платежному поручению № 467 от 01.06.2020 года;

570 000 (пятьсот семьдесят) тысяч рублей по платежному поручению № 3506 от 28.09.2020 года;

260 000 (двести шестьдесят) тысяч рублей по платежному поручению № 3544 от 29.09.2020 года.

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом по Договору 2 составляет 800 000 рублей.

Согласно п. 5.3 Договоров, за просрочку оплаты Заказчик выплачивает Проектировщику пени из расчета 0,05% за каждый день просрочки от неоплаченной стоимости работ.

Истец начислил ответчику пени по договору №16-19 на выполнение проектных работ от 06.05.2019 за период с 11.02.2020 по 01.11.2020 вследствие неисполнения договорных обязательств по оплате выполненных работ в размере 265 000 руб.;

- по договору №14-19 на выполнение проектных работ от 06.05.2019 за период с 27.02.2020 по 01.11.2020 вследствие неисполнения договорных обязательств по оплате выполненных работ в размере 109 560 руб.

Оставление претензионных писем от 01.10.2020 без удовлетворения, послужили основанием к обращению истца в арбитражный суд области с настоящим иском (л.д. 27-28).  

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, выслушав пояснения представителя истца, суд признает иск обоснованным, подлежащим удовлетворению. 

Частью 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ определено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

По правилам ст. 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе РФ.

В настоящем споре обязательства сторон возникли в связи с заключением договора №16-19 на выполнение проектных работ от 06.05.2019, договора №14-19 на выполнение проектных работ от 06.05.2019. 

К спорным правоотношениям следует применить нормы гражданского законодательства о подряде (гл. 37 ГК РФ).

В соответствии со ст.758 Гражданского кодекса РФ, по договору подряда на выполнение  проектных  и изыскательских работ  подрядчик (исполнитель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить  изыскательские  работы,  а заказчик обязуется принять и оплатить их.

Согласно ст.762 ГК РФ, по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором, уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

В соответствии с п.1 ст.720 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Из положений статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ следует, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Частью 1 ст. 314 Гражданского кодекса РФ определено, что если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения, либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами (ч. 1 ст. 424 Гражданского кодекса РФ).

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных её этапов, заказчик в силу ч. 1 ст. 711 Гражданского кодекса  РФ обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п.1 ст. 708 ГК, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с пунктами Договора 1, Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить: проект многоквартирного жилого дома по ул.Пахотная 18 в г. Тамбове (далее - работы), а Заказчик, согласно п. 1.2 - обязуется принять и оплатить выполненную Проектировщиком работу.

Согласно п. 2.1 Договора1, срок начала работ 06.05.2019.

Срок сдачи работ: согласно календарного плана работ, является неотъемлемой частью договора ( п. 2.2). 

Согласно п. 3.1, п. 3.2 Договора1, за выполненные работы указанные в п. 1.1 настоящего договора, согласно договорной цены, Заказчик обязан уплатить Проектировщику 2 400 000 рублей без НДС. Оплата аванса по первому этапу проектирования согласно календарного плана работ, производится в размере 800 000 рублей до 14 мая 2019 года.

Согласно п. 3.3. Договора1, оплата работ по второму этапу проектирования производится согласно календарного плана работ в размере 800 000 рублей, до 22июля2019 года.

Согласно п. 3.4. Договора1, оплата работ по третьему этапу проектирования производится согласно календарного плана работ в размере 800 000 рублей, после подписанного Акта сдачи-приемки работ в пятидневный срок.

В соответствии с п. 3.5. Договора1, оплата счетов Проектировщика производится Заказчиком по безналичному расчету.

Согласно п. 6.3. Договора1, Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ обязан направить Проектировщику подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания. 

При мотивированном отказе Заказчик предоставляет аргументированные замечания и обязуется возвратить экземпляр рабочего проекта Проектировщику для их устранения в отдельно согласованные сроки ( п. 6.4). 

Истец свои обязательства по Договору1 выполнил в полном объеме, что подтверждается материалами дела: Актами сдачи –приемки работ/продукции № б/н от 16.09.2019, на сумму 800 000 руб., № б/н от 01.11.2019 на сумму 800 000 руб., № б/н от 05.02.2020 на сумму 800 000 руб. ( л.д. 12- 14). 

По Договору1 общая сумма выполненных работ составляет 2 400 000 рублей.

Ответчик частично оплатил задолженность по Договору1 в размере 400 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 2575 от 31.07.2020 года.

Задолженность ответчика перед истцом по Договору 1 составила 2 000 000 руб. 

В соответствии с пунктами Договора 2 Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию Заказчика выполнить: проект многоквартирного жилого дома по        ул. Пахотная, д. 20 в г. Тамбове (далее - работы), а Заказчик, согласно п. 1.2 - обязуется принять и оплатить выполненную Проектировщиком работу.

Согласно п. 3.1, п. 3.2 Договора2, за выполненные работы указанные в п. 1.1 настоящего договора, согласно договорной цены, Заказчик обязан уплатить Проектировщику 2400000рублей без НДС.

Оплата аванса по первому этапу проектирования согласно календарному плану работ, производится в размере 800 000  рублей до 14 мая 2019 года.

Согласно п. 3.3.Договора2, оплата работ по второму этапу проектирования производится согласно календарному плану работ в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, до 31 мая 2019 года.

Согласно п. 3.4. Договора2, оплата работ по третьему этапу проектирования производится согласно календарного плана работ в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, после подписанного Акта сдачи-приемки работ в пятидневный срок.

В соответствии с п. 3.5. Договору2 оплата счетов Проектировщика производится Заказчиком по безналичному расчету.

Согласно п. 6.3. Договора2,  Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ обязан направить Проектировщику подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания. 

При мотивированном отказе Заказчик предоставляв (аргументированные замечания и  обязуется возвратить  экземпляр рабочего проекта Проектировщику для их устранения в отдельно согласованные сроки (п. 6.4). 

С момента заключения Договора2, Проектировщиком со своей стороны надлежащим образом выполнялись его условия. Основные этапы выполнения работ истцом оказаны в срок, в соответствии с условиями «Календарного плана работ» являющегося неотъемлемой частью Договора2.

Факт выполнения работ зафиксирован путем подписания актов сдачи-приемки работ по итогам каждого этапа в рамках действия Договора, а именно: 

Акты сдачи- приемки работ/ продукции № б/н от 16.09.2019, на сумму 800 000 руб., № б/н от 09.10.2019 на сумму 800 000 руб., № б/н от 21.02.2020 на сумму 800 000 руб. (л.д. 17- 19). 

По Договору2 общая сумма выполненных работ составляет 2 400 000 рублей.

В нарушение условий Договора2 оплата за выполненные истцом работы ответчиком не была произведена в полном объеме, а производилась лишь частичная оплата:

500 000 (пятьсот тысяч) рублей по платежному получению №1762 от 14.05.2019 года;

190 000 (сто девяносто) тысяч рублей по платежному поручению № 467 от 01.06.2020 года;

570 000 (пятьсот семьдесят) тысяч рублей по платежному поручению № 3506 от 28.09.2020 года;

260 000 (двести шестьдесят) тысяч рублей по платежному поручению № 3544 от 29.09.2020 года.

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом по Договору 2 составляет 800 000 рублей.

Ответчик же обязательства по Договорам не исполнил в полном объеме. 

Требование истца о взыскании задолженности по Договорам в размере 2880000руб. заявлено истцом обоснованно и подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлены требования о взыскании с ответчика пени за нарушение условий Договоров: 

 по договору №16-19 на выполнение проектных работ от 06.05.2019 пени за период с 11.02.2020 по 01.11.2020 вследствие неисполнения договорных обязательств по оплате выполненных работ в размере 265 000 руб.;

по договору №14-19 на выполнение проектных работ от 06.05.2019 пени за период с 27.02.2020 по 01.11.2020 вследствие неисполнения договорных обязательств по оплате выполненных работ в размере 109 560 руб.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными залогом или договором.

В соответствии с п. 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения кредитору потерь, вызванных нарушением должником своих обязательств.

В соответствии с пунктом 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст.422).

Согласно п. 5.3 Договоров, за просрочку оплаты Заказчик выплачивает Проектировщику пени из расчета 0,05% за каждый день просрочки от неоплаченной стоимости работ.

Суд признает обоснованными исковые требования о взыскании пени по договору №16-19 на выполнение проектных работ от 06.05.2019 за период с 11.02.2020 по 01.11.2020 вследствие неисполнения договорных обязательств по оплате выполненных работ в размере 265 000 руб.;

- по договору №14-19 на выполнение проектных работ от 06.05.2019 за период с 27.02.2020 по 01.11.2020 вследствие неисполнения договорных обязательств по оплате выполненных работ в размере 109 560 руб., а приведенные в предварительном судебном заседании доводы ответчика о чрезмерности сумме пени несостоятельными.

Оснований для снижения размера пени, предъявленного ко взысканию истцом, суд не усматривает.    

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору сторон согласно заявленным основаниям, предмету иска, суд находит достаточными для разрешения спора по существу.

Частью 1 ст. 110 АПК РФ определено, что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Компания козерог», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ас-Нова», г. Тамбов                              (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 3 254 560 руб., из которых: 

2 000 000 руб. - основной долг по договору №16-19 на выполнение проектных работ от 06.05.2019 и 265 000 руб. - пени, начисленные за период с 11.02.2020 по 01.11.2020 вследствие неисполнения договорных обязательств по оплате выполненных работ; 

880 000 руб. - основной долг по договору №14-19 на выполнение проектных работ от 06.05.2019 и 109 560 руб. - пени, начисленные за период с 27.02.2020 по 01.11.2020 вследствие неисполнения договорных обязательств по оплате выполненных работ, а также, расходы по уплате государственной пошлины в размере 39 273 руб. 

2. Исполнительный лист выдать истцу по его заявлению после вступления решения в законную силу.

3. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу 394006, 

<

...>  через Арбитражный суд Тамбовской области.

 

Судья                                                                                                   А.В. Истомин