АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-4254/2019

27 декабря 2022 г.

г. Севастополь

 

руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  «Стройпроект» удовлетворить частично.  

Признать Решение от 21.08.2019 № 5721 об отказе от исполнения  государственного контракта от 21.11.2017 № 9-ПИР/2017 (РНК  2920400768117000074) недействительным.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города  Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 299053, 

<

...> здание 33-в, офис 204) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Стройпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  355008, 

<

...>. оф. 302) 8 379 588,03  рублей, в том числе:  

- 2 100 000,00 руб. - 50% стоимости инженерных изысканий, проектной  документации;  

- 2 100 100 руб. - стоимость дополнительных расходов по повторной  разработке проектной документации, вызванных изменением исходных  данных вследствие обстоятельств, не зависящих от ООО «Стройпроект»;  

Код доступа к материалам дела: 

 

- 204 000 руб. - стоимость разработки раздела ОВОС; 

- 476 625,00 руб. - фактической стоимости проведения  государственной экологической экспертизы (первичной и повторной);  

- 3 000 000,00 руб. - стоимость разработанной рабочей документации. 

- 293 335,81 руб. - неустойки (пени) за нарушение срока оплаты 50%  стоимости инженерных изысканий, проектной документации;  

- 205 627,22 руб. - неустойки (пени) срока оплаты дополнительных  расходов по повторной разработке проектной документации, вызванных  изменением исходных данных, по разработке, раздела ОВОС, фактической  стоимости государственной экологической экспертизы. В остальной части  требований отказать.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Взыскать частично с Государственного казенного учреждения города  Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 299053, 

<

...> здание 33-в, офис 204) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Стройпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  355008, 

<

...>. оф. 302) расходы по оплате  государственной пошлины в размере 70 454,34 руб., оплаченной платежными  поручениями № 480 от 02.09.2019, № 66 от 16.02.2021, чеком-ордером от  03.03.2021. В остальной части требований отказать.  

Взыскать частично с Государственного казенного учреждения города  Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 299053, 

<

...> здание 33-в, офис 204) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Стройпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  355008, 

<

...>. оф. 302) судебные издержки  по оплате судебной экспертизы в размере 148 385,95 руб., оплаченные  платежным поручением № 234 от 25.06.2021. В остальной части требований  отказать.  

 

В удовлетворении встречных исковых требований Государственного  казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального  строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 299053, 

<

...> здание 33-в, офис 204) отказать полностью.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города  Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 299053, 

<

...> здание 33-в, офис 204) в федеральный бюджет сумму  государственной пошлины, оплачиваемой при подаче иска в арбитражный  суд в размере 33 500,00 рублей.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня  его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано  через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.  

Судья А.Ю. Смоляков  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 5:30:47

Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич