АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск 24.03.2025 Дело № А62-7867/2024  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Каринской И. Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шумко П.Е.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Веста» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

об обязании заключить договор технологического присоединения к электрическим сетям,  

при участии в судебном заседании: 

от истца (посредством системы веб-конференции): ФИО1 – представитель по доверенности от 29.07.2024; ФИО2 – представитель по доверенности от 29.07.2024;  

от ответчика: ФИО3 – представитель по доверенности от 14.09.2024;  

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Обязать Публичное акционерное общество «Россети Центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице Филиала ПАО «Россети Центр»«Смоленскэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 673102001) заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Веста» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 42499309 на следующих условиях:  

«ДОГОВОР № 42499309  

об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям  

Публичное акционерное общество «Россети Центр», именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» ФИО4, действующего на основании доверенности № Д-ЦА/136 от 24.07.2023 г., с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Веста» (ООО «Веста»), ОГРН: 

<

***> от 28.12.2007, в лице генерального директора ФИО5, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя на основании заявки № 17494156 от 01.03.2024, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее - энергопринимающие устройства) объекта туристической отрасли (далее - технологическое присоединение) по адресу: Смоленская область, муниципальный район Гагаринский, сельское поселение Кармановское, деревня Выродово, земельный участок с кадастровым номером: 67:03:0030101:6206, со следующими характеристиками:  

 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 1350 кВт (дополнительно к ранее присоединенной мощности в размере 300 кВт по уровню напряжения 10 кВ),  

 в том числе по категориям надежности: III (третья) - 1650 кВт;  точки присоединения: 

 контактные соединения ЛЭП 10 кВ Заявителя с проводами проектируемой ЛЭП-10 кВ на последней опоре на границе участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты Заявителя. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств в точке присоединения - 1350 кВт.  

 контактные соединения ЛЭП 10 кВ Заявителя с ВЛ-10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ Дружба на опоре № 135. Максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке присоединения - 300 кВт.  

 Существующие точки присоединения: 

 контактные соединения ЛЭП 10 кВ Заявителя с ВЛ-10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ «Дружба» на опоре № 135. Максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке присоединения - 300 кВт.  

Максимальная мощность, разрешенная к одномоментному  

использованию, по 2 (двум) точкам присоединения не должна превышать 1650 кВт.  

 класс напряжения в точках присоединения: 10 кВ, 

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая при необходимости их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).  

Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные для него в технических условиях (далее -ТУ) в срок, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Договора, внести плату за технологическое присоединение и в случае расторжения/изменения договора и/или иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, оплатить фактически  

понесенные сетевой организацией расходы в соответствии с условиями настоящего Договора. Местом исполнения договора является местонахождение присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя.  

1.2. Перечень мероприятий по технологическому 

присоединению и распределение обязанностей между Сторонами по их выполнению определены в Технических условиях (приложение 1 к настоящему Договору).  

1.3. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему Договору Сторонами составляет 2 (два) года с даты заключения Договора.  

1.4. В случае если отдельным соглашением не будет установлено иное, сетевая организация несет балансовую и эксплуатационную ответственность до границ участка Заявителя, а Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в пределах границ участка, до точек присоединения, указанных в технических условиях.  

Порядок оформления Акта об осуществлении технологического присоединения устанавливается в соответствии с пунктами 2.1.5 и 2.3.9 настоящего Договора.  

1.5. Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением к настоящему Договору, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Сетевая организация обязуется:  

2.1.1. Надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства по  

настоящему Договору и осуществить фактическое присоединение  

энергопринимающих устройств Заявителя при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему Договору.  

2.1.2. В случае если в ходе проектирования у Заявителя возникнет необходимость частичного отступления от технических условий, рассмотреть возможность согласования частичного отступления от технических условий в порядке, предусмотренном законодательством.  

2.1.3. После получения уведомления о выполнении Заявителем ТУ осуществить проверку выполнения Заявителем ТУ в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила ТП).  

2.1.4. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения копии разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя осуществить фактический прием (подачу) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").  

2.1.5. После осуществления Сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) Заявителя и фактического приема (подачи) напряжения и мощности с учетом срока, указанного в пункте 1.5 Договора, подписать и направить Заявителю способом, подтверждающим отправку и получение, в электронном виде Акт об осуществлении технологического присоединения, подписанный со стороны Сетевой организации в 2 (двух) экземплярах.  

2.1.6. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Заявителя уведомления об отказе от исполнения обязательств по настоящему Договору, направить в адрес Заявителя способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения, письмо с указанием суммы фактически понесенных расходов, связанных с исполнением договора, содержащее требование об их компенсации.  

2.1.7. Направить заявителю в двух экземплярах подписанное со своей стороны дополнительное соглашение с новым расчетом платы за технологическое присоединение в случае изменений законодательства РФ, связанных с введением/исключением или повышением/понижением размера налогов и сборов, иных обязательных платежей. Изменение тарифного решения, указанного в п. 3.1 договора, в период действия договора не является основанием для пересмотра платы за технологическое присоединение.  

2.2. Сетевая организация имеет право: 2.2.1. Проверять ход выполнения заявителем технических условий. 

2.2.2. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

2.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по настоящему Договору. В том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, привлекаемых для реализации своих мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации.  

2.2.4. В случае нарушения заявителем обязанностей, предусмотренных п. 3.1 Договора, в том числе в случае нарушения срока оплаты любого из платежей, указанных в п. 3.1.1. Договора, Сетевая организация в качестве способа защиты своего нарушенного права может обратиться в суд с иском о взыскании с Заявителя подлежащей оплате суммы задолженности и (или) неустойки.  

2.2.5. При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок продлить их действие (выдать новые технические условия) в порядке и на основаниях, установленных законодательством.  

2.2.6. Сетевая организация вправе не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации в случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий:  

 несоответствие проектной документации, выполняемой Заявителем, техническим условиям и (или) требованиям нормативно-технической документации;  

 несоответствие выполненных Заявителем работ проектной документации и (или) техническим условиям. Фактическое присоединение осуществляется только после их устранения Заявителем (о факте устранения нарушений Заявитель письменно уведомляет Сетевую организацию) в пределах срока действия настоящего Договора.  

2.2.7. При нарушении Заявителем установленного в пункте 1.3. Договора срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по Договору наступает ранее указанного нарушенного Заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, расторгнуть Договор по решению суда. При этом Заявитель обязан компенсировать Сетевой организации фактически понесенные расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, в соответствии с п. 2.3.13 настоящего Договора.  

2.3. Заявитель обязуется: 

2.3.1. Принять к исполнению утвержденные технические условия, в том числе утвержденные изменения в ТУ (при наличии изменений).  

2.3.2. Надлежащим образом и своевременно исполнить свои  

обязательства по настоящему Договору, в том числе указанные в разделе 3 настоящего Договора обязательства по оплате технологического присоединения и выполнении своих мероприятий по осуществлению технологического присоединения в соответствии с Техническими условиями.  

2.3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса Сетевой организации предоставить сведения, необходимые для выполнения Сетевой организацией своих обязательств по настоящему Договору.  

2.3.4. Своевременно осуществить разработку проектной документации в рамках исполнения своих обязательств по техническим условиям (в том числе по этапам) (Договору) и своевременно (не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты направления уведомления о выполнении технических условий) направить ее в Сетевую организацию для проверки соответствия проекта требованиям технических условий.  

2.3.5. В течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения мероприятий, указанных в технических условиях, направить в адрес Сетевой организации уведомление об исполнении технических условий со стороны Заявителя с приложением документов, предусмотренных законодательством в сфере технологического присоединения, способом, подтверждающим отправку и получение уведомления.  

2.3.6. Обеспечить возможность Сетевой организации проводить проверку выполнения технических условий Заявителем.  

2.3.7. В течение 5 (пяти) дней со дня получения подписать представленный Сетевой организацией Акт о выполнении технических условий либо представить мотивированный отказ от подписания, и направить в Сетевую организацию.  

2.3.8. Получить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения утвержденного органом федерального государственного энергетического надзора Акта допуска в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя направить копию в Сетевую организацию способом, подтверждающим отправку и получение уведомления.  

2.3.9. С учетом срока, указанного в пункте 1.5 настоящего Договора, подписать представленный Сетевой организацией Акт об осуществлении технологического присоединения и направить в Сетевую организацию либо представить мотивированный отказ от подписания. В случае не поступления в указанный срок подписанного Акта об осуществлении технологического присоединения, либо не представления мотивированного отказа от подписания, Акт считается подписанным, а услуга оказанной Сетевой организацией и принятой заявителем в полном объеме и без претензий.  

2.3.10. Обеспечить соответствие технических характеристик присоединяемых энергопринимающих устройств требованиям правил, регламентов, стандартов и иных нормативно-технических документов.  

2.3.11. Выполнять обязательные требования, установленные  

законодательством Российской Федерации, а также требования нормативно-технической документации, обеспечивающие надежность работы и безопасность эксплуатации находящихся в ведении Заявителя объектов электроэнергетики и исправность используемых ими приборов и оборудования, связанных с потреблением и (или) передачей электрической энергии.  

2.3.12. При осуществлении права на отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору - направить в Сетевую организацию уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения указанного уведомления. Договор считается расторгнутым с момента получения Сетевой организацией указанного уведомления. Отказ от исполнения Договора (расторжение Договора) возможен не позднее завершения выполнения мероприятий по вводу объектов электроэнергетики Заявителя, Сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем.  

2.3.13. В случае расторжения, одностороннего отказа от исполнения договора компенсировать Сетевой организации понесенные расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, в том числе, но не ограничиваясь, связанные с подготовкой и выдачей Сетевой организации технических условий Заявителю. Возмещение расходов производится Заявителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Сетевой организации письма о возмещении понесенных расходов с актом фактически понесенных расходов, независимо от факта подписания указанного акта Заявителем.  

Размер понесенных Сетевой организацией расходов, в целях их возмещения Заявителем, рассчитывается Сетевой организацией в одностороннем порядке, в том числе по выбору Сетевой организации может быть осуществлен полностью либо в части с применением утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированной тарифной ставки С1 (ее составляющей в отношении отдельного мероприятия) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иньм лицам.  

Возмещение расходов производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Датой исполнения Заявителем обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет  

Сетевой организации.  

2.3.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Сетевой организации письма о возмещении понесенных расходов в соответствии с пунктом 2.1.6 настоящего и акта фактически понесенных Сетевой организацией расходов, подписать акт фактически понесенных расходов и направить его оригинал в адрес Сетевой организации либо представить мотивированные возражения.  

При неполучении Сетевой организацией мотивированных возражений относительно акта фактически понесенных расходов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Заявителем акт фактически понесенных расходов считается подписанным (согласованным) со стороны Заявителя.  

2.3.15. Направить в адрес Сетевой течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письма о возмещении понесенных расходов и акта фактически понесенных расходов уведомление о подтверждении оплаты понесенных Сетевой организацией расходов.  

2.3.16. Заявитель обязан подписать указанное в п.2.1.7 Договора дополнительное соглашение и в течение 10 рабочих дней со дня получения направить в адрес сетевой организации один из подписанных обеими сторонами экземпляров.  

В случае если Сетевая организация направила в адрес Заявителя указанное в п. 2.1.7 Договора дополнительное соглашение, а Заявитель не направил подписанный им экземпляр в установленный срок в адрес Сетевой организации дополнительное соглашение, то направленное в адрес Заявителя дополнительное соглашение считается заключенным Сторонами.  

2.4. Заявитель имеет право: 

2.4.1. В случае возникновения у Заявителя в ходе проектирования необходимости частичного отступления от технических условий обратиться в Сетевую организацию в целях согласования указанных изменений.  

2.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в настоящем Договоре, с учетом возмещения Сетевой организации понесенных ей расходов в связи с осуществлением технологического присоединения.  

2.4.3. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии возмещения Сетевой организации понесенных ей расходов в соответствии с пунктами 2.3.12-2.3.15 настоящего Договора. При осуществлении права на отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору Заявитель направляет в Сетевую организацию уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора, способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения указанного уведомления. Договор считается расторгнутым с момента получения Сетевой организацией указанного уведомления. Отказ от исполнения Договора (расторжение Договора) возможен не позднее завершения выполнения мероприятий по вводу объектов электроэнергетики Заявителя, Сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках  

выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем.  

3. Размер платы по Договору и порядок оплаты 

3.1.1. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от  

18.12.2023 № 220 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Смоленской области на 2024 год» и составляет: 17 421 (Семнадцать тысяч четыреста двадцать один) рубль 60 копеек, в том числе НДС 20% в размере 2 903 (Две тысячи девятьсот три) рубля 60 копеек.  

3.1.2. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:  

Платеж 

Всего к оплате, %  

Срок оплаты 

Платеж № 1 

70% (семьдесят 

процентов) от стоимости, указанной в  

п. 3.1. настоящего 

Договора  

В течение 15 дней со  

дня заключения  

настоящего договора  

Платеж № 2 

30% (тридцать 

процентов) от стоимости, указанной в  

п. 3.1. настоящего 

Договора  

В течение 180 дней со 

дня заключения настоящего договора  

ВСЕГО: 

100% 

3.2. В случае, если на момент заключения сторонами указанного в п. 2.1.7 Договора дополнительного соглашения к Договору сумма внесенных Заявителем по Договору платежей будет превышать размер платы за технологическое присоединение, утвержденный дополнительным соглашением, Сетевая организация будет обязана возвратить Заявителю сумму, превышающую установленный дополнительным соглашением размер платы за технологическое присоединение, в течение 60 дней с момента заключения такого дополнительного соглашения.  

В случае если на момент заключения сторонами указанного в п. 2.1.7 Договора дополнительного соглашения к Договору сумма внесенных Заявителем по Договору платежей окажется меньше размера платы за технологическое присоединение, утвержденного дополнительным соглашением, Заявитель будет обязан доплатить Сетевой организации оставшуюся сумму за технологическое присоединение в течение 60 дней с момента заключения такого дополнительного соглашения, если иной срок не предусмотрен условиями вышеуказанного дополнительного соглашения.  

3.3. Оплата по п. 3.1.1 Договора не зависит от стадии выполнения сторонами технических условий (приложение 1 к настоящему Договору).  

3.4. Оплата производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Датой исполнения Заявителем обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.  

3.5. Стороны производят сверку расчетов по настоящему 

Договору в соответствии с запросом одной Стороны в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения запроса.  

3.6. Ранее полученные платежи засчитываются (в порядке их поступления) в счет погашения задолженности за оказанные услуги на дату подписания первичной учётной документации в сумме оказанных услуг или на сумму полученного платежа в случае, если сумма платежа составляет менее суммы оказанных услуг.  

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Сторона договора, нарушившая сроки исполнения обязательств (мероприятий, обязательств по внесению платы (в том числе авансовых платежей, предусмотренных пунктом 3.1.1 Договора), установленных настоящим Договором, обязана уплатить другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему Договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению - не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.  

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой  

силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего Договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого  

действуют обстоятельства непреодолимой силы.  

4.4. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.  

4.5. Неисполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, в том числе обязательств по внесению оплаты за технологическое присоединение, включая авансовые платежи, освобождает сетевую организацию от ответственности за нарушение срока фактического присоединения к электрической сети.  

 4.6. Сторона договора, нарушившая сроки исполнения обязательств (мероприятий и/или обязательств по оплате), установленных настоящим Договором, обязана уплатить понесенные другой Стороной Договора расходы в определенном в судебном акте размере, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной пунктом 4.2 Договора, в случае необоснованного уклонения либо отказа Стороны от ее уплаты.  

4.7. В случае нарушения заявителем сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 договора, а также невыполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в период их действия, Сетевая организация имеет право требовать расторжения указанного договора и компенсации фактически понесенных расходов. При несогласии заявителя с указанным требованием спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с разделом 5 договора.  

5. Разрешение споров 

5.1 Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по  

выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде (Смоленской области).  

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:  

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» - smolenskenergo@mrsk-1.ru  

ООО «Веста» - svetlana-struz@vandex.ru 

6. Заключительные положения 

6.1. В случае одностороннего отказа Заявителя от договора в  

соответствии с п. 2.4.2 или расторжения Договора в судебном или внесудебном порядке Заявитель обязуется возместить Сетевой организации расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, расходы за подготовку и выдачу технических условий в размере, установленном п. 3.1. Договора.  

6.2. Акт об осуществлении технологического присоединения, акт о выполнении технических условий и иные документы, оформление которых предусмотрено Правилами ТП между сетевой организацией и Заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения, направляются между Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение.  

6.3. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения реквизитов, указанных разделе 8 Договора, уведомить друг друга о произошедших изменениях. Стороны освобождаются от ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения указанной обязанности.  

6.4. При исполнении договора стороны обязуются соблюдать положения законодательства о государственной и (или) коммерческой тайне, в том числе, но не исключительно, положения Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 29.07.2018) "О государственной тайне".  

6.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до окончания исполнения Сторонами обязательств. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся на основании соглашения сторон и действительны, если они оформлены в письменном виде  

и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7. Перечень приложений к Договору 

Приложения: 1. Технические условия. 

8. Реквизиты Сторон 

Сетевая организация: Заявитель:  

ПАО «Россети Центр» ООО «Веста»  

Юридический адрес: 119017, город ОГРН: 

<

***> от 28.12.2007 Москва, улица Ордынка М., дом 15 ИНН: 

<

***>  

Фактический адрес: 119017, 

<

...> Москва, улица Ордынка М., дом 15 тер инновационного центра 

Реквизиты Филиала ПАО «Россети Сколково, вн.тер.г. Муниципальный Центр» -«Смоленскэнерго» округ Можайский, 

<

...> Фактический адрес: 214019, г.  

Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 ОГРН 

<

***> в ИФНС № 15 по г.Москве ИНН 

<

***> 

КПП 673102001 ОКПО 00107436 р/с № 

<

***> в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже БИК 042007835 кор/сч № 30101810100000000835 

От сетевой организации: От заявителя:  

Заместитель генерального директора Генеральный директор ООО «Веста» 

по реализации услуг ПАО «Россети Центр»  

 ________________А.С. ФИО5  

______________ФИО4 М.П. М.П. 

Утверждаю: 

Приложение № 1 Заместитель генерального к договору об осуществлении директора по реализации услуг технологического присоединения ПАО «РОССЕТИ Центр» к электрическим сетям __________________ ФИО4 № 42499309 «___» ____________ 20____г.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр» 

(филиал ПАО «Россели Центр» - «Смоленекэнерго») 

 № 20834485 19 апреля 2024 г.  

Заявитель - ООО «Веста» Основание: заявка № 17494156 

1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: объект туристической отрасли.  

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение: объект туристической отрасли по адресу: Смоленская область, муниципальный район Гагаринский, сельское поселение Кармановское, деревня Выродово, земельный участок с кадастровым номером: 67:03:0030101:6206.  

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет 1350 (одна тысяча триста пятьдесят) кВт, в том числе по очередям и этапам: в один этап 1350 кВт.  

3.1. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств Заявителя составляет 300 (триста) кВт по III категории надежности по одной точке присоединения.  

 4. Категория надежности: 1650 кВт - III (третья) категория надежности.  

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ.  

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя: 2024 г. (в соответствии с заявкой).  

7. Точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы):  

- контактные соединения ЛЭП 10 кВ Заявителя с проводами проектируемой ЛЭП-10 кВ на последней опоре на границе участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты Заявителя. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств в точке присоединения -1350 кВт.  

- контактные соединения ЛЭП 10 кВ Заявителя с ВЛ-10 кВ № 06 ПС  

35/10 кВ Дружба на опоре № 135. Максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке присоединения —300 кВт.  

Существующие точки присоединения: 

- контактные соединения ЛЭП 10 кВ Заявителя с ВЛ-10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ «Дружба» на опоре № 135. Максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке присоединения - 300 кВт.  

Максимальная мощность, разрешенная к одномоментному использованию, по 2 (двум) точкам присоединения не должна превышать 1650 кВт.  

8. Основной источник питания: ПС 110/10 кВ Субботники, ПС 35/10 кВ Дружба.  

9. Резервный источник питания: нет. 10. Сетевая организация осуществляет: 

10.1. Проектирование и строительство от опоры № 1 ВЛ 10 кВ № 1008 ПС 110/10 кВ Субботники до границы земельного участка Заявителя:  

- участка ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах, протяженностью 16,0 км, одноцепная, тип провода - изолированный, материал провода - сталеалюминевый, сечением провода до 50 мм2.  

- участка КЛ-10 кВ, протяженностью 0,7 км, способом прокладки в траншее, с 1 кабелем в траншее, сечением от 100 мм2 до 200 мм2, многожильные с бумажной изоляцией:  

- участка КЛ-10 кВ, протяженностью 0,3 км, путем горизонтального наклонного бурения, сечением от 100 мм2 до 200 мм2, многожильные с бумажной изоляцией, с 1 трубой в скважине.  

Трассу, марку и сечение токоведущих элементов линии определить при проектировании.  

10.2. Проектирование и строительство на проектируемой ЛЭП-10 кВ 2 (двух) разъединителей 10 кВ с номинальным током от 250 до 500 А. Параметры и тип оборудования определить при проектировании.  

10.3. Проектирование и строительство на проектируемой ЛЭП-10 кВ одного пункта секционирования (реклоузера) 10 кВ с номинальным током от 500 до 1000 А. Параметры и тип оборудования определить при проектировании.  

10.4. По 1 (одной) точке присоединения организацию учета электроэнергии по уровню напряжения 10 кВ с применением средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения, устанавливаемого на проектируемой опоре, расположенной на границе участка Заявителя. Параметры устанавливаемого оборудования должны удовлетворять требованиям Постановления Правительства РФ от 04.05Л 012 № 442.  

10.5. Реконструкцию линейной ячейки Л-1008 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Субботники в части замены существующих трансформаторов тока на трансформаторы большего номинала. Параметры и тип оборудования определить при проектировании.  

Для устанавливаемых трансформаторов тока (далее - ТТ) произвести  

расчет времени до насыщения в соответствии с ПНСТ 283-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока». На основании проведенных расчетов определить требования к техническим характеристикам устанавливаемых УРЗА в части минимально необходимого времени достоверного измерения значения тока ТТ, при котором обеспечивается правильная работа УРЗА в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ. При необходимости, разработать мероприятия, исключающие риск неправильной работы УРЗА в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ.  

10.6. Выполнение фактического действия по присоединению электроустановок Заявителя в соответствии с настоящими техническими условиями.  

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ. Тип исполнения ТП- 10/0,4 кВ, тип и параметры устанавливаемого оборудования уточнить при проектировании.  

11.2. Проектирование и строительство ЛЭП-10 кВ от точки присоединения до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Схему построения сети, способ прокладки, марку и площадь поперечного сечения токоведущих элементов линий уточнить при проектировании.  

11.3. Проектирование и строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой Ш 10/0,4 кВ до энергопринимающих устройств Заявителя.  

11.4. На границе раздела сети (по балансовой принадлежности) установку коммутационных аппаратов, обеспечивающих видимый разрыв цепи. Тип аппаратов и выбор номинальных параметров определить при проектировании.  

11.5. При наличии автономного источника электроснабжения недопущение его работы параллельно с сетью сетевой организации и/или выдачи электроэнергии в сеть.  

11.6. Оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя, указанные в разделе 11 настоящих технических условий, средствами компенсации реактивной мощности в целях поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности tg ≤ 0,4 (6-10 кВ).  

11.7. Выполнить расчет электрических режимов, а также послеаварийных режимов в схемах в электрической сети 10 кВ в границах ответственности Заявителя. По результатам расчета определить и выполнить комплекс мероприятий, исключающих перегрузку оборудования во всех нормальных, а также ремонтных и послеаварийных режимах работы прилегающих сетей ПАО «Россети Центр». Выполнить расчет схемы организации защит от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки в электрической сети 10/0,4 кВ в границах ответственности Заявителя. Обеспечить селективность действия устройств РЗ и ПА в системе внешнего и внутреннего электроснабжения объекта.  

11.8. Определить комплекс технических мероприятий, в том числе установку фильтрокомпенсирующих устройств, исключающих ухудшение  

качества электроэнергии (по уровням высших гармоник, несимметрии и колебаниям напряжений) в энергорайоне вследствие подключения электроустановок Заявителя до уровней, соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013 во всех нормальных, а также наиболее вероятных ремонтных и послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.  

11.9. Заявитель выполняет мероприятия, указанные в разделе 11 настоящих технических условий, включая разработку проектной документации. Заявитель обязан согласовать проектную документацию с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».  

11.10. Обеспечить участие представителей филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и должностных лиц федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор в осмотре (обследовании) присоединяемых объектов в осмотре (обследовании) присоединяемых объектов.  

11.11. Получить от филиала ПАО «Россети Центр» - Смоленскэнерго» акт о выполнении технических условий.  

11.12. Получить разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства.  

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр».  

13. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Центр» с корректировкой утвержденных технических условий.  

Директор филиала ФИО6.» 

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Центр» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Веста» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 6000 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.  

Судья И.Л. Каринская