Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-7593/2024 «18» марта 2025 года  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Крайнова А.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Косьяненко К.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ворошиловского района» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании выполнить работы, с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ремонтностроительной фирмы «Мир» общества с ограниченной ответственностью, общества с ограниченной ответственностью «Ворошиловская эксплуатирующая компания-5», ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс»,  

При участии в судебном заседании:  

от истца – ФИО1, по доверенности; от ответчика – ФИО2, по доверенности; иные участники не явились, извещены.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 АПК РФ, суд, 

решил:

Иск удовлетворить. 

Обязать унитарную некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления в законную силу настоящего решения устранить нарушения при производстве капитального ремонта многоквартирного дома № 34 по ул. Рабоче-Крестьянская в г. Волгограде путем выполнения следующих работ:  

 № 

Единица 

Наименование работ 

Количество 

п/п  

измерения 

1 

Снятие дверных полотен 

100м2 поверхности  

0,0651 

2 

Демонтаж дверных коробок: в 

каменных стенах с отбивкой 

 М2 

0,02 

штукатурки и откосах 

3 

Очистка поверхности щетками  

М2 

5 

4 

Монтаж связей и распорок из 

одиночных и парных уголков, 

т 

0,1 

гнутосварных профилей для пролетов: 

до 24 м при высоте здания до 25м  

5 

Очистка поверхности щетками  

М2 

10,5 

6 

Очистка вручную поверхности фасадов 

простых от известковой окраски: с 

 100 м2 поверхности 

2,5465 

земли и лесов 

7 

Разборка мелких покрытий и обделок из 

листовой стали: водосточных труб с 

 100 п.м.  

1,068 

земли и подмостей 

8 

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора строительного с 

 т 

1,4919 

погрузкой вручную 

9 

Перевозка грузов 4 класса 

автомобилями-самосвалами 

т 

1,4919 

грузоподъемностью 10 т работающих 

вне карьера на расстояние до 18 км 

10 

Утилизация мусора строительного  

т 

1,4919 

11 

Усиление конструктивных элементов: 

т 

0,0267 

стен кирпичных стальными стяжками 

12 

Устройство горизонтальной 

гидроизоляции кирпичных стен 

ремонтируемых зданий методом 

 м 

33,7 

инъецирования при толщине кладки 

стены в 1,5 кирпича 

13 

Заделка трещин в кирпичных стенах 

100 п.м.  

3,07 

цементным раствором 

14 

Сверление вертикальных отверстий в 

железобетонных конструкциях полов 

100 отверстий 

0,16 

перфоратором глубиной 200 мм 

диаметром до 20 мм 

15 

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку 

т 

0,0957 

оборудования многоэтажных зданий 

при высоте здания до 25м 

16 

Монтаж кровли из профильного листа 

для объектов непроизводственного 

 100м2 поверхности  

0,055 

назначения простой 

17 

Окраска металлических огрунтованных 

100 м2 поверхности  

0,0292 

поверхностей эмалью ПФ-115  

18 

Установка металлических дверных 

шт 

2 

блоков в готовые проемы 

19 

Установка дверного доводчика 

шт 

2 

20 

Окраска металлических огрунтованных 

100м2 

0,05 

поверхностей эмалью ПФ-115  

Наружные откосы 

21 

Покрытие поверхностей грунтовкой 

100м2 поверхности  

0,854 

глубокого проникновения за 1 раз стен  

22 

Оклейка тканями стен 

100м2 поверхности  

0,854 

23 

Высококачественная штукатурка 

фасадов цементно-известковым 

100 п.м. 

4.27 

раствором по камню откосов при 

ширине до 200 мм плоских 

24 

Отделка фасадов мелкозернистыми 

декоративными покрытиями из 

минеральных или полимерминеральных 

составов по подготовленной 

 100м2 поверхности  

0,854 

поверхности с лесов и земли, состав с 

наполнителем из микроминерала 

(размер зерна до 0,7 мм) 

25 

Окраска фасадов акриловыми 

составами с лесов краскопультом по 

 100м2  

0,854 

подготовленной поверхности  

Цоколь 

26 

Обработка каменных, бетонных, 

кирпичных и деревянных поверхностей 

 100м2 поверхности  

0,7 

биопиреном 

27 

Протравка цементной штукатурки 

100м2 поверхности  

0,7 

нейтрализующим раствором 

28  

Покрытие поверхностей грунтовкой 

 100м2 поверхности  

0,7 

глубокого проникновения за 1 раз стен  

29  

Штукатурка по сетке без устройства 

 100м2 поверхности  

0,7 

каркаса улучшенная стен 

30  

Покрытие поверхностей грунтовкой 

100м2 

0,7 

глубокого проникновения за 1 раз стен  

31  

Сплошная шпатлевка ранее 

оштукатуренных поверхностей 

100м2 поверхности  

0,7 

цементно-поливинилацетатным составом 

с лесов и земли 

32  

Отделка фасадов мелкозернистыми по 

подготовленной поверхности 

декоративными покрытиями из 

минеральных или полимерминиральных 

 100м2 

0,7 

составов по подготовленной 

поверхности с лесов и земли состав с 

наполнителем из микроминерала (размер 

зерна до 0,7 мм) 

33  

Окраска фасадов акриловых составами с 

 100м2 поверхности  

0,7 

лесов краскопультом по подготовленной 

поверхности 

34 

Гидрофобизация поверхности 

штукатурки фасадов гладких с лесов 

 100м2 поверхности  

0,7 

вручную 

Стены фасада 

35 

Покрытие поверхностей грунтовкой 

100м2 поверхности  

9,7 

глубокого проникновения за 1 раз стен  

36 

Протравка цементной штукатурки 

100м2 поверхности  

9,7 

нейтрализующим раствором 

37 

Окраска фасадов акриловыми 

составами с лесов краскопультом по 

 100м2 поверхности  

9,7 

подготовленной поверхности  

Декоративные элементы 

38 

Покрытие поверхностей грунтовкой 

100м2 поверхности  

1,3511 

глубокого проникновения за 1 раз стен  

39 

Сплошная шпаклевка ранее 

оштукатуренных поверхностей 

100м2 поверхности  

1,3511 

цементно-поливинилацетатным 

составом с лесов и земли 

40 

Окраска фасадов акриловыми 

составами с лесов краскопультом по 

 100м2 поверхности  

1,3511 

подготовленной поверхности  

Лестница пожарная 

41 

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз грунтовкой 

 100м2 поверхности  

0,105 

ГФ-021 

42 

Окраска металлических огрунтованных 

100м2 поверхности  

0,105 

поверхностей эмалью ПФ-115  

Карнизный свес 

43 

Подшивка потолков досками обшивки 

100м2 поверхности 

0,7077 

Водосточная система 

44 

Устройство желобов подвесных 

100 м.п. 

1,05 

45 

Устройство металлической 

шт 

8 

водосточной системы: воронок 

46 

Устройство металлической 

водосточной системы: прямых звеньев 

 м 

72 

труб 

47 

Устройство металлической 

шт 

24 

водосточной системы: колен 

Взыскать с унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд  

капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ворошиловского района» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения настоящего решения, начиная с даты просрочки его исполнения до момента фактического исполнения.  

Взыскать с унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ворошиловского района» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебные расходы по оплате судебной экспертизы в размере 80 000 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Решение в полном объеме будет изготовлено в установленный законом срок.  

Судья А.В. Крайнов