АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 Именем Российс кой Федерации 

07 апреля 2025 года Дело № А33-3266/2025  

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о рассмотрении дела по общим правилам искового производства отказать.  

В удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать.  

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество "Россети Сибирь" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить условия договора от 12.12.2022 № 20.2400.12331.22 об осуществлении технологического присоединения, выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями, а именно:  

- обеспечить возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (п. 10.1.2);  

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать ее со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (п. 10.2);  

Код доступа к материалам дела - 

- строительство ЛЭП 10 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до новой ТП 10/0,4 кВ протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом (п. 10.2.1);  

- строительство ТП 10/0,4 кВ Тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом (п. 10.2.2);  

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом (п. 10.2.3);  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (п.10.2.4).  

 Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Норок" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 377 838,16 руб. неустойки за период с 14.06.2023 по 27.01.2025, а также 73 892 руб. расходов по оплате государственной пошлины, несение которых подтверждается платежным поручением от 03.02.2025 № 65.  

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично. 

В случае неисполнения решения суда в полном объёме в течение 30 календарных дней со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Норок» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) 5000 руб. за каждый день неисполнения решения суда по настоящему делу до фактического исполнения решения суда.  

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки отказать.  

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.  

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.  

Судья Е.Б. Мельникова