РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   05 апреля 2024 года    по делу А33-3709/2024 Красноярск  

«05» апреля 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «РОССЕТИ СИБИРЬ» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в течении 10 рабочих дней с момента вступления  настоящего судебного акта в законную силу, в соответствии с договором от 11.10.2022  

 № 20.2400.7607.22, осуществить мероприятия с целью технологического присоединения к  электрическим сетям энергопринимающих устройств по адресу: Красноярский край,  Березовский район, в районе с. Есаулово, д. Ермолаево, д. Терентьево, г. Сосновоборск, СПК  «Есаульский», кадастровый номер земельного участка 24:04:0301006:711, а именно:  

● (требования по проектированию, строительству новых и реконструкции  существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго»  для электроснабжения объектов заявителя): - выполнить проектную документацию в  соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их  содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и  согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим  законодательством;  

- строительство ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий, до  проектируемой ТП 10 кВ (пункт 10.2.3 технических условий). Протяжённость и  характеристики ЛЭП определить проектом;  

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на  отпаечной опоре ЛЭП 10 кВ. Тип и место установки разъединителя определить проектом;  

- строительство ТП 10 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов определить  проектом;  

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от новой ТП до точки присоединения, находящейся не далее  15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими  документами заявителя. Протяжённость и характеристики ЛЭП определить проектом;  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учёта электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков  электрической энергии» (утверждённых постановлением Правительства Российской  Федерации от 04.05.2012 № 442).  

● (требования по проектированию и установке): Устройств защиты и автоматики: - в  проекте выполнить расчёт релейной защиты и токов короткого замыкания ЛЭП-10 кВ, ф.  

 № ВЛ 10кВ ф. 137-4. 

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично. 

В случае неисполнения решения суда в полном объёме в течение 10 рабочих дней с  момента вступления настоящего судебного акта в законную силу, взыскать с публичного  акционерного общества «РОССЕТИ СИБИРЬ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г.  Красноярск) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1  (ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>, пгт. Берёзовка  Красноярского края) судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения  решения суда по настоящему делу, со дня, следующего за днём установленного судом для  исполнения обязательств срока, по день фактического исполнения решения суда.  

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки  отказать.  

Взыскать с публичного акционерного общества «РОССЕТИ СИБИРЬ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу индивидуального  предпринимателя ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН: 

<

***>,  ОГРНИП: 

<

***>, пгт. Берёзовка Красноярского края) 6 000 руб. судебных  расходов по уплате госпошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья И.В. Степаненко