Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-9199/2024

г. Хабаровск

03 октября 2024 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 25.09.2024.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Полегкого, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Михайленко К.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску                                       муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» (ОГРН 

<

***>,            ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 1 585 237 руб. 13 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: ФИО1, директор, приказ от 01.02.2022 № 2

У С Т А Н О В И Л :

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» (далее – МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью                        «Проектно строительная компания» (далее – ООО «ПСК») о взыскании штрафа и неустойки за неисполнение и нарушение срока исполнения обязательств по муниципальному контракту от 17.08.2023 № 38 в общем размере 1 585 237 руб. 13 коп.

Ответчик отзыв на иск не направил, в судебном заседании представитель ответчика в полном объеме признал предъявленные требования. 

Истец извещен надлежащим образом о рассмотрении настоящего спора в порядке статей 121-123 АПК РФ, в том числе путем опубликования сведений на официальном сайте Арбитражного суда Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил.

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в судебном заседании в отсутствие истца по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя ответчика, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре» (заказчик) и  ООО «ПСК» (подрядчик) заключен муниципальный контракт от 17.08.2023 № 38, в соответствии с пунктами 1.3, 1.4 которого подрядчик обязуется в порядке, в сроки и на условиях, установленных контрактом: выполнить работы по строительству объекта капитального строительства на условиях иждивения подрядчика с поставкой строительных материалов, оборудования используемых для выполнения работ и (или) необходимых для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства, в соответствии с проектной и рабочей документацией (шифр 23.01.12-П.30, разработанная ООО «Проектная мастерская «Тандем»), результатами инженерных изысканий, графиком выполнения работ (приложение № 2), графиком оплаты работ (приложение № 3) и сметой на выполнение работ (приложение № 1) и являющиеся его неотъемлемой частью; сдать результаты работ муниципальному заказчику; заказчик в порядке и сроки, установленные контрактом, обязуется принять и оплатить результаты выполненных по контракту подрядчиком работ.

Согласно пункту 1.2 контракта предметом настоящего контракта является выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта капитального строительства стела «Комсомольск-на-Амуре – город трудовой доблести», в соответствии с условиями, установленными в контракте и приложениях к нему, являющихся его неотъемлемой частью. Результатом выполненной работы по контракту является объект капитального строительства, в отношении которого в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод в эксплуатацию (пункт 1.5 контракта).

Пунктом 1.8.1 контракта установлены следующие сроки выполнения работ по контракту: общие сроки выполнения всех работ по контракту: начальный срок выполнения работ: 17.08.2023 (дата заключения контракта), конечный срок выполнения работ: 20.12.2023. Сроки отдельных этапов работ, устанавливаются графиком выполнения работ (приложение № 2) и графиком оплаты работ (приложение № 3).

Приложением № 2 к дополнительному соглашению от 25.12.2023 № 4, сторонами согласовано, что 1 этап работ должен быть выполнен в сроки               с 17.08.2023 по 10.10.2023, 2 этап – с 15.10.2023 по 20.12.2023.

Сроки исполнения обязательств по выполнению работ по контракту, а также их отдельных этапов, установленные по условиям контракта, являются исходными для определения штрафных санкций в случаях их нарушения подрядчиком (пункт 1.8.4 контракта).

На основании пункта 2.1 контракта цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя стоимость работ, оборудования и материалов, прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 33 209 000 руб., НДС не облагается. 

Исходя из положений пункта 3.1 контракта оформление сдачи-приемки выполненной работы (ее результатов) и отдельных этапов исполнения контракта, за исключением исполнения сторонами мероприятий по вводу объекта капитального строительства в эксплуатацию, предусмотренных пунктами 3.20-3.27 контракта, осуществляется сторонами с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 13 статьи                   94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) (далее – ЕИС). Нарушение подрядчиком установленного контрактом и Законом № 44-ФЗ порядка оформления в ЕИС сдачи-приемки выполненной работы (ее результатов) является основанием для отказа в проведении приемки работы (ее результатов) заказчиком.

Подрядчик к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом, результаты отдельного этапа исполнения контракта, при этом заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы, её отдельных этапов (пункт 3.2 контракта).

В силу пункта 3.4 контракта приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, выполненной по контракту работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается сторонами, либо подрядчику в те же сроки муниципальным заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 

Приемка и оплата выполненных работ, их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, отдельных этапов работ на основании сметы на выполнение работ (приложение № 1), графика выполнения работ (приложение № 2) и графика оплаты работ (приложение № 3), и иными условиями контракта, в соответствии с ГК РФ. Приемка результатов, выполненных подрядчиком отдельных этапов работ, осуществляется заказчиком путем оформления сторонами акта о приемке выполненных работ (приложение № 8) (пункт 3.8 контракта).

Пунктом 3.17 контракта установлено, что датой приемки отдельного этапа работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке отдельного этапа работ, подписанного заказчиком. Готовность отдельного этапа работ подтверждается подписанным сторонами документом о приемке отдельного этапа работ в установленном контрактом порядке.

В соответствии с пунктом 7.1 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной   порядок   начисления   штрафа,   чем   порядок,   предусмотренный настоящими контрактом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства) (пункты 7.2, 7.3 контракта).

Пунктом 7.9.1 контракта предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства (в том числе гарантийного), предусмотренного настоящим контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:                   а) 1 000 руб., если цена контракта не превышает 3 000 000 руб. (включительно); б) 5 000 руб., если цена контракта составляет от                        3 000 000 руб. до 50 000 000 руб. (включительно); в) 10 000 руб., если цена контракта» составляет от 50 000 000 руб. до 100 000 000 руб. (включительно); г) 100 000 руб., если цена контракта превышает 100 000 000 руб. (пункт 7.9.2.2 контракта).

Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта (пункт 8.1 контракта).

Так, муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, в определенных контрактом случаях, являющихся для сторон существенными нарушениями условий контракта (пункт 8.2 контракта).

В частности, существенным является нарушение подрядчиком сроков завершения отдельных этапов работ и (или) конечного срока выполнения работ, установленных настоящим контрактом, более чем на 30 дней (пункт 8.3.3 контракта).

Согласно пункту 8.5 контракта расторжение контракта в связи с односторонним отказом одной из сторон от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 8.11 контракта сумма неотработанного                 (не погашенного) авансового платежа, выданного в соответствии с условиями настоящего контракта, подлежит обязательному возврату подрядчиком заказчику во всех случаях расторжения (прекращения исполнения) контракта в течение 2 рабочих дней с даты расторжения контракта.

Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту               (пункт 10.1 контракта).

Во исполнение условий названной сделки подрядчиком выполнены работы по 1 этапу на сумму 15 196 959 руб. 14 коп., что подтверждается актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 25.12.2023 № 1/2023, справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 25.12.2023             № 1/2023.

Заказчиком, указанные работы приняты в полном объеме без замечаний, оплата, в соответствии с условиями контракта, перечислялась платежными поручениями от 04.09.2023 № 167424, от 10.11.2023 № 756606, от 28.12.2023 № 367267 в общей сумме – 22 650 074 руб. 66 коп.

Вместе с тем, в оставшиеся части работы 2 этапа впоследствии подрядчиком не выполнялись, что в том числе подтверждается актом повторного осмотра от 19.04.2024  № 3.

Указанные обстоятельства привели к принятию заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения спорного контракта, в связи с чем, в адрес подрядчика направлено соответствующее уведомление от 19.04.2024                  № 04-15/790 (получено 19.04.2024).

С учетом допущенной просрочки исполнения обязательств по выполнению работ в согласованные сроки, а также принимая во внимание нарушение иных обязательств (отсутствие ограждения строительной площадки) в период действия контракта, истцом ответчику начислена неустойка в виде пени в размере 1 580 237 руб. 13 коп. и штрафа в размере 5 000 руб.

Направленные истцом в адрес ответчика досудебные претензии с требованиями об оплате начисленных неустойки и штрафа ответчиком оставлены без удовлетворения.

Невозможность урегулировать возникшие между сторонами спора разногласия послужила причиной обращения истца в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ предусмотрено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720 ГК РФ), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат (статья 729 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.                        По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (пункт 3 статьи 708 ГК РФ).

Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

В пункте 1 статьи 450 ГК РФ установлено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ).

Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 4 статьи 450.1 ГК РФ).

В силу положений статьи 450.1 ГК РФ, с учетом разъяснений, приведенных в пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ             от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», только правомерный односторонний отказ от исполнения договорного обязательства полностью или частично влечет расторжение или изменение договора соответственно. 

Согласно пункту 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Исходя из разъяснений, сформулированных в пункте 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора.

Вместе с тем условия договора, которые в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения договора (например, гарантийные обязательства в отношении товаров или работ по расторгнутому впоследствии договору; условие о рассмотрении споров по договору в третейском суде, соглашения о подсудности, о применимом праве и т.п.) либо имеют целью регулирование отношений сторон в период после расторжения (например, об условиях возврата предмета аренды после расторжения договора, о порядке возврата уплаченного аванса и т.п.), сохраняют свое действие и после расторжения договора; иное может быть установлено соглашением сторон.

Частью 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В соответствии с частью 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 установлено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: а) 1 000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн. руб.; б) 5 000 руб., если цена контракта составляет от                  3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно); в) 10 000 руб., если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно);                 г) 100 000 руб., если цена контракта превышает 100 млн. руб. (пункт 6).

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, а часть 2 статьи 9 АПК РФ предусматривает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В данном случае материалами дела подтверждается, что подрядчиком работы по контракту выполнены частично, на сумму 15 196 959 руб. 14 коп. (этап 1), с нарушением сроков, согласованных сторонами, а в отношении 2 этапа работы по контакту вообще не выполнялись, заказчику до момента прекращения действия ранее заключенного между сторонами контракта не сдавались.

Также материалами настоящего дела подтверждается, что ответчик в нарушение пункта 5.2.28 контракта в пределах действия обязательств не обеспечил наличие на строительной площадке ограждения.

Указанные обстоятельства ответчик по существу не отрицал, о фальсификации представленных истцом доказательств в установленном законом порядке не заявил, иным образом их содержание не оспорил. Более того, в процессе судебного разбирательства ответчик в полном объеме признал наличие указанных нарушений и предъявленные к нему требования в соответствующей части.

В рассматриваемом случае заказчик по истечении значительного периода времени после окончания срока для выполнения работ, фактически утратив интерес к дальнейшему продолжению соответствующих правоотношений, правомерно в одностороннем порядке отказался от исполнения заключенного с подрядчиком контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, следовательно, после истечения 10-дневного срока с момента получения ответчиком указанного уведомления ранее заключенный между сторонами контракт прекратил свое действие.

При этом суд отмечает, что односторонний отказ заказчика от дальнейшего действия названной сделки ООО «ПСК» в установленном законом порядке не оспорило.

Учитывая установленный судом выше факт неисполнения ответчиком обязательств по выполнению работ в согласованные сроки, необеспечения строительной площадки ограждением, а также правомерность одностороннего отказа заказчика от дельнейшего действия спорного контракта, суд полагает, что в данном случае имеются достаточные правовые основания для привлечения ООО «ПСК» к договорной ответственности (пункты 7.9.1, 7.9.2.2 контракта) в виде взыскания пени на сумму невыполненных работ (2 этапа) в соответствующие сроки, а также фиксированного штрафа.

Проверив расчет пени и штрафа, произведенный истцом, суд признает их верными, соответствующими условиям заключенного между сторонами контракта, в связи с чем, констатирует правомерность соответствующих требований.

Расходы по оплате государственной пошлины по иску возлагаются на ответчика с учетом итогового результата рассмотрения настоящего дела, признания предъявленных требований в полном объеме и положений статьи 110 АПК РФ, 333.40 НК РФ и подлежат возмещению в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» (ОГРН 

<

***>,            ИНН 

<

***>) штраф и неустойку за неисполнение и нарушение срока исполнения обязательств по муниципальному контракту от 17.08.2023 № 38  в общем размере 1 585 237 руб. 13 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере            8 656 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                          К.А. Полегкий