АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-3420/2024

15 октября 2024 года

г. Улан-Удэ

 Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Путинцевой Н.Г., 

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Внести изменения в государственный контракт № 34-22-ф от 20.05.2022 на  выполнение дорожных работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р- 258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита км 183+400 – км 191+000, Республика Бурятия.  Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита км  191+000 – км 214+000, Республика Бурятия», заключенный между федеральным казенным  учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал»  Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и  обществом с ограниченной ответственностью «Проект-Т» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>).  

Пункт 4.1. Раздела 4 «Стоимость контракта» государственного контракта № 34-22-ф  от 20.05.2022 изложить в следующей редакции: «4.1. Общая стоимость работ по  настоящему Контракту составляет 3 730 490 676 рублей (три миллиарда семьсот тридцать  миллионов четыреста девяноста тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей) 11 копеек, в  ценах соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта, в том числе  НДС – 20%.».  

Пункт 4.2. Раздела 4 «Стоимость контракта» государственного контракта № 34-22-ф  от 20.05.2022 изложить в следующей редакции: «4.2. Планируемые объемы бюджетных  ассигнований по годам составляют:  

- 2022 г. – 851 685 298,00 рублей, в том числе НДС; - 2023 г. – 666 486 256,00 рублей, в том числе НДС; - 2024 г. – 310 466 427,00рублей, в том числе НДС; - 2025 г. – 152 773 597,00 рублей, в том числе НДС; - 2026 г. - 1 749 079 098,11 рублей, в том числе НДС». 

Пункт 9.31 Раздела 9 «Права и обязанности подрядчика» государственного контракта   № 34-22-ф от 20.05.2022 изложить в следующей редакции: «9.31. Подрядчик, который не  является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной  некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков  из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных  некоммерческих организаций. Общий объем Работ, оказываемых указанными субъектами,  в денежном выражении должен составлять 15% от цены Контракта в сумме 559 573 601,42  рублей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23  декабря 2016г. № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов,  предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков,  соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально  ориентированных некоммерческих организаций».  

Пункт 12.11 Раздела 12 «Ответственность сторон» государственного контракта № 3422-ф от 20.05.2022 изложить в следующей редакции: «12.11. За каждый факт неисполнения  или ненадлежащего исполнения Подрядчиком любых обязательств, предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе  гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан уплатить  неустойку в виде штрафа. Размер штрафа устанавливается Контрактом и составляет 0,25%  от цены Контракта в сумме 9 326 226,69 рублей согласно Постановлению Правительства  РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,  начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или  ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств  заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в  постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании  утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013  г. N 1063»:  

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не  превышает 3 млн. рублей;  

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)  составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет  от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)  составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);  

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)  составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);  

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)  составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);  

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)  составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);  

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)  составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);  

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)  превышает 10 млрд. рублей».  

Пункт 12.18 Раздела 12 «Ответственность сторон» государственного контракта № 3422-ф от 20.05.2022 изложить в следующей редакции: «12.18. За неисполнение или  ненадлежащее выполнение Подрядчиком любых требований, предусмотренных условиями  Контракта, а также разделом 9 «Права и обязательства Подрядчика», разделом 14  «Строительная Площадка» Контракта, в том числе за ненадлежащее качество  выполненных работ, зафиксированных Заказчиком в Общем журнале работ, журналах  учета выполнения работ, за не составление и не предоставление «Акта обследования  дорожных условий в месте совершения дорожно-транспортного происшествия» Заказчику,  за ДТП по сопутствующим дорожным условиям, произошедшим на месте выполнения  работ, по вине Подрядчика, при наличии в отчетном периоде по вине Подрядчика случаев  невозможности движения транспортных средств, в том числе ограничения движения  транспортных средств и возникновения препятствий для движения, за нарушение сроков,  указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях и извещениях Заказчика, за  нарушение требований составления схем ограждения производства работ, за  использование некачественных материалов, за бездействие и уклонение от принятия мер в  отношении лиц (организаций), виновных в несогласованной прокладке инженерных  коммуникаций, строительстве зданий и сооружений, установке дорожных знаков и  указателей, организации мест несанкционированной торговли, установке рекламы, за  неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ОДМ 218.6.019-2016  

«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства работ» и  Методических рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства  работ при выполнении работ, за производство работ без подписанного Акта приема-передачи Объекта в содержание, ненадлежащего содержания участка капитального  ремонта в период выполнения обязательств по Контракту, за неявку полномочных  представителей Подрядчика приглашенных Заказчиком для участия в совещаниях, в  комиссии по обследованию работ, являющихся предметом Контракта, составления акта,  фиксирующего дефекты, за непредоставление Заказчику месячно-суточных графиков  выполнения работ на следующий месяц или ежесуточную информацию о ходе выполнения  Работ; за несвоевременное представление, неполноту, недостоверность данных,  содержащихся в отчетах и ответах на запросы, предоставляемых Заказчику, за нарушение  п.9.5.1, 9.60, 9.60.1 настоящего Контракта - Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,25%  от цены Контракта в сумме 9 326 226,69 рублей за каждый факт такого нарушения, либо в  размере 100 000,00 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,  которое не имеет стоимостного выражения».  

Пункт 12.30 Раздела 12 «Ответственность сторон» государственного контракта № 3422-ф от 20.05.2022 изложить в следующей редакции: «12.30. За неисполнение условия о  привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа  субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих  организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого  привлечения, установленного контрактом, в сумме 27 978 680,07 рублей».  

Взыскать с федерального казенного учреждения «Управление федеральных  автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Проект-Т» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6 000 руб. – судебные расходы по  государственной пошлине.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный  суд Республики Бурятия.  

Судья Н.Г. Путинцева