14/2017-109792(2) . 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6 http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-12084/2017

г.Чита

19 декабря 2017 года

Руководствуясь статьями 167-170, 173 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Изменить условия пункта 2.1 муниципального контракта   № 0191300002616000037 на выполнение работ по объекту "Строительство моста через  реку Хилок на ул. Рабочая в пгт. Могзон Хилокского района Забайкальского края",  считать цену контракта равной 59400000 руб.  

Изменить условия пункта 3.2 муниципального контракта   № 0191300002616000037 на выполнение работ по объекту "Строительство моста через  реку Хилок на ул. Рабочая в пгт. Могзон Хилокского района Забайкальского края",  считать датой завершения работ по контракту 31.12.2018.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья М.В. Сталичнова