АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть по делу, рассмотренному в порядке упрощённого

производства)

дело № А40-147829/23-113-1186

г. Москва

12 сентября 2023 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи А.Г. Алексеева

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело

по исковому заявлению ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (115114, 

<

...>, СТР 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: 

<

***>)

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" (141508, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СОЛНЕЧНОГОРСК Г.О., СОЛНЕЧНОГОРСК Г., СОЛНЕЧНОГОРСК Г., ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ., СТР. 5, ПОМЕЩ. 179, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.11.2013, ИНН: 

<

***>)

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору строительного подряда № 292305/МКС от 21.12.2022 в размере 326 583,98 рублей, рассчитанной за период с 01.04.2023 по 25.04.2023

без вызова лиц, участвующих в деле

Руководствуясь ст. ст. 4, 65, 68, 71, 102, 110, 123, 156, 167-170, 180, 181, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

1.         Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» (ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» (ОГРН 

<

***>):

сумму неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору строительного подряда № 292305/МКС от 21.12.2022 в размере 326 583 (триста двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 98 копеек, рассчитанной за период с 01.04.2023 по 25.04.2023;

расходы по оплате государственной пошлины в размере 9 532 (девять тысяч пятьсот тридцать два) рубля.

2.         Решение может быть обжаловано в установленный законом срок.

 

Судья                                                                                                        А.Г. Алексеев