АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248000, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-154/2020

10 апреля 2023 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Жадан В.В., 

руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

обязать Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской  области, устранить недостатки работ, выполнив гарантийный ремонт фасада  многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, выполненных по  договору от 12.04.2018 № SBR037-180095481000045/43-ЭА/18-c, обнаруженных в  пределах гарантийного срока, выполнив следующие работы, а именно обязать  ответчика:  

1.1. Для устранения дефектов нарушения окрасочного слоя фасада в районе  магазина "Кругозор" выполнить следующие работ:  

- выполнить перекраску участков фасадов в районе входа в магазин  "Светобоев" и правее дверного блока в магазин "Кругозор" с подбором колера  окрасочного состава, совпадающего с основным цветом фасада здания - 14,66 м2.  

1.2. Для устранения дефектов нарушения дефектов трещины на торцевой  стене дома с 1 по 9 этаж с левой стороны от главного фасада по ул. Ленина,  выполнить следующие виды работ:  

- выполнить отбивку декоративной штукатурки, базового армирующего слоя  со стеклотканной сеткой по всей площади торцевого фасада дома - 632,2м2  

- выполнить демонтаж части минераловатных плит - 64,3м2 

- выполнить монтаж части минераловатных плит с креплением "грибками" и  приклеиванием плит на клей для создания перевязки вертикальных швов по высоте  здания - 64,3М2  

- выполнить устройство базового армирующего слоя с укладкой  стеклотканной сетки - 632,2м2  

- выполнить грунтовку поверхности торцвой стены - 632,2М2 - выполнить декоративную штукатурку торцевой стены - 632,2м2 - выполнить окраску торцевой стены - 632,2м2. 

Взыскать с Фонда поддержки строительства доступного жилья в Калужской  области г. Калуга в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов  

Калужской области г. Калуга расходы по оплате государственной пошлины в  сумме 6 000 руб., расходы на производство экспертизы в размере 88 000 руб.  

Выплатить ФБУ Калужская ЛСЭ Минюста России с депозитного счета  Арбитражного суда Калужской области денежные средства в сумме 88 000 рублей  (платежное поручение № 2091 от 26.03.2021) за счет внесенных Фондом  капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области на депозитный  счет Арбитражного суда Калужской области денежных средств.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через  Арбитражный суд Калужской области.  

Судья В.В. Жадан