АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; e-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А23-7790/2023

03 ноября 2023 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения изготовлена 30 октября 2023 года.  

Мотивированное решение изготовлено 03 ноября 2023 года.  

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Жадан В.В.,  рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Проект- холдинг" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 428034, 

<

...>, помещ. 27) к Государственному  казенному учреждению Калужской области "Управление капитального  строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 248001, 

<

...>) о взыскании 729 686 руб.,  

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью "Проект-холдинг" (далее также  – истец) обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к  Государственному казенному учреждению Калужской области "Управление  капитального строительства" (далее также – ответчик) о взыскании процентов за  пользование чужими денежными средства по контракту № 013/200001219002202 на  выполнение проектно-изыскательских работ для государственных нужд Калужской  области ИКЗ 192402708485540270100100130010000414 от 08.07.2019 на сумму  433 969 руб., по контракту № 0137200001219002206 на выполнение проектно-изыскательских работ для государственных нужд Калужской области ИКЗ  192402708485540270100100210010000414 от 08.07.2019 на сумму 295 717 руб.  

18.09.2023 от ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела по  общим правилам искового производства.  

19.09.2023 от ответчика поступил отзыв на исковое заявление. 

Само по себе ходатайство ответчика о рассмотрении дела по общим  правилам искового производства, в отсутствие обоснованных доводов и  доказательств наличия обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в  порядке упрощенного производства, не является безусловным основанием для  рассмотрения дела по общим правилам искового производства.  

30.10.2023 Арбитражным судом Калужской области вынесена резолютивная  часть решения по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства.  

01.11.2023 от ответчика поступило ходатайство о составлении  мотивированного решения по делу.  

Как усматривается из материалов дела, Между истцом и ответчиком  заключен государственный контракт № 013/200001219002202 на выполнение  проектно-изыскательских работ для государственных нужд Калужской области  ИКЗ 192402708485540270100100130010000414, предметом которого является  выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция ГБУЗ КО  "Калужская областная клиническая детская больница". Генеральный  проектировщик в установленные сроки согласно Контракту обязуется выполнить  инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной документации,  рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства,  указанного в пункте 1.3 Контракта (далее - соответственно работы, инженерные  изыскания, проектная документация, рабочая документация, объект), передать в  соответствии с контрактом государственному заказчику результаты указанных  работ, а государственный заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить  определенную контрактом цену.  

Пунктом 1.4 обязательства генерального проектировщика по подготовке  проектной документации, выполнению инженерных изысканий считаются  выполненными при получении государственным заказчиком положительного  заключения государственной экспертизы Проектной документации и результатов  инженерных изысканий, положительного заключения о достоверности определения  сметной стоимости строительства объекта.  

Обязательства генерального проектировщика по подготовке рабочей  документации считаются выполненными после приемки государственным  заказчиком результатов разработки рабочей документации по акту передачи  рабочей документации. (пункт 1.5 контракта)  

Объем и содержание работ определены заданием на проектирование объекта  капитального строительства (далее - задание на проектирование), (приложением №  1 к контракту), заданием на выполнение инженерных изысканий (приложение № 2  к контракту), и контрактом. (пункт 2.1 контракта)  

Сроки выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной  документации, получения заключения государственной экспертизы проектной  документации и результатов инженерных изысканий, подготовки рабочей  документации, определены графиком выполнения работ (приложение № 3 к  контракту) (далее -график выполнения работ), а сроки и размеры оплаты  выполненных в соответствии с контрактом работ (за исключением сроков и  размеров оплаты выполненных работ в сроков и размеров оплаты выполненных  работ в случае досрочного прекращения контракта)- графиком оплаты  выполненных работ (приложение № 4 к контракту) далее - график оплаты  выполненных работ).  

График выполнения работ и график оплаты выполненных работ являются  неотъемлемой контракта и в совокупности составляют график исполнения  контракта.  

Цена контракта (цена работ) составляет: 4 371 371 руб. 35 коп., НДС не  облагается установлением для исполнителя упрощенной системы налогообложения  в соответствии со ст. 346 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения  контракта включает в себя стоимость изыскательских работ с подготовкой отчетов  

по инженерным изысканиям, проекта генерального проектировщика, связанные с  проведением государственной экспертизы и согласования документации с  компетентными государственными органами, эксплуатирующими организации  органами местного самоуправления, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов  и других обязательных платежей. Стоимость экспертизы и согласований не входит  в цену контракта и оплачивается государственным заказчиком отдельно на  основании выставленных счетов от согласующих органов. (пункты 3.1-3.2  контракта)  

Пунктом 4.1.3 установлено, что государственный заказчик обязан не позднее  10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления генерального проектировщика  программы инженерных изысканий утвердить программу инженерных изысканий  или направить замечания к ней. Программа инженерных изысканий утвердить  программу инженерных или направить замечаний к ней. Программа инженерных  изысканий становится неотъемлемой частью Контракта со дня е утверждения  государственным заказчиком.  

Не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Генерального проектировщика  документа о выполненных инженерных изысканиях и проектной документации  осуществить проверку документа, содержащего результаты инженерных  изысканий, и проектной документации на соответствие заданию на выполнение  инженерных изысканий, программе инженерных изысканий и заданию на  проектирование подписать с генеральным проектировщиком акт передачи  проектной документации и результатов инженерных изысканий или направить  замечания к представленным результатом инженерных изысканий, проектной  документации с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов)  результатов инженерных изысканий, проектной документации. (пункт 4.1.4  контракта)  

Согласно пункту 4.1.6 заказчик обязан не обязан не позднее 10 (десяти) со  дня передачи генеральным проектировщиком рабочей документации по акту  передачи рабочей документации (приложение № 6 к контракту) осуществить  проверку результатов разработки рабочей документации на соответствие заданию  на проектирование и подписать с генеральным проектировщиком акт передачи  рабочей документации или направить замечания к представленной рабочей  документации с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов)  рабочей документации.  

В свою очередь генеральный проектировщик обязан, согласно пункту 4.3.1  контракта, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания контракта  представляет государственному заказчику для утверждения программу выполнения  инженерных изысканий, а также при наличии замечаний государственного  заказчика, устранить их в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня их  получения и передать государственному заказчику доработанную программу  инженерных изысканий.  

Пунктом 4.3.7 контракта установлено, что генеральный заказчик обязан  устранить за свой счет в установленный государственным заказчиком разумный  срок недостатки (дефекты) работ, выявленные в процессе выполнения работ, при  передаче результата инженерных изысканий, проектной документации, при  проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов  инженерных изысканий, проверки достоверности определения сетной стоимости  строительства объекта, при передаче рабочей документации, а также выявленные в  

ходе строительства , а также в процессе эксплуатации объекта, возникшие  вследствие невыполнения (или) ненадлежащего выполнения работ генеральным  проектировщиком и (или  ) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если  указанны недостатки (дефекты) причинены убытки государственному заказчику и  (или) третьи лицам, возместить убытки в полном объеме и соответствии с  законодательством Российской Федерации. В случае, если государственным  заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов),  такие недостатки (дефекты) должны быть устранены генеральным  проектировщиком в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения  уведомления о выявленных дефектах и недостатках.  

Приемка выполненных работ (результатов работ) в отношении проектной  документации и результатов инженерных изысканий осуществляется в  соответствии с графиком выполнения работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней со  дня получения положительного заключения экспертизы проектной документации и  результатов инженерных изысканий и при наличии заключения о достоверности  определения сметной стоимости строительства объекта.  

При получении положительного заключения государственной экспертизы  проектной документации и результатов инженерных изысканий и при наличии  заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства  объекта, государственный заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней письменно  уведомляет генерального проектировщика о получении такого положительного  заключения.  

 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения генеральным  проектировщиком от государственного заказчика указанного в пункте 7.2  контракта уведомления, генеральный проектировщик направляет  государственному заказчику пописанный со свое стороны акт передачи  выполненных работ (результатов работ) (приложение № 7 к контракту) в  отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий, с  приложением всех документов в объеме необходимом для приемки-передачи  выполненных работ в отношении проектной документации результатов  инженерных изысканий, в том числе:  

Отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим,  инженерно-экологическим изысканиям в количестве 4 (четырех) экземпляров на  бумажном носителе в сброшюрованном виде, 2 (два) экземпляра в электронной  форме:  

- 1-ый экз - текстовая часть в формате (*.doc), сметная документация в  формате (*.xls) и в формате (*.), графическая часть в формате (*.dwg), прошедший  сертификат соответствия;  

- 2-ой экз. в формате (*.pdf) в полном соответствии с экземплярами на  бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП,  руководителя организации, заверенными печатью, использование программных  или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или  печати разработанных документов запрещается.  

Проектную документацию, в количестве 6 (шести) экземпляров на бумажном  носителе сброшюрованном виде, 2 (два) экземпляра в электронной форме:  

- 1-ый экз. - текстовая часть в формате (*.doc), сметная документация в  формате (*.xls) и в формате (*.gsf); графическая часть в формате (*.pdf) в полном  

соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями  проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью,  использование и программных или аппаратных средств, препятствующих  редактированию, актуализации или печати разработанных документов  запрещается.  

Счета на оплату работ. (пункты 7.1- 7.3.3) 

Государственный заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня  получения подписанного генеральным проектировщиком акта приемки-передачи  выполненных работ (результата работ) и прилагаемых документов, указанных в  пункте 7.3 контракта:  

- осуществляет осмотр выполненных работ (результатов работ) при участии  генерального проектировщика;  

- подписывает представленный акт приемки-передачи выполненных работ  (результатов работ) либо направляет генеральному проектировщику почтовым  отправлением (либо с использованием средств связи и доставки корреспонденции)  письменные возражения и (или) замечания с требованием их устранении  выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.  

Генеральный проектировщик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со  дня получения уведомления генерального заказчика устраняет выявленные  недостатки.  

После устранения недостатков (дефектов) генеральный проектировщик  повторно направляет вышеназванные документы, а государственный заказчик  повторно рассматривает из в срок, установленный пунктом 7.4 контракта.  

Приемка выполненных работ (результатов работ) в отношении рабочей  документации осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ не  позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания государственным заказчиком  акта передачи рабочей документации (приложение № 6 к контракту).  

Государственный подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня  подписания акта передачи рабочей документации письменно уведомляет  генерального проектировщика о своей готовности принять выполненные работы  (результат работ) в отношении документации.  

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения генеральным  проектировщиком от государственного заказчика указанного в пункте 7.2  контракта уведомления, генеральный проектировщик направляет  государственному заказчику пописанный со своей стороны акт передачи  выполненных работ (результатов работ) (приложение № 7 к контракту) в  отношении рабочей документации с приложением всех документов в объеме,  необходимом для приемки-передачи выполненных работ в отношении рабочей  документации, в том числе:  

рабочую документацию, в количестве 6 (шести) экземпляров на бумажном  носителе сброшюрованном виде, 2 (два) экземпляра в электронной форме:  

- 1-ый экз. - текстовая часть в формате (*.doc), сметная документация в  формате (*.xls) и в формате (*.gsf); графическая часть в формате (*.dwg),  прошедший сертификат соответствия;  

- 2-ой экз. в формате (*.pdf) в полном соответствии с экземплярами на  бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП,  руководителя организации, заверенными печатью, использование программных  

или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или  печати разработанных документов запрещается.  

Счета на оплату работ. 

Графиком выполнения работ установлены сроки сдачи-приемки работ:  

N 

Наименование выполняемых видов и этапов работ  

Сроки начала выполнения  отдельных видов и этапов  работ  

Сроки окончания выполнения отдельных видов и этапов работ  

1 этап работ. 

1 

Выполнение инженерных изысканий  

1-й день с даты заключения  контракта  

30-й день с даты заключения контракта  

2 

Выполнение Проектной документации 

1-й день с даты заключения  контракта  

80-й день с даты заключения контракта  

3 

Сопровождение Проектной документации и  результатов Инженерных изысканий при  прохождении государственной экспертизы и  достоверности определения сметной стоимости  

81-й день с даты  заключения контракта  

126-й день с даты заключения контракта  

2 этап работ. 

4 

Выполнение Рабочей документации  

127-й день с даты  заключения контракта  

150-й день с даты заключения контракта  

Контрактом установлен следующий порядок осуществления платежей:  

N  

Наименовани 

е 

выполняемых 

видов и  

этапов работ  

Сумма  

авансового  

платежа, в  тыс.руб.  

включая 

НДС  

Дата 

авансового 

платежа  

Сумма оплаты  выполненных  

работ, в тыс.руб.  

без НДС  

Дата получения  

положительного заключения  государственной экспертизы  

Проектной документации и 

результатов Инженерных  изысканий, и (или) заключения  

о достоверности определения  

сметной стоимости 

строительства (при 

необходимости)  

Сроки оплаты  выполненных  

работ 

1 этап работ 

1  

Инженерные  

изыскания,  Проектная  

документация  

0,00 

- 

1 748,54854  

126-й день с даты заключения  

контракта 

15 рабочих дней с  

момента 

подписания Акта  приемки-передачи  

выполненных 

Работ в отношении  

Проектной документации и результатов Инженерных изысканий 

2 этап работ 

2  

Рабочая  документация  

0,00 

- 

2 622,82281  

- 

15 рабочих дней с  

момента 

подписания Акта  приемки-передачи  

выполненных 

Работ в отношении  

Рабочей документации 

Стоимость выполняемых работ (в тыс. руб. без НДС): 

1) Инженерные изыскания, Проектная документация – 1 748,54854 2) Рабочая документация - 2 622,82281 Итого цена контракта – 4 371, 37135 

08.06.2019 между истцом и ответчиком заключен Государственный контракт   № 0137200001219002206 на выполнение проектно-изыскательских работ для  государственных нужд Калужской области ИКЗ  

 № 192402708485540270100100210010000414, предметом которого является  выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Крытый футбольный  манеж на тренировочной площадке «Спутник».  

Согласно п. 1.2. контракта, генеральный проектировщик в установленные  сроки согласно Контракту обязуется выполнить инженерные изыскания,  осуществить подготовку проектной документации, рабочей документации в целях  строительства объекта капитального строительства, указанного в пункте 1.3  Контракта (далее - соответственно Работы, Инженерные изыскания, Проектная  документация, Рабочая документация, Объект), передать в соответствии с  Контрактом Государственному заказчику результаты указанных Работ, а  Государственный заказчик обязуется принять результаты Работ и уплатить  определенную Контрактом цену.  

1.4. Обязательства Генерального проектировщика по подготовке Проектной  документации, выполнению Инженерных изысканий считаются выполненными  при получении Государственным заказчиком положительного заключения  государственной экспертизы Проектной документации и результатов Инженерных  изысканий, положительного заключения о достоверности определения сметной  стоимости строительства Объекта. 1.5. Обязательства Генерального  проектировщика по подготовке Рабочей документации считаются выполненными  после приемки Государственным заказчиком результатов разработки Рабочей  документации по акту передачи рабочей документации  

Цена контракта (цена Работ) составляет: 2 989 895(Два миллиона девятьсот  восемьдесят девять тысяч восемьсот девяноста пять рублей) рублей 57 копеек,  НДС не облагается в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы  налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской  Федерации.  

Государственный заказчик производит оплату Работ в сроки и в размерах,  которые установлены Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 4).  (раздел 3 контракта)  

Приемка выполненных Работ (результатов Работ) в отношении Рабочей  документации осуществляется в соответствии с Графиком выполнения Работ не  позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Государственным заказчиком  акта передачи Рабочей документации (Приложение N 6 к Контракту).  

Государственный заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня  подписания акта передачи Рабочей документации письменно уведомляет  Генерального проектировщика о своей готовности принять выполненные Работы  (результаты Работ) в отношении Рабочей документации.  

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Генеральным  проектировщиком от Государственного заказчика указанного в пункте 7.10  Контракта уведомления Генеральный проектировщик направляет  Государственному заказчику подписанный со своей стороны акт приемки-передачи  выполненных Работ (результатов Работ) (Приложение N 7 к Контракту) в  отношении Рабочей документации с приложением всех документов в объеме,  необходимом для приемки-передачи выполненных Работ в отношении Рабочей  документации, в том числе:  

- Рабочую документацию, в количестве 6 (шести) экземпляров на бумажном  носителе в сброшюрованном виде, 2 (два) экземпляра в электронной форме:  

 - 1-ый экз. - текстовая часть в формате (*.doc), сметная документация в  формате (*.xls) и в формате (*.gsf); графическая часть в формате (*.dwg),  прошедший сертификат соответствия;  

- 2-ой экз. в формате (*.pdf) в полном соответствии с экземплярами на  бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП,  руководителя организации, заверенными печатью; использование программных  или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или  печати разработанных документов запрещается.  

Счета на оплату Работ. 

Государственный заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня  получения подписанного Генеральным проектировщиком акта приемки-передачи  выполненных Работ (результатов Работ) и прилагаемых документов, указанных в  пункте 7.11 Контракта:  

- осуществляет осмотр выполненных Работ (результатов Работ) при участии  Генерального проектировщика; - подписывает представленный акт приемки-передачи выполненных Работ (результатов Работ) либо направляет Генеральному  проектировщику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств  связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с  требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) Работ и (или)  документации.  

Генеральный проектировщик за свой счет и в указанный Государственным  заказчиком разумный срок устраняет выявленные при приемке выполненных Работ  недостатки (дефекты) Работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или)  обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Государственным  заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов)  осуществляется в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от  Государственного заказчика уведомления.  

После устранения недостатков (дефектов) Генеральный проектировщик  повторно в порядке, предусмотренном пунктом 7.11 Контракта, представляет к  приемке Работы (результаты Работ) и документы, подтверждающие устранение  выявленных Государственным заказчиком недостатков (дефектов).  Представленные Генеральным проектировщиком Работы (результат Работ) и  документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 7.12 Контракта,  повторно рассматриваются Государственным заказчиком  

Графиком выполнения работ установлены сроки сдачи-приемки работ: 

N 

Наименование выполняемых видов и этапов работ  

Сроки начала выполнения  отдельных видов и этапов  работ  

Сроки окончания выполнения отдельных видов и этапов работ  

1 этап работ. 

1 

Выполнение инженерных изысканий  

1-й день с даты заключения  контракта  

30-й день с даты заключения контракта  

2 

Выполнение Проектной документации 

1-й день с даты заключения  контракта  

80-й день с даты заключения контракта  

3 

Сопровождение Проектной документации и  результатов Инженерных изысканий при  прохождении государственной экспертизы и  достоверности определения сметной стоимости  

81-й день с даты  заключения контракта  

126-й день с даты заключения контракта  

N 

Наименование выполняемых видов и этапов работ 

Сроки начала выполнения  отдельных видов и этапов  работ  

Сроки окончания выполнения отдельных видов и этапов работ  

2 этап работ. 

4 

Выполнение Рабочей документации  

127-й день с даты  заключения контракта  

150-й день с даты заключения контракта  

Контрактом установлен следующий порядок осуществления платежей: 

N  

Наименовани 

е 

выполняемых 

видов и  

этапов работ  

Сумма  

авансового  

платежа, в  тыс.руб.  

включая 

НДС  

Дата 

авансового 

платежа  

Сумма оплаты  выполненных  

работ, в тыс.руб.  

без НДС  

Дата получения  

положительного заключения  государственной экспертизы  

Проектной документации и 

результатов Инженерных  изысканий, и (или) заключения  

о достоверности определения  

сметной стоимости 

строительства (при 

необходимости)  

Сроки оплаты  выполненных  

работ 

1 этап работ 

1  

Инженерные  

изыскания,  Проектная  

документация  

0,00 

- 

1 195, 95823  

126-й день с даты заключения  

контракта 

15 рабочих дней с  

момента 

подписания Акта  приемки-передачи  

выполненных 

Работ в отношении  

Проектной документации и результатов Инженерных изысканий 

2 этап работ 

2  

Рабочая  документация  

0,00 

- 

1 793,93734  

- 

15 рабочих дней с  

момента 

подписания Акта  приемки-передачи  

выполненных 

Работ в отношении  

Рабочей документации 

В исковом заявлении истец указывает, что задолженность по выполненным  

работам по спорным контрактам установлена вступившими в законную силу  решениями Арбитражного суда Калужской области по делам № А23-7992/2020,  А23-7993/2022.  

Задолженность ответчиком в срок, установленный договором, не оплачена, в  связи с чем, истец начислил ответчику проценты за пользование чужим денежными  средствами по государственному контракту № 013/200001219002202 за период с  25.08.2020 по 28.10.2022 на сумму 433 969 руб., по государственному контракту №  0137200001219002206 за период с 25.08.2020 по 25.10.2022 на сумму 295 717 руб.  

Претензией истец просил ответчика погасить образовавшуюся  задолженность.  

Требование истца осталось без ответа и удовлетворения, что послужило  основанием для обращения с иском в суд.  

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых  

актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями  делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных  законом.  

В соответствии частью 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской  Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить  по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат  заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Согласно ч. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная  оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить  подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы  при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок,  либо с согласия заказчика досрочно.  

На основании пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ  подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими  сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка  об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или  приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в  случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.  

Положения названной нормы направлены на защиту интересов подрядчика,  в случае если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления  документов, удостоверяющих приемку (пункт 8 информационного письма  Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N  51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").  

Как установлено решением суда по делу № А23-7992/2020, вступившим в  законную силу, имеющим преюдициальное значение для рассматриваемого дела,  по Государственному контракту № 0137200001219002206, дата сдачи работ  установлена судом как 27.08.2020, в связи с чем, с учетом 15-дневного срока,  период просрочки по оплате с 18.09.2020 по 25.10.2022;  

- по делу № А23-7993/2020 в отношении взыскания задолженности за  выполненные работы по государственному контракту № 013/200001219002202,  дата сдачи работ установлена судом как 04.08.2020, в связи с чем, с учетом 15- дневного срока, период просрочки по оплате с 26.08.2020 по 28.10.2022.  

В отзыве от 19.09.2023 ответчик возражает против исковых требование,  ссылаясь на то, что обязательства перед истцом исполнены в пределах сроков,  установленных бюджетным законодательством, считает расчет истца  необоснованным, ввиду чего, просит рассмотреть дело по общим правилам  искового производства.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской  Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от  их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму  долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России,  действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной  размер процентов не установлен законом или договором.  

Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №  7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской  

Федерации об ответственности за нарушение обязательств", уплата процентов за  пользование чужими денежными средствами является ответственностью за  неисполнение денежного обязательства.  

Представленный истцом расчет процентов судом проверен, признан  ошибочным, с учетом вышеизложенных обстоятельств в отношении периодов  взыскания, а также в силу следующего.  

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении  моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым  кредиторами" введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям,  подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе  индивидуальных предпринимателей.  

Положения пункта 1 настоящего постановления не применяются в  отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и  (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1  Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных  домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые  законодательные акты Российской Федерации" в единый реестр проблемных  объектов на дату вступления в силу настоящего постановления.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N  127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" для обеспечения стабильности  экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и  техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных  обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий  на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами на  срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.  

На срок действия моратория наступают последствия, предусмотренные  абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 Федерального закона от  26.10.2002 N 127-ФЗ, в том числе не начисляются неустойки (штрафы, пени) и  иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение  денежных обязательств и обязательных платежей.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497  вступило в силу со дня его официального опубликования и действует в течение  шести месяцев (с 01.04.2022 до 01.10.2022).  

Ввиду того, что обязанность по возвращению денежных средств у ответчика  возникла до введения в действие моратория, то проценты за пользование чужими  денежными средствами за период с 01.04.2022 по 01.10.2022 начислению не  подлежит.  

С учетом изложенного, требование истца о взыскании процентов за  пользование чужими денежными средства подлежит частичному удовлетворению  по контракту № 013/200001219002202 на выполнение проектно-изыскательских  работ для государственных нужд Калужской области ИКЗ  192402708485540270100100130010000414 от 08.07.2019 за период с 26.08.2020 по  28.10.2022 (исключая период действия моратория с 01.04.2022 по 01.10.2022) на  сумму 286 643 руб. 17 коп., по контракту № 0137200001219002206 на выполнение  проектно-изыскательских работ для государственных нужд Калужской области  ИКЗ 192402708485540270100100210010000414 от 08.07.2019 за период с 18.09.2020  по 25.10.2022 (исключая период действия моратория с 01.04.2022 по 01.10.2022) на  сумму 190 158 руб. 86 коп.  

При этом требование истца о применении ст. 395 ГК РФ не нарушает права  ответчика.  

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, судом признаны  несостоятельными, ввиду неправильного толкования норм материального права.  Помимо этого, судом отмечается, что наличие задолженности, даты,  подтверждающие ее возникновение, установлены вступившими в законную силу  судебными актами, имеющими преюдициальное значение для рассматриваемого  дела, по делам № А23-7992/2020, № А23-7993/2020.  

В связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за  пользование чужими денежными средства по контракту № 013/200001219002202 на  выполнение проектно-изыскательских работ для государственных нужд Калужской  области ИКЗ 192402708485540270100100130010000414 от 08.07.2019 за период с  26.08.2020 по 28.10.2022 (исключая период действия моратория с 01.04.2022 по  01.10.2022) на сумму 286 643 руб. 17 коп., по контракту № 0137200001219002206  на выполнение проектно-изыскательских работ для государственных нужд  Калужской области ИКЗ 192402708485540270100100210010000414 от 08.07.2019 за  период с 18.09.2020 по 25.10.2022 (исключая период действия моратория с  01.04.2022 по 01.10.2022) на сумму 190 158 руб. 86 коп.  

Расходы по уплате государственной пошлины судом распределяются на  основании ст.ст. 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации на ответчика, пропорционально удовлетворенным требованиям.  

Государственная пошлина на сумму 183 руб. подлежит возврату истцу из  федерального бюджета, как излишне уплаченная.  

Руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с Государственного казенного учреждения Калужской области  "Управление капитального строительства" г. Калуга в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Проект-холдинг" Чувашская Респ.,  г. Чебоксары проценты за пользование чужими денежными средства по контракту   № 013/200001219002202 на выполнение проектно-изыскательских работ для  государственных нужд Калужской области ИКЗ  192402708485540270100100130010000414 от 08.07.2019 за период с 26.08.2020 по  28.10.2022 (исключая период действия моратория с 01.04.2022 по 01.10.2022) на сумму  286 643 руб. 17 коп., по контракту № 0137200001219002206 на выполнение проектно-изыскательских работ для государственных нужд Калужской области ИКЗ  192402708485540270100100210010000414 от 08.07.2019 за период с 18.09.2020 по  25.10.2022 (исключая период действия моратория с 01.04.2022 по 01.10.2022) на сумму  190 158 руб. 86 коп., расходы по уплате государственной пошлины на сумму  11 497 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Проект-холдинг"  Чувашская Респ., г. Чебоксары из федерального бюджета государственную пошлину  на сумму 183 руб., уплаченную по платежному поручению № 223 от 10.11.2022.  

По заявлению лица, участвующего в деле, арбитражный суд составляет  мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения  арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения  

решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы  через Арбитражный суд Калужской области в срок, не превышающий пятнадцати дней  со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного  суда - со дня принятия решения в полном объеме.  

Судья В.В. Жадан