АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-688/23

г. Уфа

22 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 18.12.2023

Полный текст решения изготовлен 22.12.2023

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи Хазиахметовой З.Р., при ведении протокола  судебного заседания помощником судьи Щукиной Ю.О., рассмотрев исковое заявление  Администрации муниципального района Туймазинский район РБ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; далее - Администрация) к обществу с ограниченной ответственностью «Уфимская газовая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; далее - общество) об обязании возвратить исполнительную документацию

при участии в судебном заседании: не явились, извещены

Администрация обратилась в Арбитражный суд Республики Башкортостан  с иском  к обществу об обязании возвратить исполнительную документацию.

Определением от 13.01.2023 исковое заявление принято к производству суда.

От ответчика поступил отзыв на иск, в котором он указал, что исполнительная документация передана сотруднику ФИО1

От истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, просит Обязать Ответчика - Общество с ограниченной ответственностью «Уфимская компания» предоставить Муниципальному заказчику исполнительную документацию по объекту «Строительство сетей водоснабжения в с. Гафурово муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан», в том электронном носителе, на фактически выполненные работы по Контракту в течение дней с момента вступления в законную силу судебного решения по делу №

- журнал входного контроля качества. Уточнение принято в порядке ст. 49 АПК РФ.

Ответчик в судебном заседании в порядке статьи 49 АПК РФ признал исковые требования.

Иных заявлений и ходатайств не поступило. 

Рассмотрев заявленные требования, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между Администрацией (заказчик) и обществом (подрядчик) заключен контракт от 23.08.2019 № 01015000003190012160001, согласно которому Подрядчик в установленные сроки согласно Контракта, действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, проектной документацией (с учётом Приложения №1 к Разделу № I «Описания объекта закупки (Технического задания)» документации об электронном аукционе, по результатам которого заключён Контракт) и в установленные Контрактом сроки, обязуется выполнить все строительно-монтажные работы и иные предусмотренные Контрактом мероприятия по строительству объекта капитального строительства, указанного в пункте 1.2 Контракта (далее - работы, Объект), и передать Объект Заказчику, а Заказчик обязуется принять Объект и уплатить определенную Контрактом цену.

Согласно пункту 3.1 контракта Цена Контракта составляет 81 655 318,99 рублей, в том числе НДС 20% 13 609 219,83 рублей.

I этап составляет 40 827 659,50 рублей, в том числе НДС 20% 6 804 609,92 рублей

II этап составляет 40 827 659,49 рублей, в том числе НДС 20% 6 804 609,92 рублей.

(Примечание: в случае., если Подрядчик не является плательщиком НДС, слова в том числе НДС 20 % заменяются на слова в НДС не облагается на основании главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 8.2 контракта при завершении выполнения работ по Контракту Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:

подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ в отношении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ;

исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов;

счета на оплату работ и счета-фактуры.

Согласно пункту 8.8 контракта после завершения строительства Объекта Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении строительства Объекта и готовности предъявить законченный строительством Объект к приемке и передаче с» о Заказчику (далее - уведомление о завершении строительства Объекта) с приложением документов, необходимых для приемки Объекта, в том числе подписанных им:

акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту);

акта приемки законченного строительством Объекта (Приложение № 5 к Контракту); в 3 (трёх) экземплярах: исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, необходимых для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также для получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Проектной документации, переданной Заказчиком Подрядчику для выполнения работ, и рабочей документации; счета на оплату работ и счета-фактуры; 

Документа,  подтверждающего соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, подписанного Подрядчиком;

документа, подтверждающего соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанного Подрядчиком;

документов, подтверждающих соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям, подписанных представителями организаций, осуществляющих 

схемы, на которых отображены расположение построенного объекта капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, и схемы планировочной организации земельного участка;

иной отчетной документации в отношении Объекта, предусмотренной законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В случае, предусмотренном пунктом 12.17 Контракта, При расторжении Контракта Подрядчик, получивший решение об отказе от исполнения Контракта от Заказчика, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого решения предпринять следующие действия:

прекратить работы;

передать Заказчику работы, выполненные на момент получения им решения об отказе от исполнения Контракта, оборудование и материалы, находящиеся на строительной площадке и предназначенные для выполнения работ;

вывезти строительную технику Подрядчика и установленные Подрядчиком временные конструкции со строительной площадки;

передать Заказчику Проектную документацию, исполнительную документацию, и иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные затраты; 

иные действия, предусмотренные Контрактом.

Обязательство по муниципальному контракту, по строительству объекта в полном объеме Ответчиком не выполнены, сроки выполнения работ по контракту нарушены. Требования Заказчика по завершению строительства объекта и сдачи законченного объекта осталось Ответчиком без исполнения.

Всего Ответчиком выполнены работы по муниципальному контракту на сумму 64 455 418,64 рублей, что составляет 79 % (семьдесят девять процентов) от общего объема работ по контракту.

В результате ненадлежащего исполнения Ответчиком обязательств по муниципальному контракту, 10.06.2022г. Истцом было принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Данное решение вступило в законную силу 28.06.2022г.

В адрес ответчика направлена претензия с требованием завершения работ и возврате исполнительной документации. Ответ на нее не поступал, в связи с чем истец обратился в суд с рассматриваемым требованием об обязании ответчика передать исполнительную документацию.

Проанализировав представленные в материалы дела документы, суд пришел к выводу, что сторонами заключен договор, который по своей правовой природе является договором подряда. Соответственно, правоотношения сторон в данном случае регулируются § 1 гл. 37 ГК РФ.

В соответствии со ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащими образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (ст. 702 ГК РФ).

Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии со ст. 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

В случае, предусмотренном пунктом 12.17 Контракта, При расторжении Контракта Подрядчик, получивший решение об отказе от исполнения Контракта от Заказчика, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого решения предпринять следующие действия:

прекратить работы;

передать Заказчику работы, выполненные на момент получения им решения об отказе от исполнения Контракта, оборудование и материалы, находящиеся на строительной площадке и предназначенные для выполнения работ;

вывезти строительную технику Подрядчика и установленные Подрядчиком временные конструкции со строительной площадки;

передать Заказчику Проектную документацию, исполнительную документацию, и иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные затраты; 

иные действия, предусмотренные Контрактом.

Судом установлено, что истцом 10.06.2022 было принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.

Доказательств того, что исполнительная документация по объекту «Строительство сетей водоснабжения в с. Гафурово муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» передана в полном объеме в Министерство в материалы дела не представлено.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела документы в их совокупности и взаимосвязи, суд, руководствуясь статьями 309, 310, 726, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, установил, что передача комплекта исполнительной документации предусмотрена п.12.17 договора, однако таковая в отношении работ по объекту «Строительство сетей водоснабжения в с. Гафурово муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» не была направлена в адрес истца, претензия истца о передаче оставлена без удовлетворения, суд пришел к выводу о ненадлежащем исполнении подрядчиком обязанности по передаче исполнительной документации заказчику, в связи с чем требования подлежат удовлетворению.

Обществом указанные обстоятельства не оспорены, уточненные исковые требования признаны ответчиком в порядке статьи 49 АПК РФ.

Согласно частям 3, 5 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Суд не усматривает оснований полагать, что признание обществом иска противоречит закону или нарушает права других лиц.

При таких обстоятельствах суд с учетом результатов оценки представленных в материалы дела доказательств, принимая во внимание факт признания иска обществом, приходит к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения требований истца об обязании ответчика передать исполнительную документацию.

В соответствии со статьей 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом заявлено требование неимущественного характера в связи с чем, размер государственной пошлины за подачу искового заявления неимущественного характера составляет 6 000 руб. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).

Согласно пункту 1.1 части 1 статьи 333.37 НК РФ государственные органы, выступающие по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, в качестве истцов или ответчиков, освобождены от уплаты государственной пошлины.

Согласно пункту 2 части 2 статьи 333.17 НК РФ ответчики признаются плательщиками государственной пошлины в случае, если решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от ее уплаты. Соответственно, государственная пошлина в сумме 6 000 рублей подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Вместе с тем, суд учитывает, что в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при признании ответчиком иска до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Поскольку ответчик признал иск государственная пошлина в сумме 1800 руб. (30% от суммы государственной пошлины) относится на ответчика в силу положений статьи 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Уфимская газовая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда предоставить Администрации муниципального района Туймазинский район РБ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) исполнительную документацию по объекту «Строительство сетей водоснабжения в с. Гафурово муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан», в том электронном носителе, на фактически выполненные работы по Контракту: журнал входного контроля качества.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Уфимская газовая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 1800 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья З.Р. Хазиахметова