АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЕ Дело № А43-16405/2024 

 г. Нижний Новгород 25 июня 2025 года  

Руководствуясь статями 110, 167-171, 180, 181, 182, 319, 321 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

По основному иску: Требования истца удовлетворить в полном объеме. 

Признать одностороннюю сделку НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Нижегородской области" по расторжению договора № о203250000082300075 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу г.Арзамас Нижегородская область ул.Березина д.39 недействительной.  

Взыскать с НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Нижегородской области" (ИНН 

<

***>), в общества с ограниченной ответственностью "Капитель" (ИНН 

<

***>), 4027913 руб. стоимость фактически выполненных работ по договору, 6000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины,  

Взыскать НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Нижегородской области" (ИНН 

<

***>) 145897 руб. 00 коп. в доход федерального бюджета государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. По встречному иску: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Капитель" (ИНН 

<

***>), в пользу НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Нижегородской области" (ИНН 

<

***>), 817510 убытков, 100000 неустойки,19094 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

 Произвести в порядке пункта 2 части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации зачет встречных требований, в результате которого взыскать НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Нижегородской области" (ИНН 

<

***>), в общества с ограниченной ответственностью "Капитель" (ИНН 

<

***>), 3197309 руб. 00 коп. задолженности за выполнение работ.  

Взыскать НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Нижегородской области" (ИНН 

<

***>) 120440 руб. 00 коп. в доход федерального бюджета государственной пошлины  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.В. Верховодов