Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А40-270078/23-107-2047

22 марта 2024 года

г. Москва

Резолютивная часть решения изготовлена 13 марта 2024 года

Полный тест решения изготовлен 22 марта 2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-270078/23-107-2047 по иску ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) к ответчику ООО "АЛЬТЕКА" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) о взыскании суммы неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса по договору № 04/09-2022-АТЛ от 12.09.2022 в размере 22 594 279,40 р., неустойки в размере 2 540 532,99 р., при участии представителя истца: не явился, извещен, представителей ответчика: ФИО2, доверенность от 13.03.2024, паспорт, диплом,

УСТАНОВИЛ:

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ" обратилось в суд к ООО "АЛЬТЕКА" с требованием о взыскании суммы неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса по договору № 04/09-2022-АТЛ от 12.09.2022 в размере 22 594 279,40 р., неустойки в размере 2 540 532,99 р. 

Истца на судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, в связи с чем, спор рассматривается в отсутствие представителя истца в порядке ст.ст.123,156 АПК РФ. 

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам отзыва.   

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных требований в виду следующего. 

Как следует из материалов дела, между ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ" и ООО "АЛЬТЕКА" заключен договор поставки от 12 сентября 2022 года №04/09-2022/АТЛ, в соответствии с которым поставщик обязался изготовить, поставить и смонтировать светопрозрачные конструкции на объекте «Детская поликлиника, ул.Лебедянская, вл.33», а покупатель обязался принять и оплатить такие изделия. Цена договора составила 24 293 864 руб.

Дополнительным соглашением №1 к договору от 02 декабря 2022 года, цена договора увеличилась и составила 25 405 329,94 руб. Срок изготовления, поставки и монтажа изделия в течение 60-ти календарных дней с момента получения аванса, то есть с 19.09.2022 (п.3.1 договора). Срок истек 18.11.2022.    

Покупатель выплатил поставщику аванс на общую сумму 22 594 279,40 руб., что подтверждается платежными поручениями №2312 от 15.09.2022 на сумму 22 094 279,40 руб. и №3159 от 30.08.2023 на сумму 500 000 руб. 

По состоянию на 20.09.2023 (дата принятия истцом решения об одностороннем отказе от исполнения договора): поставка и монтаж изделий не были произведены, просрочка составила 19.11.2022-20.09.2023 (306 дней); расчетная неустойка за нарушение 60-ти дневного срока изготовления, поставки и монтажа Изделий составила: 22 094 279,40 х 306 х 0.1% = 6 760 849,49 руб.; с учетом ограничения, предусмотренного п. 12.7 договора, сумма подлежащей к уплате неустойки равна 2 540 532,99 руб.

05.09.2023 в 10:33 с указанного в реквизитах договора адреса электронной почты истца info@atlant-sk.com на указанный в реквизитах договора адрес ответчика alteka.info@mail.ru письмом исх. № 09/23-1158 от 05.09.2023 истцом была направлена претензия по договору поставки № 0409-2022-АТЛ от 12.09.2022 с требованием: не позднее 10 дней с даты отправки упомянутой претензии перечислить сумму неустойки в размере 2 540 532,99 руб. на расчетный счет ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ"; не позднее 10 дней с даты отправки упомянутой претензии произвести поставку и монтаж предусмотренных договором изделий в полном объеме; в течение 5 рабочих дней направить истцу в электронном виде (в виде электронных образов подлинных документов), а также на бумажном носителе ценным письмом с описью вложения и (или) нарочным документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Претензия исх. № 09/23-1158 от 05.09.2023 также была продублирована в виде приложения к письму истца исх. № 09/23-1269 от 21.09.2023, врученного ответчику 05.10.2023 почтовым отправлением 10881380117031 по правилам обмена юридически значимыми сообщениями, предусмотренным п.3 ст.54 ГК РФ.

Предъявленные претензией истца исх. № 09/23-1158 от 05.09.2023 требования -были ответчиком проигнорированы.

В соответствии с п. 11.3 договора он может быть расторгнут истцом в одностороннем порядке в том числе в случае задержки ответчиком выполнения работ по договору более чем на 10 календарных дней по причинам, независящим от истца.

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

21.09.2023 в 10:40 с указанного в реквизитах договора адреса электронной почты истца intb@atlant-sk.com на указанный в реквизитах договора адрес ответчика alteka.info@mail.ru письмом исх. № 09/23-1269 от 21.09.2023 «Уведомление об отказе от исполнения договора поставки № 04/09-2022-АТЛ от 12.09.2022», также направленным почтовым отправлением 10881380117031, врученным ответчику 05.10.2023 почтовым отправлением 10881380117031 по правилам обмена юридически значимыми сообщениями, предусмотренным п.3 ст.54 ГК РФ, в соответствии с пунктами 11.З., 12.6., 13.3. договора, ст. 1102 ГК РФ, истец: уведомил ответчика об одностороннем отказе в полном объеме от исполнения договора № 04/09-2022-АТЛ от 12.09.2022; потребовал не позднее 10 дней с даты получения претензии перечислить сумму неосновательного обогащения (неотработанного аванса) в размере 22 594 279,40 руб.; повторно потребовал не позднее 10 дней с даты получения претензии перечислить сумму неустойки в размере 2 540 532,99 руб.

Предъявленные претензией истца исх. № 09/23-1269 от 21.09.2023 требования -были ответчиком проигнорированы, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

Согласно п. 13.3. договора срок урегулирования спора в претензионном порядке составляет 10 календарных дней с даты отправки.

Соблюдение досудебного (претензионного) порядка разрешения спора подтверждается: письмом истца исх. № 09/23-1158 от 05.09.2023 - в части неустойки; письмом истца исх. № 09/23-1269 от 21.09.2023 - в части неосновательного обогащения и неустойки.

Удовлетворяя исковые требования в части суд исходит из следующего. 

В соответствии с п.8.1 договора поставщик предоставляет покупателю документы на изделия и акты о приемке выполненных монтажных работ по формам ТОРГ-12, КС-2, КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и необходимые для оплаты счета-фактуры.

Согласно п.8.2 договора покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления документов осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ. В том случае, если в обусловленный срок покупатель не направит обоснованный отказ, товар считается принятым, а работы выполненными и подлежащими оплате.

20 декабря 2022 года между покупателем и продавцом подписан акт №1 о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ на сумму 6 900 852,25 руб.

20 мая 2023 года по акту приема передачи документации представителю ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ" переданы документы: акт выполненных работ КС-2 на сумму 5 203 649,58 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на сумму 5 203 649,58 руб.

Поскольку обоснованного отказа в принятии этих документов от покупателя к поставщику не поступало, то товар считается принятым, а работы выполненными 29 мая 2023 года.

20 августа 2023 года по акту приема передачи документации представителю ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ" переданы документы: акт выполненных работ КС-2 на сумму 1 650 978,92 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на сумму 1 650 978,92 руб.

Поскольку обоснованного отказа в принятии этих документов от покупателя к поставщику не поступало, то товар считается принятым, а работы выполненными 28 мая 2023 года.

Таким образом, покупателем получен товар и приняты услуги на общую сумму 13 755 480,75 руб. оставшаяся задолженность составляет  8 838 798,65 руб., которая подлежит взысканию с ответчика в судебном порядке.  

Согласно ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 12.6. договора в случае просрочки исполнения ответчиком обязательств по изготовлению, поставке и монтажу изделий ответчик обязуется оплатить истцу неустойку в размере 0,1% от суммы уплаченного аванса за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных договором, не может превышать 10% от цены договора, то есть 2 540 532,99 руб. (п. 12.7. договора). Представленный истцом и проверенный судом расчет, признается обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В отношении снижения размера финансовых санкций судом установлено, что с учетом положений статьи 333 ГК РФ и Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВАС РФ № 81), исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика, который должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

Суд, учитывая длительную просрочку исполнения обязательств по выполнению работ, наличие ограничения в 10% от цены договора, а также отсутствие надлежащих доказательств чрезмерности размера неустойки, считает, что основания для ее снижения предусмотренные статьей 333 ГК РФ в данном случае отсутствуют. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины понесенные истцом подлежат взысканию с ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "АЛЬТЕКА" в пользу ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАНТ" сумму неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса по договору № 04/09-2022-АТЛ от 12.09.2022 в размере 8 838 798,65 р., неустойки в размере 2 540 532,99 р. (всего задолженность и проценты в размер 11 379 331,64 р.), государственную пошлину в размере 67 309 р.

В остальной части отказать в удовлетворении требований.

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.    

СУДЬЯ

М.В. Ларин