АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, http://krasnoyarsk.arbitr.ru/

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

12 января 2018 года

Дело № А33-29861/2017

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 174, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования Администрации города Ачинска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, г. Ачинск, дата регистрации - 11.02.1997) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибрегионстрой» (ИНН 2462230034, ОГРН 1142468010277, г. Красноярск, дата регистрации - 18.02.2014) в пользу Администрации города Ачинска (ИНН 2443006171, ОГРН 1022401158482, Красноярский край, г. Ачинск, дата регистрации - 11.02.1997) 97 990,96 руб. штрафа по муниципальному контракту № 0119300000116000318-01/01-23-551 от 23.08.2016.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Сибрегионстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации - 18.02.2014) безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных на основании муниципального контракта № 0119300000116000318-01/01-23-551 от 23.08.2016, а именно:  произвести замену бортового камня на цветочных клумбах территории, прилегающей к зданию администрации города Ачинска по периметру, в количестве 252 штук, в течение 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибрегионстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации - 18.02.2014) в доход федерального бюджета 9 920 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя. 

Судья

Л.О. Петракевич