АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-9164/2018

23 августа 2018 года

город  Симферополь

 

Резолютивная часть решения объявлена   22.08.2018 года.

Полный текст решения изготовлен  23.08.2018 года.

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Потопальского С.С., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску  общества с ограниченной ответственностью «Бристоль-проект», г.Воронеж,

к обществу с ограниченной ответственностью «КрымМехТранс», г.Симферополь,

о взыскании.

с участием представителей сторон:

от истца – ФИО2 по доверенности б/н от 21.03.2018 г.

от ответчика – не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Бристоль-проект», г.Воронеж обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к обществу с Общества ограниченной ответственностью «КрымМехТранс», г.Симферополь, о взыскании: задолженности в сумме 5 500 727,89 руб., 82 363,32 руб. пени, 1 329 146,31 руб.

14.08.2018 г. представитель истца подал ходатайство об уточнении исковых требований от 13.08.2018 г., в котором изложил требования в следующей редакции:

1. Взыскать с ООО «КрымМехТранс» в пользу ООО «Бристоль-проект» сумму основного долга по Договору в размере 4 000 727,89 руб.

2. Взыскать с ООО «КрымМехТранс» в пользу ООО «Бристоль-проект» сумму пени за нарушение сроков оплаты аванса по Договору в размере 82 363,32 руб.

3. Взыскать с ООО «КрымМехТранс» в пользу ООО «Бристоль-проект» сумму пени за нарушение сроков оплаты по Договору в размере 1 489 175,43 руб.

4. Расходы по госпошлине отнести на Ответчика.

Суд протокольным определением принял к рассмотрению ходатайство об уточнении исковых требований от 13.08.2018 г.

В ходе судебного заседания 21.08.2018 представитель истца подал ходатайство об уточнении исковых требований от 21.08.2018 г., в котором изложил исковые требования в следующей редакции: взыскать с ООО«КрымМехТранс» в пользу ООО «Бристоль-проект»:

- сумму основного долга по Договору в размере 4 000 727,89 рублей.

- сумму пени за нарушение сроков оплаты аванса по Договору в размере 135 021,84 рублей.

- сумму пени за нарушение сроков оплаты по Договору в размере 665 050,95 рублей.

Суд протокольным определением принял к рассмотрению ходатайство об уточнении исковых требований от 21.08.2018 г.

Представитель истца явку в судебное заседание обеспечил, дал пояснения по существу спора, просил иск удовлетворить.

Ответчик письменный отзыв суду не предоставил, явку уполномоченного представителя не обеспечил, о времени и месте проведения судебного заседания извещен путем направления судом копии определения по месту регистрации.

Информация о движении дела и определения суда опубликованы на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым в сети Интернет http://www.crimea.arbitr.ru и сайте http://kad.arbitr.ru.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между Обществом с ограниченной ответственностью «КрымМехТранс» (далее - Заказчик, Ответчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Бристоль-проект» далее - Исполнитель, Истец), заключен Договор №39/П на разработку рабочей документации по объекту: Строительство дороги микрорайона Фонтаны - Новониколаевский в г. Симферополе от 15.06.2017 года (далее - Договор), (л.д. 27-37).

Согласно п. 1.1. Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке рабочей документации по представленной Заказчиком проектной документации (далее - Проект) и технического задания (приложение № 1 к Договору) по объекту: Строительство дороги микрорайона Фонтаны-Николаевский в г. Симферополе (далее Объект), а Заказчик принимает на себя обязательство принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

В силу п. 1.2. Договора Результатом выполненных работ по настоящему Договору является разработанная рабочая документация в соответствии с предоставленным Заказчиком Проектом на основании акта приема-передачи (приложение №2 к Договору) и техническим заданием (приложение №1 к Договору), с отсутствием замечаний со стороны Заказчика и завершенная в сроки, установленными п. 4.1. Договора.

В соответствии пунктом 2.1. Цена Договора составляет 9 500 727 (Девять миллионов пятьсот тысяч семьсот двадцать семь) руб. 89 коп., включая НДС 18 процентов 1 449 263 (Один миллион четыреста сорок девять тысяч двести шестнадцать три) руб. 58 коп., согласно приложению №4 к Договору.

В силу п. 3.1. Договора оплата за выполненные работы производится в несколько

этапов:

- На первом этапе Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в размере 30 процентов - 2 850 218 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч двести восемнадцать) рублей 37 копеек в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

- На последующих этапах оплата производится ежемесячно пропорционально выполненным работам в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ (приложение №6 к Договору) путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 14 Договора.

- Аванс вычитается пропорционально выполненным работам.

В соответствии с п. 8.1. Приемка выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком поэтапно (ежемесячно - до 25 числа), пропорционально выполненным работам с момента предоставления Исполнителем с сопроводительным письмом следующих документов:

- рабочей документации в бумажном виде в количестве 1 (одного) экземпляра (результата работ (этапа работ)) с актом приема-передачи рабочей документации (приложение №5 к Договору);

- акта о приемке выполненных работ (приложение №6 к Договору);

- счета на оплату;

- счета-фактуры.

В силу п. 8.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения рабочей документации (результата работ (этапа работ)) по акту приема-передачи (приложение №5 к Договору) работ (этапов работ) и акту о приемке выполненных работ (приложение №6 к Договору) обязан их рассмотреть и принять.

Согласно п. 8.3. Договора при отсутствии замечаний Заказчик после указанного в п.8.2, настоящего Договора срока, на следующий рабочий день направляет Исполнителю с сопроводительным письмом подписанный со своей стороны экземпляр акта о приемке выполненных работ.

27.06.2017г. (с нарушением срока на 5 (календарных дней)) Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя в качестве аванса перечислены денежные средства в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп. (л.д. 52), при этом оплата аванса произведена в меньшем размере, то есть с нарушением п. 3.1. Договора.

Задолженность Заказчика по оплате аванса составляет 1 350 218,37 рублей.

В соответствии с п. 9.3. Договора при нарушении Заказчиком сроков оплаты по Договору, он выплачивает Исполнителю пени в размере из расчета 0,1% (один процент) за каждый день просрочки, но не более 10% (пяти процентов) от невыплаченной суммы.

Пеня за нарушение сроков оплаты аванса по Договору составляет 135 021,84 руб., исходя из расчета предоставленного к ходатайству об уточнении исковых требований.           

Расчет проверен судом, произведен верно.

В силу п. 7.3. Исполнитель имеет право сдать выполненную работу досрочно.

«15» августа 2017г. Заказчиком и Исполнителем подписан акт о приёмке выполненных работ №39/1, который доказывает, что ООО «Бристоль-проект» исполнило обязательства по Договору, а результат выполненных работ по Договору принят ООО «КрымМехТранс» в полном объёме, без замечаний качеству и сроку исполнения работ (л.д. 56).

Согласно абз. 2 ст. 3.1. Договора, оплата работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работа на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 14 Договора.

В соответствии с указанным пунктом Договора, ООО «КрымМехТранс» обязано  оплатить оставшуюся сумму денежных средств за выполненные и приятые без замечаний  работы в размере 8 000 727 (Восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч) руб. 89 коп. не позднее «22» августа 2017г.

Заказчик частично погасил задолженность следующими платежами с нарушением  срока оплаты: 16.11.2017г. - 1 000 000 рублей; 17.11.2017г. - 1 000 000 рублей; 01.12.2017г. - 500 000 рублей (л.д. 53-55), и 04.07.2018 – 1 500 000 руб. во время рассмотрения спора в суде.  

В остальной части ответчик обязательства не исполнил, в связи с чем возникла задолженность перед Исполнителем в размере 4 000 727, 89 руб.  

В соответствии с п. 9.3. Договора, пеня за нарушение сроков оплаты по Договору составляет 665 050, 95 руб., исходя из расчета пени, предоставленного к заявлению об уточнении  исковых требований. Расчет проверен судом, произведен верно.

В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 12.1. Договора ООО «Бристоль-проект» обращалось к ООО «КрымМехТранс» с претензией от 06.04.2018 исх. №ЮРО/867 с требованием погасить задолженность в полном объеме основного долга, а также пени за нарушение сроков оплаты, но по настоящее время данные требования не исполнены.

При подаче искового заявления истец подал ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины от 08.06.2018 г., ввиду тяжелого финансового положения, в связи с чем государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд                                              

                                                РЕШИЛ:

Удовлетворить иск полностью. 

Взыскать с Общества ограниченной ответственностью «КрымМехТранс», (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 9102070187/910201001, дата регистрации 05.01.2015)  в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Бристоль-проект», (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 3664114480/366401001, дата регистрации 13.10.2011)  сумму задолженности в размере 4 000 727,89 руб., сумму пени за нарушение сроков оплаты аванса в размере 135 021,84 руб., пени за нарушение сроков оплаты по Договору в размере 665 050,95 руб.

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью «Бристоль-проект» (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 3664114480/366401001, дата регистрации 13.10.2011)  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 47 004,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

 

Судья                                                     С.С. Потопальский