188/2020-96502(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  10 августа 2020 года А46-13964/2019  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Баландина В.А. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом заседании суда дело по иску бюджетного учреждения города  Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора:  

- открытого акционерного общества «Омский СоюзДорНИИ» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

- общества с ограниченной ответственностью «Сибирский инновационный  испытательный центр» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

- общества с ограниченной ответственностью «Технадзор» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>),  

об обязании выполнить работы, 

В заседании приняли участие: от истца – ФИО2 по доверенности от 30.01.2020 № 18; от ответчика – ФИО3 по доверенности от 06.07.2020 № 58; от третьих лиц – не явились; 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу  

устранить за счет собственных средств дефекты на автомобильных дорогах в рамках  

гарантийных обязательств, а именно: 

1) по улице Машиностроительная от улицы Новокирпичная до магазина  

«Метро» по Черлакскому тракту: 1. Завышение кромки а/б покрытия в районе перекрестка с улицей Цеховой. 2. Выбоины на сопряжении с улицей Фрезерной. 3. Проседание а/б покрытия на перекрестке с улицей Фрезерной - 4 кв.м. 4. Сетка трещин на перекрестке с улицей Фрезерной - 2 кв.м. 5. Выбоина районе дома 82 по улице Машиностроительная - 2 кв.м. 6. Разрушение а/б покрытия в районе дома 82 по улице Машиностроительная - 26 кв.м. 

7. Пролом а/б покрытия в районе магазина «Южный» 5 кв.м.  

8. Просадка а/б покрытия перед перекрестком с улицей Гашека 10 кв.м.  9. Просадка а/б покрытия в районе карты на перекрестке с улицей Гашека 10 кв.м.  

10. Колейность в районе дома № 145А по ул. Путевая - 50 м.п. глубиной свыше 3 см. 

11. Выбоины у дома 93 по ул. Машиностроительная в старом дефектном месте - 16 кв.м.  12. Просадка с разрушением а/б покрытия в конце участка у строения Черлакский тракт  дом 5 —40 кв.м..  

13. Продольные трещины в конце участка вблизи строения Черлакский тракт  дом 5-20 м.п.  

2) улице ФИО4 от улицы Нейбута до улицы ФИО8: 

1. Продольная трещина от сопряжения улиц ФИО4 и Нейбута - 15 м.п. 

2. Колейность 3 см по левой стороне 18 м.п. 

3. Разрушение кромки а/б покрытия в районе выезда между домами 40, 42 по улице Б.  

Хмельницкого. 

4. Разрушение а/б покрытия решетки вокруг ливневой канализации в районе дома 42 по  

улице ФИО4. 

5. Разрушение а/б покрытия вокруг колодца на перекрестке с улицей Омской.  6. Сетка трещин 8 кв.м. на перекрестке с улицей Омской.  

7. Выбоины и разрушение а/б покрытия 20 кв.м. за перекрестком с улицей Омской. 

8. Продольная трещина в районе дома 61 по улице ФИО4 -10 м.п.  9. Продольная трещина на сопряжении с улицей Иркутской - 15 м.п.  

10. Разрушение кромки напротив дома 77 по улице ФИО4 по правой стороне.  11. Продольная трещина в районе дома 77 по улице ФИО4 - 10 м.п.  

12. Разрушение кромки напротив дома 81 по улице ФИО4 по правой стороне.  13. Разрушение кромки в районе выезда дома 44 по улице ФИО4.  

14. Разрушение а/б покрытия в районе съезда на ООТ «10 лет Октября».  15. Колейность 3,4 см за перекрестком с улицей 10 лет Октября - 3 м.п.  16. Продольная трещина в районе дома 106 по улице ФИО4 - 8 м.п.  

17. Занижение с разрушением а/б покрытия вокруг колодца в районе дома 112 по улице  

ФИО4 в объеме 1 кв.м. 

18. Продольная трещина от дома 112 по улице ФИО4 до улицы  

ФИО5 - 110 м.п. 19. Завышение колодца в районе дома 120 по улице ФИО4 свыше 3 см. 

20.ФИО10 на сопряжении с трамвайным полотном у 

<

...> в  

объеме 1,5 м.п. 

21. Просадка покрытия у линии трамвайного полотна на повороте рельс на улицу  

ФИО4 в районе 

<

...> в объеме 2 кв. м. 

22. Разрушение а/б покрытия вокруг колодца в районе дома 131 по улице Б.  

Хмельницкого 1,5 кв.м. 

23. Продольная трещина от улицы ФИО5 до дома 128 по улице Б.  

Хмельницкого - 80 м.п. 24. Закатанный люк в районе дома 128 по улице ФИО4. 25. Просадка с разрушением а/б покрытия вокруг колодца в районе дома 161 по улице ФИО4 1,5 кв.м. 

26. Поперечная колейность глубиной свыше 3 см на перекрестке с улицей  

Красных Зорь. 

27. Занижение колодца в районе перекрестка с улицей Красных Зорь на 3 см.  28. Продольная трещина на сопряжении с улицей Красных Зорь - 20 м.п.  

29. Ширина покрытия не доходит до бордюрного камня 50 см у домов 136,138 по улице  

ФИО4. 

30. Разрушение а/б покрытия вокруг колодца в районе дома 189 по улице  

ФИО4 0,5 кв.м. 

31. Просадка покрытия в районе дома 189 по улице ФИО4 по правой стороне  

1,5 кв.м. 

32. Продольные трещины от улицы Красных Зорь - 2X100 м.п..  33. Разрушение кромки в районе дома 138 по улице ФИО4- 15 м.п.  

34. Продольные трещины в районе дома 138 по улице ФИО4 - 2X20 м.п. 

35. Продольная трещина в районе дома 140 по улице ФИО4 - 26 м.п.  

36. Продольная трещина на сопряжении с выездом от дома 140 по улице  

ФИО4. 

37. Проседание 10 кв.м. в районе выезда от дома 140 по улице ФИО4.  38. Продольная трещина в районе дома 144 по улице ФИО4 - 40 м.п.  

39. Разрушение кромки предположительно у колодца в районе дома 148 по улице Б.  

Хмельницкого 1 м.п. 

40. Закатанный колодец на перекрестке с улицей ФИО8 2 кв.м.  41. Разрушение а/б покрытия вдоль трамвайных путей 1 кв.м.  

3) улице Блусевич от улицы Вокзальная до улицы Невского:  1. Разрушение а/б покрытия от улицы Дзержинского до дома 52 по улице Блусевич 0,5  

кв.м. 

2. Выбоины в районе домов 32, 30 по улице Блусевич 1,5 кв.м.  

3. Выбоины на выезде от дома 47 по улице Толстого 1 кв.м.  4. Выкрашевание а/б покрытия в районе 

<

...> кв.м.  

5. Выкрашивание а/б покрытия в районе домов 10, 8 по улице Блусевич - 20 кв.м.  6. Колейность от ул. Дзержинского до дома 52 по ул. Блусевич глубиной свыше 3 см.  

7. Колейность от 

<

...> до ул. Горького глубиной свыше 3 см.  8. Колейность от д. 27 до 

<

...> свыше 3 см.  

9. Колейность от д. 15 до 

<

...> по правой стороне глубиной свыше 3 см. 10. Колейность от д. 3 до 

<

...> свыше 3 см. 

4) улице Воровского от улицы 1-я Красной Звезды до ООТ «Калитка»:  

1. Просадка а/б покрытия напротив трансформаторной будки в районе ООТ  «Калитка» 6 кв.м.  

2. Просадка а/б покрытия в районе колодца уд. 119 по ул. Воровского 4 кв.м.  3. Просадка и колейность в районе перекрестка с улицей 10-я Электровозная.  4. Сетка трещин за перекрестком с улицей 10-я Электровозная 1,5 кв.м.  

5. Просадка а/б покрытия в районе дома 112 по улице Воровского 2 кв.м.  6. Продольные трещины на участке от дома 112 по улице Воровского - 180 м.п.  

7. Выбоины и разрушение а/б покрытия в районе дома 2 по улице Воровского 2 кв.м.  

8. Выбоины в конце участка на сопряжении с улицей 1-я Красной Звезды 1,5 кв.м.  

5) улице Звездова от улицы Куйбышева до улицы Маршала ФИО6:  

1. Колейность от перекрестка ул. Звездова, Куйбышева с обеих сторон 48,5 м.п.  

глубиной свыше 3 см. 

2. Напротив входа в Картографическую фабрику продольная трещина - 5 м.п.  3. Занижение люка на выезде с парковки Картографической фабрики на 3 см.  

4. Просадка до 60 кв.м. с продольной трещиной в районе выезда с парковки  

Картографической фабрики. 

5. Заплатка на асфальте в районе дома 52 по улице Звездова, предположительно люк 1,5  

кв.м. 

6. Люк выше уровня полотна на 3 см. с разрушением асфальта у 

<

...>  

1,5 кв.м. 7. Сетка трещин 105 кв.м. в районе дома 50 по улице Звездова 

8. Просадка люка с разрушением асфальта, перекресток улиц Звездова и  

Декабристов 1,5 кв.м. 9. Просадка в районе дома 25 по улице Звездова 6 кв. м. 

10. Разрушение а/б покрытия вокруг колодца на пересечении улиц Звездова и 30 Лет  

ВЛКСМ 1,5 кв.м. 

11. Разрушение а/б покрытия вокруг колодца в районе мойки дом 23 по улице Звездова  

1,5 кв.м. 

12. Колейность от КПП дом 23 по улице Звездова 20 м.п. глубиной свыше 3 см.  13. Просадка до 30 кв.м. пересечение улиц Звездова и Учебная.  

14. Сетка трещин от улицы Учебная до улицы Слободской 50 кв.м. 

15. Просадка асфальта вокруг колодцев в районе около 25 метров от улицы  

Маршала ФИО6. 

6) Красноярский тракт от улицы Малиновского на протяжении 2,5 км.:  1. На участке от 1,5 км до 2 км от улицы Малиновского продольная трещина 300 м.п.  

7) улице Куйбышева от улицы Маяковского до улицы 10 лет Октября:  

1. Поперечная трещина на сопряжении улиц Куйбышева и 10 лет Октября.  2. Выбоины по улице Куйбышева около 3 м. от улицы 10 лет Октября до 1,5 кв.м.  

3. Выбоины напротив магазина «Пивоман» у д. 10 лет Октября д. 70 1 кв.м.  

4. Разрушение кромки между домами 62 по улице Куйбышева и 70 по улице 10 лет  

Октября 1,5 м.п. 

5. Выкрашивание и выбоины напротив магазина «Биомедсервис» у д. 62 по  

ул. Куйбышева 2,5 кв.м. 

6. Разрушение а/б покрытия колодца напротив магазина «Шанежки» у д. 43 по ул.  

Куйбышева 1,5 кв.м. 

7. Выбоины напротив магазина «Шанежки» у 

<

...>.  8. Продольная трещина в районе домов 63 и 67 по улице Куйбышева 90 м.п.  

9. Завышение колодца с разрушением а\б покрытия и в районе дома 69 по улице  

Куйбышева 2 кв.м., завышение свыше 3 см. 

10. Продольная трещина в районе дома 69 по улице Куйбышева 80 м.п.  

11. Разрушение кромки на перекрестке улиц Куйбышева и Успенского 0,5 кв.м.  12. Завышение колодца на перекрестке улиц Куйбышева и Успенского на 3 см.  13. Занижение колодца на перекрестке улиц Куйбышева и ФИО7 на 3 см.  

14. Продольная трещина в районе дома 116 по улице Куйбышева - 5 м.п.  15. Разрушение кромки в районе дома 120 по улице Куйбышева 0,6 м.п.  16. Продольная трещина в районе дома 118/2 по улице Куйбышева - 30 м.п.  

17. Завышение колодца в районе дома 130 по улице Куйбышева на 3 см.  18. Поперечная трещина в районе дома 132/1 по улице Куйбышева 10 м.п.  

19. Выбоины в районе пешеходного перехода, дом 79А по улице Куйбышева 0,3 кв.м. 

20. Разрушение (выбоины) предположительно колодец районе дома 79А по улице  

Куйбышева 1,5 кв.м. 

21. Продольная трещина от перекрестка улиц Куйбышева и Съездовская 80 м.п.  22. Продольные трещины от улицы Съездовская до улицы ФИО8 350 м.п.  

23. Поперечные трещины на протяжении всего участка со средним шагом 15 м.  

24. Поперечные трещины (2 штуки) на сопряжении улиц Куйбышева и  

ФИО8 45 м.п. 

25. Занижение колодца на перекрестке улиц Куйбышева и ФИО8 на 3 см.  26. Просадка 4 кв.м. на сопряжении улиц Куйбышева и ФИО8.  

27. Продольная трещина от улицы ФИО8 до улицы Маяковского 230 п.м.  

28. Выкрашивание а/б покрытия напротив салона «Персона», дом 134/1 по улице  

Куйбышева 2 кв.м. 

29. Занижение колодца (2 штуки) с разрушением а/б покрытия на выезде дома 134/1 по  

улице Куйбышева на 3 см. 

30. Колейность от перекрестка ул. Куйбышева и 10 лет Октября по обеим сторонам до  

ул. ФИО5 глубиной свыше 3 см. 

8) улице Новосортировочная от улицы Гуртьева до улицы 1-я  

Комсомольская: 1. Продольная трещина в районе озера Чередовое - 40м.п. 2. Вышелушивание в районе озера Чередовое - 1 кв.м. 

3. Вышелушивание в районе дома 33 по улице Сортировочная - 20+6 кв.м.  4. Просадка а/б покрытия в районе въезда отдела кадров.  

5. Выбоины в районе дома 18 К 28 по ул. Гуртьева 1кв.м. 6. Выбоины на развилке у дома 18/1 по улице Гуртьева 1кв.м.. 

7. Выбоина с поперечной трещиной на развилке у дома 18/1 по улице Гуртьева.  

8. Выбоины на повороте вдоль забора хозяйственного корпуса у дома 18/1 по  

улице Гуртьева 1,5 кв.м. 

9. Выбоины от ООТ «ДК имени Гуртьева» в сторону центра до пешеходного перехода у  

дома 15 по ул. Гуртьева 2,5 кв.м. 

10. Колейность в районе озеро Чередовое 35 м,п. глубиной свыше 3 см.  

9) улица ФИО9 от улицы ФИО8 до улицы 10 лет Октября:  1. Колейность в районе 

<

...>. глубиной свыше 3 см.  

2. Занижение колодца примыкающего к дороге на выезде м/д домами 168 и 170 по улице  

ФИО9 на 3 см 

3. В районе дома 165 по улице ФИО9 продольная трещина - 16,5 м.п.  4. В районе дома 199 по улице ФИО9 продольная трещина - 36 м.п.  

5. В районе дома 199 по улице ФИО9 напротив водонапорной колонки сетка  

трещин и продольная трещина - 3 м.п. 

6. Разрушение а/б покрытия вокруг колодца на перекрестке улиц ФИО9 и 20 лет  

РККА. 

7. Продольная трещина в районе дома 195 по улице ФИО9 - 5 м.п.  8. Продольная трещина от дома 195 до дома 179 по улице ФИО9 - 65 м.п.  

9. Продольная трещина в районе дома 167 по улице ФИО9 - 15 м.п.  10. Продольная трещина в районе дома 161 по улице ФИО9 - 57 м.п.  

11. ФИО10 на сопряжении по обе стороны на сопряжении с улицей Красных Зорь  

12 м.п. 

12. Разрушение а/б на сопряжении с рельсами на перекрестке улиц ФИО5 и  

ФИО9 - до 5 м.п. 

13. Продольная трещина в районе дома 127 по улице ФИО5- 9 м.п.  

14. Продольная трещина в районе ООТ «10 лет Октября)) у дома 68 по ул.  

ФИО9 - 24 м.п. 

15. Колейность в районе дома 127 по ул. ФИО5 до ул. 10 лет Октября 62 м.п.  

глубиной свыше 3 см. 

16. Колейность по двум полосам на перекрестке домов 164 и 199 по ул.  

ФИО9 5 м.п. глубиной свыше 3 см. 

10) Окружная дорога от улицы 10 лет Октября до просп. Космический:  

1 .ФИО10 в покрытии в районе второго столба с рекламой «Автопоинт» - 1 м.п.  

2. Просадка покрытия на пересечении с дорогой около магазина «Автозапчасти» -40  

кв.м у дома 109 1/А по проспекту Космический. 

3. Продольная трещина от магазина «Автозапчасти» - 49 кв.м. у дома 109 1/А по  

проспекту Космический. 

4. Разрушение а/б покрытия в районе шиномонтажа - 8 кв.м. у дома 109 к. 3 по  

проспекту Космический 

5. Колейность на повороте у проспекта Космический 5 м.п. глубиной свыше 3 см.  

11) проспект Космический от Окружной дороги до ул. Индустриальная:  1. Выкрашивание покрытия в районе перекрестка с улицей П. ФИО11 - 6 кв.м..  

2. Выкрашивание покрытия в районе магазина «Пятерочка» у дома 91/Б по  проспекту Космический - 6 кв.м.  

3. Выкрашивание покрытия в районе дома 77 по просп. Космический - 32 кв.м.  4. Выкрашивание покрытия в районе домов 53, 47 по просп. Космический - 60+24 кв.м.  

5. Выбоины напротив дома 41 по просп. Космический по левой стороне - 40 кв.м.  

6. Просадка покрытия в районе дома 41 по просп. Космический - 7 кв.м.  7. Просадка покрытия в районе дома 35 по просп. Космический - 8 кв.м.  8. Вышелушивание в районе магазина «Победа» на стороне кинотеатра «Космос»-4  

кв.м. 

9. Выкрашивание в районе ООТ «Кинотеатр Космос» по направлению улицы П.  

ФИО11- 20 кв.м. 10. Выбоина в районе дома 18А по просп. Космический - 5 кв.м 

11. Выкрашивание покрытия в районе дома 18А по просп. Космический - 8 кв.м.  12. Выкрашивание покрытия в районе дома 18 по просп. Космический - 29 кв.м.  13. Выкрашивание покрытия в районе дома 1 по улицы П. ФИО11- 9 кв.м.  

14. Выкрашивание покрытия в районе магазина «Линия жизни» - 8 кв.м.  15. Выбоина на въезде к дому 28 по просп. Космический — 54 кв.м.  

16. Выкрашивание в районе перекрестка с улицей Романенко - 25+13+24 кв.м.  17. Занижение люка в районе дома 105 по просп. Космический на 3 см.  

18. Выкрашивание покрытия от дома 105 по просп. Космический до ООТ «Конечная» 5  кв.м.  

19. Выбоины в районе выезда со стоянки напротив ООТ «Конечная» 5 кв.м. 20. Выкрашивание в районе выезда со стоянки напротив ООТ «Конечная» 48+72 кв.м. 

21. Выкрашивание покрытия в районе шиномонтажа и АЗС «ОКТАН» - 75 кв.м.  22. Выкрашивание напротив центра «СириусАвто» - 18 кв.м.  

23. Выбоина от центра «СириусАвто» до ж/д переезда 2 кв.м.  

12) Проспект Мира от улицы Нефтезаводской до улицы Доковской:  

1. Выбоины и шелушение покрытия около 4 кв.м. по левой стороне от перекрестка с  

улицей Нефтезаводской. 

2. Выбоины (5 штук) у дома 72 по Проспекту Мира площадью до 1 кв.м.  3. Выбоины 5 кв.м. в районе ООТ «Нефтезаводская» в сторону улицы Доковской.  

4. Выбоины 2,5 кв.м. в районе выезда от дома 78 по Проспекту Мира.  5. Выбоины 5,5 кв.м. у перекрестка с улицей Тварковского.  

6. Выбоины 2 кв.м. у перекрестка с улицей Мамина-Сибиряка. 

7. Выбоины 0,5 кв.м. в районе ООТ «Садко» в районе ООТ «Нефтезаводская»  

8. Выбоины от дома 90 по Проспекту Мира до улицы 50 Лет Октября по правой  

стороне. 

9. Выбоины 3 кв.м. на перекрестке с улицей 50 Лет Октября.  10. Выбоины 10 кв.м. в районе ООТ «ДОК» в сторону улицы Нефтезаводской  

11. Выбоины в районе дома 61 по Проспекту Мира 1 кв.м. 

12. Занижение решеток ливневой канализации на протяжении всего участка на 3  

см. 

13. Поперечные трещины на протяжении всего участка с шагом до 15 метров.  

13) улице Химиков от Проспекта Мира до улицы Энтузиастов:  1. Выкрашивание покрытия в районе дома 6 по улице Химиков 2 кв.м.  

2. Выкрашивание покрытия в районе дома 6/3 по улице Химиков 9 кв.м.  

14) улице ФИО12 от улицы ФИО4 до улицы Барабинскои:  1. Просадка покрытия в районе ООТ «ДК Рубин» у дома 4 по ул. ФИО12 2 кв.м.  

2. Разрушение а/б покрытия вокруг решетки ливневой канализации в районе ООТ «Дом  

Дружбы» у дома 10 по ул. Кирова 2 кв.м. 

3. Занижение решетки ливневой канализации в районе ООТ «Дом Дружбы» в сторону  

центра на 3 см. 

4. Выбоины 2 кв.м. в районе т.к. «Ольга» у дома 47/2 по ул. ФИО12.  

5. Завышение колодца в районе ООТ «11-я Рабочая» в сторону центра у дома 51 по ул.  

ФИО12 на 3 см. 

15) улице ФИО14 от улицы Лукашевича до улицы 2-я Солнечная:  

1. Продольная трещина на сопряжения полос в районе перекрестка улиц ФИО14 и  

ФИО13 - 20 м.п. 

2. Завышение решетки ливневой канализации в районе ООТ «Лесной Проезд» на 3 см.  3. Продольная трещина в районе перекрестка улиц ФИО14 и Кондратюка - 50 м.п.  

4. Продольная трещина в районе дома 30 по улице ФИО14 - 40 м.п.  5. Выбоины в районе перекрестка улиц ФИО14 и 3-я Любинская 0,5 кв.м.  

6. Места вырубки кернов на выезде со стоянки общественного транспорта.  7. Продольные трещины от выезда с АЗС «Газпром» - 15 м.п.  

8. Продольные трещины от автомойки в сторону улицы Лукашевича - 40 м.п. 

9. Продольные трещины от въезда на АЗС «ТопЛайн» ул. ФИО14 14 Б до АГЗС по ул.  

ФИО14 д. 14 В 50 п.м. 

10. Продольные трещины от въезда на АГЗС ул. ФИО14 д. 14 В до перекрестка улиц  

ФИО14 и 3-я Любинская - 140 м.п. 

11. Продольные трещины от перекрестка улиц ФИО14 и 3-я Любинская до магазина  

«Самовар» ул. ФИО14 д. 39 - 15 м.п. 

12. Шелушение а/б покрытия в районе въезда к магазину «Самовар» ул. ФИО14 д. 39-6  

кв.м. 

13. Шелушение а/б покрытия в районе ООТ «Дорстрой» в сторону улицы  

Лукашевича - 4,5 кв.м. 

14. Продольная трещина в районе перекрестка улиц ФИО14 и Лисицкого - 10 м.п.  15. Колейность 3,5 см в районе ООТ «ФИО14» в сторону улицы Лукашевича - 15 м.п.  

16. Колейность 3,5 см в районе ООТ «ФИО14» в сторону улицы 2-я Солнечная -40 м.п.  17. Колейность свыше 2 см. в районе выезда с улицы дублера Лукашевича со стороны  

универсама - 15 м.п. 

18. Колейность в районе ООТ «Лесной проезд» в сторону ул. Лукашевича 50 м.п.  

глубиной 3 см. 

16) улице 70 лет Октября от улицы Конева до улицы Б. ФИО15:  

1. Продольная трещина в районе перекрестка улиц 70 лет Октября и ФИО16 -10 м.п.  2. Продольная в районе пешеходного перехода напротив дома 13/3 по улице 70 лет  

Октября- 15 м.п. 

3. Трещины и выбоины на сопряжении с карманом ООТ «70 лет Октября» в сторону  

улицы Б. ФИО15 4 кв.м. 

4. Продольная трещина в районе ООТ «ФИО16» в сторону улицы Б.  

ФИО15 - 10 м.п. 

5. Продольная трещина на сопряжении с выездом от трансформаторной будки в  

районе дома 7/1 по улице Б. ФИО15 6 м.п. 

17) проспект Губкина в границах Красноярского тракта и до  ул. Нефтезаводской:  

1. Поперечные трещины на протяжении всего участка с шагом 20 м. - 40 м.  

18) улице Доковская в границах ул. Комбинатская и до проспекта Мира:  1. Продольная трещина на участке от ул. 22 Апреля в сторону ул. Доковская - 400 м.п.  

2. Продольная трещина в районе АЗС «ГазПромНефть» - 30 м.п. 

3. Продольная трещина на участке от ул. 22 Апреля в сторону пр. Мира- 150 м.п.  

4. Поперечные трещины на протяжении всего участка с шагом 15 - 20 м.  

19) улице Комбинатская в границах проспект Губкина и до ул. Заозерная:  1. Продольная трещина в районе дома 3 по улице Комбинатская - 30 м.п.  

2. Продольная трещина в районе перекрестка с улицей Заводская - 20 м.п.  3. Разрушение а/б покрытия люка в районе дома 6 по улице Комбинатская - 1,5 кв.м.  

20) улице 1-я Трамвайная в границах ул. Воровского и до ул. Леонова:  1. Просадка а/б покрытия в районе дома 9 по улице 1-я Трамвайная - 2 кв.м.  2. Продольная трещина в районе дома 30 по улице 1-я Трамвайная - 60 м.п.  3. Разрушение кромки на пересечении улиц 1-я Трамвайная и 6-я Марьяновская -Юм.п.  

4. Продольные трещины в районе дома 46 по улице 1-я Трамвайная общей  протяженностью - 52 м.п.  

5. Застой воды на проезжей части в районе домов 56, 60 по улице 1-я Трамвайная -60  м.п.  

6. Продольная трещина в районе дома 66 по улице 1-я Трамвайная - 20 м.п.  7. Продольная трещина в районе дома 76 по улице 1-я Трамвайная - 20 м.п.  8. Поперечные трещины на протяжении всего участка с шагом 15-20 м.  

21) улице Леонова в границах ул. 1-я Трамвайная и до ул. 13-я  Комсомольская:  

1. Поперечные трещины на протяжении всего участка с шагом 15 м.  

22) улице 13-я Комсомольская в границах ул. Леонова и до Черлакского  тракта:  

1. Катофоты на пешеходном переходе, отсутствует светоотражающая пленка - 7 шт. у  дома 20 по ул. 13-я Комсомольская.  

2. Продольные трещины в районе дома 31 по улице 13-я Комсомольская - 12 п.м.  3. Продольная трещина на повороте на улицу Леонова - 13 м.п.  

4. Поперечные трещины на протяжении всего участка с шагом 20 м.  

23) улице 1-я Заводская в границах проспект Губкина и до ул. Энтузиастов:  1. Разрушение а/б покрытия на сопряжении с элементами железной дороги - 6 м.п. у д.  

25 по ул. 1 -я Заводская; 

2. Поперечные трещины на протяжении всего участка с шагом 25 - 30 м.  

24) улице 22 Апреля в границах ул. Энергетиков и до ул. Доковская:  

1. Разрушение кромки 3 м.п., в районе 

<

...>. Закатанный люк в районе 

<

...>;  

3. Продольная трещина в районе 

<

...> м.п.;  4. Разрушение кромки а/б покрытия 

<

...>. Разрушение кромки а/б покрытия 

<

...>. Продольная трещина в районе 

<

...> м.п.;  7. Занижение решетки ливневой канализации в районе 

<

...> на 3  

см.; 8. Просадка а/б покрытия люкового узла 1кв.м. у дома 30 А по ул. 22 Апреля; 

9. Занижение колодца на перекрестке с ул. Нефтезаводская на 3 см.;  10. Разрушение кромки а/б покрытия перед перекрестком с ул. Нефтезаводская 1,5 м.п.;  

11. Занижение решетки ливневой канализации перед перекрестком с ул. Нефтезаводская  на 3 см.;  

12. Продольная трещина в районе 

<

...> м.п.;  13. Продольная трещина в районе 

<

...> м.п.;  14.Разрушение кромки а/б покрытия на сопряжении с ул. Новоселов - 3 м.п.  

25) улице Березовая в границах ул. Красный путь и до проспекта Королева:  

1. Место отбора керна в районе выезда с АЗС «ГазПромНефть» у дома 1 к. 1 по  

ул. Березовая. 

2. Шелушение а/б покрытия по правой стороне движения от АГЗС до  

ул. 2-я Кольцевая в сторону проспекта Королева - 1000 кв.м. 

3. разрушение кромки а/б покрытия перед перекрестком с проспектом Королева - 5  

м.п. у дома 34 по проспекту Королева. 

26) улице Заводская в границах ул. Нефтезаводская и до ул. Комбинатская:  

1. Выбоина на пересечении улиц 1-я Заводская - Заводская - 1 кв.м;  2. Продольная трещина в районе 

<

...>.;  

3. Продольная трещина в районе АЗС «ГазПромНефть» у дома 12 по  

ул. Заводской- 200 м.п.; 

4. Продольная трещина в районе 

<

...> м.п.;  5. Сетка трещин на участке от 

<

...> до ул. Комбинатская - 20 кв.м.;  

6. Продольная трещина на участке от 

<

...> до ул. Комбинатская -260  

м.п.; 

7. Поперечные трещины на протяжении всего участка с шагом 10 - 15 м.  

27) Красноярский тракт в границах от путепровода по ул. Заозерная до  

границы города Омска: 

1. Продольная трещина в районе д. 87 по Красноярскому тракту - 20 м.п.  2. Продольная трещина - 15 м.п.  

3. Сетка трещин- 1,5 кв.м. 4. Выбоины общей площадью - 1,5 кв.м. 

5. Продольная трещина на переходно-скоростной полосе в районе дома 42 по  

Красноярскому тракту - 20 м.п. 

6. Места отбора кернов - 2 шт. 7. Продольная трещина - 30 м.п. 

28) проспект Мира в границах ул. Доковская и до ул. Полевая:  1. Сетка трещин в районе дома 112/4 по Проспект Мира - 25 кв.м.  

29) улице 36-я Северная в границах ул. Герцена и ул. Оржоникидзе:  1 .Поперечные трещины на протяжении всего участка с шагом 10 м. - 15 м.  

30) улице 2-я Солнечная от ул. Коттеджной до ул. Волгоградской:  1. не заделаны места отбора кернов у дома 40 В по ул. 2-я Солнечная;  

2.продольные трещины от выезда с АЗС «Газпром» д.40/1 по ул. 2-я Солнечная -15 м.п.  3. сетка трещин в районе выезда со стоянки общественного транспорта - 14 кв.м.;  

31) улице Авиационная от ул. 22 Декабря до ул. Транссибирской:  

1. шелушение а/б покрытия в районе дома 48 по улице Авиационная - 4 кв.м. 

2. просадка а/б покрытия в районе дома 46 по улице Авиационная - 14 кв.м.  

3. шелушение а/б покрытия на участке от улицы 22 Декабря до улицы  

Транссибирская общей площадью - 68 кв.м. 

4. просадка а/б покрытия в районе дома 88 по улице Авиационная,  

предположительно над коммуникациями- 30 кв.м. 

5. выбоины в районе светофора пешеходного перехода у дома 144 по ул.  

Авиационная- 12 кв.м. 6. разрушение а/б покрытия в районе дома 143А по улице Авиационная - 0,5 кв.м.. 

7. поперечные трещины на протяжении всего участка с шагом 40 м.  

32) улице Объездная дорога ТРК «Континент» от улицы Конева до улицы  Енисейская:  

1.поперечные трещины на протяжении всего участка с шагом 80-100 м.  

33) улице Ватутина от ул. Конева до Бульвара ФИО15 и от ул.  

Перелета до ул. Лукашевича: 

1. шелушение а/б покрытия в районе дома 1 по улице Ватутина - 22 кв.м.  2. разрушение а/б покрытия в районе дома 25А по улице Ватутина- 10 кв.м.  

3. продольная трещина в районе дома 2/6 по улице Садовая - 20 м.п.  4. продольная трещина в районе дома 29 по улице Ватутина - 15 м.п.  5. продольная трещина от дома 29 по улице Садовая - 160 м.п.  

6. не заделаны места отбора кернов в районе дома 3 по ул. Ватутина  

34) улице Семиреченская от ул. Мельничной до ОТ «Новостройка»:  1. продольная трещина в районе дома 89 по улице Семиреченская - 60 мл.  

2.поперечные трещины на протяжении всего участка с шагом 20-30 м.  

35) улице Суворова от круговой развязки Ленинградского моста до ул.  

Володарского: 1 .продольная трещина от въезда на улицу Суворова - 50 м.п. 

2. продольная трещина напротив ООТ «По требованию» - 20 м.п.  

3. просадка а/б покрытия над водопропускной трубой в районе ООТ «По  

требованию» - 9 кв.м. 

4. продольные трещины в районе выезда от дома 93 по улице Суворова общей  

протяженностью - 20 м.п. 5. продольная трещина в районе ООТ «Суворова» - 12 м.п. 

6. продольные трещины протяженностью 10-15 м с шагом 10-15 м от перекрестка с  

улицей 12 Декабря до улицы Володарского. 

36) проспект Комарова от ул. Лукашевича до бульвара ФИО15: 

1. продольная трещина в районе ООТ «Автовокзал» у дома 2/2 по проспекту Комарова10 м.п. 2.поперечные трещины на протяжении всего участка с шагом 20-30 м.  

37) улице Мельничная от ул. Нефтебаза до ул. 3-я Казахстанская:  1. выбоина перед въездом на АГЗС у дома 130 к. 1 по ул. Мельничная - 0,5 кв.м.  

2. продольная трещина за АГЗС - 40 м.п. 

38) проспект Карла Маркса от ул. ФИО5 до ул. Лобкова:  

1. занижение люка колодца (напротив ООТ «Транспортная академия» на 4 см. 

2. занижение люка колодца напротив дома 18 по проспекту Карла Маркса на 4 см.  3. не соблюден продольный уклон у дома 24 по проспекту Карла Маркса- 30кв.м.  

4. продольная трещина у 

<

...> п.м;  5.разрушение а/б покрытия вокруг колодца у 

<

...>.;  

6. занижение решетки (деформирование) колодца у д. 36/1 по проспекту Карла Маркса  

на 4 см.; 

7. занижение решетки дождеприемного колодца в кармане ООТ «Цирк» на 4 см;  8. продольная трещина у 

<

...> п. м ;  

9. продольные трещины у 

<

...> п.м., у д. 50 по  

проспекту Карла Маркса - 10 п. м., у 

<

...> п. м, у д. 54 по  

проспекту Карла Маркса - 30 п.м.; 

10. просадка решетки дождеприемного колодца у домов 75, 62, 64, 66, 82 по  

проспекту Карла Маркса на 4 см. 

11. не заделаны места отбора кернов у дома 44 по проспекту Карла Маркса;  

12. продольная трещина у дома 66 по проспекту Карла Маркса 20 п.м., у дома 72 по  

проспекту Карла Маркса 60 п.м.; 

13. разрушение а/б покрытия у 

<

...> кв. м.;  

14. не соблюден продольный уклон у края покрытия в районе 

<

...>  

Маркса 

15. разрушение а/б покрытия у колодца у 

<

...>  

по проспекту Карла Маркса - 2 кв. м; 

16. продольные трещины у 

<

...> п. м., у д. 41/10 по  

проспекту Карла Маркса - 40 п.м.; 

17. завышение люка колодца на перекрестке у 

<

...> на 4 см,;  

18. нет сопряжения с прилегающей территорией у д. 69 по проспекту Карла Маркса 7  п.м.;  

19. занижение решетки дождеприемного колодца на съезде у д,69 по проспекту Карла  Маркса, у 

<

...> у 

<

...> у д.41/10 по  проспекту Карла Маркса, у 

<

...> на 4 см.;  

20. просадка под бордюрным камнем у парковки у 

<

...>.;  

21. завышение люков колодцев 2 шт. (у «Каскада») у дома 24 по проспекту Карла  Маркса на 4 см;  

22. продольные трещины у 

<

...> п.м., у 

<

...> п. м., уд. 17 по проспекту Карла Маркса - 30 п. м.;  

23. разрушение покрытия у колодца (вокруг люка) у 

<

...>.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу бюджетного учреждения города Омска  «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке  апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме).  

Судья В.А. Баландин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 31.05.2019 7:41:53Кому выдана Баландин Виталий Александрович