АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05

www.kemerovo.arbitr.ru 

E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е НИ Е

Дело № А27-13553/2018

город Кемерово

30 августа  2018  года

Резолютивная часть решения оглашена 23 августа  2018  года

Полный текст решения изготовлен  30 августа  2018 года

 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О.С., при ведении протокола и аудиозаписи   судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЗАЩИТА», г.  Подольск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Публичному  акционерному обществу «Южно – Кузбасская ГРЭС», г. Калтан (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании 10 924 699 руб.  60 коп. долга по договору  подряда на выполнение  ремонтных работ  №2КЦ-2018/ТМ от 29.12.2017года;  47 672 руб. 02 коп. долга по договору подряда на выполнение ремонтных работ  №1ТЦ-2018/ТМ от 25.12.2017года;  3 689 900  руб. 12 коп. долга  по договору подряда №1КЦ-2018/ТМ от 19.12.2017года;    2 776  558 руб. 88 коп. долга по договору  подряда на выполнение работ №1КЦ, ТЦ-2018/ТМ от 19.12.2017года

при участии:

от истца - ФИО2, представитель по доверенности от 28.05.2018года, паспорт,

от ответчика – не явились

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Теплозащита» (истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковыми требованиями к  Публичному акционерному обществу  «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ответчик) о взыскании  10 924 699 руб.  60 коп. долга по договору  подряда на выполнение  ремонтных работ  №2КЦ-2018/ТМ от 29.12.2017года;  47 672 руб. 02 коп. долга по договору подряда на выполнение ремонтных работ  №1ТЦ-2018/ТМ от 25.12.2017года;  3 689 900  руб. 12 коп. долга  по договору подряда №1КЦ-2018/ТМ от 19.12.2017года; 2 776  558 руб. 88 коп. долга по договору  подряда на выполнение работ №1КЦ,ТЦ-2018/ТМ от 19.12.2017года.

Исковые требования  мотивированы неисполнением ответчиком обязательства по оплате  работ по договорам  подряда  №2КЦ-2018/ТМ от 29.12.2017года;  №1ТЦ-2018/ТМ от 25.12.2017года;  №1КЦ-2018/ТМ от 19.12.2017года;  №1КЦ, ТЦ-2018/ТМ от 19.12.2017года.

Определением  Арбитражного суда Кемеровской области от 05 июля 2018 года  иск  принят к производству, предварительное  судебное заседание по делу назначено на  23 августа 2018года на 14 час. 00 мин., судебное разбирательство по рассмотрению дела по существу  в судебном заседании суда первой инстанции  назначено на 23 августа 2018года на 14 час. 15 мин. Ответчик  копию определения суда от 05 июля  2018года фактически получил, что подтверждается почтовым извещением  №65097123278413.

Представитель истца, принимавший участие в предварительном судебном заседании, заявленные исковые требования поддержал.

Ответчик, уведомленный о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим  образом, что подтверждено документально материалами дела (почтовое извещение №65097123278413), явку своего представителя  в судебное заседание не обеспечил, возражений относительно проведения предварительного судебного заседания, судебного разбирательства по рассмотрению  дела по существу  в отсутствие своего  представителя не заявил, отзыв не представил.

При отсутствии возражений сторон, суд,  руководствуясь ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, завершил подготовку дела к судебному разбирательству и перешел к судебному разбирательству по рассмотрению спора по существу в арбитражном суде первой инстанции.

Представитель  истца заявленные требования поддержал.

Исследовав   материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд полагает иск подлежащим удовлетворению, исходя из следующего.

 Между ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (заказчик) и ООО «Теплозащита» (подрядчик)   заключен договор  подряда на выполнение ремонтных работ №2КЦ-2018/ТМ от 29.12.2017года, в соответствии с которым истец принял на себя обязательства  по заданию заказчика в установленный срок выполнить работы по ремонту тепловой изоляции и обмуровки оборудования котельного цеха. Работы производятся на ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по адресу:  

<

...>. Объем, содержание выполняемой работы и предъявленные к ней требования установлены ведомостью объемов работ (Приложение №1 к договору),  сметным расчетом (Приложение №2 к договору), требованиями по выполнению договора (Приложение №6 к договору) и техническим заданием (Приложение №5 к договору). (раздел 1 договора – Предмет договора).

Срок выполнения работ определен с 01.01.2018года по  31.12.2018года. (п.2.1. договора).

Работы по договору выполняются подрядчиком и принимаются заказчиком поэтапно по результатам отчетного периода. Отчетным периодом признается календарный месяц, в котором подрядчик выполнял работы. При этом стороны договорились, что этапом работ, выполненных в рамках договора, является выполненный подрядчиком и принятый заказчиком объем работ за отчетный месяц. (п.3.7. договора).

Стоимость договора согласно пункту 4.1 договора составила 45 254 790 руб.

Оплата работ производится за фактически выполненные работы после сдачи-приемки выполненных работ. Оплата производится заказчиком в течение 30 календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (Ф Кс-3) , выставления подрядчиком счета-фактуры и удержания суммы ранее перечисленного аванса. Оплата дополнительных работ, выполненных подрядчиком в соответствии с дополнительными соглашениями к договору, производится в аналогичном порядке. (п.7.1., п.7.2., п.7.3. договора).

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательства. (п.11.1. договора).

Во исполнение принятых на себя обязательств по договору №2КЦ-2018/ТМ от 29.12.2017года, подрядчик выполнил, а заказчик принял работы на общую сумму 10 924 699 руб. 60 коп., в подтверждение чего истцом  представлены подписанные сторонами договора без замечаний  и скрепленные печатями организаций акты по форме КС-2  от 26.01.2018года №№1-9, акты по форме КС-2 от 26.02.2018года №№10-14, №15,  16, справки о стоимости выполненных работ и затратах  формы КС-3 №1   от 31.01.2018года на сумму  5 278 655, 66 руб. и № 2 от 28.02.2018года на сумму 5 646 043 94 руб., на оплату работ выставлены счета-фактуры.

Между ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (заказчик) и ООО «Теплозащита» (подрядчик)   заключен договор  подряда на выполнение работ №1ТЦ-2018/ТМ от 25.12.2017года, в соответствии с которым истец принял на себя обязательства  по заданию заказчика в установленный срок выполнить работы по ремонту тепловой изоляции оборудования турбинного и химического цехов. Работы производятся на ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по адресу:  

<

...>. Объем, содержание выполняемой работы и предъявленные к ней требования установлены ведомостью объемов работ (Приложение №1 к договору), сметным расчетом (Приложение №2 к договору), требованиями по выполнению договора (Приложение №5 к договору) и техническим заданием (Приложение №4 к договору). (раздел 1 договора – Предмет договора).

Срок выполнения работ определен с 01.01.2018года по  31.12.2018года. (п.2.1. договора).

Работы по договору выполняются подрядчиком и принимаются заказчиком поэтапно по результатам отчетного периода. Отчетным периодом признается календарный месяц, в котором подрядчик выполнял работы. При этом стороны договорились, что этапом работ, выполненных в рамках договора, является выполненный подрядчиком и принятый заказчиком объем работ за отчетный месяц. (п.3.7. договора).

Стоимость договора согласно пункту 4.1 договора составила 4 275 426 руб.

Оплата работ производится за фактически выполненные работы после сдачи-приемки выполненных работ. Оплата производится заказчиком в течение 30 календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, выставления подрядчиком счета-фактуры и удержания суммы ранее перечисленного аванса. Оплата дополнительных работ, выполненных подрядчиком в соответствии с дополнительными соглашениями к договору, производится в аналогичном порядке. (п.7.1., п.7.2., п.7.3. договора).

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательства. (п.11.1. договора).

Во исполнение принятых на себя обязательств по договору подряда на выполнение ремонтных работ №1ТЦ-2018/ТМ от 25.12.2017года, подрядчик выполнил, а заказчик принял работы на сумму 90 636 руб. 98  коп., в подтверждение чего истцом  представлены подписанные сторонами договора без замечаний  и скрепленные печатями организаций акты по форме КС-2  от 26.01.2018года №№1Т, 2Т, 3Т. 4Т, 5Т,  справка о стоимости выполненных работ и затрат  формы КС-3 №1   от 31.01.2018года на сумму 90 636, 98 руб., на оплату работ выставлен счет-фактура.

22.02.2018года  между ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»  и ООО «Теплозащита»   был произведен взаимозачет по договору подряда на выполнение ремонтных работ №1ТЦ-2018/ТМ от 25.12.2017года на сумму 42 964 руб. 96 коп., о чем подписан акт взаимозачета №45, сумма оставшейся непогашенной задолженности по договору составила  47 672 руб. 02 коп..

Также между ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (заказчик) и ООО «Теплозащита» (подрядчик)   заключен договор  подряда №1КЦ-2018/ТМ от 19.12.2017года, в соответствии с которым истец принял на себя обязательства  по заданию заказчика в установленный срок выполнить работы по очистке оборудования котельного цеха от золошлаковых отходов. Работы производятся на ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по адресу:  

<

...>. Объем, содержание выполняемой работы и предъявленные к ней требования установлены ведомостью  планируемых объемов работ (Приложение №1 к договору), локальным сметным расчетом и калькуляцией (Приложения №2.1 и №2.2.  к договору), требованиями по выполнению договора (Приложение №6 к договору) и техническим заданием (Приложение №5 к договору). (раздел 1 договора – Предмет договора).

Срок выполнения работ определен с 01.01.2018года по  31.12.2018года. (п.2.1. договора).

Работы по договору выполняются подрядчиком и принимаются заказчиком поэтапно по результатам отчетного периода. Отчетным периодом признается календарный месяц, в котором подрядчик выполнял работы. При этом стороны договорились, что этапом работ, выполненных в рамках договора, является выполненный подрядчиком и принятый заказчиком объем работ за отчетный месяц. (п.3.5. договора).

Стоимость договора согласно пункту 4.1 договора составила 13 344 921 руб.

Оплата работ производится за фактически выполненные работы после сдачи-приемки выполненных работ. Оплата производится заказчиком в течение 30 календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. Кс-3) , выставления подрядчиком счета-фактуры и удержания суммы ранее перечисленного аванса. Оплата дополнительных работ, выполненных подрядчиком в соответствии с дополнительными соглашениями к договору, производится в аналогичном порядке. (п.7.1., п.7.2., п.7.3. договора).

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательства. (п.11.1. договора).

Во исполнение принятых на себя обязательств по договору подряда № 1КЦ-2018/ТМ от 19.12.2017года, подрядчик выполнил, а заказчик принял работы на общую сумму 3 689 900 руб. 12  коп., в подтверждение чего истцом  представлены подписанные сторонами договора без замечаний  и скрепленные печатями организаций акты по форме КС-2  от 26.01.2018года №№1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К,  справка о стоимости выполненных работ и затратах  формы КС-3 №1   от 31.01.2018года на сумму 2 065  413, руб.,  акты о приемке выполненных работ  по форме КС-2  от 26.02.2018года №№7К, 8К, 9К, 10К, 11К, 12К, справка о стоимости выполненных работ и затратах  формы КС-3 №2   от 28.02.2018года на сумму  1 624 487, 12 руб., на оплату работ выставлены счета-фактуры.

Между ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (заказчик) и ООО «Теплозащита» (подрядчик)   заключен договор  подряда на выполнение работ № 1КЦ, ТЦ-2018/ТМ от 19.12.2017года, в соответствии с которым истец принял на себя обязательства  по заданию заказчика в установленный срок выполнить работы  по устройству и разборке лесов и настилов на территории объекта. Работы производятся на ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» по адресу:  

<

...>. Объем, содержание выполняемой работы и предъявленные к ней требования установлены ведомостью  планируемых объемов работ (Приложение №1 к договору), локальным сметным расчетом (Приложение №2 к договору), требованиями по выполнению договора (Приложение №5 к договору) и техническим заданием (Приложение №4 к договору). (раздел 1 договора – Предмет договора).

Срок выполнения работ определен с 01.01.2018года по  31.12.2018года. (п.2.1. договора).

Работы по договору выполняются подрядчиком и принимаются заказчиком поэтапно по результатам отчетного периода. Отчетным периодом признается календарный месяц, в котором подрядчик выполнял работы. При этом стороны договорились, что этапом работ, выполненных в рамках договора, является выполненный подрядчиком и принятый заказчиком объем работ за отчетный месяц. (п.3.6. договора).

Стоимость договора согласно пункту 4.1 договора составила 9 569 669 руб.

Оплата работ производится за фактически выполненные работы после сдачи-приемки выполненных работ. Оплата производится заказчиком в течение 30 календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. Кс-2), выставления подрядчиком счета-фактуры и удержания суммы ранее перечисленного аванса. Оплата дополнительных работ, выполненных подрядчиком в соответствии с дополнительными соглашениями к договору, производится в аналогичном порядке. (п.7.1., п.7.2., п.7.3. договора).

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения обязательства. (п.11.1. договора).

Во исполнение принятых на себя обязательств по договору подряда на выполнение работ № 1КЦ, ТЦ-2018/ТМ от 19.12.2017года, подрядчик выполнил, а заказчик принял работы на общую сумму  2 776 558 руб. 88 коп., в подтверждение чего истцом  представлены подписанные сторонами договора без замечаний  и скрепленные печатями организаций акты по форме КС-2  от 26.01.2018года №№1-24,  справка о стоимости выполненных работ и затрат   формы КС-3 №1   от 31.01.2018года на сумму 1 477 797, 78 руб.,  акты о приемке выполненных работ  по форме КС-2  от 26.02.2018года №№25-51, справка о стоимости выполненных работ и затрат  формы КС-3 №2   от 28.02.2018года на сумму 1 298 761, 10 руб., на оплату работ выставлены счета-фактуры.

Таким образом,  задолженность заказчика по оплате выполненных подрядчиком работ по спорным договорам составляет 17 438 830 руб. 62 коп.: 10 924 699 руб.  60 коп. по договору  подряда на выполнение  ремонтных работ  №2КЦ-2018/ТМ от 29.12.2017года;  47 672 руб. 02 коп. по договору подряда на выполнение ремонтных работ  №1ТЦ-2018/ТМ от 25.12.2017года;  3 689 900  руб. 12 коп.  по договору подряда №1КЦ-2018/ТМ от 19.12.2017года; 2 776  558 руб. 88 коп. по договору  подряда на выполнение работ №1КЦ, ТЦ-2018/ТМ от 19.12.2017года

В связи с отсутствием оплаты долга за выполненные работы в полном объеме  истец 13.04.2018года направил ответчику претензию (исх.№94 от 13.04.2018года) с требованием об оплате задолженности в срок до 30.04.2018года,, неисполнение ответчиком  которой послужило основанием  для обращения в суд с настоящим иском.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ следует, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

На основании п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача и приемка выполненных работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Факт сдачи подрядчиком результата работ заказчику и их принятие последним  по вышеуказанным договорам подтвержден   представленными в материалы дела доказательствами и ответчиком не оспаривался. Наличие  неоплаченной задолженности в заявленном ко взысканию размере ответчиком также не оспорен, доказательств уплаты задолженности в материалы дела на день рассмотрения настоящего дела в суде ответчиком не представлено.

С учетом изложенного,  исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме  на основании ст. 702, 711, 720, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная пошлина относится судом согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями  167-171, 110, 112  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

р е ш и л :

Иск удовлетворить.

Взыскать с  Публичного акционерного общества «Южно – Кузбасская ГРЭС» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЗАЩИТА» 10 924 699 руб.  60 коп. долга по договору  подряда на выполнение  ремонтных работ  №2КЦ-2018/ТМ от 29.12.2017года;  47 672 руб. 02 коп. долга по договору подряда на выполнение ремонтных работ  №1ТЦ-2018/ТМ от 25.12.2017года;  3 689 900  руб. 12 коп. долга  по договору подряда №1КЦ-2018/ТМ от 19.12.2017года; 2 776  558 руб. 88 коп. долга по договору  подряда на выполнение работ №1КЦ, ТЦ-2018/ТМ от 19.12.2017года, 110 194 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску, всего – 17 549 024 руб. 62 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск.

 

Судья                                                                                           О.С. Андуганова