ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 18АП-11922/2024

г. Челябинск

12 сентября 2024 года

Дело № А07-38331/2023

 

Резолютивная часть постановления объявлена 11 сентября 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 сентября 2024 года.

 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Колясниковой Ю.С.,

судей Аникина И.А., Камаева А.Х., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Цегельниковой А.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 01.08.2024 по делу № А07-38331/2023.

В судебном заседании принял участие представитель:

  Администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан - ФИО1 (доверенность от 12.01.2024, срок действия до 31.01.2025, паспорт, диплом).

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения указанной информации на официальном сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет, в судебное заседание не явились.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие неявившихся лиц.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (далее - истец, Министерство) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (далее -ответчик, Администрация) о взыскании в доход бюджета Республики Башкортостан денежные средства в размере 17 446 718 руб. 23 коп., предоставленные из бюджета Республики Башкортостан в 2019-2021 году бюджету муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в качестве субсидии «Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район Республики Башкортостан, мощностью (протяженностью) 46306 м» по соглашению от 07.11.2019 № 80652000-1-2019-016, от 26.02.2021 № 80652000-1-2021-006.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Финансовое Управление Администрации Уфимского района, Министерство Финансов Республики Башкортостан.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.11.2023 судом отказано в принятии заявления Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2024 определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.11.2023 по делу № А07-38331/2023 об отказе в принятии заявления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан отменено, вопрос направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 01.08.2024  (резолютивная часть от 30.07.2024) в удовлетворении исковых требований отказано.

С вынесенным решением не согласился истец, обжаловав его в апелляционном порядке. В апелляционной жалобе Министерство (далее также - податель жалобы, апеллянт) просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

Из апелляционной жалобы следует, что заявитель отмечает, что недостижение показателей результатов использования субсидий в установленные сроки к бюджетным нарушениям не относится.

Обязательство по недостижению результативности возникло в рамках соглашения между Министерством и Администрацией.

Несоблюдение плановых значений результатов использования субсидий и возврат в бюджет РФ в связи с недостижением результата по объекту, а не в виде бюджетного нарушения по ст. 306.2 БК РФ.

Апеллянт указал, что исковые требования Министерства направлены на применение санкции за не достижение результата предоставленной субсидии, которая является мерой ответственности, и не привязана к целевому использованию субсидии.

Кроме того, апеллянт просит принять во внимание то, что ответчиком, подтверждающие документы в обоснование освобождения от ответственности в Министерство не направлялись.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2024 апелляционная жалоба принята к производству. Судебное заседание назначено на 11.09.2024. 

  От Министерства Финансов Республики Башкортостан поступил отзыв на апелляционную жалобу с доказательством направления. Отзыв приобщен к материалам дела.

  От Администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан поступил отзыв на апелляционную жалобу с приложенными документами (судебный акт по делу № А07-17653/2022). Отзыв приобщен к материалам дела.

Законность и обоснованность судебного акта суда проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан 12.02.2019 заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 069-09-2019-272 (в редакции дополнительных соглашений от 18.12.2019, 24.12.2019, 18.09.2020, 25.02.2021) (далее - соглашение-069).

Предметом соглашения-069 (в редакции дополнительного соглашения от 24.12.2019) является предоставление из федерального бюджета в 2019 - 2022 годах бюджету Республики Башкортостан субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая вода» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017г. № 1710.

В целях обеспечения проектирования и строительства водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район Республики Башкортостан между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 7 ноября 2019 года заключено соглашение № 80652000-1-2019-016 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (в редакции дополнительных соглашений от 14.11.2019, 09.12.2019, 25.12.2019, 28.12.2019, 03.12.2020, 03.04.2020) (далее - соглашение-016).

Предметом соглашения-016 является предоставление из бюджета Республики Башкортостан в 2019-2021 годах бюджету муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан субсидии «Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район Республики Башкортостан» в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (далее - Министерство, Минжилкомхоз РБ) как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации в рамках регионального проекта «Чистая вода» подпрограммы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» Государственной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» (далее - Субсидия).

Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (Муниципальный заказчик) па основании результатов электронного аукциона 2 сентября 2019 года заключила муниципальный контракт № 01015000003190013090001 с обществом с ограниченной ответственностью «Уфимская Газовая Компания» (Генеральный подрядчик) на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район Республики Башкортостан» (далее соответственно - Контракт, Объект). Срок выполнения работ по Контракту - с момента подписания контракта по 30 ноября 2021 года.

Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 6 к Контракту) сроки выполнения работ по контракту определены 01.11.2021.

В целях обеспечения проектирования и строительства водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район Республики Башкортостан между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 26 февраля 2021 года заключено соглашение № 80652000-1-2021-006 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (в редакции дополнительных соглашений от 11.03.2021, 23.03.2021, 10.08.2021) (далее - соглашение-006).

Предметом соглашения-006 является предоставление из бюджета Республики Башкортостан в 2021 году бюджету муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта капитального строительства «Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство» в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству жилиицю-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (далее - Министерство, Минжилкомхоз РБ) как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации в рамках регионального проекта «Чистая вода» подпрограммы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» Государственной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» (далее - Субсидия).

Значение результата на каждый год установлено по количеству построенных объектов, в том числе с учетом окончания в 2021 году строительства объекта «Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство MP Уфимский район Республики Башкортостан, мощностью (протяженностью) 46306 м».

Как следует из соглашений №№ 016, 006 на объект: «Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство MP Уфимский район Республики Башкортостан, мощностью (протяженностью) 46306 м» из федерального и республиканского бюджетов выделено в 2019 году - 52 954 778 руб. 81 коп., в 2020 год - 88 769 999 руб. 99 коп., в 2021 году - 36 303 022 руб.10 коп.

Общий размер бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального района Уфимский район РБ на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидии составляет: в 2019 году 806 417 руб. 95 коп., в 2020 году - 1 351 827 руб.42 коп., в 2021 году 552 837 руб. 90 коп.

Согласно приложению № 3 «Значения результатов использования субсидии» к соглашению № 006 результатом установлено: «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами значение «1», дата достижения результата «31.12.2021».

Согласно приложению № 2 «График выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства» к соглашению № 006, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом установлен -декабрь 2021 года.

Согласно пункту 4.3.3 соглашения № 006 Администрация обязалась обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 3 и выполнение мероприятий согласно графику в соответствии с приложением № 2 к соглашению № 006.

Администрация свои обязательства по соглашению № 016 и соглашению № 006 о достижении проекта по Объекту в срок до 31.12.2021 не выполнила.

Объект введен в эксплуатацию в октябре 2022 года.

В этой связи, Министерством в адрес администрации направлено требование о возврате средств в бюджет Республики Башкортостан по не достижению показателя результативности и эффективности использования субсидии на реализацию мероприятий Регионального проекта «Чистая вода» от 19.10.2023 № М02-09-9723, согласно которому предложено в тридцатидневный срок добровольно возвратить в бюджет Республики Башкортостан денежные средства в размере 17 446 718 руб. 23 коп.

 Суд первой инстанции удовлетворении заявленных требований отказал, ссылаясь на то, что меры бюджетного принуждения относятся к бесспорному взысканию денежных средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету системы Российской Федерации.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Проанализировав условия соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 12.02.2019 №069-09-2019-272, а также учитывая, что стороны приступили к его исполнению, суд приходит к выводу о том, что соглашение заключено и к отношениям его сторон применяются предусмотренные в нем условия.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 

Цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления указанных межбюджетных субсидий и их распределения между субъектами   Российской    Федерации устанавливаются   федеральными   законами    и   (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на срок не менее трех лет.

Согласно пункту 1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации под субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

На основании пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законами субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» утверждены Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (далее - Правила).

Абзацами 2 и 3 пункта 2 Правил установлено, что в случае если утвержденными правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации, разработанными в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, предусматривается предоставление субсидии на софинансирование одновременно капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) (далее - объекты недвижимого имущества) и мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты капитального строительства и приобретению объектов недвижимого имущества, или софинансирование 2 и более мероприятий в рамках одной государственной программы Российской Федерации (подпрограммы государственной программы Российской Федерации), такие субсидии для целей настоящих Правил относятся к консолидированным и на них распространяются положения настоящих Правил о консолидированной субсидии.

Условия предоставления субсидий, критерии отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий и их распределения между субъектами Российской Федерации устанавливаются федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

В силу пункта 5 Правил целевое назначение субсидий определяется правилами предоставления субсидии и соглашениями исходя из расходных обязательств субъектов Российской Федерации, на софинансирование которых предусмотрены субсидии.

Целевое назначение субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Российской Федерации (федеральной целевой     программы) на софинансирование мероприятий, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), определяется исходя из целей государственной программы Российской Федерации (федеральной целевой программы), реализуемой за счет средств федерального бюджета.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества устанавливается соглашением в соответствии с правилами предоставления субсидий, а также принимаемых в случаях, предусмотренных пунктом настоящих Правил, актами Правительства Российской Федерации или актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности № 80652000-1-2019-016 от 07.11.2019, Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности № 80652000-1-2021-006 от 26.02.2021, заключенными между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан предусмотрено предоставление субсидии в целях реализации проекта «Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство МР Уфимский район Республики Башкортостан».

Пунктом 4.3.3 Соглашения предусмотрено обязательство муниципалитета обеспечивать достижение значений результатов регионального проекта, установленных в соответствии с приложением № 1 и выполнение мероприятий согласно графику в соответствии с приложением № 5 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

Срок достижения результатов проекта установлен до 31.12.2021.

Между тем объект введен в эксплуатацию в октябре 2022 года.

Не оспаривая факта выполнения работ в объеме предоставленной субсидии, истец ссылается на наличие формальных оснований для возврата денежных средств: при установленном в соглашении срока ввода в эксплуатацию декабрь 2021 года., фактически объект введен в эксплуатацию в октябре 2022 года.

Факт использования субсидии по прямому целевому назначению, то есть на строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта капитального строительства «Проектирование и строительство водозабора и сетей водоснабжения с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, д. Опытное хозяйство MP Уфимский район Республики Башкортостан, мощностью (протяженностью) 46306 м» истцом не оспаривался.

Доказательств обратного в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлено. 

В настоящее время данный объект эксплуатируется по своему целевому назначению, обеспечивая население с. Кумлекуль, д. Якшиваново, с. Горново, с. Красный Яр, д. Карюгино, Опытное хозяйство MP Уфимский район Республики Башкортостан питьевой водой.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что материалами дела подтверждается добросовестность действий ответчика, предоставленные денежные средства осваивались им в соответствии с целевым назначением.

Ввиду вышеизложенного, суд апелляционной инстанции полагает, что истцом не представлены доказательства необоснованного получения средств поддержки, а равно как и доказательства нарушений, допущенных ответчиком, которые являются основаниями для возврата предоставленных денежных средств.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно, в том числе в постановлениях от 18.05.2012 № 12-П, от 14.02.2013 № 4-П, от 19.01.2016 № 2-П указывал на то, юридическая ответственность, по смыслу статьи 54 (часть 2) Конституции Российской Федерации, может наступать только за те деяния, которые законом, действующим на момент их совершения, признаются правонарушениями; наличие состава правонарушения является, таким образом, необходимым основанием для всех видов юридической ответственности; при этом признаки состава правонарушения, прежде всего в публично-правовой сфере, как и содержание конкретных составов правонарушений должны согласовываться с конституционными принципами демократического и правового государства, включая требование справедливости, в его взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами как субъектами юридической ответственности; в свою очередь, наличие вины как элемента субъективной стороны состава правонарушения - общепризнанный принцип привлечения к юридической ответственности во всех отраслях права, и всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, то есть закреплено непосредственно в законе.

Конституционные требования справедливости и соразмерности предопределяют, по общему правилу, необходимость дифференциации юридической ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при выборе той или иной меры государственного принуждения.

Материалами дела подтверждено и не оспаривается истцом целевое использование ответчиком средств предоставленной субсидии и отсутствие фактов нарушения условий предоставления субсидии (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Следовательно, исходя из установленных обстоятельств дела, удовлетворение исковых требований, и возложение на ответчика обязанности возвратить денежные средства в полном размере, будет явно несоразмерно совершенному нарушению, имеющему формальный характер, которое было к тому же ответчиком устранено, что противоречит принципам справедливости, разумности и добросовестности.

Таким образом, суд апелляционной инстанции полагает, что оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Доводы апелляционной жалобы, приведенные в ее обоснование, сводятся  лишь к несогласию с судебным актом, дают иную правовую оценку установленным обстоятельствам, являются несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат распределению в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и в силу того, что апеллянт освобожден от оплаты государственной пошлины, взыскание в доход федерального бюджета не производится.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции  

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 01.08.2024 по делу № А07-38331/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий судья

Ю.С. Колясникова

 

Судьи:

И.А. Аникин

 

А.Х. Камаев