﻿ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075  

http://fasuo.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ Ф09-5485/19 

Екатеринбург

14 октября 2019 г.

 

Дело № А07-29889/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 07 октября 2019 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 октября 2019 г. 

 

Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Вербенко Т.Л.,

судей Сидоровой А.В., Тимофеевой А.Д.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи                     Старковой Ю.В., рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Проектная фирма «Уралтрубопроводстройпроект» (ИНН: 0274095068, ОГРН: 1030203949181; далее – общество ПФ «Уралтрубопроводстройпроект») на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.03.2019 по делу                              № А07-29889/2016 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2019 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа.

Судебное заседание проведено с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Удмуртской Республики.   

В судебном заседании Арбитражного суда Удмуртской Республики приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью «ИжТехноСервис» (далее – общество «ИжТехноСервис») - Пермяков С.В., директор (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц), Пушин И.Ю. (доверенность от 22.05.2019). 

Полномочия указанных лиц проверены Арбитражным судом Удмуртской Республики.

В Арбитражном суде Уральского округа принял участие представитель общества ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» - Габдрахманов Р.Р. (доверенность от 01.03.2017 № 22/1002).

Общество «ИжТехноСервис» (ИНН: 1831077597, ОГРН: 1021801163427) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» о взыскании                       6 507 003 руб. 41 коп. долга, 1 251 620 руб. 57 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга по день фактического исполнения обязательства, 30 000 руб. судебных расходов на оплату юридических услуг (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Общество ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан со встречным иском о взыскании 8 115 053 руб. убытков, 1 441 053 руб. расходов на устранение недостатков и неустойки в сумме 1 321 535 руб. 79 коп.  

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество «ГазпромнефтьОренбург» (далее – общество «ГазпромнефтьОренбург»).  

Решением суда от 28.03.2019 (судья Абдуллина Э.Р.) первоначальные исковые требования удовлетворены частично. С общества ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» в пользу общества «ИжТехноСервис» взысканы долг в сумме 6 507 003 руб. 41 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 251 620 руб. 57 коп., а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму основного долга, начиная с 22.03.2019 по день фактического исполнения обязательства, судебные расходы по оказанию юридических услуг в размере 7000 руб. В удовлетворения остальной части заявления о взыскании судебных расходов отказано. В удовлетворении встречного иска отказано. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда             от 24.06.2019 (судьи Арямов А.А., Бояршинова Е.В., Плаксина Н.Г.) решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» просит указанные судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права. По мнению заявителя, дополнительные работы, предъявленные к оплате истцом, выполнены в рамках действовавшего договора, в связи с чем при расчете их стоимости судами ошибочно не применены в нарушение положений статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации не применены понижающие коэффициенты, в то время как при определении цены к договору сторонами были применены понижающие коэффициенты. 

Помимо этого, кассатор считает, что судом первой инстанции допущено нарушение требований статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выразившееся в принятии в качестве допустимого доказательства заключения ненадлежащим образом выполненной экспертизы. Как указывает заявитель в жалобе, согласно статье 84 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации комиссионная экспертиза представляет собой заключение нескольких экспертов одной специальности, однако судебная экспертиза по настоящему делу не имеет единого комплексного заключения экспертов, а содержит отдельные выводы каждого из экспертов по своей специальности.

В отзыве на кассационную жалобу общество «ИжТехноСервис» просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.  

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, между обществом «ГазпромнефтьОренбург» (заказчик) и обществом ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» (подрядчик) заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ от 30.04.2014 № 2014/572/ГПНО, в соответствии с которым подрядчик обязался разработать проектную и рабочую документацию по объекту «Обустройство Царичанского месторождения на полное развитие. Первая очередь».

Во исполнение названного договора между обществом «ИжТехноСервис» (субподрядчик) и обществом ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» (подрядчик) заключен договор подряда от 16.06.2014 № 2014/268-1529, по условиям которого субподрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплексных инженерных изысканий (геодезические, геологические, в том числе статическое зондирование грунтов, штамповые испытания, инженерно-геофизические работы, гидрологические, метрологические, экологические) по объекту «Обустройство Царичанского месторождения на полное развитие. Первая очередь», а заказчик обязался принять и оплатить фактически выполненные работы. 

Согласно пункту 1.4 данного договора работа выполняется в рамках Генерального договора от 30.04.2014 № 2014/572/2270 между заказчиком – обществом «ГазпромнефтьОренбург» и подрядчиком – обществом ПФ «Уралтрубопроводстройпроект». 

Стоимость работ по инженерным изысканиям составляет 6 607 678 руб. 95 коп. (пункт 4.1 договора подряда). 

В соответствии с пунктом 5.1 названного договора приемка и оценка изыскательской продукции осуществляется в соответствии с заданием на изыскания по каждому объекту. При завершении работ субподрядчик предоставляет подрядчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием по каждому объекту. 

Согласно пункту 5.2 указанного договора подрядчик в течение                       30 календарных дней со дня получения документации и подписания накладной, обязан направить субподрядчику подписанный акт сдачи приемки или мотивированный отказ. Если после истечения 30 календарных дней от подрядчика подписанный акт сдачи приемки или мотивированный отказ субподрядчику не поступали, то работа считается принятой без замечаний.

В пункте 5.4 договора от 16.06.2014 стороны определили, что в случае мотивированного отказа подрядчика от принятия работ, сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

В соответствии с пунктом 5.5 договора подряда субподрядчик в сроки, установленные подрядчиком, вносит изменения и дополнения в результаты выполненных работ для устранения допущенных субподрядчиком недостатков, обнаруженных подрядчиком, заказчиком, экспертными органами, при приемке в ходе проведения внутренней экспертизы, органами госэкспертизы и иных случаях, установленных законодательством.

Приложением № 1 к договору от 16.06.2014 № 2014/268-1529 является Техническое задание.  

В приложении № 2 к названному договору стороны согласовали сроки проведения работ. 

Общество «ИжТехноСервис» указывает, что в соответствии с условиями указанного договора им выполнены работы и переданы по накладным                        от 25.10.2014, от 23.03.2015, от 17.08.2015, от 21.10.2015, от 27.10.2015 и                    от 20.01.2016 обществу ПФ «Уралтрубопроводстройпроект». 

В соответствии с подписанными сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ по договору от 16.05.2016 № 001, от 30.09.2016 № 002 общество ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» оплатило стоимость выполненных работ на сумму 6 389 632 руб. 53 коп. (стоимость работ оплачена с учетом письма общества ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» в адрес общества «ИжТехноСервис» от 07.10.2016 № 05-01-41 о снижении стоимости работ по договору в связи со снижением рентабельности объекта).

Дополнительно к выполненным по договору работам, письмом от 08.09.2015, направленном в адрес общества «ИжТехноСервис», общество ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» просило дополнительно выполнить посадку скважины по новым координатам и направить топографический план для нанесения проектных трасс, а также указать сроки выполнения работ с предоставлением сметной стоимости по дополнительным работам.  

В письме от 17.10.2014 № 05/9107, подписанном заместителем генерального директора по производству общества ПФ «Уралтрубопроводстройпроект», последний просил общество «ИжТехноСервис» с 20.10.2014 приступить к дополнительным работам по инженерным изысканиям, указав, что уточненные планы будут направлены до 20.10.2014.  

В письме от 22.10.2014 № 29-09/9228, подписанным от имени генерального директора общества ПФ «Уралтрубопроводстройпроект», подрядчик просил субподрядчика приступить к инженерным изысканиям по уточненным данным заказчика и гарантировал заключение договора и полноту оплаты. 

Обществом «ИжТехноСервис» составлен акт от 23.03.2015 № 002 на дополнительные работы, выполненные субподрядчиком на указанном объекте на основании гарантийного письма от 22.10.2014 № 9228/29-09, на общую сумму 11 360 108 руб. 41 коп., в том числе инженерно-геодезические изыскания на сумму 7 065 808 руб. 26 коп., инженерно-геологические изыскания на сумму 3 928 758 руб. 56 коп., инженерно-гидрометеорологические изыскания па сумму 173 049 руб. 61 коп., инженерно-экологические изыскания на сумму 192 491 руб. 91 коп. 

Письмом от 23.03.2015 общество «ИжТехноСервис» направило в адрес общества ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» отчеты по инженерным изысканиям с учетом дополнительных работ.

Общество «ИжТехноСервис» 25.10.2016 направило в адрес общества ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» подписанный в одностороннем порядке акт                 от 23.03.2015 № 002 и соответствующую накладную от 23.03.2015 № 4.

Акт обществом ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» не подписан и не возвращен.

Общество «ИжТехноСервис» направило в адрес общества ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» претензию от 15.11.2016, предложив погасить задолженность в сумме 11 360 108 руб., которая оставлена последним без ответа.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества «ИжТехноСервис» в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности за выполненные работы.

Общество ПФ «Уралтрубопроводстройпроект», в свою очередь, обратилось в арбитражный суд со встречным иском о взыскании убытков в виде дополнительных производственных затрат, связанных с оплатой труда работников вследствие допущенных субподрядчиком ошибок в разработке изыскательской документации, расходов по устранению недостатков.

Суд первой инстанции, удовлетворяя первоначальные исковые требования, исходил из доказанности факта надлежащего выполнения субподрядчиком согласованных дополнительных работ, подлежащих оплате подрядчиком. Стоимость выполненных истцом дополнительных работ скорректирована судом с учетом заключения экспертов. Кроме того, установив ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по оплате задолженности, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований о взыскании процентов.   

Отказывая в удовлетворении встречного иска, суд указал на пропуск срока исковой давности по заявленным требованиям.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции и оставил решение без изменения.

Проверив законность обжалуемых судебных актов в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в пределах доводов заявителя кассационной жалобы, суд кассационной инстанции не находит оснований для их отмены.

Как верно установлено судами, правоотношения сторон сложились в связи с исполнением договора от 16.06.2014 № 2014/268-1529, содержащим необходимые условия, предусмотренные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора подряда.

Разногласия сторон касаются взыскания стоимости выполненных обществом «ИжТехноСервис» дополнительных работ, согласованных сторонами  посредством  обмена  письмами,  на основании акта от 23.03.2015 на общую сумму  11 360 108 руб. 41 коп.,  в том числе инженерно-геодезических изысканий на сумму 7 065 808 руб. 26 коп., инженерно-геологических изысканий на сумму 3 928 758 руб. 56 коп., инженерно-гидрометеорологических изысканий на сумму 173 049 руб. 61 коп., инженерно-экологических изысканий на сумму 192 491 руб. 91 коп. 

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Общество «ИжТехноСервис» указывает, что спорные работы выполнены им в соответствии с предоставленной обществом ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» и согласованной с обществом «ГазпромнефтьОренбург» Программой производства инженерно-геодезических изысканий № 512/ГПНО-ИГД на 2014 год (что предусмотрено договором) в объеме согласно Техническому заданию.

Из пояснений общества «ГазпромнефтьОренбург» следует, что условиями заключенного договора от 30.04.2014 № 2014/572/ГПНО предусмотрена обязанность подрядчика – общества ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» согласовывать привлечение субподрядчиков с заказчиком – обществом «ГазпромнефтьОренбург»  (пункты 6.1 - 6.3 договора), однако привлечение общества «ИжТехноСервис» (субподрядчика) с последним не было согласовано. При этом в силу пункта 34 приложения № 8 к указанному договору подрядчик несет ответственность за привлечение субподрядчика без предварительного согласования с заказчиком.

В соответствии с пунктом 33 Технического задания к договору                            от 30.04.2014 № 2014/572/ГПНО стороны указали на необходимость согласовать техническое задание на производство инженерных изысканий, комплексную программу изысканий и местоположение трассы с Главным маркшейдером обществом «ГазпромнефтьОренбург».

Данные требования соответствуют пункту 32 Технического задания, являющегося приложением № 1 к договору субподряда от 16.06.2014                                  № 2014/268-1529, подписанному между обществами «ИжТехноСервис» и ПФ «Уралтрубопроводстройпроект».

Судами установлено, что общество ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» привлечение общества «ИжТехноСервис» в качестве субподрядчика с заказчиком – обществом «ГазпромнефтьОренбург» не согласовало.

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза (пункт 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В целях определения объема и качества выполненных обществом «ИжТехноСервис» спорных дополнительных работ в суде первой инстанции назначена судебная экспертиза, по результатам проведения которой представлено заключение экспертов.

Определением суда от 23.05.2018 назначено проведение дополнительной экспертизы.

В связи с недостаточной ясностью и полнотой заключения определением от 03.10.2018 назначена повторная судебная экспертиза.

По результатам проведенной повторной экспертизы в материалы дела представлено заключение от 07.12.2018, содержащее выводы экспертов по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

В экспертном заключении указаны объем, виды и стоимость дополнительных работ, не включенных в договор и расчеты.

В отношении выполненных субподрядчиком инженерно-геодезических изысканий установлено, что их объем превышает объемы, указанные в Техническом задании к договору от 16.06.2014 № 2014/268-1529 на величину, необходимую для выполнения инженерно-геодезических изысканий, соответствующих требованиям нормативной документации на проектируемых сооружениях, включенных в Техническое задание к отчету и отсутствующих в Техническом задании, приложенному к договору. Исходя из данных об объемах и видах работ, выполненных под проектируемые сооружения, не вошедшие в Техническое задание, приложенное к договору и включенные в Техническое задание, приложенное к отчету, рассчитанная по справочнику базовых цен стоимость дополнительных инженерно-геодезических изысканий составила 3 510 144 руб. 47 коп. с учетом налога на добавленную стоимость.          

Относительно инженерно-геологических изысканий определено, что объем выполненных инженерно-геологических изысканий превышает объемы, указанные в Техническом задании к договору от 16.06.2014 № 2014/268-1529 на величину, необходимую для выполнения инженерно-геологических изысканий, соответствующих требованиям нормативной документации на проектируемых сооружениях, включенных в Техническое задание к отчету и отсутствующих в Техническом задании, приложенному к договору. Исходя из данных об объемах и видах работ, выполненных под проектируемые сооружения, не вошедшие в Техническое задание, приложенное к договору и включенные в Техническое задание, приложенное к отчету, рассчитанная по справочнику базовых цен стоимость дополнительных инженерно-геологических изысканий составила 2 996 858 руб. 94 коп. с учетом налога на добавленную стоимость 18%.  

По поводу выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий эксперт указал на наличие недостатков, а также заключил, что объем и виды работ, приведенные в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий, не соответствуют требованиям Технического задания. Работы, выполненные обществом «ИжТехноСервис» сверх определенного в Техническом задании объема, отсутствуют. 

В отношении инженерно-экологических изысканий эксперт пришел к выводу о том, что объемы и виды инженерных изысканий, которые выполнены сверх определенного в Техническом задании к договору от 16.06.2014                        № 2014/268-1529, определить невозможно, так как в Техническом задании не устанавливаются объемы и виды инженерных изысканий. 

По результатам исследования данного экспертного заключения и оценки указанных выводов экспертов, суд первой инстанции признал их соответствующими предъявляемым законом требованиям к однозначности и обоснованности таких заключений, в связи с чем признал заключение экспертов допустимым доказательством по делу.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе заключение экспертов, пояснения, данные в судебном заседании, суды установили, что стоимость фактически выполненных обществом «ИжТехноСервис» дополнительных работ составила 6 507 003 руб. 41 коп., в частности стоимость инженерно-геодезических работ в сумме 3 510 144 руб. 47 коп. и стоимость инженерно-геологических работ в сумме 2 996 858 руб. 94 коп.    

При этом судами принято во внимание, что необходимость дополнительных работ для исполнения проектной документации по объекту подтверждена экспертными исследованиями, а положительным заключением Государственной экспертизы от 25.12.2015 № 0542-15/СГЭ-4593/02 ФАУ «Главгосэкспертиза России» подтверждено соответствие установленным требованиям всего объема работ, включая выполненные обществом «ИжТехноСервис» рассматриваемые дополнительные работы (заключение содержит, в том числе перечень проектных сооружений, выполненных на основании дополнительных изыскательских работ обществом «ИжТехноСервис», отсутствующих в Техническом задании, являющемся приложением № 1 к договору от 16.06.2014 № 2014/268-1529).

На основании изложенного, учитывая, что материалами дела подтвержден факт надлежащего выполнения обществом «ИжТехноСервис» дополнительных работ на сумму 6 507 003 руб. 41 коп., суды первой и апелляционной инстанций правомерно удовлетворили исковые требования о взыскании задолженности в указанном размере.  

Кроме того, установив нарушение обществом ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» денежного обязательства по оплате оказанных истцом услуг, суды обоснованно взыскали проценты на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Расчет суммы проверен судами и признан правильным. 

Довод заявителя жалобы о том, что к стоимости дополнительных работ с учетом положений пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат применению понижающие коэффициенты, предусмотренные условиями договора от 16.06.2014 № 2014/268-1529, судом кассационной инстанции отклоняется.

В силу статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления (пункт 1). В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (пункт 3).

В рассматриваемом случае стоимость дополнительных работ сторонами не согласовывалась; спорные работы выполнены сверх объема, определенного договором от 16.06.2014 № 2014/268-1529, были согласованы путем обмена письмами, в связи с чем к ним не может быть применено предусмотренное данным договором формирование стоимости работ.

Как верно указано апелляционным судом, применение положений             пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации в настоящем случае исключено, поскольку стоимость фактически выполненных работ может быть определена и фактически определена в соответствии с установленными государственными органами расценками (Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства).

Кроме того, положениями раздела 4 договора (Стоимость работ и порядок расчетов) применение понижающих коэффициентов не предусмотрено.

Доводы кассационной жалобы признаются судом кассационной инстанции несостоятельными, поскольку не содержат фактов, которые не были проверены и не учтены судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела.

В соответствии с положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду кассационной инстанции не предоставлены полномочия пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать установленными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении, либо были отвергнуты судами первой или апелляционной инстанций.

Оснований не согласиться с выводами судов судебная коллегия не усматривает и признает, что все существенные обстоятельства дела судами установлены, правовые нормы, регулирующие спорные правоотношения, применены правильно и спор разрешен в соответствии с установленными обстоятельствами и представленными доказательствами при правильном применении норм процессуального права.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.03.2019 по делу № А07-29889/2016 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2019 по тому же делу  оставить без изменения, кассационную жалобу ООО ПФ "УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРОЕКТ" –  без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию   Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

Председательствующий                                             Т.Л. Вербенко 

 

Судьи                                                                          А.В. Сидорова 

 

                                                                                     А.Д. Тимофеева