128/2022-108983(2) 

 

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г.Тамбов ул.Пензенская, 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А64-7322/2019

11 марта 2022 г.

г. Тамбов

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.В. Истомина,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Д. Комаровой,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

муниципального казенного учреждения «Дирекция городских дорог», г. Тамбов  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  

обществу с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ», г. Тамбов  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об устранении дефектов и взыскании штрафа третьи лица: 

муниципальное образование город Тамбов в лице администрации г. Тамбова  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  муниципальное бюджетное учреждение «Спецдорсервис», г. Тамбов  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  Руководствуясь ст.ст.49, 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд,  

РЕШИЛ:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ», 

г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение тридцати календарных дней  с момента вступления решения в законную силу устранить дефекты асфальтобетонного  покрытия на автомобильной дороге от ул. М. Горького до пл. Комсомольской в г.Тамбове,  по следующим адресам:  

разрушение асфальтобетонного покрытия и отмостки вокруг колодца (в районе  д.103) (0,3м2);  

разрушение отмостки вокруг колодца (в районе д.103) (0,3м2);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) в районе  магазина «Нирвана»(0,5м2) (Советская 105А);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) отмостки  колодца в районе магазина «Абу-Даби» (ул. Советская № 105) (0,5м2); -поперечная  трещина перед мостом через р.Студенец;  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) в районе  моста через р.Студенец (1м2), разрушение отмостки колодца (0,3м2) (ул. Советская №  105/1), разрушение асфальтобетонного покрытия (0,5м );  

11 марта 2022 года 

разрушение отмостки дождеприемного колодца в районе Московской (ул.  Советская № 107) (0,3м2);  

разрушение отмостки колодца (0,3м2), разрушение отмостки дождеприемного  колодца (0,3м2) на перекрестке с ул.Московской (ул. Советская № 109);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) в районе  Банка «Совкомбанк»;  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (1м2),  разрушение отмостки колодца (0,3 м2), разрушение отмостки дождеприемного колодца  (0,3м2) на остановке «Московская» (ул. Советская № 111);  

разрушение отмостки колодца (0,3 м2), разрушение отмостки дождеприемного  колодца (0,3м2) (ул. Советская № 111);  

разрушение колодца дождеприемного колодца (0,3 м2) в районе магазина «585  Золотой» (ул. Куйбышева № 12А);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (2м2) перекресток с ул.Куйбышева; - шелушение и выкрашивание асфальтобетона, разрушение асфальтобетонного покрытия  

(восстановление горячим асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым  асфальтобетоном) отмостки колодца (0,3м2) (ул. Советская № 121), разрушение  асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим асфальтобетоном разрушений,  выполненных ранее литым асфальтобетоном)(1м2) в районе магазина «Лидер»;  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки колодца (0,3м2) в районе  «Промсвязьбанка» (ул. Советская № 125);  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки колодца (0,3 м2) в районе  магазина «Крокус» (ул. Советская № 139)  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца  (0,3м2) в районе магазина «Фаберлик» (ул. Советская № 143);  

разрушение асфальтобетонного покрытия на кромке проезжей части (0,5м2) в  районе «Аптеки» дом 143;  

сетка трещин, шелушение асфальтобетонного покрытия, разрушение  асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим асфальтобетоном разрушений,  выполненных ранее литым асфальтобетоном) (0,3 м2), разрушение асфальтобетонного  покрытия (0,2м2) на перекрестке с ул. Чичканова;  

сетка трещин, разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного  колодца (0,3м2) на остановке «Чичканова» (ул. Советская № 161);  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца  (0,3м2) (ул. Советская № 161);  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца  (0,3м2), разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) отмостки  дождеприемного колодца (0,3м2) в районе магазина «Рубль бум» (ул. Советская № 163);  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца  (0,3м2) в районе магазина «Интертек» (ул. Советская № 177);  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки колодца (0,3 м2) в районе салон  «Мегафон» (ул. Советская № 177);  

разрушение асфальтобетонного покрытия на кромке проезжей части (0,2м2),  разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим асфальтобетоном  разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (1м2), разрушение  асфальтобетонного покрытия отмостки колодца (0,3м2) (ул. Советская № 177) магазин  «Связной»;  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки колодца(0,3м ) (ул. Советская   № 184);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (0,3м2), разрушение асфальтобетонного  покрытия (восстановление горячим асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее  литым асфальтобетоном) отмостки у 2 колодцев (1м ) (ул. Советская № 182);  

многочисленные разрушения асфальтобетонного покрытия (0,2м2), разрушение  асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим асфальтобетоном разрушений,  выполненных ранее литым асфальтобетоном) отмостки колодца (0,3м2), разрушение  асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца (0,3 м) в районе  «Сбербанка» дом ул. Советская № 180;  

разрушение шва, разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки  дождеприемного колодца (0,3м2) на примыкании к ул. 1-я Полковая (ул. Советская № 178);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) отмостки  колодца (0,3м2) в районе магазина «Семь дней» дом ул. Советская № 178;  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца  (0,3м2) в районе дома ул. Советская № 176;  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки и провал колодца (0,3м2) в  районе Автошколы «Рим» ул. Советская дом № 174;  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца (0,3м  ) ул. Советская дом № 174;  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (15м2) в  районе «Аптеки», разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного  колодца (0,3м2) в районе ул. Советская дом № 164;  

разрушение асфальтобетонного покрытия (1м2), разрушение асфальтобетонного  покрытия (восстановление горячим асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее  литым асфальтобетоном) (3м2), разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки  колодца (0,3м2) перекресток с ул. Чичканова ул. Советская № 160;  

раскрытие шва, разрушение асфальтобетонного покрытия(1м2) на остановке  «Чичканова»;  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (1м2),  разрушение асфальтобетонного покрытия (1м2), разрушение асфальтобетонного покрытия  отмостки дождеприемного колодца (0,3 м2) в районе магазина «Элегант леди» (ул.  Советская № 158); -раскрытие шва на съезде к ДК «Юбилейный»;  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки колодца (0,3 м2), разрушение  асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца (0,3м) в районе магазина  «Офисмаг» (четная сторона) (ул. Советская № 125);  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки и просадка колодца (0,3м2) в  районе «Промсвязьбанка» (четная сторона) (ул. Советская № 125);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) отмостки  дождеприемного колодца (0,3м2) на съезде к магазину «Спартак» (ул. Советская   № 148/45к1);  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца  (0,3м2) в районе магазина «Амстердам» ул. Советская дом № 148/45;  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца  (0,3м2), разрушение асфальтобетонного покрытия (0,5м ) в районе магазина «Центр  Кухни» (четная сторона) ул. Советская № 121;  

провал и разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного  колодца (0,3 м2), разрушение асфальтобетонного покрытия кромки проезжей части (0,2м )  (четная сторона) (ул. Советская № 119);  

разрушение асфальтобетонного покрытия на перекрестке с ул.Куйбышева в районе  дома Советская № 132;  

раскрытие трещины в районе «Проката коньков» дома Советская № 132;  разрушение асфальтобетонного покрытия кромки проезжей части (0,5м2) в районе  

магазина «Талисман» Советская ул. № 132; раскрытие шва на съезде к 130 дому; 

раскрытие шва на съезде с ул. Советской на ул. Московскую,  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (2м2) на  перекрестке с ул. Московской;  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) отмостки  дождеприемного колодца (0,3м2), разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки  колодца (0,3 м2) в районе дома № 107 (государственный архив) четная сторона;  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (1м2) на  перекрестке с ул. Студенецкая набережная;  

сетка трещин 2х20м, выдавливание, разрушение асфальтобетонного покрытия  отмостки колодца (0,3м2) на мосту через реку Студенец (ул. Советская № 107 Г);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (0,5м2) в районе магазина «Абу Даби» и  стадиона Спартак (четная сторона ул. Советской);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) отмостки 4-х  колодцев, разрушение асфальтобетонного покрытия (0,5м2) на перекрестке с ул.Ст.Разина  (ул. Советская № 103);  

сетка трещин, разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки 2-х колодцев  (0,6м2) в районе Храма Святого Лазаря (ул. Советская № 122);  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки 4-х колодцев (1,5м2) (ул.  Советская дом № 122);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (1м2),  разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца (0,3м2),  сетка трещин в районе Университета «Синергия» (ул. Советская № 120);  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки 2-х колодцев (0,6м2),  разрушение асфальтобетонного покрытия(1м2) на перекрестке с ул.Октябрьской; - разрушение асфальтобетонного покрытия (1м2), разрушение асфальтобетонного покрытия  на кромке проезжей части (0,5м2) на остановке «Парк культуры» (ул. Октябрьская № 2);  

сетка трещин 30х2м в районе «Тамбовкредитпромбанка», Советская 118; 

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (1м),  разрушение асфальтобетонного покрытия (4м2), выкрашивание в районе Общественной  палаты Тамбовской области, Советская 118;  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) отмостки  колодца и дождеприемного колодца на съезде к Краеведческому музею (ул. Державинская   № 1);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (1,5м ),  

разрушение асфальтобетонного покрытия на кромке проезжей части(0,5м2)  разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим асфальтобетоном  разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) покрытия отмостки колодца в  районе «Аптеки № 3» (ул. Советская № 116А);  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца  (0,3м2), разрушение асфальтобетонного покрытия (0,2м2) в районе «Первого Спацентра»;  

сетка трещин, разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного  колодца (0,3м2), разрушение асфальтобетонного покрытия (0,5м2), разрушение  асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим асфальтобетоном разрушений,  выполненных ранее литым асфальтобетоном) (1м2) напротив ТЦ «РИО» (четная сторона)  (ул. Советская № 99А);  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки 2-х колодцев (0,6м2),  разрушение асфальтобетонного покрытия (0,5м2), сетка трещин на перекрестке с  ул.Коммунальной (ул. Советская № 114);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (1м2),  разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца (0,3м2),  разрушение асфальтобетонного покрытия на кромке проезжей части (1м2) ул. Советская в  районе дома № 114;  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (1м2),  разрушение асфальтобетонного покрытия (0,5м2) в районе «Тамбовской сбытовой  компании», Советская 112 А;  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца  (0,3м2), разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки колодца (0,3м2), разрушение  асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим асфальтобетоном разрушений,  

выполненных ранее литым асфальтобетоном) (0,1м2), 

разрушение асфальтобетонного покрытия (0,1м2) ул. Советская в районе дома   № 112 офиса «Адвокат»;  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (0,3м2),  разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца (0,3м2),  разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим асфальтобетоном  разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (0,3м2), разрушение  асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца (0,3м2), разрушение  асфальтобетонного покрытия кромки проезжей части(0,2м2) в районе лицея № 6 кор.2,  Советская,110;  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки колодца (0,3м2) напротив  Училища ФИО1 (четная сторона) (ул. Советская № 108);  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки колодца (0,3м2), разрушение  асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим асфальтобетоном разрушений,  выполненных ранее литым асфальтобетоном) (0,3м) на перекрестке с  ул.Интернациональной (ул. Советская д. № 87);  

разрушение на примыкании к остановке «Институт ФИО1» (0,3м) (ул.  Советская № 108);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (0,5м2) в районе «Института повышения  квалификации» (ул. Советская № 108);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (0,3м2) в  районе дома 108 по ул. Советской;  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки 2-х колодцев (0,6м2) в район 

<

...>;  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки колодца (0,3м2) на съезде на  М.Горького ул. Советская № 106;  

разрушение асфальтобетонного покрытия на кромке проезжей части(3м2) на  перекрестке с ул. Интернациональной (нечетная сторона);  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки 2-х колодцев и 2-х  дождеприемных колодцев (1,5м2) на перекрестке с ул.ФИО1 ( ул. Советская № 87),  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки колодца и 2-х дождеприемных  колодцев (0,6м2), выкрашивание асфальтобетона (0,5м2), разрушение асфальтобетона (0,5  м2) в районе 89 и 91 дома;  

разрушение асфальтобетонного покрытия (Зм2), сетка трещин, разрушение  асфальтобетонного покрытия отмостки 2-х колодцев (0,6м2), разрушение  асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим асфальтобетоном разрушений,  выполненных ранее литым асфальтобетоном) (0,3м2) напротив ТГУ  им.Державина(нечетная сторона) ул. Советская № 93;  

разрушение асфальтобетонного покрытия (восстановление горячим  асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее литым асфальтобетоном) (4м2),  разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки 2-х колодцев, сетка трещин  перекресток с ул. Коммунальной (нечетная сторона) ул. Советская № 93;  

разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки дождеприемного колодца  (0,3м2) в районе ТЦ «РИО» (нечетная сторона);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (0,3м2)в районе дома № 97;  

разрушение асфальтобетонного покрытия кромки проезжей части (0,3м2) на  остановке «Картинная Галерея»;  

разрушение асфальтобетонного покрытия (0,2м2), разрушение асфальтобетонного  покрытия отмостки 2-х колодцев(0,6м2), разрушение асфальтобетонного покрытия  отмостки дождеприемного колодца(0,3м2) в районе ГУМа ( ул. Советская № 101);  

разрушение асфальтобетонного покрытия (2м2), разрушение асфальтобетонного  покрытия (восстановление горячим асфальтобетоном разрушений, выполненных ранее  литым асфальтобетоном) (1м2), разрушение асфальтобетонного покрытия отмостки  дождеприемного колодца (0,3м2) на перекрестке с ул.Ст.Разина ( ул. Советская № 101)  

множественные поперечные и продольные трещины на всем протяжении  ул.Советской.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ»,  г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казенного  учреждения «Дирекция городских дорог», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) штраф в размере 300 000 руб., а также расходы по оплате государственной  пошлины в размере 39 587 руб.  

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.  

4. Исполнительный лист истцу выдать по его заявлению после вступления решения  в законную силу.  

5. Направить лицам, участвующим в деле, решение заказным письмом с  уведомлением о вручении.  

6. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.  

Судья А.В. Истомин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.02.2022 8:22:00

Кому выдана ИСТОМИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ