АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело № А71-17592/2016

г. Ижевск

23 мая 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2017 года

Полный текст решения изготовлен 23 мая 2017 года 

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи                            Н.В. Щетниковой, при ведении протокола судебного заседания (с использованием средств аудиозаписи) помощником судьи                                   Н.Ф. Жентичкой, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Арбитражного суда Удмуртской Республики по адресу: 

<

...>, каб. 103, дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Эталон-С», г. Екатеринбург, Свердловская область  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства по территории Урала при федеральном агентстве специального строительства», г. Ижевск                       (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании                          15 572 302 руб. 64 коп., в том числе 12 421 724 руб. 49 коп. долга за дополнительные работы,  3 150 578 руб. 15 коп. процентов за пользование денежными средствами в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам субподряда № 335-18 от 30.08.2013, № 1345 от 19.08.2013, № 35 от 12.08.2013, № 68-8112 от 01.10.2013. 

В заседании суда участвовали:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 01.12.2016

от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности                           № 49/16-72 от 11.01.2017, Андреевских Н.В. – представитель по доверенности № 49/16-63 от 11.01.2017

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-С» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства по территории Урала при федеральном агентстве специального строительства» (далее – ответчик) о взыскании 15 572 302 руб. 64 коп., в том числе                                 12 421 724 руб. 49 коп. долга за дополнительные работы,                       3 150 578 руб. 15 коп. процентов за пользование денежными средствами в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам субподряда № 335-18 от 30.08.2013, № 1345 от 19.08.2013, № 35 от 12.08.2013, № 68-8112 от 01.10.2013.

Истец на иске настаивает по основаниям, изложенным исковом заявлении, представил письменные пояснения с приложением дополнительных документов, заявил ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы.

В удовлетворении ходатайства в силу ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судом отказано, в связи с отсутствием оснований, поскольку для установления существенных для рассмотрения настоящего дела обстоятельств отсутствует необходимость разъяснения вопросов, требующих  специальных познаний отсутствует. 

Ответчик иск не признает по мотивам, изложенным в ранее представленном отзыве на иск,  представил письменные дополнения к отзыву с приложением дополнительных документов, настаивает на применении срока исковой давности в отношении договоров № 335-18 от 30.08.2013, № 1345 от 19.08.2013, № 61-8112 от 01.10.2013.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства, выслушав представителей истца и ответчика, арбитражный суд установил следующее.

12 августа 2013 года между сторонами заключен договор подряда                   № 35 (далее – Договор-1) (том 2 л.д. 55-58), в соответствии с условиями которого, ответчик (Генподрядчик) поручил, а истец (Подрядчик) обязался выполнить отделочные работы на объекте: 335-155-6т-550-2 в г. Нижний Тагил, п. Свободный,  в/ч 34103 в соответствии с условиями договора и сметной документацией (пункт 1.1 Договора-1). 

Генподрядчик обязался принять результат выполненных работ и оплатить его на условиях договора (пункт 1.2 Договора-1). 

В соответствии с пунктом 2.1 общая цена Договора-1 включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по объекту и ориентировочно составляет 499 750 руб. 59 коп., в том числе НДС 18%, согласно утвержденному сметному расчету № 2.

Согласно пункту 2.2 Договора-1 изменение цены договора оформляется дополнительным соглашением сторон, которое будет являться неотъемлемой частью договора. Оплата производится в следующем порядке: расчет производится Заказчиком после окончания работ на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), а также счета-фактуры на оплату в течение 30 банковских дней со дня подписания актов КС-2, КС-3.

Срок выполнения работ  по Договору-1 установлен сторонами в пункте 3.1: с 12.08.2013 по 30.09.2013.

Дополнительным соглашением № 1 от 24.09.2013 к Договору-1 (том 2 л.д. 59) стороны изменили срок окончания работ на 31 октября 2013 года.          

Между сторонами 19 августа 2013 года был заключен договор субподряда на выполнение работ по объекту «Реконструкция сооружения 515 объекта 335/155-6т г. Нижний Тагил, Свердловской области» № 1345 (далее – Договор-2) (том 1 л.д. 97-110), согласно которому ответчик (Подрядчик) поручил,  а истец (Субподрядчик) обязался выполнить собственными и привлеченными силами и средствами выполнить на объекте «Реконструкция сооружения 515 объекта 335/155-6т г. Нижний Тагил, Свердловской области» по заданию Подрядчика работы по устройству кровли в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной совместно с Подрядчиком и утвержденной Заказчиком, качественно и в сроки согласно графику производства работ (Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью договора (пункт 1.1 Договора-2).

В соответствии с пунктом 1.2 Договора-2 Субподрядчик обязался выполнить объем работ, указанный в пункте 1.1 Договора-2 собственными силами и привлеченными им организациями качественно, в срок и в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, с учетом возможных изменений объема работ.

Согласно пункту 2.1 Договора-2 стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком, определена в соответствии с проектно-сметной документацией и составляет на момент заключения договора на основании ведомости договорной цены (Приложение № 2) в текущих ценах                4 918 629  руб. 14 коп., в том числе НДС-18%.        

В случае возникновения непредвиденных работ, дополнительного объема работ, не предусмотренного Договором-2, Субподрядчик обязался сообщить об этом Подрядчику. Субподрядчик совместно с Подрядчиком и заказчиком (Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации») составляют акт о необходимости проведения дополнительных работ. Подрядчик передает Акт для составления сметы, либо дополнительную смету и ППР составленные Субподрядчиком и согласованные Подрядчиком. Субподрядчик приступает к выполнению таких работ после оформления сторонами дополнительного соглашения (пункт 2.3 Договора-2). 

В соответствии с пунктом 2.4 Договора-2 оплата за фактически выполненные Субподрядчиком работы производятся Подрядчиком в пределах лимитов, выделенных на соответствующий финансовый год в течение 30 банковских дней после предоставления Подрядчику, оформленных Субподрядчиком, Актов приемки выполненных работ (формы № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3), оригиналов счетов и счетов-фактур и получения денежных средств от Генподрядчика (ФГУП «Спецстройинжиниринг»). Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится перечислением Подрядчиком денежных средств на расчетный счет Субподрядчика либо иными способами, не противоречащими действующему законодательству РФ по согласованию сторон. Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится Подрядчиком в порядке, установленном разделом Договора-2 до предела, не превышающего 95% от цены Договора-2. Оставшаяся часть цены Договора-2 будет выплачена Субподрядчику при окончательном расчете. Окончательный расчет по Договору-2 производится после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов и сдачу всей исполнительной документации, в течение 30 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию (пункт 2.6 Договора-2).      

Согласно пункту 3.1 Субподрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные условиями Договора-2 в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 1) и в следующие сроки:

начало работ – в течение 5 календарных дней с момента заключения договора,

окончание работ – 30 октября 2013 года.

Между истцом (Субподрядчик) и ответчиком (Подрядчик) был заключен договора субподряда на выполнение работ по объекту «Реконструкция сооружения 18 объекта 335/155-6т г. Нижний Тагил, Свердловской области» № 335-18 от 30.08.2013 (далее – Договор-3) (том 1 д.д. 60-71), согласно условиям которого Подрядчик поручил, а Субподрядчик обязался собственными и привлеченными силами и средствами выполнить следующие работы:

- подготовительные работы;

- выправка и балластировка существующих путей № 11, 12;

- проезды объекта «Реконструкция сооружения 18 объекта 3335/155-6т г. Нижний Тагил, Свердловской области», в соответствии  с проектно-сметной документацией, разработанной совместно с Подрядчиком и утвержденной Заказчиком, качественно и в сроки согласно графику производства работ (Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью договора (пункт 1.1 Договора-3).

Согласно пункту 2.1 Договора-3 стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком, определена в соответствии с проектно-сметной документацией и составляет на момент заключения договора, на основании ведомости договорной цены (Приложение № 2) в текущих ценах 4 998 326 руб. 13 коп., в том числе НДС-18%.                 

В случае возникновения непредвиденных работ, дополнительного объема работ, не предусмотренного Договором-3, Субподрядчик обязался сообщить об этом Подрядчику. Субподрядчик совместно с Подрядчиком и заказчиком (Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации») составляют акт о необходимости проведения дополнительных работ. Подрядчик передает Акт для составления сметы, либо дополнительную смету и ППР составленные Субподрядчиком и согласованные Подрядчиком. Субподрядчик приступает к выполнению таких работ после оформления сторонами дополнительного соглашения (пункт 2.3 Договора-3). 

В соответствии с пунктом 2.4 Договора-3 оплата за фактически выполненные Субподрядчиком работы производятся Подрядчиком в пределах лимитов, выделенных на соответствующий финансовый год в течение 30 банковских дней после предоставления Подрядчику, оформленных Субподрядчиком, Актов приемки выполненных работ (формы № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3), оригиналов счетов и счетов-фактур и получения денежных средств от Генподрядчика (ФГУП «Спецстройинжиниринг»). Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится перечислением Подрядчиком денежных средств на расчетный счет Субподрядчика либо иными способами, не противоречащими действующему законодательству РФ по согласованию сторон. Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится Подрядчиком в порядке, установленном разделом Договора-2 до предела, не превышающего 95% от цены Договора-3. Оставшаяся часть цены Договора-3 будет выплачена Субподрядчику при окончательном расчете. Окончательный расчет по Договору-3 производится после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов и сдачу всей исполнительной документации, в течение 30 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию (пункт 2.6 Договора-3).      

Согласно пункту 3.1 Субподрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные условиями Договора-3 в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 1) и в следующие сроки:

начало работ – в течение 5 календарных дней с момента заключения договора,

окончание работ – 1 ноября 2013 года.

Кроме того, 1 октября 2013 года между сторонами был заключен договора субподряда на выполнение работ по объекту «Реконструкция сооружения 618 объекта 335/155-6т г. Нижний Тагил, Свердловской области» № 61-8112 (далее – Договор-4) (том 2 л.д. 6-17), в соответствии с условиями которого ответчик (Подрядчик) поручил, а истец (Субподрядчик) обязался собственными и привлеченными силами и средствами  выполнить на объекте «Реконструкция сооружения 618 объекта 335/155-6т г. Нижний Тагил, Свердловской области» по заданию Подрядчика общестроительные работы по вертикальной планировке, устройству водоотводов, проездов, площадок в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной совместно с Подрядчиком и утвержденной Заказчиком, качественно и в сроки согласно графику производства работ (Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью договора (пункт 1.1 Договора-4).         

Согласно пункту 2.1 Договора-4 стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком, определена в соответствии с проектно-сметной документацией и составляет на момент заключения договора, на основании ведомости договорной цены (Приложение № 2) в текущих ценах 4 902 895 руб. 37 коп., в том числе НДС-18%. 

Дополнительным соглашением № 1 от 01.11.2013 к Договору-4 стороны уменьшили стоимость работ по Договору-4 до                                           суммы 4 748 757 руб. 78 коп. 

В случае возникновения непредвиденных работ, дополнительного объема работ, не предусмотренного Договором-4, Субподрядчик обязался сообщить об этом Подрядчику. Субподрядчик совместно с Подрядчиком и заказчиком (Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации») составляют акт о необходимости проведения дополнительных работ. Подрядчик передает Акт для составления сметы, либо дополнительную смету и ППР составленные Субподрядчиком и согласованные Подрядчиком. Субподрядчик приступает к выполнению таких работ после оформления сторонами дополнительного соглашения (пункт 2.3 Договора-3). 

В соответствии с пунктом 2.4 Договора-4 авансирование по Договору-4 для приобретения материалов предусматривается в размере до 50% от стоимости работ по Договору-4. Аванс перечисляется на основании счета, выставленного Субподрядчиком. Погашение аванса производится ежемесячно пропорционально выполненному объему работ.    

Оплата за фактически выполненные Субподрядчиком работы производятся Подрядчиком в пределах лимитов, выделенных на соответствующий финансовый год в течение 30 банковских дней после предоставления Подрядчику, оформленных Субподрядчиком, Актов приемки выполненных работ (формы № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3), оригиналов счетов и счетов-фактур и получения денежных средств от Генподрядчика (ФГУП «Спецстройинжиниринг»). Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится перечислением Подрядчиком денежных средств на расчетный счет Субподрядчика либо иными способами, не противоречащими действующему законодательству РФ по согласованию сторон. Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится Подрядчиком в порядке, установленном разделом Договора-2 до предела, не превышающего 95% от цены Договора-4. Оставшаяся часть цены Договора-3 будет выплачена Субподрядчику при окончательном расчете. Окончательный расчет по Договору-4 производится после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов и сдачу всей исполнительной документации, в течение 30 календарных дней с момента ввода объекта в эксплуатацию (пункт 2.6 Договора-4).      

Согласно пункту 3.1 Субподрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные условиями Договора-4 в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 1) и в следующие сроки:

начало работ – в течение 5 календарных дней с момента заключения договора,

окончание работ – 1 ноября 2013 года.

Указывая на неоплату ответчиком работ выполненных в рамках Договоров-1,2,3,4 дополнительных работ, от приемки которых и подписания по которым актов ответчик отказался, истец обратился  в суд с настоящими исковыми требованиями.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии со ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации  оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В силу ст.ст. 65, 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

 Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В силу пунктов 1-4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство оценивается арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Истцом предъявлена к взысканию задолженность за выполненные работы в рамках Договоров-1,2,3,4  дополнительные работы на основании актов КС-2 и справок КС-3 № 550-доп от 30.12.2013на сумму 3 428 806 руб. 79 коп. (Договор-1) (том  2 л.д. 74-96), № 515-доп от 30.12.2013 на сумму 1 757 907 руб. 00 коп. (том 1 л.д. 134-154) (Договор-2), № 18-доп от 30.12.2013 на сумму 2 904 800 руб. 10 коп. (том 1 л.д. 87-91) (Договор-3), № 618-доп от 30.12.2013 на сумму 4 330 210 руб. 60 коп. (том 2 л.д. 30-47)  (Договор-4), подписанных в одностороннем порядке, от подписания которых ответчик отказался письмами исх. № 49/61-1952 от 10.11.2016 (том 2 л.д. 97), № 49/56-2077 от 14.11.2016 (том 1 л.д. 155-156), № 49/56-2079 от 14.11.2016 (том 1 л.д. 92-93), № 49/56-2075 от 14.11.2016 (том 2 л.д. 48-49), ссылаясь на то, что данные работы договорами предусмотрены не были, дополнительные соглашения, в порядке предусмотренном договорами, на выполнение указанных дополнительных работ сторонами не заключались, выполнение работ истцу не поручалось.

В соответствии с пунктом 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан осуществить строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и смете.

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если договором не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем за счет заказчика (пункт 3 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 4 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

Заключенными сторонами Договорами-2,3,4  предусмотрен порядок согласования сторонами необходимости выполнения и стоимости дополнительных работ.

Пунктом 2.3 Договоров-2,3,4 стороны предусмотрели, что в случае возникновения непредвиденных работ, дополнительного объема работ, не предусмотренного Договорами-2,3,4 Субподрядчик обязался сообщить об этом Подрядчику. Субподрядчик совместно с Подрядчиком и заказчиком (Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации») составляют акт о необходимости проведения дополнительных работ. Подрядчик передает Акт для составления сметы, либо дополнительную смету и ППР составленные Субподрядчиком и согласованные Подрядчиком. Субподрядчик приступает к выполнению таких работ после оформления сторонами дополнительного соглашения (пункт 2.3 Договоров-2,3,4). 

Условие пункта 2.3 Договоров-2,3,4 устанавливает возможность корректировки объемов работ, но не предоставляет право стороне в одностороннем порядке изменять согласованные в договоре условия и цене и объеме выполненных работ.   

Положения  Договора-1 также предусматривают необходимость оформления изменений цены договора дополнительным соглашением сторон (п. 2.2.)

Представленные истцом в материалы дела локальные сметные расчеты, акты формы КС-2, справки формы КС-3 со стороны ответчика не подписаны. Дополнительные соглашения на выполнение работ, указанных в актах на дополнительные работы в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договоров-2,3,4, п.2 .2. Договора-1, сторонами не заключалось.

При этом, суд не может принять представленные истцом акты на дополнительные работы,  в качестве доказательств согласования сторонами в установленном законом и договором порядке необходимости выполнения дополнительных работ. 

Большинство указанных актов не содержат каких-либо подписей со стороны ответчика.  Из содержания данных актов не следует, что выполнение конкретных дополнительных работ было поручено ответчиком истцу и что стороны согласовали объем, виды, стоимость и сроки таких дополнительных работ. Подписанные акты содержат подпись работников ответчика, в полномочия которых не входит право на изменение условий заключенных договоров. Изменения в заключенные сторонами договоры на основании указанных документов в установленном порядке внесены не были.

Таким образом, поскольку согласование дополнительных работ истцом в установленном порядке произведено не было, он лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ.

Доказательства того, что ответчик был вынужден незамедлительно действовать в интересах истца, поскольку приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства, материалы дела также не содержат.

При таких обстоятельствах, в отсутствие надлежащих доказательств, подтверждающих согласование уполномоченными представителями обеих сторон необходимости выполнения и стоимости дополнительных работ, а также доказательств, свидетельствующих о необходимости немедленных действий в интересах ответчика в порядке, установленном пунктом 4 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании с ответчика стоимости данных дополнительных суда не имеется, в связи с чем в удовлетворении исковых требований суд отказывает.

Ответчик заявил о применении срока исковой давности.

По правилам п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В соответствии со ст. 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года.

В силу п.п. 1 и 2 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Как установлено судом, в период действия спорных договоров каких-либо дополнительных соглашений о необходимости выполнения дополнительных работ сторонами заключено не было.

Все основные работы, выполненные  в период действия договоров, ответчиком были приняты и оплачены.

Срок окончания работ по Договору-1 с учетом дополнительного соглашения к нему согласован сторонами 31.10.2013, по Договору-2 – 30.10.2013, по Договорам-3,4 – 01.11.2013.

По истечении указанных дат, поскольку какие-либо дополнительные соглашения в отношении дополнительных работ сторонами не заключались, акты приемки не подписывались,  ответчик должен был узнать о нарушении своего права на оплату дополнительных работ.

Таким образом, на момент обращения истца с настоящим иском в суд (30.12.2016) трехгодичный срок исковой давности для защиты нарушенного права истцом был пропущен.

Учитывая, что ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности, надлежащих доказательств перерыва течения срока исковой давности либо его приостановления истцом суду не представлено,  суд на основании ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации отказывает в удовлетворении исковых требований в полном объеме также в связи с истечением срока исковой давности.

С учетом принятого решения на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу иска, а также за подачу заявления о принятии обеспечительных мер относятся на истца.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Пермь в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья                                                       Н.В. Щетникова