АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-16083/2022 

Р Е Ш Е Н И Е именем Российской Федерации резолютивная часть 

17 июля 2024 г. г. Кемерово  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Переваловой О.И.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем Мурзиной Д.И.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску некоммерческой  организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», город  Кемерово (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «АльфаСтройКузбасс», город Кемерово  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОФПРОЕКТ", г. Кемерово, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

об обязании устранить недостатки выполненных работ в рамках гарантийных  обязательств  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора: 

общество с ограниченной ответственностью "ВИТА", г. Кемерово, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

общество с ограниченной ответственностью "Бытовик" Поселок Зеленогорский",  Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, Зеленогорский поселок  городского типа, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Комфортный  Дом", Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, Зеленогорский поселок  городского типа, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  

Государственная жилищная инспекция Кузбасса, г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>  

ФИО1, пгт Зеленогорский Крапивинского района, Кемеровская  область.  

Руководствуясь, статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

решил:

иск удовлетворить в части. 

 Обществу с ограниченной ответственностью ООО «ПрофПроект» (ИНН:  

<

***>) в течение 14 календарных дней с момента вступления решения в  законную силу внести изменения в рабочую документацию шифр № 04-18/109.ПД.18- 1, с учетом действующих строительных норм и правил, в части разработанного узла  сопряжения вентиляционной шахты с карнизным свесом и водоотводящим лотком, с  указанием необходимых размеров, указаний по выполнению и герметизации стыков.  

 Обществу с ограниченной ответственности «АльфаСтройКузбасс» (ИНН:  

<

***>) безвозмездно в течение 30 календарных дней с момента получения от  

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  проектно-сметной документации выполнить работы - узел сопряжения  вентиляционной шахты с карнизным свесом и водоотводящим лотком в соответствии  с принятым проектным решением ООО «ПрофПроект».  

 Обществу с ограниченной ответственности «АльфаСтройКузбасс» (ИНН:  

<

***>) безвозмездно в течение 30 календарных дней с момента вступления  решения в законную силу устранить недостатки выполненных работ по капитальному  ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская  область- Кузбасс, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д.4В, а именно:  

- выполнить крепления листов профнастила в местах нарушения в  соответствии с рабочей документации шифр № 04-18/109.ПД.18-1, а именно:  величину нахлеста листов профнастила принять по длине 2 волны;  

- выполнить работы по устройству уплотнителя, повторяющие форму гребней  и впадин в местах поперечной нахлестки листов рядового покрытия при соединении с  плоской поверхностью картин (в карнизной части крыши);  

- восстановить целостность фальцевого соединения картин настенного желоба  и карнизного свеса с герметизацией картин между собой мастикой Викар;  

- предусмотреть укладку гидроизоляционного материала между деревянной  балкой и железобетонной стропильной ногой; крепление всех деревянных прогонов из  бруса к ж/б стропильным ногам выполнить тройной скруткой из проволоки  диаметром 4мм в количестве 3 шт. на каждую стропильную ногу; заменить доски  обрешетки со значительными сколами и трещинами;  

- обеспечить исправное состояние деревянных оконных блоков со створками,  в том числе обеспечить плотное и надежное закрытие створок, наличие всей  фурнитуры, выполнить элемент № 7 спецификации, обеспечивающий защиту от  попадания атмосферных осадков в чердачное помещение, окрасить эмалью ПФ-115  ГОСТ 6465-78;  

- выполнить установку водосточных стояков из звеньев согласно ГОСТ 762384, которые должны быть соединены между собой при помощи валика жесткости,  придающего дополнительную жесткость с креплением их к стене хомутами ХП 1  оцинкованными.  

- выполнить в соответствии с проектной документацией воротники из  оцинкованной стали вокруг слуховых окон;  

 - выполнить опорную площадку при выходе из слухового окна на кровлю и  ходовой трап выполнить согласно проектной документации.  

 В остальной части в удовлетворении иска отказать 

 Уплату государственной пошлины за рассмотрение иска отнести на  ответчиков.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПрофПроект» (ИНН:  

<

***>) и общества с ограниченной ответственности «АльфаСтройКузбасс»  (ИНН: 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального  ремонта многоквартирных домов Кузбасса», город Кемерово (ИНН: 

<

***>) по  3000 руб. расходов от уплаты государственной пошлины по иску.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПрофПроект» (ИНН:  

<

***>) и общества с ограниченной ответственности «АльфаСтройКузбасс»  

(ИНН: 

<

***>) в доход бюджета по 3000 руб. государственной пошлины за  рассмотрение иска.  

 Расходы на проведение экспертизы возложить на ответчиков. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПрофПроект» (ИНН:  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственности  «АльфаСтройКузбасс» (ИНН: 

<

***>) 20000 руб. расходов на проведение  экспертизы.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный  апелляционный суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья О.И. Перевалова