АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-9780/18

г. Уфа

13 сентября 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 06.09.2018

Полный текст решения изготовлен 13.09.2018

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Потенциал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Башкирская мясная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

Третье лицо: ООО «Компания по строительному инжинирингу и архитектурно-строительному проектированию Стройтех»

о взыскании задолженности в размере 7 750 000 руб.

 

по встречному исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская мясная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Потенциал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере 13 788 908 руб.

 

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 доверенность от 05.06.2018 г.

от ответчика, третьего лица: не явились, извещены по правилам ст.ст. 121-123 АПК РФ, в том числе путем публичного размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет.

 

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Потенциал" /далее – истец, ООО "Компания "Потенциал"/ обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская мясная компания" /далее – ответчик, ООО "Башкирская мясная компания"/ о взыскании задолженность в размере 7 750 000 руб. по обязательствами по договорам на выполнение изыскательских работ №391/1800, №392/1800, №393/1800, №394/1800, №395/1800, №196/1800, №197/1800, №398/1800, №399/1800, №400/1800, №401/1800, №402/1800 от 13.03.2017г.

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская мясная компания» к Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Потенциал»  о взыскании 10 226 000 руб. неосновательного обогащения в связи с невозвратом авансовых платежей, полученных по расторгнутым договорам подряда, 2 566 500 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ, 202 044 руб. 54 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Ответчиком по первоначальному иску был представлен отзыв /л.д.84-89 т.2/, которым ответчик исковые требования не признал на основании того, что истец в нарушение требований условий договора не представил готовую техническую документацию, допустил нарушения сроков выполнения работ, не признает передачу технической документации и извещение третьего лица ООО "Стройтех" в качестве исполнения обязательств по договорам. Также ответчик указал, что в одностороннем порядке отказался от исполнения договора в связи с существенными нарушениями, допущенными истцом. 

Истцом по первоначальному исковому заявлению был представлен отзыв на встречное исковое заявление /л.д.184-186 т.2/, которым указал, что исполнение договоров с его стороны было, так как третье лицо "Стройтех" осуществляло функции технического заказчика, согласно договору, заключенному между ответчиком и третьим лицом, соответственно, по мнению истца, третье лицо обладало правом принятия исполнения договоров подряда. Истцом заявлено, что односторонних отказ от исполнения обязательств по договору недопустим, у ответчика отсутствуют правовые основания  для совершения одностороннего отказа, а взыскиваемое ответчиком неосновательное обогащение не подлежит взысканию на основании того, что данные авансовые платежи являются оплатой выполненных истцом работ в рамках заключенных договоров подряда. 

Дело рассматривается в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без участия представителей ответчика, надлежащим образом извещенных о дате судебного заседания.

Исследовав представленные доказательства, выслушав представителя истца, суд 

 

УСТАНОВИЛ:

13.03.2017г. между ООО "Башкирская мясная компания" /заказчик/ и ООО "Компания "Потенциал"/ подрядчик/ был заключен договор подряда №391/1800 /далее – договор №391 л.д.11б-11и т.1/, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить изыскательские работы и разработать проектную, рабочую документации и сметную документацию по объекту: "Внеплощадочные сети газоснабжения к объекту "Комплекс "Мочилки", Белебеевский селекционно-генетический центр" место расположения: Республики Башкортостан, Белебеевский район Донской с/с", а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их /п.1.1 договора №391/.

Согласно п. 1.2 договора №391 объем разрабатываемой проектной, рабочей документации, сметной документации и перечень работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, определяется в договоре, техническом задании (приложение №1 к договору) и календарном плане работ (приложение №2 к договору).

В соответствии с п. 2.1 договора №391 работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане (приложение №2).

Датой полного окончания выполнения работ является дата подписания сторонами акта об исполнении договора /п.2.4 договора №391/.

Согласно п. 3.1 договора №391 общая стоимость составляет 1 850 000 руб.

Оплата производится в следующем порядке: авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 740 000 руб. выплачивается заказчиком после подписания договора на основании счета в течение 10 банковских дней; платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 740 000 руб. выплачивается заказчиком после получения заказчиком официального уведомления о готовности передачи проектной документации в течение 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от общей стоимости работ в размере 185 000 руб. выплачивается после приемки проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта не позднее 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от стоимости работ (185 000 руб.) выплачивается не позднее 5 банковских дней после приемки рабочей и сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта /п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 договора №391/. 

Порядок сдачи и приемки работ предусмотрен разделом 4 договора №391.

Согласно календарному плану /л.д. 13 т.1/, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания проводятся в течение 06.03.2017 по 20.04.2017, разработка проектной документации в течение 31.03.2017 по 15.04.2017.

13.03.2017г. между ООО "Башкирская мясная компания" /заказчик/ и ООО "Компания "Потенциал"/ подрядчик/ был заключен договор подряда №392/1800 /далее – договор №392 л.д.18-26 т. 1/, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить изыскательские работы и разработать проектную, рабочую документации и сметную документацию по объекту: "Внеплощадочные сети газоснабжения к объекту "Мясоперерабатывающее предприятие", Белебеевский селекционно-генетический центр" место расположения: Республики Башкортостан, г. Белебей", а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их /п.1.1 договора №392/.

Согласно п. 1.2 договора №392 объем разрабатываемой проектной, рабочей документации, сметной документации и перечень работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, определяется в договоре, техническом задании (приложение №1 к договору) и календарном плане работ (приложение №2 к договору).

В соответствии с п. 2.1 договора №392 работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане (приложение №2).

Датой полного окончания выполнения работ является дата подписания сторонами акта об исполнении договора /п.2.4 договора №392/.

Согласно п. 3.1 договора №392 общая стоимость составляет 880 000 руб.

Оплата производится в следующем порядке: авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 352 000 руб. выплачивается заказчиком после подписания договора на основании счета в течение 10 банковских дней; платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 352 000 руб. выплачивается заказчиком после получения заказчиком официального уведомления о готовности передачи проектной документации в течение 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от общей стоимости работ в размере 88 000 руб. выплачивается после приемки проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта не позднее 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от стоимости работ (88 000 руб.) выплачивается не позднее 5 банковских дней после приемки рабочей и сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта /п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 договора №392/. 

Порядок сдачи и приемки работ предусмотрен разделом 4 договора №392.

Согласно календарному плану /л.д. 29 т.1/, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания проводятся в течение 06.03.2017 по 20.04.2017, разработка проектной документации в течение 31.03.2017 по 15.04.2017.

13.03.2017г. между ООО "Башкирская мясная компания" /заказчик/ и ООО "Компания "Потенциал"/ подрядчик/ был заключен договор подряда №393/1800 /далее – договор №393 л.д.34-42 т. 1/, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить изыскательские работы и разработать проектную, рабочую документации и сметную документацию по объекту: "Внеплощадочные сети водоснабжения к объекту "Комплекс "Шаровка", Белебеевский селекционно-генетический центр" место расположения: Республики Башкортостан, Белебеевский район Донской с/с" место расположения: Республики Башкортостан, г. Белебей", а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их /п.1.1 договора №393/.

Согласно п. 1.2 договора №393 объем разрабатываемой проектной, рабочей документации, сметной документации и перечень работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, определяется в договоре, техническом задании (приложение №1 к договору) и календарном плане работ (приложение №2 к договору).

В соответствии с п. 2.1 договора №393 работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане (приложение №2).

Датой полного окончания выполнения работ является дата подписания сторонами акта об исполнении договора /п.2.4 договора №392/.

Согласно п. 3.1 договора №393 общая стоимость составляет 5 780 000 руб.

Оплата производится в следующем порядке: авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 2 312 000 руб. выплачивается заказчиком после подписания договора на основании счета в течение 10 банковских дней; платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 2 312 000 руб. выплачивается заказчиком после получения заказчиком официального уведомления о готовности передачи проектной документации в течение 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от общей стоимости работ в размере 578 000 руб. выплачивается после приемки проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта не позднее 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от стоимости работ (578 000 руб.) выплачивается не позднее 5 банковских дней после приемки рабочей и сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта /п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 договора №393/. 

Порядок сдачи и приемки работ предусмотрен разделом 4 договора №393.

Согласно календарному плану /л.д. 45 т.1/, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания проводятся в течение 06.03.2017 по 20.04.2017, разработка проектной документации в течение 31.03.2017 по 15.04.2017.

13.03.2017г. между ООО "Башкирская мясная компания" /заказчик/ и ООО "Компания "Потенциал"/ подрядчик/ был заключен договор подряда №394/1800 /далее – договор №394 л.д.50-58 т. 1/, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить изыскательские работы и разработать проектную, рабочую документации и сметную документацию по объекту: "Внеплощадочные сети водоснабжения к объекту "Комплекс "Мочилки", Белебеевский селекционно-генетический центр" место расположения: Республики Башкортостан, Белебеевский район Донской с/с" место расположения: Республики Башкортостан, г. Белебей", а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их /п.1.1 договора №394/.

Согласно п. 1.2 договора №394 объем разрабатываемой проектной, рабочей документации, сметной документации и перечень работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, определяется в договоре, техническом задании (приложение №1 к договору) и календарном плане работ (приложение №2 к договору).

В соответствии с п. 2.1 договора №394 работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане (приложение №2).

Датой полного окончания выполнения работ является дата подписания сторонами акта об исполнении договора /п.2.4 договора №394/.

Согласно п. 3.1 договора №393 общая стоимость составляет 1 020 000 руб.

Оплата производится в следующем порядке: авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 408 000 руб. выплачивается заказчиком после подписания договора на основании счета в течение 10 банковских дней; платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 408 000 руб. выплачивается заказчиком после получения заказчиком официального уведомления о готовности передачи проектной документации в течение 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от общей стоимости работ в размере 102 000 руб. выплачивается после приемки проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта не позднее 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от стоимости работ (102 000 руб.) выплачивается не позднее 5 банковских дней после приемки рабочей и сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта /п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 договора №394/. 

Порядок сдачи и приемки работ предусмотрен разделом 4 договора №394.

Согласно календарному плану /л.д. 61 т.1/, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания проводятся в течение 06.03.2017 по 20.04.2017, разработка проектной документации в течение 31.03.2017 по 15.04.2017.

13.03.2017г. между ООО "Башкирская мясная компания" /заказчик/ и ООО "Компания "Потенциал"/ подрядчик/ был заключен договор подряда №395/1800 /далее – договор №395 л.д.66 т. 1/, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить изыскательские работы и разработать проектную, рабочую документации и сметную документацию по объекту: "Внеплощадочные сети водоснабжения к объекту "Мясоперерабатывающее предприятие", Белебеевский селекционно-генетический центр" место расположения: Республики Башкортостан, Белебеевский район г. Белебей" место расположения: Республики Башкортостан, г. Белебей", а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их /п.1.1 договора №395/.

Согласно п. 1.2 договора №395 объем разрабатываемой проектной, рабочей документации, сметной документации и перечень работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, определяется в договоре, техническом задании (приложение №1 к договору) и календарном плане работ (приложение №2 к договору).

В соответствии с п. 2.1 договора №395 работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане (приложение №2).

Датой полного окончания выполнения работ является дата подписания сторонами акта об исполнении договора /п.2.4 договора №395/.

Согласно п. 3.1 договора №395 общая стоимость составляет 340 000 руб.

Оплата производится в следующем порядке: авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 136 000 руб. выплачивается заказчиком после подписания договора на основании счета в течение 10 банковских дней; платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 136 000 руб. выплачивается заказчиком после получения заказчиком официального уведомления о готовности передачи проектной документации в течение 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от общей стоимости работ в размере 34 000 руб. выплачивается после приемки проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта не позднее 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от стоимости работ (34 000 руб.) выплачивается не позднее 5 банковских дней после приемки рабочей и сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта /п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 договора №395/. 

Порядок сдачи и приемки работ предусмотрен разделом 4 договора №395.

Согласно календарному плану /л.д. 77 т.1/, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания проводятся в течение 06.03.2017 по 20.04.2017, разработка проектной документации в течение 31.03.2017 по 15.04.2017.

13.03.2017г. между ООО "Башкирская мясная компания" /заказчик/ и ООО "Компания "Потенциал"/ подрядчик/ был заключен договор подряда №396/1800 /далее – договор №396 л.д.82-90 т. 1/, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить изыскательские работы и разработать проектную, рабочую документации и сметную документацию по объекту: "подъездная автомобильная дорога к объекту "Комплекс "Шаровка", Белебеевский селекционно-генетический центр" место расположения: Республики Башкортостан, Белебеевский район Донской с/с" место расположения: Республики Башкортостан, г. Белебей", а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их /п.1.1 договора №396/.

Согласно п. 1.2 договора №396 объем разрабатываемой проектной, рабочей документации, сметной документации и перечень работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, определяется в договоре, техническом задании (приложение №1 к договору) и календарном плане работ (приложение №2 к договору).

В соответствии с п. 2.1 договора №396 работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане (приложение №2).

Датой полного окончания выполнения работ является дата подписания сторонами акта об исполнении договора /п.2.4 договора №396/.

Согласно п. 3.1 договора №396 общая стоимость составляет 1 750 000 руб.

Оплата производится в следующем порядке: авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 700 000 руб. выплачивается заказчиком после подписания договора на основании счета в течение 10 банковских дней; платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 700 000 руб. выплачивается заказчиком после получения заказчиком официального уведомления о готовности передачи проектной документации в течение 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от общей стоимости работ в размере 175 000 руб. выплачивается после приемки проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта не позднее 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от стоимости работ (175 000 руб.) выплачивается не позднее 5 банковских дней после приемки рабочей и сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта /п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 договора №396/. 

Порядок сдачи и приемки работ предусмотрен разделом 4 договора №396.

Согласно календарному плану /л.д. 93 т.1/, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания проводятся в течение 06.03.2017 по 20.04.2017, разработка проектной документации в течение 31.03.2017 по 15.04.2017.

13.03.2017г. между ООО "Башкирская мясная компания" /заказчик/ и ООО "Компания "Потенциал"/ подрядчик/ был заключен договор подряда №397/1800 /далее – договор №397 л.д.98-106 т. 1/, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить изыскательские работы и разработать проектную, рабочую документации и сметную документацию по объекту: "подъездная автомобильная дорога к объекту "Комплекс "Мочилки", Белебеевский селекционно-генетический центр" место расположения: Республики Башкортостан, Белебеевский район Донской с/с" место расположения: Республики Башкортостан, г. Белебей", а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их /п.1.1 договора №397/.

Согласно п. 1.2 договора №397 объем разрабатываемой проектной, рабочей документации, сметной документации и перечень работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, определяется в договоре, техническом задании (приложение №1 к договору) и календарном плане работ (приложение №2 к договору).

В соответствии с п. 2.1 договора №397 работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане (приложение №2).

Датой полного окончания выполнения работ является дата подписания сторонами акта об исполнении договора /п.2.4 договора №397/.

Согласно п. 3.1 договора №397 общая стоимость составляет 1 750 000 руб.

Оплата производится в следующем порядке: авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 700 000 руб. выплачивается заказчиком после подписания договора на основании счета в течение 10 банковских дней; платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 700 000 руб. выплачивается заказчиком после получения заказчиком официального уведомления о готовности передачи проектной документации в течение 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от общей стоимости работ в размере 175 000 руб. выплачивается после приемки проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта не позднее 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от стоимости работ (175 000 руб.) выплачивается не позднее 5 банковских дней после приемки рабочей и сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта /п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 договора №397/. 

Порядок сдачи и приемки работ предусмотрен разделом 4 договора №397.

Согласно календарному плану /л.д. 109 т.1/, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания проводятся в течение 06.03.2017 по 20.04.2017, разработка проектной документации в течение 31.03.2017 по 15.04.2017.

13.03.2017г. между ООО "Башкирская мясная компания" /заказчик/ и ООО "Компания "Потенциал"/ подрядчик/ был заключен договор подряда №398/1800 /далее – договор №398 л.д.114-118 т. 1/, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить изыскательские работы и разработать проектную, рабочую документации и сметную документацию по объекту: "подъездная автомобильная дорога к объекту "Мясоперерабатывающее предприятие", Белебеевский селекционно-генетический центр" место расположения: Республики Башкортостан, Белебеевский район г. Белебей " место расположения: Республики Башкортостан, г. Белебей", а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их /п.1.1 договора №398/.

Согласно п. 1.2 договора №398 объем разрабатываемой проектной, рабочей документации, сметной документации и перечень работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, определяется в договоре, техническом задании (приложение №1 к договору) и календарном плане работ (приложение №2 к договору).

В соответствии с п. 2.1 договора №398 работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане (приложение №2).

Датой полного окончания выполнения работ является дата подписания сторонами акта об исполнении договора /п.2.4 договора №398/.

Согласно п. 3.1 договора №397 общая стоимость составляет 1 750 000 руб.

Оплата производится в следующем порядке: авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 700 000 руб. выплачивается заказчиком после подписания договора на основании счета в течение 10 банковских дней; платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 700 000 руб. выплачивается заказчиком после получения заказчиком официального уведомления о готовности передачи проектной документации в течение 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от общей стоимости работ в размере 175 000 руб. выплачивается после приемки проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта не позднее 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от стоимости работ (175 000 руб.) выплачивается не позднее 5 банковских дней после приемки рабочей и сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта /п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 договора №398/. 

Порядок сдачи и приемки работ предусмотрен разделом 4 договора №398.

Согласно календарному плану /л.д. 129 т.1/, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания проводятся в течение 06.03.2017 по 20.04.2017, разработка проектной документации в течение 31.03.2017 по 15.04.2017.

13.03.2017г. между ООО "Башкирская мясная компания" /заказчик/ и ООО "Компания "Потенциал"/ подрядчик/ был заключен договор подряда №400/1800 /далее – договор №400 л.д.134-142 т. 1/, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить изыскательские работы и разработать проектную, рабочую документации и сметную документацию по объекту: "Внеплощадочные сети электроснабжения к объекту "Комплекс "Мочилки", Белебеевский селекционно-генетический центр" место расположения: Республики Башкортостан, Белебеевский район Донской с/с" место расположения: Республики Башкортостан, г. Белебей", а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их /п.1.1 договора №400/.

Согласно п. 1.2 договора №400 объем разрабатываемой проектной, рабочей документации, сметной документации и перечень работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, определяется в договоре, техническом задании (приложение №1 к договору) и календарном плане работ (приложение №2 к договору).

В соответствии с п. 2.1 договора №400 работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане (приложение №2).

Датой полного окончания выполнения работ является дата подписания сторонами акта об исполнении договора /п.2.4 договора №400/.

Согласно п. 3.1 договора №400 общая стоимость составляет 1 107 000 руб.

Оплата производится в следующем порядке: авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 442 800 руб. выплачивается заказчиком после подписания договора на основании счета в течение 10 банковских дней; платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 442 800 руб. выплачивается заказчиком после получения заказчиком официального уведомления о готовности передачи проектной документации в течение 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от общей стоимости работ в размере 110 700 руб. выплачивается после приемки проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта не позднее 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от стоимости работ (110 700 руб.) выплачивается не позднее 5 банковских дней после приемки рабочей и сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта /п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 договора №400/. 

Порядок сдачи и приемки работ предусмотрен разделом 4 договора №400.

Согласно календарному плану /л.д. 145 т.1/, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания проводятся в течение 06.03.2017 по 20.04.2017, разработка проектной документации в течение 31.03.2017 по 15.04.2017.

13.03.2017г. между ООО "Башкирская мясная компания" /заказчик/ и ООО "Компания "Потенциал"/ подрядчик/ был заключен договор подряда №401/1800 /далее – договор №401 л.д.1-8 т. 2/, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить изыскательские работы и разработать проектную, рабочую документации и сметную документацию по объекту: "Внеплощадочные сети электроснабжения к объекту "Мясоперерабатывающее предприятие" Белебеевский селекционно-генетический центр" место расположения: Республики Башкортостан, Белебеевский район Донской с/с" место расположения: Республики Башкортостан, г. Белебей", а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их /п.1.1 договора №401/.

Согласно п. 1.2 договора №401 объем разрабатываемой проектной, рабочей документации, сметной документации и перечень работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, определяется в договоре, техническом задании (приложение №1 к договору) и календарном плане работ (приложение №2 к договору).

В соответствии с п. 2.1 договора №401 работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане (приложение №2).

Датой полного окончания выполнения работ является дата подписания сторонами акта об исполнении договора /п.2.4 договора №401/.

Согласно п. 3.1 договора №401 общая стоимость составляет 594 000 руб.

Оплата производится в следующем порядке: авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 237 600 руб. выплачивается заказчиком после подписания договора на основании счета в течение 10 банковских дней; платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 237 600 руб. выплачивается заказчиком после получения заказчиком официального уведомления о готовности передачи проектной документации в течение 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от общей стоимости работ в размере 59 400 руб. выплачивается после приемки проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта не позднее 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от стоимости работ (59 400 руб.) выплачивается не позднее 5 банковских дней после приемки рабочей и сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта /п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 договора №401/. 

Порядок сдачи и приемки работ предусмотрен разделом 4 договора №401.

Согласно календарному плану инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания проводятся в течение 06.03.2017 по 20.04.2017, разработка проектной документации в течение 31.03.2017 по 15.04.2017.

13.03.2017г. между ООО "Башкирская мясная компания" /заказчик/ и ООО "Компания "Потенциал"/ подрядчик/ был заключен договор подряда №400/1800 /далее – договор №402 л.д.15-23 т. 2/, согласно которому подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить изыскательские работы и разработать проектную, рабочую документации и сметную документацию по объекту: "система водоотведения к объекту "Мясоперерабатывающее предприятие", Белебеевский селекционно-генетический центр" место расположения: Республики Башкортостан, Белебеевский район г. белебей" место расположения: Республики Башкортостан, г. Белебей", а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их /п.1.1 договора №402/.

Согласно п. 1.2 договора №402 объем разрабатываемой проектной, рабочей документации, сметной документации и перечень работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, определяется в договоре, техническом задании (приложение №1 к договору) и календарном плане работ (приложение №2 к договору).

В соответствии с п. 2.1 договора №402 работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане (приложение №2).

Датой полного окончания выполнения работ является дата подписания сторонами акта об исполнении договора /п.2.4 договора №400/.

Согласно п. 3.1 договора №402 общая стоимость составляет 340 000 руб.

Оплата производится в следующем порядке: авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 136 000 руб. выплачивается заказчиком после подписания договора на основании счета в течение 10 банковских дней; платеж в размере 40% от общей стоимости работ по договору в размере 136 000 руб. выплачивается заказчиком после получения заказчиком официального уведомления о готовности передачи проектной документации в течение 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от общей стоимости работ в размере 34 000 руб. выплачивается после приемки проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта не позднее 5 банковских дней с даты получения счета; платеж в размере 10% от стоимости работ (34 000 руб.) выплачивается не позднее 5 банковских дней после приемки рабочей и сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и подписания сторонами соответствующего акта /п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 договора №402/. 

Порядок сдачи и приемки работ предусмотрен разделом 4 договора №402.

Согласно календарному плану /л.д. 26 т.2/, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания проводятся в течение 06.03.2017 по 20.04.2017, разработка проектной документации в течение 31.03.2017 по 15.04.2017.

Между  сторонами  сложились гражданско-правовые отношения подряда на выполнение проектных и  изыскательских работ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии со статьей 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором, уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ; возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Ответчиком согласно условиям договоров были перечислены денежные средства в качестве аванса в размере 40% от сумма договора платежными поручениями №2357 от 21.03.2017г. на сумму 740 000 руб. /л.д.16 т.1/ по договору №391, №2360 от 21.03.2017 на сумму 352 000 руб. по договору №392 /л.д.32 т.1/, №2362 от 21.03.2017г. на сумму 2 312 000 по договору №393 /л.д.48 т.1/, №2369 от 21.03.2017г. на сумму 408 000 руб. по договору №394 /л.д.64 т.1/, №2368 от 21.03.2017 на сумму 136 000 руб. по договору №395 /л.д.80 т.1/, №2353 от 21.03.2017 на сумму 700 000 руб. по договору №396 /л.д.96 т.1/, №2355 от 21.03.2017 на сумму 700 000 руб. по договору №397 /л.д.112 т.1/, №2361 от 21.03.2017 на сумму 885 600 руб. по договору №399 /л.д.132 т.14/, №2352 от 21.03.2017 на сумму 442 800 руб. по договору №400 /л.д.148 т.1/, №2359 от 21.03.2017 на сумму 237 600 руб. по договору №401 /л.д.13 т.2/, №21.03.2017 на сумму 136 000 руб. по договору 402 /л.д.29 т.2/. Общая сумма перечисленных денежных средств составляет 10 226 000 руб. 

Согласно материалам дела указанные работы были сданы истцом ООО "Стройтех", которое расписалось в графе "от технического заказчика" в актах передачи проектной документации №391 от 27.07.2017 /л.д.17 т.1/, №392 от 13.03.2017 от 27.04.2017 /л.д.33 т.1/, №393 от 27.04.2017 /л.д.49 т.1/, №394 от 27.04.2017 /л.д.65 т.1/, №395 от 27.04.2017 /л.д.81 т.1/, №396 от 27.04.2017 /л.д.97 т.1/, №397 от 27.04.2017 /л.д.113 т.1/, №399 от 27.04.2017 /л.д.133 т.1/, №400 от 27.04.2017 /л.д.149 т.1/, №401 от 27.04.2017 /л.д.14 т.2/, №402 от 27.04.2017 /л.д.30 т.2/. 

Однако, исследовав представленные акты, суд не может принять их в качестве доказательств исполнения обязательств по договорам.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ обязанностью подрядчика является передача заказчику готовой технической документации.

Пунктом 4 статьи 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно пункту 8 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Согласно п. 4.3 договоров выполнение работ подтверждается подписанием заказчиком и подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ при единовременном предоставлении результатов инженерных изысканий, проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, рабочей документации, сметной документации. 

Из приведенных норм и условий договора следует, что результат выполнения проектных и изыскательских работ будет достигнут и иметь для заказчика какую-либо ценность и экономический эффект только при передаче исполнителем вместе с сопутствующей проведенным изысканиям документации. 

Вместе с тем, из представленных истцом актов следует, что результат работ был принят не заказчиком, то есть ответчиком, а иным лицом, не являющимся участником правоотношений по спорным договорам. 

ООО "Стройтех" не является надлежащим лицом, уполномоченным на совершение значимых хозяйственных действий от имени ответчика, доказательств обратного сторонами не представлено. Довод истца, основанный на том, что согласно условиям договора №Пр-385/1800 ответчик поручает ООО "Стройтех" исполнение функций технического заказчика, а вместе с этим уполномочивает на принятие работ, имеющих отношение к объекту подрядных работ, отклоняется. 

Согласно п.п. 22 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации выполнение функций технического заказчика не является безусловной возможностью осуществления всех прав и обязанностей заказчика, касающиеся данных правоотношений. Гражданским и градостроительным законодательством не предусмотрено возникновение доверительных правоотношений, между ответчиком и третьим лицом, в которых третье лицом могло бы выступать от имени ответчика и совершать юридически значимые действия. 

Согласно п. 5.1.1 договоров при назначении ответчиком уполномоченного им лица, он направляет в адрес истца соответствующее уведомление с указанием ФИО представителя, занимаемой должности, срок полномочий, дата, номер доверенности, с приложением доверенности, подтверждающих объем полномочий представителей. 

Согласно пунктам 1 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

ООО "Стройтех" не получал письменной, согласованного ответчиком, доверенности, уполномочивающей третье лицо на получение результатов работ по настоящим договорам подряда. Истцом не представлены доказательства,  из которых следовало бы, что ответчиком было дано поручение ООО "Стротех" на осуществление обязательств по принятию изыскательских работы по спорным договорам.  

В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" разъяснено, что по общему правилу, предусмотренному п. 3 ст. 308 ГК РФ, обязательство не создает прав и обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). Соответственно, стороны обязательства не могут выдвигать в отношении третьих лиц возражения, вытекающие из обязательства, в котором они не участвуют.

Согласно письму №23/1 от 23.03.2017 /л.д.32 т.2/, адресованному истцу от ООО "Стройтех", следует только то, что третье лицо сообщило о том, что им согласовывается выполнение изыскательских работ в соответствии с утвержденной схемой прохождения сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения. Указаний на осуществление поручения от ответчика в принятии результатов настоящих работ в тексте письма нет. 

24.07.2017  письмом №428 /л.д.36 т.2/ истцом в адрес ответчика были направлены проектно-сметная документация, однако данное действие не может быть принято в качестве надлежащего исполнения договорных обязательств на том основании, что данное отправление было сформировано спустя 3 месяца после истечения срока сдачи работ, согласно графикам, а также не содержит описи вложения со штампов транспортной организации, согласно которой можно очевидно установить о содержимом отправления. Указание в тексте письма о повторном направлении не может свидетельствовать о попытке вручить документацию ответчику ранее, так как в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о данном обстоятельстве. 

Направление по поручению третьего лица, содержащегося в письме от 28.04.2017 /л.д.34 т.2/ проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий в адрес ГАУ "Управление Государственной экспертизы Республики Башкортостан" не является надлежащим исполнением договорных обязательств. Согласно ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора толкуются буквально, а из содержания рассматриваемых договоров следует, что выполнение всех работ подтверждается подписанным заказчиком (ответчиком) и подрядчиком (истцом) акта о сдачи-приемке работ с предоставлением всей соответствующей документации. Ни условиями договора, ни гражданским законодательством непредусмотрено признание обязательства исполненным путем предоставления проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий государственным учреждениям или третьим лицам. 

На основании указанного, суд приходит к выводу, что акты выполненных работ были подписаны неуполномоченным лицом, а сами акты вместе с результатами работ  в нарушение действующего законодательства, а также условий договоров  не были переданы в надлежащие сроки ответчику, так как истцом доказательства обратного не были представлены. Таким образом, первоначальные исковые требования не подлежат удовлетворению в связи с неисполнением обязательств, предусмотренных договорами. 

В связи с нарушением сроков выполнения работ ответчиком заявлены встречные требования о взыскании неустойки в размере 2 566 500 руб.

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 6.4 договоров если подрядчик не выполнит своих обязательств по выполнению работ и/или нарушит сроки выполнения работ или устранения недостатков и/или любого срока исполнения обязательств, подрядчик обязуется уплатить заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненного объема работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по договору.

Согласно расчету ответчика по договору №390 цена договора 6 290 000 руб., период неустойки составляет 16.04.2017 по 26.02.218 неустойка составляет 1 993 930 руб., что превышает 10% от суммы договора (629 000 руб.); по договору №391 цена договора 1 850 000 руб., период неустойки составляет 16.04.2017 по 26.02.218 неустойка составляет 564 250 руб., что превышает 10% от суммы договора (185 000 руб.); по договору №392 цена договора 880 00 руб., период неустойки составляет 16.04.2017 по 26.02.218 неустойка составляет 268 400 руб., что превышает 10% от суммы договора (88 000 руб.); по договору №393 цена договора 5 780 000 руб., период неустойки составляет 16.04.2017 по 26.02.218 неустойка составляет 1 762 900 руб., что превышает 10% от суммы договора (578 000 руб.); по договору №3947 цена договора1 020 000 руб., период неустойки составляет 16.04.2017 по 26.02.218 неустойка составляет 311 100 руб., что превышает 10% от суммы договора (102 000 руб.); по договору №395 цена договора 340 000 руб., период неустойки составляет 16.04.2017 по 26.02.218 неустойка составляет 103 700 руб., что превышает 10% от суммы договора (34 000 руб.); по договору №396 цена договора 1 750 000 руб., период неустойки составляет 16.04.2017 по 26.02.218 неустойка составляет 533 750 руб., что превышает 10% от суммы договора (175 000 руб.); по договору №397 цена договора 1 750 000 руб., период неустойки составляет 16.04.2017 по 26.02.218 неустойка составляет 533 750 руб., что превышает 10% от суммы договора (175 000 руб.); по договору №398 цена договора 1 750 000 руб., период неустойки составляет 16.04.2017 по 26.02.218 неустойка составляет 533 750 руб., что превышает 10% от суммы договора (175 000 руб.); по договору №399 цена договора 2 214 000 руб., период неустойки составляет 16.04.2017 по 26.02.218 неустойка составляет 675 270 руб., что превышает 10% от суммы договора (221 400 руб.); по договору №400 цена договора 1 107 000руб., период неустойки составляет 16.04.2017 по 26.02.218 неустойка составляет 337 635 руб., что превышает 10% от суммы договора (110 700 руб.); по договору №401 цена договора 594 000 руб., период неустойки составляет 16.04.2017 по 26.02.218 неустойка составляет 181 170 руб., что превышает 10% от суммы договора (59 400 руб.); по договору №402 цена договора 340 000 руб., период неустойки составляет 16.04.2017 по 26.02.218 неустойка составляет 103 700 руб., что превышает 10% от суммы договора (34 000 руб.). Общая сумма неустойки по всем договорам составляет 2 566 500 руб.

Расчет ответчика признан арифметически верным. 

Истцом контррасчет не представлен, о снижении неустойки в порядке ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявлено.

В связи с тем, что нарушение сроков исполнения обязательств истцом является установленным документально обстоятельством, требования ответчика по встречному исковому заявлению о взыскании неустойки в размере 2 566 500 руб. подлежат удовлетворению. 

В связи с существенным нарушением условий договора, а именно несвоевременным и ненадлежащим исполнением обязательств по договору ответчиком был заявлен односторонний отказ от договоров. 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут при существенном нарушении договора другой стороной, в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором (п. 1 ч. 2 ст. 450 ГК РФ). Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Пунктом 1 ст. 450.1 ГК РФ установлено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Письмом №56/18-БМК от 19.01.2018 /л.д.129 т.2/, направленным в адрес истца, ответчик отказался в одностороннем порядке от исполнения настоящих договоров.

Согласно пункту 2 статьи 715 Кодекса, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу положений пункта 1 статьи 1102 Кодекса лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Указанная норма права предполагает неосновательное обогащение одного лица за счет другого (пострадавшего) при отсутствии обязательственных правоотношений между участниками.

В пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" разъяснено, что положения пункта 4 статьи 453 Кодекса не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода.

Следовательно, с расторжением договоров подряда  году у истца отпали правовые основания для удержания перечисленных заказчиком денежных средств. Право сохранить за собой авансовые платежи с этого момента прекратилось, и на основании пункта 1 статьи 1102 Кодекса у истца возникло обязательство по их возврату заказчику.

При таких обстоятельствах требования ответчика о взыскании денежных средств в размере 10 226 000 руб. правомерны.

Несвоевременное возвращение истцом денежных средств послужило основанием для начисления процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК РФ, на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Согласно расчету ответчика за период с 14.02.2018 (дата расторжения договоров №№391, 392, 393, 394, 395, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402), и 26.02.2018 (дата расторжения договора №390)  по 25.05.2018г. проценты составляют 202 044 руб. 54 коп./расчет л.д.111 т.2/

Расчет ответчика признан арифметически верным и подлежит удовлетворению.

Согласно всему вышесказанному, суд отказывает в удовлетворении исковых требований в полном объеме, удовлетворяет встречные исковые требования. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на итсца в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В  удовлетворении исковых  требования ООО «Компания  «Потенциал»  к ООО  «Башкирская  мясная  компания»  о взыскании задолженности в размере 7 750 000 руб. отказать.

         Встречные исковые  требования  ООО «Башкирская  мясная компания»  удовлетворить.

         Взыскать  с ООО «Компания  «Потенциал»  в пользу  ООО «Башкирская  мясная  компания»  неосновательное обогащение  10 226 000 руб., неустойку  в  размере 2 566 500 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 202 044 руб.54 коп., судебные расходы по государственной пошлине 91 544 руб.54 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья                                                                 И.Р. Юсеева