РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-112351/22-110-813

г. Москва

09 декабря 2022 г.

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2022 года 

Решение в полном объеме изготовлено 09декабря 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску закрытого акционерного общества  "РИКА ИНЖИНИРИНГ" (107553, ГОРОД МОСКВА, ЧЕРКИЗОВСКАЯ Б. УЛИЦА, 26, 6, 39, ОГРН: 1027739189202) к акционерному обществу "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (107031, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ПЕТРОВКА, 15/13, СТР.5, , ОГРН: 1027739018944) о взыскании 3 073 621,84 руб.,

при участии:

от истца – Мартынов  А.И. , гендиректор,

от ответчика- Первышина  Д.А. по дов.  от  01.08.2020,

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество "РИКА ИНЖИНИРИНГ" обратилось с иском к акционерному обществу "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 3 073 621,84 руб. задолженности по договору №15/0807 от 07.04.2015, 261 721 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов на сумму 3 073 621,84 руб., исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды с 02.10.2022 по дату фактического исполнения обязательства.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 07 апреля 2015 года между ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ» и ЗАО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» был заключен договор на выполнение строительных работ № 15/08. 

В соответствии с условиями вышеуказанного договора ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ» обязалось выполнить  строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по устройству внутренних инженерных систем на объекте «Индивидуальный жилой дом с офисными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: город Москва, улица Изумрудная, дом 65».

ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ» во исполнение своих обязательств по договору выполнило работы  на общую сумму 26 614 990,29 (Двадцать шесть миллионов шестьсот четырнадцать тысяч девятьсот девяносто)  рублей 29 копеек, что подтверждается подписанными  сторонами Справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и Актами выполненных работ по форме КС -2:

№ пп

№ договора/дополнительного соглашения

№ акта, дата

Сумма, руб.

1

Дог. 15/08 от 07.04.2015

Акт № 1 от 30.06.2015

 2 506 219,05

2

Дог. 15/08 от 07.04.2015

Акт № 2 от 31.07.2015)

4 084 954,96

3

Дог. 15/08 от 07.04.2015

Акт № 3 от 31.08.2015)

5 548 159,77

4

Дог. 15/08 от 07.04.2015

Акт № 4 от 30.09.2015)

4 951 569,62

5

ДС № 2 к дог. 15/08 от 01.12.2015

Акт № 1 от 30.09.2015

2 691 000,00

6

ДС № 1 к дог. 15/08 от 01.12.2015

Акт №1 от 30.09.2015

890 000,00

7

Дог. 15/08 от 07.04.2015

Акт № 5 от 31.10.2015)

2 275 366,60

8

Дог. 15/08 от 07.04.2015

Акт № 6 от 30.11.2015

633 665,23

9

ДС № 2 к дог. 15/08 от 01.12.2015

Акт № 2 от 30.11.2015

299 000,00

10

ДС № 3 к дог. 15/08 от 01.12.2015

Акт № 1 от 30.11.2015

173 427,00

11

ДС № 4 к дог. 15/08 от 01.12.2015

Акт № 1 от 30.11.2015)

1 369 602,00

12

ДС № 5 к дог. 15/08 от 01.12.2015

Акт № 1 от 17.12.2015

145 124,62

13

Дог. 15/08 от 07.04.2015

Акт № 7 от 31.12.2015

1 025 062,54

14

ДС № 6 к дог. 15/08 от 01.12.2015

Акт № 1  от 31.01.2016)

21 838,90

Документы надлежащим образом оформлены и подписаны сторонами без замечаний по объему и качеству работ.

Пунктом 4.7. Договора установлено, что Подрядчик обязуется оплатить Генподрядчику стоимость оказываемых Генподрядчиком услуг (связанные с обеспечением технической документацией, координацией работ, с предоставлением общего освещения, с расходом за временную подводку энергоснабжения, водоснабжения, с предоставлением сантехнических сооружений, бытовых помещений), в размере 5 (пяти) % от стоимости выполненных работ по актам КС-2 и КС-3, ежемесячно, на основании «Акта об оказании услуг», акта взаимозачета, счета и  счета-фактуры установленной формы. Сторонами подписаны акты на генподрядные услуги на общую сумму 1 330 749,51 (Один миллион триста тридцать тысяч семьсот сорок девять) рублей 51 копейка.

ЗАО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ»  произвело частичную оплату выполненных работ на общую сумму 22 210 618,94 (Двадцать два миллиона сто семьдесят семь тысяч шестьсот семь) рублей 94 копеек.

Согласно пунктом 4.8. Договора с целью обеспечения гарантийных обязательств, принятых Подрядчиком по настоящему Договору Генподрядчик оставляет в своем распоряжении гарантийную сумму (гарантийный резерв) в размере 10 (десяти) % от стоимости Работ по настоящему Договору.

В соответствии с пунктом 11.2. гарантийный срок составляет 5 (Пять) лет. Указанный гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного строительством объекта.

Гарантийный срок истек 31.01.2021 года, однако окончательный расчет за выполненные работы не произведен.

Таким образом задолженность АО «МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ» по договору № 15/08 от 07.04.2018 г. составляет сумму в размере 3 073 621,84 (Три миллиона семьдесят три тысячи шестьсот двадцать один) рубль 84 копейки.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, при этом односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, не допускается.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1).

Согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга до момента его полного погашения. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Кроме того в соответствии с пунктом 7.2.6. Генподрядчик вправе зачесть только начисленные штрафные санкции Подрядчику из сумм, подлежащих выплате Подрядчику в порядке статьи 410 ГК РФ с обязательным предоставлением заявления о произведённом зачёте встречных однородных требований.

Заявления о произведённом Ответчиком зачёте встречных однородных требований (штрафных санкций) Истцу не направлялись.

Ни какой иной порядок расчетов между сторонами Договором не предусмотрен. Уменьшение финансовых обязательств Генподрядчика путем одностороннего зачета не допустимо, кроме стоимости начисленных Подрядчику штрафных санкций в порядке статьи 410 ГК РФ с обязательным предоставлением заявления о произведённом зачёте.

Представленные Ответчиком Акты  взаимозачета № 326 от 31.10.2015, № 391 от 31.12.2015 и № 281 от 01.09.2016 не  имеют юридического значения для рассмотрения настоящего дела, так как ни каких финансовых обязательств, вытекающих из представленных актов, ввиду нулевого сальдо расчетов у сторон не возникает и не приводит к уменьшению финансовых обязательств сторон.

Представленный Ответчиком Акт № 2/1 от 31.01.2016 так же не  имеет юридического значения для рассмотрения настоящего дела, так как возмещение затрат за тепловую энергию потребленную в январе 2016 года Договором № 15/08 от 07.04.2015 г. не предусмотрено. Затраты на содержание строительной площадки несет Генподрядчик. Сторонами не подписывались Соглашения об увеличении размера (5%) стоимости оказываемых Генподрядчиком услуг. Ссылку на Договор № 15/08 от 07.04.2015 Акт № 2/1 от 31.01.2016 не содержит.

Все основные работы по Договору № 15/08 и дополнительные работы по Соглашениям №1, №2, №3, №4 и №5 были закончены 31 декабря 2015 года.

Как указал истец, в январе 2016 года производились только непредвиденные работы по восстановлению работоспособности системы «Автоматика Незадымляемости» после протечки воды в соответствии с  Дополнительным соглашением № 6 от 01.12.2015 на сумму 21 838,90 рублей.

Довод ответчика о произведенном ним взаимозачете встречных требований на основании Акта сверки взаимных расчетов за период январь 2014 - август 2016 года не является доказательством осуществления его сторонами зачета, поскольку из него однозначным образом не следует, что стороны намеревались прекратить встречные обязательства путем взаимозачета встречных однородных требований. Указанный Акт  сверки является документом, который отражает движение товаров, работ, услуг и денежных средств между контрагентами.

Кроме того,  по акту  №2/1 от 31.01.2016 пропущен срок исковой давности,  в связи с чем оснований для зачета не имеется.. Остальные акты,  являются актами  взаимозачета,  согласно которым задолженности Истца были зачтены  сторонами по другим обязательствам Ответчика.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.02.2021 по 31.03.2022 составляет 261 721 руб. 

Кроме того, с ответчика подлежат взысканию проценты на сумму  3 073 621 руб. 84 коп. ,  исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды,  с 02.10.2022  по день фактической оплаты.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.  110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с  акционерного общества "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (ОГРН: 1027739018944)  в пользу  закрытого акционерного общества  "РИКА ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН: 1027739189202) 3 073 621 руб. 84 коп. задолженности,  261 721 руб. процентов, проценты на сумму  3 073 621 руб. 84 коп. ,  исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды,  с 02.10.2022  по день фактической оплаты, 38 368 руб.  в возмещение расходов по госпошлине.

Взыскать с  акционерного общества "МОСПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (ОГРН: 1027739018944)  в федеральный бюджет госпошлину в размере  1 309 руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко