Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-5367/2022

25 октября 2022 года

город Якутск

 

Резолютивная часть решения объявлена 19.10.2022.

Мотивированное решение изготовлено 25.10.2022.

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Никодимовой М.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Муниципального казенного учреждения "Главстрой" Городского округа "Город Якутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ДорСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки,

с участием представителей:

от истца: ФИО1 по доверенности №ПД-08/2021 от 17.08.2022, удостоверение, диплом; 

от ответчика: не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное казенное учреждение "Главстрой" Городского округа "Город Якутск" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением от 04.07.2022 № 310 к обществу с ограниченной ответственностью "ДорСтрой"  об обязании безвозмездно устранить недостатки работ по муниципальному контракту на выполнение работ по объекту:»Капитальный ремонт автомобильных дорог городской агломерации ГО «город Якутск» от 19.05.2020 № КР-04/2020 в течение 30 дней с момента  вступления решения суда в законную силу. 

Определением суда от 28.09.2022 принято уточнение исковых требований об обязании общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой" (ИНН 

<

***>/ ОГРН 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки работ по муниципальному контракту от 19.05.2020 № КР-04/2020 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильных дорог городской агломерации ГО «город Якутск» в срок до 30 июня 2023 года:

-«Капитальный ремонт Окружною шоссе на участке от ул.Жорницкого до Вилюйского тракта (2-я очередь)»:

ПК2+070: Восстановить дорожный бордюрный камень 

ПК 8+015: Вывезти бурт

ПК 8 +040: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под габионы, осуществить укладку габионов

ПК 10+015: Убрать строительный мусор 

ПК 10+085: Убрать строительный мусор

ПК 13+080: Провести досыпку растительной землей, сделать планировку, сделать посев трав

ПК 13+090: Убрать строительный мусор

ПК 14+00: Провести досыпку растительной землей, сделать планировку, сделать посев трав

ПК 16+005: Не соблюдение требований сп 78 13330 2012

ПК 19+024: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под габионы, осуществить укладку габионов. Залить битумом

ПК 22+015: Убрать остаток опоры, заделать отверстие асфальтобетоном

ПК 25+00: Заделать отверстие асфальтобетоном

ПК 28+030: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под габионы, осуществить укладку габионов

ПК 32+080: Демонтировать ограждения

ПК 34+050: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под габионы, осуществить укладку габионов 

ПК 35+050: Убрать бурт

ПК 38+050: Восстановить асфальтобетонное покрытие 

ПК 41 +00: Заделать отверстие асфальтобетоном

Транспортное кольцо Вилюйский тракт: Восстановить дорожный бордюрный камень

ПК 41+050: Убрать строительный мусор 

ПК 32+050: Восстановить откосы

ПК 31+050: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под габионы, осуществить укладку габионов. Залить битумом

ПК 28+04: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под габионы, осуществить укладку габионов

ПК 27+050: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под габионы, осуществить укладку габионов

ПК 26+060: Восстановить асфальтобетонное покрытие

ПК 25+050: Убрать строительный мусор, восстановить бордюр

ПК 24+060: Заделать отверстие асфальтобетоном

ПК 24+00: Восстановить дорожные стойки и знаки вследствие наезда транспортного средства. Убрать строительный мусор.

ПК 10+015: Восстановить крышку колодца и отсыпать

ПК 8+040: Выполнить paботы по проекту по поднятию или опусканию трубы

ПК 7+050: Убрать строительный мусор

ПК (ул. Космонавтов) на съезд с Окружною шоссе: Заглубить стойку под знак пешеход 

ПК 1+070: Заделать отверстие асфальтобетоном

-«Капитальный ремонт ул. Курнатовского на участке от ул. Пилотов до ФИО2 ФИО4 шоссе»:

ПК 2+005 (слева): Демонтировать покрытие, основание, осуществить устройство основания и покрытия

ПК 2+020 (слева): Дсчошировам. покрытие, основание, осуществить устройство основания и покрытия

ПК 2+050 (слева): Демонтировать асфальтобетонное покрытие, основание, осуществить устройство основания и асфальтобетонного покрытия

ПК 2+055 (слева): Демонтаж и новое устройство асфальтобетонного покрытия 

ПК 3+050: Заменить крышку лотка

ПК   5+080  (слева):   Демонтирован,   покрытие,   основание,  осуществить  устройство основания и покрытия

ПК 7+015: Убрать строительный мусор

ПК 7+020 (слева): Демонтировать остаток опоры, заделать отверстие асфальтобетоном 

ПК 11+090: Демонтировать покрытие, основание, осуществить устройство основания и покрытия

ПК 6+050: Убрать строительный мусор

ПК 6+00: Заделать отверстие асфальтобетоном

ПК 5+050: Заделать отверстие асфальтобетоном.

Копия определения суда от 15.07.2022 о принятии искового заявления вручена ответчику 23.07.2022 (отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 67700073778527).

Определение суда от 06.07.2022 о принятии искового заявления к производству, направленное в адрес ответчика по адресу согласно сведениям из ЕГРЮЛ:  72000, 

<

...>,возвращено почтовой организацией по истечении срока хранения.

В соответствии с частью 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения юридического лица. Место нахождения юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

В пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что с учетом положения пункта 2 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по перечисленным адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, направленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 68 того же Постановления, статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Поскольку ответчик не обеспечил получение корреспонденции по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, соответственно, он считается надлежащим образом извещенным о возбуждении производства по делу.

Иных адресов ответчика материалы дела не содержат.

Согласно части 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

Информация о движении дела на официальном сайте арбитражного суда опубликована своевременно.

Суд, руководствуясь статьей 156 АПК РФ, определил рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие  ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Ответчик отзыв по иску в суд не направил.

28.09.2022 истцом представлены дополнения к иску.

Суд в порядке статьи 66 АПК РФ приобщил к материалам дела поступившие документы. 

По существу заявленных требований суд установил следующие обстоятельства.

По результатам осуществления закупки 0116300000120000300 путем проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона № 257 от 08.05.2020) между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен муниципальный контракт №КР-04/2020 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильных дорог городской агломерации ГО «город Якутск», по условиям которого (п. 1.1.) Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить на Объекте, указанном в п. 1.2. настоящего Контракта работы по капитальному ремонту в соответствии с проектно-сметной документацией, в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика производства работ (приложение №1 к Контракту) в объеме, установленном в Ведомости объемов работ контрактной цены (приложение № 2), в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Контракта (далее – работы), а Заказчик обязуется принять выполненные работы по Объекту и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Наименование Объекта: «Капитальный ремонт автомобильных дорог городской агломерации ГО «город Якутск» (п. 1.2. контракта).

В соответствии с п. 1.7. контракта Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании (Приложение № 3 к Контракту), другими нормативными документами, устанавливающими требования к работам, являющимся предметом настоящего Контракта, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

В п. 4.1. контракта указаны следующие сроки выполнения работ: 

Капитальный ремонт Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта (2-ая очередь). 1 этап: Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта Окончание выполнения работ: 30 ноября 2020 г. 2 этап: Начало выполнения работ – 1 марта 2021 г. Окончание выполнения работ: 30ноября 2021 г.

Капитальный ремонт ул. Курнатовского на участке от ул. Пилотов до ФИО2 Юряхское шоссе. 1 этап: Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта. Окончание выполнения работ: 30 ноября 2020 г.

Согласно п. 2.1 контракта цена контракта составляет 974 404 412,08 руб., в том числе НДС. Источник финансирования: муниципальный бюджет (п. 2.6 контракта). 

В п. 2.7 контракта сторонами согласован порядок авансирования работ.

Сторонами подписаны акты формы КС-2 № 1 от 22.07.2020, № 2 от 15.09.2020, № 3 от 15.09.2020, № 4 от 21.09.2020, № 5 от 21.09.2020, № 6 от 15.10.2020, № 7 от 15.10.2020, № 8 от 28.10.2020, № 9 от 16.11.2020, № 10 от 15.11.2020, № 12 от 26.04.2021, № 13 от 25.05.2021, № 14 от 22.06.2021, № 15 от 26.07.2021, № 16 от 30.07.2021, № 17 от 30.08.2021, № 18 от 20.09.2021, № 19 от 06.10.2021, № 20 от 12.10.2021, № 21 от 25.10.2021, № 22 от 23.11.2021, № 23 от 15.12.2021, № 24 от 15.12.2021, № 25 от 21.12.2021, № 26 от 21.12.2021, справки формы КС-3.

Также сторонами подписаны акты приемки законных работ «Капитальный ремонт ул. Курнатовского на участке от ул. Пилотов до ФИО2 Юряхское шоссе», «Капитальный ремонт Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта (2-ая очередь)».

В подтверждение оплаты работ заказчиком в материалы дела представлены платежные поручения за период с июля 2020 года по декабрь 2021 года.

28.04.2022 заказчиком комиссионно произведен осмотр объекта «Капитальный ремонт Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта (2-ая очередь)», по результатам составлен Акт о выявленных недостатках.

По результатам осмотра объекта «Капитальный ремонт ул. Курнатовского на участке от ул. Пилотов до ФИО2 Юряхское шоссе» составлен Акт о выявленных недостатках от 29.04.2022.

Акты о выявленных недостатках от 28.04.2022, 29.04.2022 подписаны также ФИО3, которому предоставлена доверенность от 11.01.2022 на представление интересов ООО «ДорСтрой» при ведении работ по спорным объектам, предоставлено право подписывать и получать предписания, акты, протоколы от заказчика МУК «Главстрой».

12.05.2022 с участием представителя подрядчика составлен акт комиссионного обследования Окружного шоссе, решено произвести в срок до 10.06.2022 повторный засев трав на откосах автомобильной дороги.

Истцом в адрес ответчика направлены претензионные письма от 20.05.2022 об исполнении гарантийных обязательств, а именно устранить указанные в претензии недостатки в срок до 30.06.2022.

23.06.2022 истец уведомил ответчика о составлении акта по гарантийным обязательствам, указал время и место сбора комиссии - 27.06.2022.

Уведомление от 23.06.2022 № 1416/ГСЛ направлено ответчику по адресу электронной почты, указанной в пункте 23.5, разделе 25 контракта (л.д. 17).

Согласно пункту 20.1 контракта все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с описью документов по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 24 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

27.06.2022 истцом в отсутствие представителя ответчика составлен акт комиссионного обследования по устранению выявленных дефектов по объектам: «Капитальный ремонт Окружного на участке от ул.Жорницкого до Вилюйского тракта (2-

я очередь)», «Капитальный ремонт ул. Курчатовского на участке от ул. Пилотов до ФИО2- ФИО4 шоссе» по муниципальному контракту № КР-04/2020 от 19.05.2020, согласно которому по результатам осмотра объектов выявлено, что подрядной организацией ООО «Дорстрой» выполнены работы по санации трещин битумной эмульсией; по остальным работам подрядчик не приступил к выполнению гарантийных обязательств указанных в актах о выявленных недостатках от 28.04.2022, 29.04.2022 и в акте комиссионного обследования Окружного шоссе от 12.05.2022 (посев трав).

В п. 11.1. контракта предусмотрено, что Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами, и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, возможность его нормальной бесперебойной эксплуатации на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и рабочей документации (п. 11.2. контракта).

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту (п. 11.3. контракта).

В соответствии с п. 11.4. контракта гарантийные сроки устранения подрядчиком дефектов, возникших в течение эксплуатации Объекта с момента подписания акт приемки отремонтированного участка автомобильной дороги, составляют:

Земляное полотно

8 лет

Основание дорожной одежды

6 лет

Нижний слой покрытия

5 лет

Верхний слой покрытия

4 лет

Искусственные сооружения:

Водопропускные трубы

6 лет

Регуляционные сооружения (тип сооружения)

6 лет

Обустройство дороги:

Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное)

5 лет

Сигнальные столбики

2 лет

Дорожные знаки

2 лет

Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб

8 лет

 

Гарантийные обязательства по всем выполненным в рамках Контракта видам работ, предусматриваются в соответствии с гарантийными сроками на данные виды работ, конструкций и изделий.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта (Приложение № 8 к Контракту).

В отношении выполненным в рамках Контракта видам работ, не предусмотренных гарантийным паспортом, гарантийный срок устанавливается 3 (три) года.

В силу п. 11.5. контракта Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего реконструкции Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами..

При обнаружении Заказчиком любых дефектов/недостатков в Работах и МТР, несоответствия требованиям рабочей документации, действующим нормативным документам в строительстве (СНиП, СП, ТУ и др) в ходе приемки Работ, а также в течение гарантийного срока Заказчик должен заявить о них Подрядчику в письменной форме и пригласить Подрядчика для участия в составлении Акта, фиксирующего выявленные недостатки и устанавливающего сроки устранения недостатков (далее по тексту – «Акт о выявленных недостатках»).

В соответствии с п. 11.5.1. контракта Уполномоченный представитель Подрядчика обязан прибыть для составления Акта в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления.

В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок либо отказа от составления и подписания Акта о выявленных недостатках, Заказчик вправе в одностороннем порядке составить Акт о выявленных недостатках, который будет иметь обязательную юридическую силу для Сторон (п. 11.5.2. контракта).

Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика и в установленный таким требованием срок за свой счет устранить выявленные недостатки, без увеличения цены настоящего Контракта (п. 11.6. контракта).

Неисполнение ответчиком обязательств по устранению выявленных в пределах гарантийного срока недостатков послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Ответчик отзыв по иску в суд не направил, суд в порядке части 4 статьи 131 АПК РФ, части 1 статьи 156 АПК РФ рассматривает дело по имеющимся в материалах дела доказательствам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 ГК РФ названы договоры и иные сделки.

Отношения между сторонами регулируются положениями ГК РФ, применимыми к договору строительного подряда (глава 37), общими положениями о договорах, обязательствах и сделках, с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также условиями государственного контракта.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно пункту 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Исходя из положений пункта 3 статьи 724 ГК РФ, заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Согласно пункту 1 статьи 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами (пункт 2 статьи 755 Кодекса).

Названная норма предусматривает презумпцию вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленных в пределах гарантийного срока, и безвозмездное устранение недостатков только при выполнении подрядчиком работ с отступлениями от договора подряда.

Как видно из материалов дела, недостатки работ выявлены истцом в пределах гарантийного срока. В актах от 28.04.2022, 29.04.2022 помимо недостатков, указаны причины их возникновения. Представителем ответчиком указанные акты подписаны без возражений и разногласий, однако в установленный истцом срок недостатки в выполненных ответчиком работах добровольно не были устранены.

Уведомление от 23.06.2022 № 1416/ГСЛ направлено ответчику в соответствии с условиями контракта. На осмотр объектов 27.06.2022 представитель ответчика не явился.

Согласно данным актам при выполнении работ ответчиком не соблюдены требования "СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85", что привело к недостаткам. При этом данные работы истцом были оплачены.

 В ходе судебного разбирательства ответчик полномочия представителя по подписанию актов не оспорил, доказательств того, что выявленные истцом недостатки имеют не эксплуатационный, а строительный характер не представил, ходатайство о назначении судебной экспертизы не заявил.

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ, определяющей принцип состязательности судопроизводства в арбитражном суде, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

На основании изложенного, требование истца об обязании ответчика устранить недостатки работ в срок до 01.06.2023 подлежит удовлетворению, учитывая, что устранение недостатков связано с сезонными работами.

При этом суд отмечает, что отсутствие указания на конкретные объемы выявленных недостатков, требующих устранения, не влияет на исполнимость решения, поскольку предоставляет право ответчику, действуя добросовестно, самостоятельно определить необходимые объемы, в пределах контракта, для приведения выполненных работ в соответствие с надлежащим качеством.

При подаче искового заявления в суд истцом в доход федерального бюджета уплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб. платежным поручением № 83092 от 20.06.2022.

В силу статьи 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной пошлины возмещаются ответчиком.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить полностью. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки работ по муниципальному контракту от 19.05.2020 № КР-04/2020 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильных дорог городской агломерации ГО «город Якутск» в срок до 30.06.2023:

-«Капитальный ремонт Окружного шоссе на участке от ул.Жорницкого до Вилюйского тракта (2-я очередь)»:

ПК2+070: Восстановить дорожный бордюрный камень; 

ПК 8+015: Вывезти бурт;

ПК 8 +040: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под габионы, осуществить укладку габионов;

ПК 10+015: Убрать строительный мусор; 

ПК 10+085: Убрать строительный мусор;

ПК 13+080: Провести досыпку растительной землей, сделать планировку, сделать посев трав;

ПК 13+090: Убрать строительный мусор;

ПК 14+00: Провести досыпку растительной землей, сделать планировку, сделать посев трав;

ПК 16+005: Заделать отверстие асфальтобетонной смесью;

ПК 19+024: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под габионы, осуществить укладку габионов. Залить битумом;

ПК 22+015: Убрать остаток опоры, заделать отверстие асфальтобетоном;

ПК 25+00: Заделать отверстие асфальтобетоном;

ПК 28+030: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под габионы, осуществить укладку габионов;

ПК 32+080: Демонтировать ограждения;

ПК 34+050: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под габионы, осуществить укладку габионов; 

ПК 35+050: Убрать бурт;

ПК 38+050: Восстановить асфальтобетонное покрытие; 

ПК 41 +00: Заделать отверстие асфальтобетоном;

Транспортное кольцо Вилюйский тракт: Восстановить дорожный бордюрный камень;

ПК 41+050: Убрать строительный мусор; 

ПК 32+050: Восстановить откосы;

ПК 31+050: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под габионы, осуществить укладку габионов. Залить битумом;

ПК 28+04: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под габионы, осуществить укладку габионов;

ПК 27+050: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под габионы, осуществить укладку габионов;

ПК 26+060: Восстановить асфальтобетонное покрытие;

ПК 25+050: Убрать строительный мусор, восстановить бордюр;

ПК 24+060: Заделать отверстие асфальтобетоном;

ПК 24+00: Восстановить дорожные стойки и знаки. Убрать строительный мусор;

ПК 10+015: Восстановить крышку колодца и отсыпать;

ПК 8+040: Выполнить paботы по проекту по поднятию или опусканию трубы;

ПК 7+050: Убрать строительный мусор;

ПК (ул. Космонавтов) на съезд с Окружного шоссе: Заглубить стойку под знак пешеход 

ПК 1+070: Заделать отверстие асфальтобетоном.

-«Капитальный ремонт ул. Курнатовского на участке от ул. Пилотов до ФИО2 ФИО4 шоссе»:

ПК 2+005 (слева): Демонтировать покрытие, основание, осуществить устройство основания и покрытия;

ПК 2+020 (слева): Демонтировать асфальтобетонное покрытие, основание, осуществить устройство основания и покрытия;

ПК 2+050 (слева): Демонтировать асфальтобетонное покрытие, основание, осуществить устройство основания и асфальтобетонного покрытия;

ПК 2+055 (слева): Демонтаж и новое устройство асфальтобетонного покрытия; 

ПК 3+050: Заменить крышку лотка;

ПК   5+080  (слева):   Демонтировать   покрытие,   основание,  осуществить  устройство основания и покрытия;

ПК 7+015: Убрать строительный мусор;

ПК 7+020 (слева): Демонтировать остаток опоры, заделать отверстие асфальтобетоном; 

ПК 11+090: Демонтировать покрытие, основание, осуществить устройство основания и покрытия;

ПК 6+050: Убрать строительный мусор;

ПК 6+00: Заделать отверстие асфальтобетоном;

ПК 5+050: Заделать отверстие асфальтобетоном.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДорСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Муниципального казенного учреждения "Главстрой" Городского округа "Город Якутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья

Семёнова У. Н.