ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А40-79739/17

г. Москва

03 октября 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 26 сентября 2017 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 03 октября 2017 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

Председательствующего судьи: Гармаева Б.П.,

Судей: Титовой И.А., Гончарова В.Я.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ФГУП "Главное военно-строительное управление № 14" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 11.07.17 по делу №А40-79739/17, принятое судьей Чадовым А.С. (12-446), по иску Министерство обороны Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ответчику: ФГУП «ГВСУ №14» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), о расторжении договора №13168318/ДГЗ-13107 от 17.12.2013г.,

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 17.10.2016г., 

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 22.05.2017г.,

У С Т А Н О В И Л:

Министерство обороны Российской Федерации (далее – истец, заказчик) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о расторжении государственного контракта № 13168318/ДГЗ-13107 от 17.12.2013 г., заключенного с ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.07.2017 г. иск удовлетворен, государственный контракт № 13168318/ДГЗ-13107 от 17.12.2013 г. расторгнут.

Не согласившись с принятым судебным актом ФГУП "Главное военно-строительное управление № 14"  обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Заявитель указывает на то, что в неисполнении обязательств отсутствует вина ответчика.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца требования и доводы жалобы отклонил за необоснованностью, решение просил оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Представитель ответчика требования и доводы жалобы поддержал в полном объеме, решение суда первой инстанции просил отменить, жалобу удовлетворить.

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, выслушав представителей истца и ответчика, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как усматривается из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, между сторонами был заключен государственный контракт от 17.12.2013 № 13168318/ДГЗ-13107 на выполнение полного комплекса работ по объекту «Реконструкция и строительство зданий и сооружений с инженерными сетями под штаб 49 армии по адресу:  Краснодарский край, г. Краснодар, военный городок № 5» (шифр объекта 13107).

Согласно положениям статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Как согласовано сторонами в п. 5.1 контракта дата проведения инженерных изысканий и обследований - 20 марта 2014 г.; разработки проектной документации - 1 августа 2014 г.; прохождение экспертизы - 15 сентября 2014 г.; рабочая документация - 20 октября 2014 г.; строительно-монтажных работ - 15 ноября 2016 г.; дата подписания итогового акта приемки выполненных работ - 1 декабря 2016 г.

В соответствии с п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств выполнения взятых на себя обязательств в срок.

Исковые требования заявлены о расторжении контракта.

Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с п. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Письмом от 19.07.2016 № 153/9/11228 в адрес ответчика истцом был направлен проект соглашения о расторжении контракта.

Исходя из положений ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Поскольку материалами дела факт выполнения ответчиком в срок взятых на себя обязательств не подтвержден, судом принимается ссылка истца о существенном нарушении ответчиком условий контракта.

В соответствии с ч. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут. 

В силу ч. 2. ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучение ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в 15-дневный срок. 

Поскольку материалами дела усматривается соблюдение истцом предусмотренного порядка, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о наличии оснований для расторжения контракта.

Как установлено в п. 5 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Согласно ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Поскольку ответчиком взятые на себя обязательства исполнены не были, доказательств отсутствия вины ответчиком не представлено, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции об обоснованности иска.

Учитывая изложенное, Девятый арбитражный  апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи с чем апелляционная жалоба по изложенным в ней доводам является необоснованной и удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст. ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.07.17 по делу № А40-79739/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу  - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

Председательствующий судья:  Б.П. Гармаев 

Судьи:  И.А. Титова 

 В.Я. Гончаров 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.