АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-307578/23-6-2406

17 июля 2024 года

город Москва

 Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Коршиковой Е.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ивановой А.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании  

дело по иску ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  (115035, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, ПЯТНИЦКАЯ УЛ., Д. 19, СТР. 1, ОГРН: 1027700151170, Дата  присвоения ОГРН: 23.08.2002, ИНН: 7705021556)  

к ответчику: ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ  УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ "АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ" (125375, ГОРОД  МОСКВА, ДЕГТЯРНЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 3, ОГРН: 1027739550156,  Дата присвоения ОГРН: 14.11.2002, ИНН: 7705395248)  

о понуждении провести работы по сохранению объекта культурного наследия третье лицо: ООО «Окна и двери» (ИНН: 9718205233) при участии: от истца – Шальнова С.П. по дов. от 28.12.2023г. (дип. от 08.07.2006г.) от ответчика – Щербакова О.В. по дов. от 26.12.2023г. (дип. от 24.06.2010г.) от третьего лица – не явился, извещен 

Р Е Ш И Л:

Обязать ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ "АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ" (ОГРН: 1027739550156, ИНН:  7705395248) провести работы по сохранению объектов культурного наследия  федерального значения "Усадьба, 1801 г.: - "Главный дом" (кадастровый номер  50:21:0150303:303), "Усадьба, 1801 г.: - "Флигель" (кадастровый номер  77:17:0150309:760), расположенных по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское,  поселок Филимонки, в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона от 25  июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и  культуры) народов Российской Федерации", а именно:  

в течение шести месяцев с даты вступления в силу решения по настоящему делу  по разрешению Департамента провести первоочередные противоаварийные работы,  

предоставить Департаменту отчетную документацию об их проведении и получить акт  приемки указанных работ;  

в течение шести месяцев с даты вступления в силу решения по настоящему делу  на основании задания Департамента разработать проектную документацию по  сохранению данных объектов культурного наследия, включая их реставрацию и  приспособление для современного использования, и согласовать ее в Департаменте в  установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства об охране  объектов культурного наследия. В случае если работы по сохранению объектов  культурного наследия затрагивают их конструктивные и другие характеристики  надежности и безопасности, проектную документацию разработать в соответствии с  требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской  Федерации" и Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

в течение пятнадцати месяцев с даты вступления в силу решения по настоящему  делу по разрешению Департамента выполнить в соответствии с согласованной  проектной документацией работы по сохранению данных объектов культурного  наследия (включая работы по реставрации и приспособлению для современного  использования), предоставить в Департамент отчетную документацию и получить акты  приемки выполненных работ. В случае если работы по сохранению объектов  культурного наследия затрагивают их конструктивные и другие характеристики  надежности и безопасности, указанные работы провести в соответствии с требованиями  Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и  Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

 Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный  апелляционный суд.  

Судья Е.В. Коршикова