100178_457044 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г. Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  05.09.2017 Дело № А62-3610/2017  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи  Яковенковой В. В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Павловой О.Ю.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

муниципального казенного учреждения «Строитель» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

к закрытому акционерному обществу «Специализированное управление 197»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ, при участии: от истца – ФИО1, представителя по доверенности от 13.06.2017  № 23, 

ответчика – не явились, извещены надлежащим образом.  

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Обязать закрытое акционерное общество «Специализированное  управление 197» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в период с  15.09.2017 по 01.11.2017 безвозмездно устранить недостатки, допущенные  при выполнении работ по контракту от 08.08.2011 № 14/2011-МБУ при  строительстве здания МБДОУ «Детский сад № 78 «Исток», расположенного  по адресу: 

<

...>, обнаруженные в  пределах гарантийного срока и указанные в акте обследования здания от  02.05.2017, а именно: 1) произвести монтаж системы приточно-вытяжной  вентиляции в соответствии с проектно-сметной документацией;  

2) устранить образование конденсата в подкровельном пространстве здания;  

3) произвести замену несущих элементов стропильной системы кровли,  поврежденных плесенью и грибком; 4) обеспечить функционирование  системы отопления в соответствии с действующими нормативными актами;  5) выполнить работы по укладке плитки, оштукатуриванию и покраске стен,  откосов оконных  проемов, пораженных грибком и плесенью;  

6) смонтировать предусмотренную проектом систему обогрева кровли  (антиобледенительную систему); 7) устранить недостатки монтажа  водосточной системы; 8) произвести покраску стен, облицовочную кладку из  кирпича и камня на фасадах здания в местах их повреждения.  

Взыскать с закрытого акционерного общества «Специализированное  управление 197» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 рублей.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья В. В. Яковенкова