ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ульяновск                                                                              Дело №А72-10338/2022

«25» мая 2023 года

 

Резолютивная часть решения объявлена «18» мая 2023 года

Полный текст решения изготовлен «25» мая 2023 года

 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи П.Г.Юдина, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                  ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Ульяновск

к Обществу с ограниченной ответственностью «Вегас» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Ульяновск

о взыскании 1 894 891 руб. 11 коп.

 

по встречному иску

Общества с ограниченной ответственностью «Вегас» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Ульяновск

к Акционерному обществу «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Ульяновск

о взыскании 2 754 571 руб. 36 коп.,

 

по делу по иску 

Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Ульяновск

к Обществу с ограниченной ответственностью «Вегас» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Ульяновск

о взыскании 157 844 руб. 70 коп.,

 

при участии в заседании:

от Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Завод Искра»  – ФИО2, доверенность от 14.12.2022, диплом;

от Общества с ограниченной ответственностью «Вегас» – ФИО3, доверенность от 13.11.2020, удостоверение адвоката №1277; 

 

установил:

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Вегас» о взыскании 1 894 891 руб. 11 коп., в том числе: 1 193 645 руб. 81 коп. – основной долг, 282 490 руб. 74 коп. – неустойка,              348 754 руб. 56 коп. – штраф.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 21.07.2022 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание.

09.09.2022 через канцелярию суда от истца поступило заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства ответчика в размере исковых требований – 1 894 891 руб. 11 коп.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 12.09.2022 заявление о принятии обеспечительных мер оставлено без удовлетворения.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 15.09.2022 предварительное судебное заседание завершено, дело назначено к судебному разбирательству. 

Определениями Арбитражного суда Ульяновской области от 17.10.2022, от 30.11.2022, от 21.12.2022 судебное разбирательство откладывалось.

24.01.2023 через канцелярию суда от истца поступили возражения на отзыв ответчика.

В судебном заседании 25.01.2023 представитель ответчика представил встречное исковое заявление о взыскании 2 754 571 руб. 36 коп., в том числе: 1 210 244 руб. 35 коп. – основной долг по договору №542-21/ТП от 08.06.2021,  204 039 руб. 27 коп. – неустойка, 1 124 896 руб. 64 коп. – основной долг по договору №541-21/ТП от 10.06.2021, 215 391 руб. 10 коп. – неустойка.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 27.01.2023 встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Вегас»  в порядке статьи 128 АПК РФ было оставлено без движения.

В судебном заседании 16.02.2023 представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требований, в котором просил:

1. взыскать с ООО «Вегас» в пользу АО «НПП «Завод Искра» по договору №897-21/ТП от 28.09.2021г. сумму основного долга в размере неосвоенной суммы аванса в размере 1 193 645  руб. 81 коп.; неустойку в размере 282 490 руб. 74 коп.; штраф в размере 348 754 руб. 56 коп.;

2. взыскать с ООО «Вегас» в пользу АО «НПП «Завод Искра» по дополнительному соглашению №1 к договору №541-21/ТП от 10.06.2021 г. неустойку в размере 43 403 руб. 40 коп. и штраф в размере 31 002 руб.43 коп.;

3. взыскать с ООО «Вегас» в пользу АО «НПП «Завод Искра» по дополнительному соглашению №1 к договору №542-21/ТП от 08.06.2021г. неустойку в размере 48 960 руб. и штраф в размере 34 478 руб. 87 коп.;

4. взыскать с ООО «Вегас» в пользу АО «НПП «Завод Искра» расходы по уплате госпошлины.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 16.02.2023 ходатайство истца об уточнении исковых требований оставлено без удовлетворения.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 20.02.2023 встречное исковое заявление принято к производству.

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 16.03.2023 по ходатайству Акционерного общества «Научно-производственное предприятия «Завод Искра» дело №А72-2802/2023 объединено с делом №А72-10338/2022 в одно производство для совместного рассмотрения. Объединенному делу присвоен №А72-10338/2022. 

04.04.2023 через web-сервис «Мой Арбитр» от Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» поступили дополнительные документы.

Протокольным определением от 10.05.2023 суд удовлетворил ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Вегас»  об уточнении встречных исковых требований, в котором просил взыскать с Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» основной долг по договору №542-21/ТП от 08.06.2021 в сумме 1 210 244 руб. 35 коп., неустойку в сумме 204 039 руб. 27 коп.; основной долг по договору №541-21/ТП от 10.06.2021 в сумме 1 124 896 руб. 64 коп., неустойку в сумме 200 712 руб. 04 коп.

В судебном заседании 18.05.2023 представитель Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» на объединенных исковых требованиях настаивал, возражал против встречных исковых требований.

Представитель  Общества с ограниченной ответственностью «Вегас» возражал против исковых требований, на встречном иске настаивал.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает, что исковые требования Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» к Обществу с ограниченной ответственностью «Вегас» следует удовлетворить частично, встречные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Вегас» к Акционерному обществу «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» следует удовлетворить частично.

При этом суд руководствовался следующим. 

Как усматривается из материалов дела, 28.09.2021 между Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вегас» (Подрядчик) заключен договор №897-21/ТП, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный настоящим договором срок выполнить следующие работы: ремонт лестницы, именуемые в дальнейшем «Работы», и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять и оплатить результат работ. Место выполнения работ: 

<

...>, здание Главного корпуса, Центральная часть, лестничная клетка, 1-7 этаж, кадастровые номера объектов  №73:24:040302:782 (п.1.1 договора).

Согласно п.1.2 договора, состав и виды работ, объемы выполняемых работ и требования к ним определяются Техническим заданием и Локальной сметой №02-01-17, №04-01-25, являющейся неотъемлемыми частями настоящего Договора. Работы выполняются согласно Графику выполнения работ (Приложение №4 к настоящему Договору). 

В соответствии с п.2.1 договора стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему договору составляет 3 487 545 руб. 68 коп., в т.ч. НДС 20%, что составляет 581 257 руб. 61 коп., и подтверждается согласованными и утвержденными сторонами Локальными сметами №02-01-21, №04-01-25.

В соответствии с п.3.1 договора работы, по настоящему договору оплачиваются в следующем порядке:

- аванс в размере 50% цены Договора уплачивается Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора и при условии предоставления Подрядчиком  независимой банковской гарантии на сумму аванса. Банковская гарантия должна обеспечивать возврат аванса в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих договорных обязательств. Банковская гарантия должна быть выдана на срок, превышающий срок выполнения работ не менее чем на два месяца;

- окончательный расчет в размере 50% цены Договора уплачивается Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта по форме КС-2, справки по форме КС-3, при наличии у Заказчика счета Подрядчика;

Пунктом 5.1 договора предусмотрены сроки выполнения работ. Начало работ: рабочий день, следующий за днем подписания Договора. Окончание работ 45 календарных дней с даты начала работ. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

Согласно п.6.1 договора, при выполнении работ Стороны составляют акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), заверенные копии документов о приобретении материалов в собственность.

В соответствии с п.6.2 договора Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих, дней с момента предъявления документов, указанных в п. 6.1, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат Работ или иных недостатков в Работах немедленно письменно заявить об этом Подрядчику. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок, не превышающий 5 (Пяти) календарных дней со дня получения требования Заказчика, если, с учетом характера выявленных недостатков, они не могут быть устранены в более короткий срок. 

Во исполнение условий договора №897-21/ТП от 28.09.2021 платежным поручением №7205 от 09.11.2021 Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» перечислило Обществу с ограниченной ответственностью «Вегас» аванс в размере 1 743 772 руб. 84 коп. 

Работы по договору №897-21/ТП от 28.09.2021 выполнены частично на сумму           550 127 руб. 03 коп., что подтверждается актом и приемке выполненных работ №1 от 01.02.2022, представленным в материалы дела и подписанным сторонами без разногласий.

Поскольку в установленный договором срок работы Подрядчиком не были выполнены в полном объеме, письмом от 31.01.2022 исх. №426 Заказчик уведомил Подрядчика об одностороннем расторжении договора с 31.01.2022.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 27.05.2022 исх. №2923 с требованием о возврате неотработанного аванса. Данная претензия была оставлена без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Истец просит взыскать с ответчика неотработанный аванс в размере 1 193 645 руб. 81 коп., а также неустойку за период с 12.11.2021 по 01.02.2022 в сумме 282 490 руб. 74 коп. и штраф в размере 348 754 руб. 56 коп.

 

Кроме того, из материалов дела следует, что 10.06.2021 между Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вегас» (Подрядчик) заключен договор №541-21/ТП, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный настоящим договором срок выполнить следующие работы: капитальный ремонт помещений 7 этажа, именуемые в дальнейшем «Работы», и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять и оплатить результат работ. Место выполнения работ: АО «НПП «Завод Искра», 432030, 

<

...>, здание Главного корпуса, Центральная часть, 7 этаж, кадастровые номера объектов №73:24:040302:785, №73:24:040302:782, помещения в осях 16-ХI 16-II А-Д (п.1.1 договора)

Согласно п.1.2 указанного договора, состав и виды работ, объемы выполняемых работ и требования к ним определяются Техническим заданием и Локальной сметой №02401-18, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Работы выполняются согласно Графику выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору). 

В соответствии с п.2.1 договора стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему договору составляет 3 103 799 руб. 46 коп., НДС не облагается, подтверждается согласованной и утвержденной сторонами Локальной сметой №02-01-18.

Согласно п.2.2 договора, общая стоимость работ, установленная п. 2.1 настоящего договора, может быть изменена Сторонами в случае изменения по инициативе Заказчика видов и/или Объемов работ. При изменении объемов выполняемых работ составляется Акт контрольного обмера объемов выполненных работ с участием представителей Заказчика и Подрядчика. На основании Акта контрольного обмера объемов выполненных работ производится уточнение сметной стоимости. В результате Подрядчиком формируется исполнительная смета, подлежащая утверждению Заказчиком. Все изменения к договору должны быть зафиксированы в Дополнительном соглашении.

В соответствии с п.3.1 договора работы, по настоящему договору оплачиваются в следующем порядке:

-аванс в размере 50% цены Договора уплачивается Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора и при условии предоставления Подрядчиком  независимой банковской гарантии на сумму аванса. Банковская гарантия должна обеспечивать возврат аванса в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих договорных обязательств. Банковская гарантия должна быть выдана на срок, превышающий срок выполнения работ не менее чем на два месяца;

- окончательный расчет в размере 50% цены Договора уплачивается Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта по форме КС-2, справки по форме КС-3, при наличии у Заказчика счета Подрядчика;

Пунктом 5.1 договора предусмотрены сроки выполнения работ. Начало работ: рабочий день, следующий за днем подписания Договора. Окончание работ 45 календарных дней с даты начала работ. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

Согласно п.6.1 договора, при выполнении работ Стороны составляют акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), заверенные копии документов о приобретении материалов в собственность.

В соответствии с п.6.2 договора Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих, дней с момента предъявления документов, указанных в п. 6.1, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат Работ или иных недостатков в Работах немедленно письменно заявить об этом Подрядчику. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок, не превышающий 5 (Пяти) календарных дней со дня получения требования Заказчика, если, с учетом характера выявленных недостатков, они не могут быть устранены в более короткий срок.

Согласно п.7.2.3 договора, в случае просрочки Подрядчиком обязательств по выполнению работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый календарный день просрочки.

В соответствии с п.7.2.4 договора в случае нарушения Подрядчиком срока начала и/или окончания выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% от цены настоящего Договора. Неустойка и штраф взыскиваются путем выставления счета Заказчиком Подрядчику, либо вычитаются из очередного причитающегося Подрядчику платежа. Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки и штрафа по первому требованию Заказчика.

Согласно п.7.3 договора, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком без замечаний работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки размере 0,05% от суммы заложенности за каждый календарный день просрочки.

22.07.2021 между Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вегас» (Подрядчик) подписано дополнительное соглашение №1 к договору №541-21/ТП от 10.06.2021, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика дополнительные работы по подключению к электроэнергии кабинетов на 7 этаже блока №1 для нужд АО «НПП Завод Искра» по адресу: 432030, 

<

...> (п.1).

Стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет 310 024 руб. 31 коп., в т.ч. НДС 20%, что составляет 51 670 руб. 72 коп. (п.3).

Пунктом 4 дополнительного соглашения предусмотрен порядок оплаты работ:

- аванс 50% в течение 10 рабочих дней после подписания Дополнительного соглашения обеими сторонами;

- оставшиеся 50% в течение 10 рабочих дней после подписания обеими сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки выполненных работ по форме КС-3, с устранением выявленных дефектов, при предъявлении счета, счета-фактуры.

Пунктом 5 дополнительного соглашения предусмотрены сроки выполнения работ: начало работ – день, следующий за днем подписания дополнительного соглашения. Окончание работ:  в течение 20 календарных дней с даты начала работ.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами (п.10).

Как следует из искового заявления АО «Научно-производственное предприятие «Завод Искра», работы по договору №541-21/ТП от 10.06.2021 были выполнены ответчиком с нарушением установленного срока и сданы 29.12.2021, что подтверждается актом о приемке выполненных работ 29.12.2021 на сумму 2 463 079 руб. 84 коп., представленным в материалы дела и подписанным сторонами без разногласий.

В связи с просрочкой выполнения дополнительных работ по дополнительному соглашению №1 к договору №541-21/ТП от 10.06.2021 Заказчиком начислена неустойка в размере 43 403 руб. 40 коп. и штраф в размере 31 002 руб.43 коп. за просрочку выполнения работ в соответствии с п.7.2.3, 7.2.4 договора.

Расчет неустойки по дополнительному соглашению: за период с 12.08.2021 по 29.12.2021 (140 календарных дней) 310 024,31 (цена дополнительного соглашения) х 140 (количество дней просрочки) х 0,1% = 43 403 руб. 40 коп. 

Расчет штрафа по дополнительному соглашению к договору: 10% от цены дополнительного соглашения (310 024,31) = 31 002 руб.43 коп.

 

08.06.2021 между Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вегас» (Подрядчик) заключен договор №542-21/ТП, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный настоящим договором срок выполнить следующие работы: капитальный ремонт помещений, именуемые в дальнейшем «Работы», и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять и оплатить результат работ. Место выполнения работ: АО «НПП «Завод Искра», 432030, 

<

...>, здание Главного корпуса, Центральная часть, 5 этаж, кадастровые номера объектов №73:24:040302:785, №73:24:040302:782, помещения в осях 16-ХI 16-II А-Д (п.1.1 договора).

Согласно п.1.2 указанного договора, состав и виды работ, объемы выполняемых работ и требования к ним определяются Техническим заданием и Локальной сметой №02-01-17, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Работы выполняются согласно Графику выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору). 

В соответствии с п.2.1 договора стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему договору составляет 3 030 216 руб. 00 коп., НДС не облагается, подтверждается согласованной и утвержденной сторонами Локальной сметой №02-01-17.

Согласно п.2.2 договора, общая стоимость работ, установленная п. 2.1 настоящего договора, может быть изменена Сторонами в случае изменения по инициативе Заказчика видов и/или Объемов работ. При изменении объемов выполняемых работ составляется Акт контрольного обмера объемов выполненных работ с участием представителей Заказчика и Подрядчика. На основании Акта контрольного обмера объемов выполненных работ производится уточнение сметной стоимости. В результате Подрядчиком формируется исполнительная смета, подлежащая утверждению Заказчиком. Все изменения к договору должны быть зафиксированы в Дополнительном соглашении.

В соответствии с п.3.1 договора работы, по настоящему договору оплачиваются в следующем порядке:

-аванс в размере 50% цены Договора уплачивается Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора и при условии предоставления Подрядчиком  независимой банковской гарантии на сумму аванса. Банковская гарантия должна обеспечивать возврат аванса в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих договорных обязательств. Банковская гарантия должна быть выдана на срок, превышающий срок выполнения работ не менее чем на два месяца;

- окончательный расчет в размере 50% цены Договора уплачивается Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта по форме КС-2, справки по форме КС-3, при наличии у Заказчика счета Подрядчика;

Пунктом 5.1 договора предусмотрены сроки выполнения работ. Начало работ: рабочий день, следующий за днем подписания Договора. Окончание работ 45 календарных дней с даты начала работ. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

Согласно п.6.1 договора, при выполнении работ Стороны составляют акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), заверенные копии документов о приобретении материалов в собственность.

В соответствии с п.6.2 договора Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих, дней с момента предъявления документов, указанных в п. 6.1, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат Работ или иных недостатков в Работах немедленно письменно заявить об этом Подрядчику. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок, не превышающий 5 (Пяти) календарных дней со дня получения требования Заказчика, если, с учетом характера выявленных недостатков, они не могут быть устранены в более короткий срок.

Согласно п.7.2.3 договора, в случае просрочки Подрядчиком обязательств по выполнению работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый календарный день просрочки.

В соответствии с п.7.2.4 договора в случае нарушения Подрядчиком срока начала и/или окончания выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% от цены настоящего Договора. Неустойка и штраф взыскиваются путем выставления счета Заказчиком Подрядчику, либо вычитаются из очередного причитающегося Подрядчику платежа. Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки и штрафа по первому требованию Заказчика.

Согласно п.7.3 договора, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком без замечаний работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки размере 0,05% от суммы заложенности за каждый календарный день просрочки.

20.07.2021 между Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Вегас» (Подрядчик) подписано дополнительное соглашение №1 к договору №542-21/ТП от 08.06.2021, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика дополнительные работы по подключению к электроэнергии кабинетов на 5 этаже блока №1 для нужд АО «НПП Завод Искра» по адресу: 432030, 

<

...> (п.1).

Стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет 344 788 руб. 67 коп., в т.ч. НДС 20%, что составляет 57 464 руб. 78 коп. (п.3).

Пунктом 4 дополнительного соглашения предусмотрен порядок оплаты работ:

- аванс 50% в течение 10 рабочих дней после подписания Дополнительного соглашения обеими сторонами;

- оставшиеся 50% в течение 10 рабочих дней после подписания обеими сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки выполненных работ по форме КС-3, с устранением выявленных дефектов, при предъявлении счета, счета-фактуры.

Пунктом 5 дополнительного соглашения предусмотрены сроки выполнения работ: начало работ – день, следующий за днем подписания дополнительного соглашения. Окончание работ:  в течение 20 календарных дней с даты начала работ.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами (п.10).

Как следует из искового заявления АО «Научно-производственное предприятие «Завод Искра», работы по договору №542-21/ТП от 08.06.2021 были выполнены ответчиком с нарушением установленного срока и сданы 29.12.2021, что подтверждается актом о приемке выполненных работ 29.12.2021 на сумму 2 547 173 руб. 18 коп., представленным в материалы дела и подписанным сторонами без разногласий.

В связи с просрочкой выполнения дополнительных работ по дополнительному соглашению №1 к договору №542-21/ТП от 08.06.2021 Заказчиком начислена неустойка в размере 48 960 руб. 00 коп. и штраф в размере 34 478 руб. 87 коп. за просрочку выполнения работ на основании п.7.2.3, 7.2.4 договора.

Расчет неустойки по дополнительному соглашению: 

за период с 10.08.2021 по 29.12.2021 (142 календарных дня) 344 788,67 (цена дополнительного соглашения) х 142 (количество дней просрочки) х 0,1%) = 48 960 руб. 00 коп.

Расчет штрафа по дополнительному соглашению к договору: 10% от цены дополнительного соглашения (344 788,67) = 34 478 руб. 87 коп.

Размер неустойки и штрафа проверен судом и признан арифметически верным.

 

Ответчик (ООО «Вегас») исковые требования не признал по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Кроме того, ООО «Вегас» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области со встречным исковым заявлением  о взыскании основного долга по договору №542-21/ТП от 08.06.2021 в сумме 1 210 244 руб. 35 коп., неустойки в сумме 204 039 руб. 27 коп.; основного долга по договору №541-21/ТП от 10.06.2021 в сумме 1 124 896 руб. 64 коп., неустойки в сумме 200 712 руб. 04 коп. (с учетом уточнения).

Как следует из встречного искового заявления, по договору №542-21/ТП от 08.06.2021 ООО «Вегас» выполнило работы на сумму 2 887 745 руб. 54 коп., что подтверждается актом №1 от 29.12.2021 на сумму 340 572 руб. 36 коп., актом №9 от 22.02.2022 на сумму 2 547 173 руб. 18 коп.

Оплата АО «НПП «Завод Искра» по договору №542-21/ТП от 08.06.2021 произведена в размере 1 677 501 руб. 19 коп.

По расчету ООО «Вегас», задолженность АО «НПП «Завод Искра» по договору №542-21/ТП от 08.06.2021 составляет 1 210 244 руб. 35 коп.

По договору №541-21/ТП от 10.06.2021 ООО «Вегас» выполнило работы на сумму 2 762 365 руб. 82 коп., что подтверждается актом №1 от 29.12.2021 на сумму 299 285 руб. 98 коп., актом №8 от 01.02.2022 на сумму 2 463 079 руб. 84 коп.

Оплата AO «НПП «Завод Искра» по договору №541-21/ТП от 10.06.2021 произведена в размере 1 637 469 руб. 18 коп. 

По расчету ООО «Вегас», задолженность АО «НПП «Завод Искра» по договору №541-21/ТП от 10.06.2021 составляет 1 124 896 руб. 64 коп.

Также, ООО «Вегас» просит взыскать с АО «НПП «Завод Искра» неустойку в связи с несвоевременным исполнением обязательства по оплате выполненных работ по договору №541-21/ТП от 10.06.2021 в сумме 200 712 руб. 04 коп. и по договору №542-21/ТП от 08.06.2021 в сумме 204 039 руб. 27 коп. 

 

Изучив доводы сторон, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 2 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик в соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

По смыслу ст.ст. 711, 746 ГК РФ основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ предусмотрена обязанность каждого лица, участвующего в деле, доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с положениями статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено указанным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ).

Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что договор от 28.09.2021 №897-21/ТП расторгнут с 31.01.2022 на основании одностороннего отказа от договора Заказчиком.

Абзацем 1 пункта 4 статьи 453 ГК РФ предусмотрено, что стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

В то же время в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства (абзац 2 пункта 4 статьи 453 ГК РФ).

Следовательно, Заказчик вправе требовать возврата Исполнителем неотработанного аванса в качестве неосновательного обогащения, если к моменту расторжения договора им не получено встречное исполнение обязательства по выполнению работ, равное по стоимости сумме перечисленного аванса. 

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, в том числе подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ №1 от 01.02.2022, справку о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 01.02.2022, установив, что Заказчик оплатил работы на сумму 1 743 772 руб. 84 коп., в то время как фактически работы выполнены Подрядчиком и приняты Заказчиком на сумму 550 127 руб. 03 коп., суд приходит к выводу, что требование о взыскании неотработанного аванса в сумме 1 193 645 руб. 81 коп. является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению. 

 

АО «НПП «Завод Искра» также просит взыскать с ответчика неустойку по договору №897-21/ТП за период с 12.11.2021 по 01.02.2022 в сумме 282 490 руб. 74 коп. и штраф в размере 348 754 руб. 56 коп.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п.7.2.3 договора, в случае просрочки Подрядчиком обязательств по выполнению работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый календарный день просрочки.

В соответствии с п.7.2.4 договора в случае нарушения Подрядчиком срока начала и/или окончания выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% от цены настоящего Договора. Неустойка и штраф взыскиваются путем выставления счета Заказчиком Подрядчику, либо вычитаются из очередного причитающегося Подрядчику платежа. Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки и штрафа по первому требованию Заказчика.

В соответствии с п.1.2 договора №897-21/ТП, приложением №4 к указанному договору работы должны быть выполнены до 11.11.2021. Согласно акту о приемке выполненных работ, работы выполнены ОО «Вегас» 01.02.2022 на сумму 550 127 руб. 03 коп., то есть с нарушением срока, установленного договором, а также не в полном объеме.

Учитывая изложенное суд приходит к выводу, что требования АО «НПП «Завод Искра» о взыскании неустойки и штрафа по договору №897-21/ТП является обоснованным.

 

АО «НПП «Завод Искра» в соответствии с п.7.2.3, 7.2.4 договора №541-21/ТП от 10.06.2021, также, просит взыскать с ООО «Вегас» неустойку за период с 12.08.2021 по 29.12.2021 в размере 43 403 руб. 40 коп. и штраф в размере 31 002 руб.43 коп. за просрочку выполнения работ. 

В соответствии с п.5 Дополнительного соглашения №1 к договору №541-21/ТП работы должны быть выполнены до 11.08.2021. Согласно акту о приемке выполненных работ, работы выполнены ООО «Вегас» 29.12.2021, то есть с нарушением срока, установленного договором.

Учитывая изложенное суд приходит к выводу, что требования АО «НПП «Завод Искра» о взыскании неустойки и штрафа по договору №541-21/ТП является обоснованным.

 

В соответствии с п.7.2.3, 7.2.4 договора №542-21/ТП от 08.06.2021 АО «НПП «Завод Искра» просит взыскать с ООО «Вегас» неустойку за период с 10.08.2021 по 29.12.2021 в сумме 48 960 руб. 00 коп. и штраф в размере 34 478 руб. 87 коп.

В соответствии с п.5 Дополнительного соглашения №1 к договору №542-21/ТП работы должны быть выполнены до 09.08.2021. Согласно акту о приемке выполненных работ, работы выполнены ООО «Вегас» 29.12.2021, то есть с нарушением срока, установленного договором.

Учитывая изложенное суд приходит к выводу, что требования АО «НПП «Завод Искра» о взыскании неустойки и штрафа по договору №542-21/ТП является обоснованным.

 

Ответчик заявил ходатайство об уменьшении размера неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.

В соответствии со ст.333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды. 

Кроме того, согласно пункту 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Согласно пункту 77 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, сформировавшейся при осуществлении конституционно-правового толкования статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, при применении данной нормы суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности (неустойкой) и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 г. №263-О).

Судом установлено, что согласно пунктам 7.3 договоров №897-21/ТП, 541-21/ТП, №542-21/ТП в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком без замечаний работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки размере 0,05% от суммы заложенности за каждый календарный день просрочки.

Таким образом, договором установлены неравноценные условия об ответственности Заказчика и Подрядчика, отличающиеся в два раза.

Оценив обстоятельства дела, имеющиеся в деле доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что начисленная неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства,  и подлежит снижению до 0,05%.

По расчету суда, неустойка по договору №897-21/ТП за период с 12.11.2021 по 01.02.2022 составила 141 245 руб. 60 коп., 

По аналогичным основаниям суд считает возможным снизить размер неустойки по дополнительному соглашению №1 к договору от 10.06.2021 №541-21/ТП до 21 701 руб. 70 коп., по дополнительному соглашению №1 к договору от 08.06.2021 №542-21/ТП до 24 480 руб. 00 коп

При данных обстоятельствах, требования АО «НПП «Завод Искра» о взыскании неустойки подлежат частичному удовлетворению.

Размер штрафа проверен судом и признан правильным, основания для его снижения судом не установлены.

При таких обстоятельствах, требование АО «НПП «Завод Искра» о взыскании с ООО «Вегас» штрафов в сумме 348 754 руб. 56 коп. по договору №897-21/ТП, в сумме 31 002 руб.43 коп. по договору  №541-21/ТП, в сумме 34 478 руб. 87 коп. по договору №542-21/ТП являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению.

Таким образом, с ООО «Вегас» в пользу АО «НПП «Завод Искра» подлежит взысканию: неосвоенный аванс по договору от 28.09.2021 №897-21/ТП в сумме 1 193 645 руб. 81 коп.. неустойка в сумме 141 245 руб. 60 коп., штраф в сумме 348 754 руб. 56 коп., неустойка по дополнительному соглашению №1 к договору от 10.06.2021 №541-21/ТП в сумме 21 701 руб. 70 коп., штраф в сумме 31 002 руб. 43 коп., неустойка по дополнительному соглашению №1 к договору от 08.06.2021 №542-21/ТП в сумме 24 480 руб. 00 коп., штраф в сумме 34 478 руб. 87 коп.

 

Заявляя встречные исковые требования, ООО «Вегас» просит взыскать с АО «НПП «Завод Искра» основной долг по договору №542-21/ТП от 08.06.2021 в сумме 1 210 244 руб. 35 коп., неустойку в сумме 204 039 руб. 27 коп., а также основной долг по договору №541-21/ТП от 10.06.2021 в сумме 1 124 896 руб. 64 коп., неустойку в сумме 200 712 руб. 04 коп. (с учетом уточнения).

Из материалов дела следует, что работы по договору №542-21/ТП от 08.06.2021 ООО «Вегас» выполнило на общую сумму 2 887 745 руб. 54 коп. (акты №1 от 29.12.2021 и №9 от 22.02.2022). АО «НПП «Завод Искра» произвело частичную оплату в сумме 1 677 501 руб. 19 коп.

Указанные обстоятельства сторонами не оспариваются.

Задолженность АО «НПП «Завод Искра» по договору №542-21/ТП от 08.06.2021 составляет 1 210 244 руб. 35 коп.

В соответствии с актами №1 от 29.12.2021 и №8 от 01.02.2022 ООО «Вегас» выполнило работы по договору №541-21/ТП от 10.06.2021 на сумму 2 762 365 руб. 82 коп. Оплата AO «НПП «Завод Искра» по договору №541-21/ТП от 10.06.2021 произведена в сумме 1 637 469 руб. 18 коп. 

Указанные обстоятельства сторонами не оспариваются.

Задолженность АО «НПП «Завод Искра» по оплате выполненных работ по договору №541-21/ТП от 10.06.2021 составляет 1 124 896 руб. 64 коп.

В связи с нарушением срока оплаты выполненных работ, по расчету  ООО «Вегас», неустойка по договору №541-21/ТП от 10.06.2021 составила 200 712 руб. 04 коп., а по договору №542-21/ТП от 08.06.2021 – 204 039 руб. 27 коп. 

В отзыве на встречное исковое заявление АО «НПП «Завод  Искра» указало, что за нарушение условий договоров (срока выполнения работ) №541-21/ТП от 10.06.2021, №542-21/ТП от 08.06.2021 после подписания актов выполненных работ в соответствии с пунктами 7.2.4 указанных договоров Подрядчику (ООО «Вегас») были начислены неустойка и штрафы:  по договору №541-21/ТП от 10.06.2021 в размере 515 230 руб. 71 коп. – неустойка и штраф в размере 310 379 руб. 95 коп.; по договору №542-21/ТП от 08.06.2021 неустойка в размере 566 650 руб. 39 коп. и штраф в размере 303 021 руб. 60 коп., которые были удержаны из окончательного платежа.

ООО «Вегас» в соответствии со ст.333 ГК РФ заявило ходатайство о снижении размера неустойки удержанной АО «НПП «Завод  Искра» по договорам №541-21/ТП от 10.06.2021и №542-21/ТП от 08.06.2021.

Пунктом 79 Постановления Пленум Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 предусмотрено, что в случае списания по требованию кредитора неустойки со счета должника (п.2 ст.847 ГК РФ), а равно зачета суммы неустойки в счет суммы основного долга и/или процентов должник вправе ставить вопрос о применении к списанной неустойке положений ст.333 ГК РФ, например путем предъявления самостоятельного требования о возврате излишне уплаченного (ст.1102 ГК РФ).

Принимая во внимание указанные положения, а также учитывая неравноценность ответственности, установленной договорами для Заказчика и Подрядчика, суд приходит к выводу, что начисленная Заказчиком неустойка по договорам №541-21/ТП от 10.06.2021, №542-21/ТП от 08.06.2021 подлежит снижению в два раза, то есть до 0,05% от цены договора, до суммы 257 615 руб. 36 коп – по договору №541-21/ТП и до суммы 283 325 руб. 20 коп. – по договору №542-21/ТП.

Размер штрафа проверен судом и признан правильным.

Учитывая изложенное,  требование ООО «Вегас» о взыскании основного долга подлежит частичному удовлетворению, а именно:  по договору от 10.06.2021 №541-21/ТП в сумме 343 184 руб. 80 коп. (2 463 079,84 – 1 551 899, 73 – 257 615,36 – 310 379,95), по договору от 08.06.2021 №542-21/ТП в сумме 445 718 руб. 38 коп. (2 547 173 ,18 – 1515 108,0 – 283 252,2 – 303 021,6).

В части взыскания неустойки с АО «НПП «Завод  Искра» за нарушение срока оплаты выполненных работ суд приходит к следующим выводам.

Поскольку расчет произведен ООО «Вегас» на основании пунктов 7.3 договоров с применением значения 0,05% от неуплаченной суммы, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства АО «НПП «Завод  Искра» о снижении размера неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - ФЗ N 127-ФЗ) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей настоящей статьи - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления).

Постановление N 497 вступило в силу со дня его официального опубликования и действует в течение шести месяцев (с 01.04.2022 по 01.10.2022).

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на срок действия моратория в отношении должников, наступают последствия, предусмотренные абзацами 5 и 7 - 10 пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона, в частности не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Правила о моратории, установленные Постановлением N 497, распространяют свое действие на всех участников гражданско-правовых отношений (граждане, включая индивидуальных предпринимателей, юридические лица), за исключением лиц, прямо указанных в пункте 2 данного постановления (застройщики многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов), независимо от того, обладают они признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Разрешение вопроса о применении положений Постановления N 497 в части начисления финансовых санкций не зависит от момента возникновения (просрочки исполнения) обязательств, то есть временный запрет на применение соответствующих санкций распространяется на случаи ненадлежащего исполнения обязательств, возникших как до введения моратория, так и в период его действия.

Иное толкование ставит в неравное (худшее) положение те субъекты предпринимательской деятельности, которые приняли на себя обязательства в период действия моратория и не исполнили их, по сравнению с теми, кто не исполнил свои обязательства в период, предшествующий мораторию, то есть в докризисный период.

На основании изложенного, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, руководствуясь вышеуказанными нормами права, регулирующими спорные правоотношения, установив, что в период действия моратория (с 01.04.2022 до 01.10.2022), введенного Постановлением N 497, финансовые санкции не начисляются независимо от периода (месяца) возникновения задолженности, с учетом общего принципа юридического равенства между активно участвующими в гражданском обороте государственными предприятиями и иными юридическим лицами, общей экономической направленности мер по поддержке российской экономики, суд приходит к выводу, что требования о взыскании неустойки за период с 01.04.2022 по 01.10.2022 удовлетворению не подлежат.

Кроме того, суд считает необходимым производить расчет неустойки на сумму долга по договору от 10.06.2021 №541-21/ТП в сумме 343 184 руб. 80 коп., по договору от 08.06.2021 №542-21/ТП в сумме 445 718 руб. 38 коп.

По расчету суда, неустойка по договору от 10.06.2021 №541-21/ТП составила 39 392 руб. 51 коп., а именно: за период с 14.03.2022 по 30.03.2022 в сумме 1 299 руб. 00 коп., за период с 02.10.2022 по 10.05.2023 в сумме 38 093 руб. 51 коп. 

По расчету суда, неустойка по договору от 08.06.2021 №542-21/ТП составила 50 158 руб. 74 коп., а именно: за период с 14.03.2022 по 30.03.2022 в сумме 684 руб. 00 коп. и с 02.10.2022 по 10.05.2023 в сумме 49 474 руб. 74 коп.

Учитывая изложенное, требование ООО «Вегас» о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ является законным, обоснованными и подлежит частичному удовлетворению, исходя из расчета суда.

При таких обстоятельствах, встречные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Вегас» к Акционерному обществу «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» следует удовлетворить частично.

Согласно части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса РФ при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

В соответствии с п.23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» суд вправе осуществить зачет судебных издержек, взыскиваемых в пользу каждой из сторон, и иных присуждаемых им денежных сумм как встречных (часть 5 статьи 3, часть 3 статьи 132 АПК РФ).

Таким образом, в результате зачета встречных однородных требований с Общества с ограниченной ответственностью «Вегас» в пользу Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» следует взыскать задолженность в сумме 916 854 руб. 54 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 24 866 руб. 00 коп.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Кроме того, излишне уплаченная истцом госпошлина в сумме 698 руб. 00 коп. подлежит возврату из федерального бюджета в порядке, предусмотренном статьей 333.40 НК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л:

Ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Вегас» о снижении размера неустойки удовлетворить.

Исковое заявление Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» к Обществу с ограниченной ответственностью «Вегас» удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Вегас» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неосвоенный аванс по договору от 28.09.2021 №897-21/ТП в сумме 1 193 645 руб. 81 коп.. неустойку в сумме 141 245 руб. 60 коп., штраф в сумме 348 754 руб. 56 коп., неустойку по дополнительному соглашению №1 к договору от 10.06.2021 №541-21/ТП в сумме 21 701 руб. 70 коп., штраф в сумме 31 002 руб. 43 коп., неустойку по дополнительному соглашению №1 к договору от 08.06.2021 №542-21/ТП в сумме 24 480 руб. 00 коп., штраф в сумме 34 478 руб. 87 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 36 984 руб. 00 коп.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения. 

Встречное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Вегас» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность по договору от 10.06.2021 №541-21/ТП в сумме 343 184 руб. 80 коп., неустойку в сумме 39 392 руб. 51 коп., задолженность по договору от 08.06.2021 №542-21/ТП в сумме 445 718 руб. 38 коп., неустойку в сумме 50 158 руб. 74 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 12 118 руб. 00 коп.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Произвести зачет встречный исковых требований на сумму 878 454 руб. 43 коп., расходов по уплате государственной пошлины в сумме 12 118 руб. 00 коп.

В результате зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Вегас» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Завод Искра» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в сумме 916 854 руб. 54 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 24 866 руб. 00 коп.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Вегас» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 698 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                                  П.Г.Юдин