Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-8297/2018

16 мая 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  14 мая 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  16 мая 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Стрельчук У.В.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: открытое акционерное общество "НЬЮ ГРАУНД" (адрес:  Россия 614089, г ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ край, ул КРОНШТАДТСКАЯ д. 35, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: акционерное общество "БалтСтрой" (адрес:  Россия 194044, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании

 

при участии

- от истца: ФИО2, дов. от 10.01.2017

- от ответчика: не явился, извещен 

 

установил:

открытое акционерное общество "НЬЮ ГРАУНД" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с акционерного общества "БалтСтрой" (далее – ответчик) 778034,25 руб. задолженности по договору от 03.10.2016 № 4205/С; 108 314,16 руб. неустойки.

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, представителя для участия в судебном заседании не направил; отзыв на исковое заявление с документальным обоснованием своих возражений не представил.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в его отсутствие.

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил, что между сторонами заключен договор от 03.10.2016 № 4205/С на выполнение работ по устройству грунтоцементных свай в осях М-Р/6-9 согласно проекту 14-14 на объекте «Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 по адресу: Москва, Малый Знаменский пер. под квартирную галерею искусства старых мастеров.

Согласно актам КС-2, КС-3 от 25.01.2017 № 1 истец выполнил определенные договором работы на общую сумму 7 789 342,50 руб.

С учетом частичной оплаты задолженность составила 778 034,25 руб. (гарантийное удержание).

Ответчик от подписания актов уклонился; мотивированный отказ от их подписания в адрес истца не направил; выполненные работы в полном объеме не оплатил; претензию с требованием погасить задолженность оставил без удовлетворения, в связи с чем истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Таким образом, в силу статей 711 и 720 ГК РФ заказчик обязан оплатить выполненную подрядчиком работу после сдачи результатов работ в сроки и в порядке, предусмотренных условиями договора.

В соответствии со статьей 706 ГК РФ подрядчик, если иное не вытекает из закона или договора, вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц - субподрядчиков. В этом случае ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда перед субподрядчиком несет генеральный подрядчик.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Приведенная норма означает, что акт, оформленный подрядчиком и подписанный им в одностороннем порядке, в связи с уклонением заказчика от его подписания, подтверждает выполнение и передачу указанного в нем подрядчиком объема работ до тех пор, пока вступившим в законную силу решением суда этот акт не будет признан недействительным полностью или в части по мотиву обоснованности отказа заказчика от его подписания.

Факт выполнения истцом работ по договору от 03.10.2016 № 4205/С и их стоимость подтверждены материалами дела, в том числе актами по форме КС-2 и КС-3. 

Доказательства направления истцом в адрес ответчика этих актов представлены в материалы дела. 

Ответчик данные акты не подписал, мотивированный отказ от подписания в установленный договором срок не заявлял, равно как и  претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ.

Пунктом 4.4 договора установлено, что суммы гарантийных удержаний, выплачиваются генподрядчиком субподрядчику по истечении 6 календарных месяцев с момента окончания последнего этапа работ по договору и подписания акта выполненных работ по форме КС-2 на основании выставленного субподрядчиком счета.

Материалами дела подтверждается, что заявленное истцом требование о взыскании задолженности по спорному договору в размере 778 034,25 руб. является гарантийным удержанием.

Соблюдение истцом требований пункта 4.4 договора подтверждается материалами дела.

Поскольку в рассматриваемом случае срок оплаты, установленный пунктом 4.4 договоров, наступил, обязательства по оплате в полном объеме ответчиком не исполнены, заявленное истцом требование подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с положениями статей 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств можно обеспечивать неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 ГК РФ).

Материалами дела подтверждается нарушение ответчиком сроков оплаты, в связи с чем у истца возникло право на взыскание неустойки, предусмотренной пунктом 10.2 договора.

Согласно представленному истцом расчету, размер неустойки составил 108 314,16 руб. Проверив расчет, суд признал его обоснованным, рассчитанным в соответствии с условиями договора и подлежащим удовлетворению.

Ответчик расчет не оспорил; ходатайство о снижение неустойки по статье 333 ГК РФ – не заявил; доказательств возврата денежных средств на день рассмотрения спора суду не представил.

Поскольку от ответчика в процессе судебного разбирательства возражения на иск не поступили, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьей 9, 65 АПК РФ о бремени доказывания, исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены.

На основании изложенного требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме с отнесением на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

взыскать с акционерного общества «БалтСтрой» в пользу открытого акционерного общества НЬЮ ГРАУНД» 778 034,25 руб. задолженности по договору от 03.10.2016 № 4205/С; 108 314,16 руб. неустойки; 20 727 руб. в качестве возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                                    Стрельчук У.В.