АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 14 тел. (4922) 32-29-10, факс (4922) 42-32-13 е-mail: vladimir.info@arbitr.ru, Интернет-сайт: http://vladimir.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________  

 РЕШЕНИЕ  резолютивная часть

Дело № А11-15149/2018

г. Владимир

05 июля 2019 года

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи 

Смагиной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном  заседании дело № А11-15149/2018 по исковому заявлению муниципального  казенного общеобразовательного учреждения Мезиновская средняя  общеобразовательная школа имени Александра Исаевича Солженицына  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 601525, Владимирская обл.,  

<

...>) к обществу  с ограниченной ответственностью «Строительная фирма Спектр»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 600910, Владимирская обл.,  г. Радужный, кв. 1-Й, 34, пом. 6-21) об обязании выполнить работы по  контракту от 24.07.2018 № 0328300053118000073_111944 (с учетом  уточнения),  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Строительная фирма Спектр» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, адрес: 600910, Владимирская обл., г. Радужный, кв. 1-Й,  34, пом. 6-21) к муниципальному бюджетному общеобразовательному  учреждению «Мезиновская средняя общеобразовательная школа имени  Александра Исаевича Солженицына» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>, адрес: 601525, Владимирская обл., 

<

...>) о взыскании 4 213 704 руб. 13 коп.  (с учетом уточнения),  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора, муниципальное казенное учреждение «Отдел строительного  контроля» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 601503,  

<

...>).  

Руководствуясь статьями 17, 49, 65, 71, 101, 110, 121,123, 156, 167-170,  176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

иск муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Мезиновская средняя общеобразовательная школа имени Александра  Исаевича Солженицына к обществу с ограниченной ответственностью  «Строительная фирма Спектр» удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная  фирма Спектр» выполнить работы по контракту от 24.07.2018   № 0328300053118000073_111944:  

произвести ремонт деревянных элементов конструкций крыш (смена  стропильных ног из бревен) в количестве 7,8 м(произвести очистку коры);  

произвести изоляцию покрытий и перекрытий изделиями из  волокнистых и зернистых материалов насухо в два слоя в объеме 14,1465 м3  (вата минеральная «ISOVER» толщиной 5 см в количестве 316,5 м²);  

произвести огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом  «Пирилакс» для обеспечение первой группы огнезащитной эффективности  на площади 2-2,33 м²;  

произвести укладку ходовых досок на чердаке 96,47 м; 

произвести устройство снегозадержания на кровле 0,5 м (устройство  надлежащего крепления);  

произвести устройство желобов настенных на участке 0,6 м (устройство  надлежащего водоотвода с крыши);  

произвести устройство водоотвода с укладкой лотков 50 м (устройство  надлежащего водоотвода с тротуара);  

произвести погрузку мусора строительного 29,317 т; осуществить перевозку грузов(мусора) 29,317 т. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  фирма Спектр» в пользу муниципального казенного общеобразовательного  учреждения Мезиновская средняя общеобразовательная школа имени  Александра Исаевича Солженицына расходы по уплате государственной  пошлины в сумме 6000 руб.  

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью  «Строительная фирма Спектр» удовлетворить частично.  

Взыскать с муниципального казенного общеобразовательного  учреждения Мезиновская средняя общеобразовательная школа имени  Александра Исаевича Солженицына в пользу общества с ограниченной  ответственностью Строительная фирма Спектр» задолженность в сумме  4 038 049 руб. по контракту от 24.07.2018 № 0328300053118000073_111944,  пени в сумме 142 341 руб. 23 коп. за период 13.02.2019 по 03.07.2019,  расходы по уплате государственной пошлины в сумме 43 720 руб. 58 коп.  

В удовлетворении остальной части встречного иска о взыскании пени  отказать.  

С учетом зачета требований по первоначальному и встречному искам:  

Взыскать с муниципального казенного общеобразовательного  учреждения Мезиновская средняя общеобразовательная школа имени  Александра Исаевича Солженицына в пользу общества с ограниченной  ответственностью Строительная фирма Спектр» задолженность в сумме  4 038 049 руб. по контракту от 24.07.2018 № 0328300053118000073_111944,  пени в сумме 142 341 руб. 23 коп. за период 13.02.2019 по 03.07.2019,  расходы по уплате государственной пошлины в сумме 37 720 руб. 58 коп.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в  законную силу.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная  фирма Спектр» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме  

1008 руб., уплаченную по платежному поручению от 18.01.2019 № 41.  

Подлинной платежное поручение от 18.01.2019 № 41, остается в  материалах дела, поскольку госпошлина возвращается частично. Основанием  для возврата государственной пошлины является настоящее решение.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в срок,  не превышающий месяца с момента его вынесения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.В. Смагина