Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-4067/2018

18 мая 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  10 мая 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  18 мая 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

Истец: Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (адрес:  Россия 188750, п Плодовое, Ленинградская обл Приозерский р-н, ул Центральная 14, ОГРН:  1054700441290);

Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬКАСАР" (адрес:  Россия 194214, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт ЭНГЕЛЬСА 97/А/22Н, ОГРН:  1157847260086);

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 09.01.18

- от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом

установил:

Администрация муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области обратилась с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Алькасар" 1 646 838 руб. 00 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту №01453000282115000041-382353 от 20.02.16.

Ответчика в судебное заседание не явился, отзыв не представил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассматривается без его участия на основании ст.156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен муниципальный контракт №01453000282115000041-382353 от 20.02.16 на выполнение работ по строительству открытого корта для городошного спорта пос. Плодовое Призерского района Ленинградской области.

Цена контракта составляет 26 470 879 руб. 00 коп.

Согласно п.1.3 договора срок выполнения работ – 20.09.16.

Фактически выполнены работы ответчиком 07.09.17, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта формы КС-11.

В соответствии с п. 5.4.1 контракта ответчику начисляется пеня за просрочку исполнения обязательства в размере 1 646 838 руб. 00 коп. 

Ответчик возражений не заявил, ходатайства об уменьшении нустойки не предоставил.

Расчет проверялся судом  и признан правильным.

Учитывая, что просрочка составила почти год, суд считает, что размер пени не является завышенным.

На основании изложенного суд считает, что иск подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Алькасар" в пользу Администрации муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 1 646 838 руб. 00 коп. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Алькасар" в доход федерального бюджета  29 468 руб. 00 коп.

Выдать исполнительные листы в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.