Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Калининград

Дело №

А21-1364/2020

«21»

июля

2020 года

 

Резолютивная часть решения объявлена  

«20»

июля

2020 года

 

Решение изготовлено в полном объеме   

«21»

июля

2020 года

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску МАУК «Калининградский зоопарк» к ООО «Реставрационная мастерская «НАСЛЕДИЕ» о взыскании 1 033 428,07 рублей

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности

от ответчика: н/я

от третьего лица: ФИО3 по доверенности

установил.

 

            Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградский зоопарк» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Реставрационная мастерская «НАСЛЕДИЕ» о взыскании неустойки в сумме 1 033 428,07 рублей.

            Определением суда к участию в деле было привлечено муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства «Городского округа «Город Калининград».

            Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ.

            Судом установлено.

            Между учреждением «Калининградский зоопарк» (заказчик) и ООО «Реставрационная мастерская «НАСЛЕДИЕ» (подрядчик) был заключен контракт от 07.11.2017 года № 816343/6ц.

            По условиям контракта подрядчик обязался выполнить строительные работы  по реконструкции объекта Калининградского зоопарка «Львятник» под «Дом тропической птицы».

            В соответствии с пунктом 3.3 договора срок выполнения работ 576 календарных дней со дня подписания контракта.

В соответствии с пунктом 4.1 контракта его цена составляет 119 359 008,35 рублей. 

В соответствии с пунктом 8.3.1 контракта за нарушение срока выполнения работ начисляется неустойка  в размере одной трехсотой действующей  ставки ЦБ России на дату уплаты пени за каждый день просрочки.

26.09.2019 года подписана справка КС-3 о выполнении работ по контракту на сумму 89 242 879,22 рублей.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 23.10.2019 года по делу № А21-12225/2019 с заказчика в пользу подрядчика взыскано 7 282 559,25 рублей по акту выполненных работ, переданному заказчику 02.09.2019 года. Решение вступило в силу.

24.12.2019 года стороны подписали соглашение о расторжении контракта от 07.11.2017 года № 816343/6ц. Пунктом 3 соглашения стороны установили, что стоимость работ составляет 96 525 438,47 рублей (с учетом акта на 7 282 559,25 рублей).

По настоящему делу истец просит взыскать неустойку за нарушение срока выполнения работ по положениям пункта 8.3.1 контракта за период с 06.06.2019 года по 26.09.2019 года в сумме 1 033 428,07 рублей.

Расчет неустойки проверен судом.

Установлено, что  при расчете неустойки истцом не учтена скорректированная дополнительным соглашением от 24.12.2019 года к контракту  цена работ  (96 525 438,47 рублей), не учтено выполнение работ на сумму 7 282 559,25 рублей (с учетом пункта 7.1.2 контракта 10.09.2019 года).

Также при расчете неустойки подлежит применению ставка ЦБ России 4,5%, действующая дату принятия решения по делу.

Согласно расчету суда неустойка за период с 06.06.2019 года по 26.09.2019 года составляет  258 541,55 рублей. 

Расчет произведен в целях определения размера госпошлины по делу.

Ответчиком заявлено о применении положений статьи 333 ГК РФ.

Учитывая объем обращений подрядчика по разъяснению порядка выполнения работ связи недостатками проектной и рабочей документации, период просрочки, суд полагает возможным применить положения статьи 333 ГК РФ и определить размер неустойки 180 000 рублей.

Требования истца в установленной сумме подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310, 330 ГК РФ, положений контракта.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Реставрационная мастерская «НАСЛЕДИЕ» (ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального автономного учреждения культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградский зоопарк» (ОГРН 

<

***>) неустойку в сумме 180 000 рублей, расходы по госпошлине в сумме 5837,6 рублей.

Во взыскании остальной суммы отказать.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                               О.Н.Шкутко