АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________  

600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, 14 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Владимир Дело № А11-8245/2017 22.01.2018 

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи  

Щавлёвой А.Л. при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Беляковой М.О., рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по иску Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации города Владимира (600026, г. Владимир, ул. Горького,  

д. 95А, ИНН 3302011981, ОГРН 1023301457739) к обществу с  ограниченной ответственностью "Владимирский асфальтобетонный завод"  (121552, г. Москва, ул. Ельнинская, д. 15, корпус 2, квартира 32,  

ИНН 3306016250, ОГРН 1123326001226) о понуждении к исполнению  гарантийных обязательств.  

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд    

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации города Владимира, г. Владимир удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Владимирский  асфальтобетонный завод", г. Москва в течение пятнадцати дней со дня  вступления решения суда в законную силу выполнить гарантийные  обязательства:  

- по контракту № 115 от 17.09.2015, а именно: заделать выбоины,  трещины, просадки, разрушения кромок общей площадью 12 кв.м на  автомобильной дороге по ул. Школьный проезд от дома 1 по Школьному  проезду до дома 5а по ул. Ноябрьская путем фрезерования, подгрунтовки,  укладки асфальтобетонной смеси БII;  

- по контракту № 124 от 22.09.2015, а именно: на автомобильной  дороге по Козлову тупику заделать выбоины, разрушения кромок общей  площадью 10 кв.м путем фрезерования, подгрунтовки, укладки  асфальтобетонной смеси БII;  

- по контракту № 125 от 22.09.2015, а именно: на автомобильной  дороге по ул. Диктора Левитана от дома 33 по ул. Офицерской до дома 31  по ул. Диктора Левитана заделать выбоины общей площадью 4 кв.м путем  фрезерования, подгрунтовки, укладки асфальтобетонной смеси БII.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Владимирский асфальтобетонный завод", г. Москва в доход федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 6000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в  течение месяца с момента принятия решения.  

 Судья А.Л. Щавлёва