АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

 http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А28-14185/2017

город  Киров

20 декабря 2017 года

резолютивная часть решения объявлена 19 декабря 2017 года

решение в полном объеме изготовлено 20 декабря 2017 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Малышевой М.В.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 

<

...>

дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Коршик" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: Кировская область, с. Коршик, Оричевский район, ул. Зеленая, д. 22)

к акционерному обществу «Нововятская ПМК-1» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: Кировская область, г.Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 11А)

о взыскании 3 090 677 рублей 12 копеек

при участии в  судебном заседании:

от истца - ФИО2 (по доверенности от 04.08.2015),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Коршик" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к акционерному обществу "Нововятская ПМК-1" (далее – ответчик) о взыскании 3 090 677 рублей 12 копеек долга по договору подряда №П/54 от 30.09.2016.

Истец исковые требования поддерживает.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, под роспись, отзыв на исковое заявление не представил.

Дело рассмотрено в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика.

Суд, заслушав объяснения истца, исследовав представленные в материалы дела письменные доказательства, установил следующее.

30.09.2016 между истцом (заказчик) и ответчиком (генеральный подрядчик) заключен договор подряда №П/54 на выполнение работ по строительству объекта, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по строительству объекта: «Телятник беспривязного содержания в с.Коршик Оричевского района Кировской области и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять их результат – построенный, сданный по акту сдачи-приемки объект, принять результат работ и уплатить обусловленную цену (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 2.1 договора дата начала работ – 01.10.2016. Дата окончания работ по строительству объекта – 31.03.2017, за исключением работ по благоустройству территории, которые должны быть выполнены и сданы заказчику в срок до 15.06.2017. 

Согласно пункту 2.2 договор сроки завершения и сдачи отдельных этапов работ указаны в графике выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением №3 к договору и его неотъемлемой частью. 

В соответствии с пунктом 3.1 цена работ, выполняемых по договору, и порядок ее формирования определяется в протоколе согласования цены договора (Приложение №2) и локальной смете №1 (Приложение №1). При необходимости стороны оформят дополнительным соглашением к договору увеличение или уменьшение объемов работ, ранее согласованных ими в приложениях и/или дополнительных соглашениях.

Заказчик производит оплату работ в следующем порядке (пункт 3.2 договора):

- пункт 3.2.1. - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора  заказчик оплачивает генеральному подрядчику аванс на приобретение материалов в размере 6 585 262 рубля 52  копейки, в том числе НДС18% 1 004 531 рубль 57 копеек. В дальнейшем аванс засчитывается заказчиком в счет оплаты выполненных подрядчиком пропорционально объемам выполненных работ.

- пункт 3.2.2. - ежемесячно заказчик оплачивает фактически выполненные подрядчиком работы, основанием для платежа будут являться: подписанные сторонами акты выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, и выставленный в соответствии с этими документами надлежаще оформленный счет-фактура. Оплата производится в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления подрядчиком заказчику указанных документов.

Согласно пункту 3.4 договора подрядчик обязан предоставить заказчику акты формы КС-2 и справку формы КС-3 не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Согласно пункту 7.7 договора приемка выполняемых по договору работ производится ежемесячно поэтапно по актам выполненных работ формы КС-2, с составлением справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. Заказчик при получении уведомления подрядчика в 5-дневный срок осматривает выполненную работу (ее результата), и если результат работы соответствует установленным требованиям, подписывает акт сдачи-приемки работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, заказчик заявляет подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. После полного окончания работ стороны подпишут акт сдачи-приемки готового объекта в эксплуатацию.

Пунктом 13.1 договора стороны согласовали претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана уведомить об этом лицо, ее направившее, в течение 3-х дней с момента получения такого письма. Мотивированный ответ по существу претензии должен быть направлен не позднее 30 дней с момента ее получения. 

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств (пункт 14.1 договора).

Сторонами согласованы приложения №№№1,2,3 к договору: локальная смета №1, протокол согласования цены договора подряда, график производства строительно-монтажных работ.

Согласно протоколу согласования цены договора от 30.09.2016 цена работ, выполняемых по договору, составляет 21 950 875 рублей 08 копеек, в том числе НДС 18% 3 348 438 рублей 57 копеек.

Дополнительным соглашением №1 от 01.02.2017 к договору подряда стороны согласовали изменение части работ, поскольку выявились дополнительные работы, отраженные в локальной смете №1 ДОП. Общая сумма дополнительных работ по смете составляет 275 923 рубля 68 копеек, в том числе НДС 18% - 42 090 рублей 05 копеек (пункт 1).

В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению перенести выполнение работ по устройству полов на весенне-летний период. Дата начала работ – 01.10.2016, дата окончания работ в срок до 30.06.2017.

Согласно пункту 3 дополнительного соглашения  от 01.02.2017 № 1 стороны установили цену работ по договору в размере 22 226 798 рублей 76 копеек, в том числе НДС 18% 3 390 528 рублей 62  копейки.

Во исполнение договора подряда истец уплатил ответчику 7 701 761 рубль 68 копеек, что подтверждается платежными поручениями:

№1495 от 30.09.2016 на сумму 6 585 262 рубля 52 копейки (аванс),

№1701 от 10.11.2016 на сумму 245 137 рублей 48 копеек, 

№1906 от 13.12.2016 на сумму 595 438 рублей 00 копеек,

№285 от 07.03.2017 на сумму 275 923 рубля 68 копеек.

Ответчик (генеральный подрядчик) выполнил работы, предусмотренные договором, на сумму 3 972 995 рублей 38 копеек и сдал их результат ответчику (заказчику), что подтверждается актами о приемке выполненных работ:

№1 от 31.10.2016 на сумму 350 196 рублей 05 копеек, 

№2 от 30.11.2016 на сумму 850 626 рублей 16 копеек, 

№1 от 28.02.2017 на сумму 257 175 рублей 51 копейка, 

№3 от 28.02.2017 на сумму 1 134 079 рублей 00 копеек,

№1 от 14.07.2017 на сумму 1 270 388 рублей 83  копейки, 

№2 от 14.07.2017 на сумму 110 529 рублей 83  копейки, 

и справками о стоимости выполненных работ и затрат.

Также ответчик передал истцу материалы (плита дорожная ж/б 2х6, железобетонные фундаменты ФМ-5) на общую сумму 638 089 рублей 18 копеек, что подтверждается накладными на отпуск материалов на сторону от 25.07.2017 № 160 и № 161 и счетами-фактурами.

В связи с невозможностью выполнения генеральным подрядчиком работ по договору подряда № П/54 от 30.09.2016 и фактическим их прекращением, стороны приняли решение расторгнуть договор подряда с 14.07.2017 о чем стороны подписали дополнительное соглашение от 14.07.2017.

Согласно дополнительному соглашению от 14.07.2017 уплаченная заказчиком генеральному подрядчику денежная сумма в размере 7 701 761 руб. 68 коп. засчитывается сторонами в следующем порядке: в сумме 3 972 995 руб. 38 коп. в счет оплаты выполненных на объекте работ (акты указаны выше), в сумме 638 089 руб. 18 коп. в счет переданных заказчику приобретенных подрядчиком для выполнения работ материалов (накладные указаны выше), оставшаяся сумма в размере 3 090 677 рублей 12 копеек (в том числе НДС18%) подлежит перечислению подрядчиком на расчетный счет заказчика указанный в раздел 15 «Адреса и реквизиты сторон» в срок до 25.08.2017.

В связи с невозвратом указанной суммы в срок истец направил ответчику претензию от 20.09.2017 № 802 с требованием вернуть денежные средства в сумме 3 090 677 рублей 12 копеек. Претензия получена ответчиком под роспись 20.09.2017, однако требование истца ответчик не исполнил.

Указанное послужило поводом для предъявления настоящего иска в суд.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием возникновения гражданских прав и обязанностей является договор. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно части 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Таким образом, основанием для возникновения у заказчика обязательств по оплате выполненных работ является сдача результата работ, оформляемая актом.                                                

В соответствии с пунктом 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

Стороны расторгнутого договора не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон (пункт 4 статьи 453 ГК РФ).

Согласно пункту 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения, полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, в связи с чем, при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

Таким образом, ответчик обязан возвратить аванс истцу, если не докажет факт исполнения обязательства ответчиком (выполнения работ в установленный договором срок до момента его расторжения).

Из материалов дела усматривается, что истец во исполнение договора подряда перечислил ответчику сумму в размере 7 701 761 рубль 68 копеек, в то же время ответчиком выполнены работы и переданы истцу материалы на общую сумму 4 611 084 рубля 56 копеек. 

Дополнительным соглашением от 14.07.2017 к договору подряда подтверждается, что сумма неосвоенных ответчиком денежных средств на дату расторжения договора подряда № П/54 от 30.09.2016 составляет 3 090 677 руб. 12 коп. 

Поскольку договор расторгнут по соглашению сторон, оснований для удержания ответчиком данной суммы отсутствуют.  

Доказательств возврата данной суммы истцу ответчиком в материалы дела не представлено. 

При таких обстоятельствах суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

        Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

взыскать с акционерного общества «Нововятская ПМК-1» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: Кировская область, г.Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 11А) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Коршик" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: Кировская область, с. Коршик, Оричевский район, ул. Зеленая, д. 22) 3 090 677 (три миллиона девяносто тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 12 копеек долга и 38 453 (тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 38 копеек расходов по госпошлине.

        Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.

Судья              М.В.Малышева