152/2023-144784(2) 

Арбитражный суд Брянской области  

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru  Именем Российской Федерации  

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А09-7856/2023

город Брянск

18 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 14.12.2023. Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Ивашиной Я.В., 

рассматривает в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Капитал-Строй»,  г. Брянск,  

к Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области,  г. Брянск,  

о взыскании 212 134,82 руб. при участии в заседании: от истца: не явился, извещен, от ответчика: ФИО1 (доверенность от 27.01.2023 № 61), 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» (далее – ООО  «Капитал-Строй», истец) обратилось в Арбитражный суд Брянской области к  Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области  (далее – ответчик) о взыскании 212 134,82 руб. неосновательного обогащения.  

Определением Арбитражного суда Брянской области от 18.08.2023 по делу   № А09-7856/2023 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного  производства.  

Определением от 12.10.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам  искового производства в соответствии с частью 5 статьи 227 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).  

Истец, уведомленный надлежащим образом в дате и времени судебного  разбирательства, в судебное заседание не явился.  

Дело рассмотрено по правилам статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителя  истца.  

От истца поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.  

Суд, рассмотрев ходатайство истца об отложении судебного разбирательства,  считает его не подлежащим удовлетворению, исходя из следующего.  

В соответствии с частью 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить  судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном  судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в  деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических  неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том  числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об  отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею  дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.  

В каждой конкретной ситуации суд, исходя из обстоятельств дела и мнения лиц,  участвующих в деле, самостоятельно решает вопрос об отложении дела слушанием, за  исключением тех случаев, когда суд обязан отложить рассмотрение дела ввиду  невозможности его рассмотрения в силу требований Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Заявляя ходатайство об отложении рассмотрения дела, лицо, участвующее в деле,  должно указать и обосновать, для совершения каких процессуальных действий  необходимо отложение судебного разбирательства. Заявитель ходатайства должен также  обосновать невозможность разрешения спора без совершения таких процессуальных  действий.  

При этом возможность отложить судебное заседание является правом суда, которое  осуществляется с учетом обстоятельств конкретного дела, за исключением случаев, когда  рассмотрение дела в отсутствие представителя лица, участвующего в деле, невозможно в  силу положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и  отложение судебного заседания является обязанностью суда.  

Суд, рассмотрев ходатайство истца, не усматривает правовых оснований,  предусмотренных ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  для отложения судебного заседания, обстоятельств невозможности рассмотрения дела в  настоящем судебном заседании не приведено, полагает заявленное представителем истца  ходатайство об отложении судебного разбирательства, приведет к необоснованному  затягиванию спора, в связи с чем, заявленное ходатайство удовлетворению не подлежит.  

Представитель ответчика возражал против исковых требований, по основаниям,  изложенным в отзыве на иск.  

В судебном заседании 14.12.2023 в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до  12 час. 15 мин. 14.12.2023. После объявленного перерыва судебное заседание продолжено.  

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что считает необоснованным  применение при расчете неустойки однократной ставки рефинансирования.  

Как следует из материалов дела, между истцом (подрядчиком) и ответчиком  (заказчиком) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирном доме от 18.03.2022 № 128.КР.2022, по условиям  которого подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту общего  имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, в соответствии с условиями договора и проектной (сметной) документацией.  

В соответствии с пунктом 3.1 стоимость работ составляет 2 002 514, 85 руб.  

Согласно п. 2.2. договора в редакции дополнительного соглашения к договору от  01.06.2022 срок выполнения работ, определен следующим образом: дата начала –  04.04.2022, дата окончания – 02.06.2022.  

Заказчик имеет право не оплачивать выполненные работы до оплаты подрядчиком  всех начисленных и предъявленных подрядчику в соответствии с разделом 10 договора  неустоек и штрафных санкций по договору. При оплате выполненных работ по объекту  заказчик вправе перечислить подлежащие оплате подрядчику денежные средства за  вычетом суммы начисленных и предъявленных подрядчику в соответствии с разделом 10  договора неустоек и штрафных санкций по договору (пункт 3.17 договора).  

В случае просрочки исполнения подрядчиком любого из обязательств,  предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа,  пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором и  приложениями к нему срока исполнения обязательства до фактического исполнения.  Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере 0,25 % от общей  стоимости работ по объекту, по которому допущена просрочка исполнения обязательств  (пункт 10.1 договора).  

В соответствии с пунктом 10.9 договора уплата неустойки за нарушение  обязательств производится подрядчиком на основании претензии заказчика  перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет заказчика. В  случае применения мер, заказчик вправе в одностороннем порядке произвести  соответствующее удержание из стоимости работ.  

По актам формы КС-2 подрядчик сдал, а заказчик принял работы на общую сумму  2 002 514, 85 руб.  

В связи с нарушением подрядчиком срока выполнения работ, ответчик удержал  неустойку из стоимости работ по договору в сумме 212 134, 82 руб. (2 002 514, 85 руб. х  0,25 % х 41) за период с 03.06.2022 по 13.07.2022.  

 Ссылаясь на то, что нарушение сроков выполнения работ было допущено в силу  независящих от истца обстоятельств, которые объективно препятствовали выполнению  работ в согласованные сроки, кроме того удержанная сумма неустойки явно несоразмерна  последствиям допущенного нарушения и подлежит снижению в порядке статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации, общество обратилось в арбитражный суд с  настоящим иском.  

В силу пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в  договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По  согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки  завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального  и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской  Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае  просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан  доказывать причинение ему убытков.  

Пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее –  постановление Пленума № 7) разъяснено, что на случай неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения,  законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить  кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть  установлен в твердой сумме – штраф или в виде периодически начисляемого платежа –  пени (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Истец в своем заявлении указал, что в адрес ответчика направил письмо с  предложением о заключении дополнительного соглашения, предусматривающего  изменение сроков выполнения работ.  

Основанием для направления данного предложения послужило основание наличия  фактических обстоятельств, связанных с невозможностью выполнения работ в срок в  связи с неблагоприятными погодными условиями и недопуском собственниками  помещений в МКД истца к выполнению работ, что подтверждается справкой Брянского  ЦГМС – филиала «Центрально-Черноземное УГМС» от 06.05.2022 № 2/703 и протоколом  общего собрания собственников помещений в МКД.  

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что истец не уведомил ответчика  надлежащим образом в соответствии с п. 4.2.19 договора.  

Пунктом 2.5. договора предусмотрено продление сроков выполнения работ  возможно лишь по соглашению сторон при наличии документов подтверждающих одно  из следующих обстоятельств:  

а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о  проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких  изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным  представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления  в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной  организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по  причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой  организацией договора о проведении капитального ремонта;  

в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту  в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.  

При этом, п. 1 ст. 716 ГК РФ Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика  и до получения от, него указаний приостановить работу при обнаружении:  

- непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком  материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки  (обработки) вещи;  

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний  о способе исполнения работы;  

- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или  прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения  в срок.  

Пункт 4.2.19 договора № 128.КР.2022 от 18.05.2022 устанавливает обязанность  подрядчика в течение одного рабочего дня с даты возникновения, уведомить заказчика  под роспись о наличии обстоятельств, препятствующих завершению всех работ, или  

отдельного этапа в срок, чего в данном случае, в нарушение обязательств,  предусмотренных договором, подрядчиком сделано не было.  

Срок выполнения работ установлен с 04.04.2022 по 02.06.2022. 

Поскольку указанный срок был нарушен, является правомерным удержание фондом  неустойки за период просрочки с 03.06.2022 по 13.07.2022, начисленной им за 41 день  просрочки (212 134, 82 руб. = 2 069 606, 94 руб. х 0,25 % х 41).  

Между тем такое удержание не препятствует подрядчику заявить о  несоразмерности примененной ответственности. Возражая против расчета заказчика,  истец сослался на чрезмерность неустойки и ее несоразмерность последствиям  допущенного нарушения, просит уменьшить неустойку исходя из расчета 1/130 ключевой  ставки ЦБ РФ, предусмотренной в качестве минимальной ответственности пунктом 232  постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.  

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 79 постановления Пленума   № 7, в случае списания по требованию кредитора неустойки со счета должника (пункт 2  статьи 847 Гражданского кодекса Российской Федерации), а равно зачета суммы  неустойки в счет суммы основного долга и/или процентов должник вправе ставить вопрос  о применении к списанной неустойке положений статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации, например, путем предъявления самостоятельного требования о  возврате излишне уплаченного (статья 1102 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

С учетом указанных разъяснений подрядчик вправе ставить вопрос о взыскании с  заказчика неосновательного обогащения в связи с наличием оснований для уменьшения  неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В силу пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства,  суд вправе уменьшить неустойку.  

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа  обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их  неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки  предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям  нарушения обязательств.  

Согласно пункту 71 постановления Пленума № 7, если должником является  коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая  организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки  судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может  

быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными  средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного  пользования (подпункт 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) (пункт  75 постановления Пленума № 7).  

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в  качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной  ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения  неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности  последствиям нарушения обязательств.  

Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного  Суда Российской Федерации от 01.09.2020 № 310-ЭС19-26999, предметом судебной  проверки является не ставка пени, которая может соответствовать критерию  справедливости, а итоговая сумма пени за конкретное нарушение.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской  Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или  сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого  лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или  сбереженное имущество (неосновательное обогащение) за исключением случаев,  предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Поскольку удержание ответчиком денежных средств в части, превышающей размер  справедливой ответственности подрядчика, неправомерно, излишне подученная  заказчиком неустойка является неосновательным обогащением ответчика.  

Суд признает обоснованным довод фонда о неправомерности снижения судом  неустойки ниже двукратной ключевой ставки.  

В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что разрешая вопрос о  соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой  целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут  исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период  такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной  

последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить  доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на  пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам  предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения  обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей  в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера  допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не  может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из  однократной учетной ставки Банка России.  

При таких обстоятельствах, в связи с отсутствии доказательств наличия у  ответчика каких-либо негативных последствий, наступивших от нарушения подрядчиком  сроков выполнения работ по спорному договору, незначительность периода просрочки (34  дня), но в то же время принимая во внимание, что истцом не обосновано наличие  обстоятельств, позволяющих снизить неустойку ниже двукратной ключевой ставки, суд  считает необходимым определить сумму неустойки исходя из разъяснений, изложенных в  пункте 1 постановления Пленума № 81 и определении Верховного Суда Российской  Федерации от 18.09.2019 № 308-ЭС19-8291 (по двукратной ключевой ставке на дату  прекращения обязательств).  

В связи с вышеизложенным, правомерно удержанной неустойкой является 44 170, 52 руб. (2 069 606, 94 руб. *2 * 9,5% *41 / 365). 

Следовательно, неосновательно удержанными являются денежные средства в  размере 167 964, 30 руб. (212 134, 82 руб. – 44 170, 52 руб.).  

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию в пользу истца 167 964, 30 руб.  неосновательного обогащения.  

В силу подпункта 1 пункта 1 ст.333.21 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее – НК РФ) госпошлина при цене иска 212 134, 82 руб. составляет 7 243 руб.  

При подаче в арбитражный суд иска истец уплатил в доход федерального бюджета 7 243 руб. госпошлины по чек по операции Сбербанк онлайн от 08.08.2023. 

В связи с частичным удовлетворением исковых требований с ответчика в пользу  истца подлежит взысканию 5 735 руб. расходов по оплате госпошлины.  

В остальной части расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.  

Руководствуясь ст.ст.167-170, ч.2 ст.176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй»  удовлетворить частично.  

Взыскать с регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов  Брянской области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй»  167 964,30 руб., неосновательного обогащения, 5735 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  принятия и может быть обжаловано в течение указанного срока в Двадцатый  арбитражный апелляционный суд, г.Тула.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области. 

Судья Ивашина Я.В.