6/2023-29815(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина, д. 74, г. Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-24708/2022

г. Тюмень

27 февраля 2023 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев в  открытом судебном заседании исковое заявление Муниципального унитарного предприятия  «Паритет» (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 23.10.2003, ИНН: 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Омега-Сервис» (ОГРН: 

<

***>, дата  присвоения ОГРН: 02.04.2012, ИНН: 

<

***>) об обязании устранить недостатки, третье лицо:  ООО УК «Нижний Пасад» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), руководствуясь статьями  110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Омега-Сервис» в течение двух месяцев  

со дня вступления решения суда в законную силу устранить выявленные в пределах гарантийного  

срока недостатки выполненных работ по объекту: Многоквартирный жилой дом, расположенный  

по адресу: 

<

...>, а именно: 

- сдать в установленном порядке прибор тепловой энергии в эксплуатацию,  

передать МУП «Паритет» техническую документацию на тепловой пункт и  

технические паспорта на оборудование и приборы учёта; - в тепловом узле на потолке восстановить шумоизоляцию; 

- перемонтировать стояки отопления в подъездах трубой соответствующего диаметра,  

обеспечивающей теплоснабжение жилых помещений; - в кв. № 1 демонтировать не проектную врезку в систему отопления; 

- во входных группах подъездов восстановить штукатурно-окрасочный слой,  

отремонтировать отломленную кирпичную кладку, приклеить плитку; 

- устранить щель между входными группами и корпусом здания;  - на пандусе 1-го подъезда восстановить штукатурно-окрасочный слой, приклеить плитку;  

- устранить не плотности кровельного покрытия над входной группой 2-го  

подъезда с целью исключения проникновения дождевых и талых вод;  

- стропильные конструкции в подкрышном пространстве обработать антигрибковым  

покрытием и огне-био-защитой; - асфальтовое покрытие перед домом восстановить, устранить провалы; 

- отремонтировать потрескавшуюся отмостку, устранить проседание и  

выполнить необходимый уклон от стены дома, в целях исключения  

проникновения воды в подвальное помещение; - закрепить отделку цокольной части, устранить отслоения и выпученность; 

- отремонтировать трещины и сколы по фасаду дома, приклеить декоративные элементы  

дома со стороны ул. Декабристов; - смонтировать отливы окон подвальных (цокольных) помещений; 

- на двери в подвальное помещение обеспечить место крепления ручки,  

установить над дверью козырёк для отвода воды; 

- прикрепить «отошедший» водосток в местах крепления от стен. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Омега-Сервис» в пользу  Муниципального унитарного предприятия «Паритет» расходы на оплату государственной  пошлины в размере 6000 руб.  

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Тюменской области.  

 Судья Михалева Е.В.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 23.12.2021 7:49:49

 Кому выдана Михалева Елена Васильевна