Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-86557/24-14-659

г. Москва

15 июля 2024 года

Резолютивная часть объявлена 27 июня 2024 г.

Дата изготовления решения в полном объеме             15 июля 2024 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Лихачевой О.В. (единолично)

рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ,

дело по иску АО «КТК-Р» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику ООО «Кубань-СтройТорг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании суммы убытков в размере 420 796,42 руб.

без вызова сторон

УСТАНОВИЛ:

АО «КТК-Р» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Кубань-СтройТорг» о взыскании суммы убытков в размере 420 796,42 руб.

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены основания, предусмотренные статьей 227 АПК РФ, для рассмотрения дела в порядке упрощённого производства. 

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 АПК РФ. 

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока. 

27 июня 2024 г. принята резолютивная часть решения в порядке, предусмотренном ст. 229 АПК РФ.

03.07.2024 18:45 МСК в суд поступило, в установленный ст. 229 АПК РФ срок, заявление ответчика о составлении мотивированного решения.

Ответчиком представлен отзыв, в котором он против иска возражает.

Исследовав все представленные по делу доказательства, суд пришел к выводу об обоснованности требований истца и удовлетворении исковых требований в силу следующих обстоятельств.

Как установлено судом и следует из материалов дела, между АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P» (далее - Истец, АО «КТК-Р», Компания) и ООО «Кубань-СтройТорг» (далее - Ответчик, Подрядчик) был заключен Договор подряда № R-OD-20-0060 от 17.06.2020 г. (далее - Договор), Дополнительное соглашение № 1 от 15.12.2020 г., Дополнительное соглашение № 2 от 05.04.2021 г. на выполнение Работ по ремонту противопожарной стенки и полов в помещениях на объектах Компании.

Объекты Центрального региона АО «КТК-Р» (НГ1С ЦР), на которых выполнялись работы: A-HПC-4A, А-НПС-5А, ППС-2, ППС-3, НПС «Комсомольская» (пункт 1.2 Приложения № 1 к Договору, Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 15.12.2020 г.).

Комплекс работ по ремонту бетонных полов и противопожарной стенки насосной станции пожаротушения выполнялись на НПС Центрального региона Компании согласно Плана производства работ от 18.06.2020 г. и «Ведомости объема работ» приложение № 1 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2020 г.

В соответствии с приложением № 1 «График выполнения работ» к Дополнительному соглашению № 2 от 05.04.2021 г. Работы подлежали выполнению в срок до 31 мая 2021 г.

Акт приемки выполненных работ по ремонту бетонных полов и противопожарной стенки насосной станции пожаротушения на объектах Компании между АО «КТК-Р» и ООО «Кубань-СтройТорг» был подписан 22.10.2021 г.

Гарантийный срок на результат Работ по Договору составлял 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ (пункт 11.1 Договора).

Период гарантийного срока по Договору составлял с 22.10.2021 г. по 22.10.2023 г.

Пункт 11.3 Договора предусматривает, что при обнаружении дефектов в течение гарантийного срока Компания письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах.

Письмами от 10 августа 2022 г. Исх. № Out-L-CPCR-8235-2022 и от 07 сентября 2022 г. Исх. № Out-L-CPCR-9184-2022 АО «КТК-Р» уведомило Подрядчика об обнаружении дефектов в помещениях НПС ЦР Компании: НПС-3, Л-НПС-5А, А-НПС-4А, и потребовало мобилизовать персонал для выполнения работ по устранению выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств.

20 сентября 2022 г. ООО «Кубань-СтройТорг» сообщил, что для выполнения работ по устранению дефектов в гарантийный период по Договору произвести мобилизацию планируется только в весенне-летний период 2023 года по причине отказа европейским поставщиком поставок в адрес предприятия изготовителя полимерного покрытия компонентов необходимых для изготовления материалов, а также технологических особенностей нанесения полимерных покрытий в части соблюдения температурных и влажных показателей (Письмо Исх. № АС-09-2022 от 20.09.2022 г., номер КТК № In-L-CPCR-11255-2022 от 22.09.2022 г.).

В ответ на письмо Подрядчика 27 октября 2022 г. Исх. № Out-L-CPCR-10920-2022 Истец сообщил, что планируемые сроки мобилизации не могут быть приняты АО «КТК-Р», так как помещения HПC ЦР Компании, в которых выявлены дефекты, продолжают эксплуатироваться и неустранение дефектов в ближайшее время может привести к ухудшению состояния напольных покрытий и увеличению площади дефектов.

Важно отметить, что на основании пункта 11.3 Договора представители Подрядчика должны прибыть для осмотра помещений и для подписания сторонами акта о выявленных дефектах, в котором фиксируется обнаружение дефекта и дата его устранения.

Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в акте о выявленных дефектах.

По требованию АО «КТК-Р» представители ООО «Кубань-СтройТорг» в срок не позднее 28.11.2022 г. должны были прибыть на объекты Компании для осмотра выявленных дефектов и составления совместного акта обследования, ведомости дефектов и определения сроков выполнения ремонтных работ.

От ООО «Кубань-СтройТорг» в указанный срок ответа не поступило, и явка представителей Подрядчика не была обеспечена, в связи с чем, АО «КТК-Р» в одностороннем порядке составило и подписало Акт технического осмотра зданий и сооружений ЦР от 09.12.2022 г. и Дефектную ведомость от 09.12.2022 г. по объектам А-НПС-4А, А-НПС-5А, НПС-3.

На основании пункта 11.3 Договора в случае неприбытия представителей Подрядчика в определенный в извещении Компании срок. Компания составляет односторонний акт о выявленных дефектах, который является доказательством выполнения Подрядчиком Работ с ненадлежащим качеством.

В результате осмотра зданий и сооружений НПС ЦР Компанией было определено ухудшение состояния напольных покрытий и увеличение площади дефектов, по сравнению с измерениями, указанными ранее в направлявшемся письме Исх. № Out-L-CPCR-8235-2022 от 10 августа 2022 г.

23.01.2023 г. письмом Исх. № Out-L-CPCR-0556-2023 АО «КТК-Р» направило в адрес Ответчика Акт технического осмотра зданий и сооружений ЦР от 09.12.2022 г. и Дефектную ведомость от 09.12.2022 г., и потребовало мобилизовать представителей Подрядчика для выполнения работ по устранению выявленных дефектов не позднее 30.03.2023 г.

На основании пункта 11.4 Договора, в случае если Подрядчик в течение срока, указанного в акте о выявленных дефектах, не устранит обнаруженные дефекты или откажется от подписания акта, или не направит своего представителя для составления и подписания акта, то Компания вправе без ущемления своих нрав по гарантии устранить дефекты или недоделки силами третьих лиц с отнесением расходов на Подрядчика.

Такие расходы подлежат возмещению Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты выставления Компанией соответствующего счета.

ООО «Кубань-СтройТорг» не предоставил ответа на запросы Компании, явка представителей Подрядчика не была обеспечена, работы по устранению выявленных дефектов на объектах АО «КТК-Р» не были выполнены.

Возражений относительно выявленных дефектов/недостатков, сроков устранения и представленных документов Ответчик не заявил, и не представил никакой дополнительной информации касательно соблюдения условий гарантии по Договору.

Руководствуясь условиями Договора и положениями законодательства РФ, АО «КТК-Р» устранило дефекты силами третьих лиц в рамках гарантийных обязательств и выставило соответствующих счет на возмещение расходов, понесенных Компанией.

АО «КТК-Р» заключило с подрядчиком ООО «ТехноСервис» Договор подряда № R-OD-23-0184 от 07.07.2023 г. на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений НПС Центрального региона КТК-Р, которые включали в себя комплекс работ по устранению дефектов на объектах А-НПС-4А, А-НПС-5Л, НПС-3, выявленных в рамках Договора подряда № R-OD-20-0060 от 17.06.2020 г.

Акт о приемке выполненных работ № 3 между АО «КТК-Р» и ООО «ТехноСервис» был подписан 29.09.2023 г. на сумму в размере 420 796,42 (четыреста двадцать тысяч семьсот девяносто шесть и 42/100) рублей.

26 октября 2023 г. письмом Исх. № Out-L-CPCR-9420-2023 Компания в адрес ООО «Кубань-СтройТорг» направила счет № 0252 от 26.10.2023 г. на возмещение убытков, понесенных АО «КТК-Р», в результате устранения выявленных дефектов по ремонту полов по Договору № R-OD-20-0060 силами третьих лиц.

20.11.2023 г. Истцом в адрес ООО «Кубань-СтройТорг» была направлена претензия (Исх. № Out-L-CPCR-10127-2023) с требованием оплаты убытков, понесенных Компанией, в размере 420 796,42 рублей, без НДС, в соответствии с выставленным счетом №0252 от 26.10.2023 г. 

Повторное уведомление о претензионном требовании об оплате убытков по Договору на основании счета АО «КТК-Р» было направлено 14.12.2023 г. (Исx. № Out-L-CPCR-10963-2023).

Письмами Исх. № АС-11-2023/1 от 08.11.2023 г. и Исх. № АС-12-2023/11 от 14.12.2023 г. ООО «Кубань-СтройТорг» требование об оплате убытков, понесенных Компанией, отклонил.

На основании изложенного, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании пунктов 1 и 2 статьи 722 Гражданского кодекса РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В силу пункта 3 статьи 724 Гражданского кодекс РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В соответствии с пунктом 1 статьи 755 Гражданского кодекса РФ Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.

Пункт 2 статьи 755 Гражданского кодекса РФ устанавливает ответственность Подрядчика за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В соответствии со статьями 723 и 397 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательств выполнить для кредитора определенную работу, кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своим силами, и потребовать от должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

Доводы отзыва ответчика судом внимательно изучены и подлежат отклонению, как противоречащие фактическим обстоятельствам дела и основанные на неправильном толковании норм материального права.

Ссылка ответчика на то, что в направленных в наш адрес исх. Out-L-CPCR-0556-2023 от 23.01.2023 г. акте технического осмотра зданий и сооружений ЦР от 09.12.2022 г. и дефектной ведомости специалистами АО «КТК-Р» определены дефекты образовавшиеся в результате эксплуатации и погодных условий, а не вследствие некачественно выполненных нашей организацией работ по договору №R-OD-20-0060 от 17.06.2021 г., судом не принимается.

Ответчиком надлежащим образом не доказан факт ненадлежащей эксплуатации и наличие сложных погодных условий.

Ответчик, декларативно возражая против заявленных требований, в процессе рассмотрения дела не представил в установленном порядке и в сроки доказательства в опровержение заявленных требований.

Таким образом, иск подлежит полному удовлетворению судом.

В соответствии со ст. ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина и судебные расходы относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 65, 110, 167- 171, 176, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Кубань-СтройТорг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу АО «КТК-Р» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) сумму убытков в размере 420 796,42 руб. и расходы по государственной пошлине в размере 11 416 руб.

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения. В этих случаях исполнительный лист выдается сразу после принятия такого судебного акта или обращения его к немедленному исполнению. Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

По заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья: О.В. Лихачева