Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации

Решение

 

арбитражного суда первой инстанции

г. КраснодарДело № А32-51795/2019

Резолютивная часть решения объявлена 29.07.2020 г. 

Полный текст решения изготовлен 05.08.2020 г. 

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Гречко О.А.

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Амбелиди В.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело на основании искового заявления

ПАО "Кубаньэнерго" (Публичное Акционерное Общество Энергетики и Электрификации Кубани, Адрес (место нахождения) юр.лица 350033 край Краснодарский 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)»

к ООО "Южстройкомплект" (Общество с ограниченной ответственностью "Южстройкомплект" 350089, Краснодарский край, город краснодар, проспект Чекистов, дом 42, квартира 136, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.05.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 230801001)

третье лицо:

в/у ООО "Южстройкомплект" (ФИО1. (ИНН 

<

***>, регистрационный номер в едином государственном реестре арбитражных управляющих - 18105, адрес для направления корреспонденции: 400006, 

<

...>), члена Союза «Арбитражных управляющих «Правосознание»

о взыскании неустойки по договору от 10.11.2015 г. № 993 в размере 201 140 руб. 23 коп., неустойки по договору от 10.11.2015 г. № 987 в размере 230 605 руб. 75 коп., об обязании возвратить материалы и оборудование по договорам от 10.11.2015 г. № 993, от 10.11.2015 г. № 987 согласно накладным от 03.12.2015 №395,396,398; от 04.12.2015 № 400, от 14.12.2015 № 470, 472, от 15.12.2015 №484, от 26.04.2016 № 380, от 11.07.2016 № 615, 624, 625, 626, 627,от05.11.2016№998,999 и расходов по оплате государственной пошлины в размере 17 800 руб. (общая сумма 431 745 руб. 98 коп.)

в отсутствие представителей сторон, протоколирование с использованием средств аудиозаписи не ведется

установил:

ПАО "Кубаньэнерго" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с требованиями к ООО "Южстройкомплект" о взыскании неустойки по договору от 10.11.2015 г. № 993 в размере 201 140 руб. 23 коп., неустойки по договору от 10.11.2015 г. № 987 в размере 230 605 руб. 75 коп., об обязании возвратить материалы и оборудование по договорам от 10.11.2015 г. № 993, от 10.11.2015 г. № 987 согласно накладным от 03.12.2015 №395,396,398; от 04.12.2015 № 400, от 14.12.2015 № 470, 472, от 15.12.2015 №484, от 26.04.2016 № 380, от 11.07.2016 № 615, 624, 625, 626, 627,от05.11.2016№998,999 и расходов по оплате государственной пошлины в размере 17 800 руб. (общая сумма 431 745 руб. 98 коп.)

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик не выполнил надлежащим образом взятые на себя обязательства, за нарушение сроков выполнения работ подлежит взысканию неустойка. Кроме того, необходимо возвратить материалы.

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, пояснений в отношении обстоятельств спора не дал, сумму иска по существу не оспорил, отзыв на исковое заявление в соответствии с требованиями части 1 статьи 131 АПК РФ, в материалы дела не представил.

Суд, исследовав собранные по делу доказательства, оценив их в совокупности в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установил следующее.

Между ПАО «Кубаньэнерго» (далее - Истец) ООО «Южстройкомплект» (далее - Ответчик) заключены договор подряда на строительно-монтажные, пусконаладочные работы от от 10.11.2015 № 987 от 10.11.2015 № 993,от 28.03.2016 №183 от 03.06.2016 №436, от 03.06.2016 №437, от 10.11.2015 №992, от 01.07.2016 №583.

Согласно Договорам Ответчик, являющийся подрядчиком по Договорам, обязуется по заданию Истца, являющегося заказчиком по Договорам, и в соответствии с утвержденной проектной документацией, передаваемой заказчиком подрядчику для выполнения работ по Договорам, сводной ведомостью стоимости выполнения работ и услуг, протоколом соглашения о стоимости выполнения строительно-монтажных работ и календарным           планом           выполнения          работ           осуществить строительно-монтажные работы по договорам на технологическое присоединение, по объектам, указанным в Договорах, и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договорами.

Результатом исполнения обязательств по Договорам является ввод объектов в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

В соответствии с пунктами 2.2., 2.3. Договоров срок начала работ по Договорам - в течение 3 календарных дней с момента поставки материалов и оборудования заказчика, срок завершения выполнения работ по Договорам -в течение 45 календарных дней с момента поставки материалов и оборудования заказчика.

Принимая во внимание условия пп. 2.3., 2.3. Договоров, а так же факт отпуска материалов Ответчику, подтверждающийся накладными на отпуск материалов, 

- по договору подряда на строительно-монтажные, пусконаладочные работы от 10.11.2015 № 987 Ответчик должен был приступить к выполнению работ не позднее 06.12.2015. Срок завершения выполнения работ - не позднее 17.01.2016. Однако указанное обязательство им не выполнено.

Цена Договора в соответствии с п. 3.1. указанного договора составляет 456 645,05 руб.

В связи с тем, что последним днем исполнения обязательств по договору является 17.01.2016, то период просрочки исполнения обязательств наступает с 18.01.2016. Таким образом, период просрочки с 18.01.2016 по 06.06.2017 составил 505 дней, следовательно, пеня за указанный период составляет 230 605, 75 руб.

В адрес ответчика была направлена претензия от 07.06.2017 № КЭС/116/654 с требованием об оплате пени в указанном размере в связи с несвоевременным исполнением обязательств по Договору с указанием на пункт 8.7. договора о том, что уплата пеней и штрафов не освобождает Ответчика от исполнения своих обязательств по договору. Однако денежные средства на расчетный счет Истца не поступали, работы Ответчиком не выполнены.

- по договору подряда на строительно-монтажные, пусконаладочные работы от 10.11.2015 № 992 Ответчик должен был приступить к выполнению работ не позднее 17.12.2015. Срок завершения выполнения работ - не позднее 28.01.2016. Однако указанное обязательство им не выполнено.

В адрес Ответчика была направлена претензия от 10.05.2017 № КЭС/116/456 об исполнении обязательств по указанному договору. Однако, по утверждению истца,  oтвета на претензию не последовало, работы ответчиком не выполнены.

- по договору подряда на строительно-монтажные, пусконаладочные работы от 10.11.2015 № 993 Ответчик должен был приступить к выполнению работ не позднее 06.12.2015. Срок завершения работ - не позднее 17.01.2016. Однако указанное обязательство им выполнено не было.

Цена Договора в соответствии с п. 3.1. указанного договора составляет 398 297,49ipy6.

В связи с тем, что последним днем исполнения обязательств по Договору является 17.01.2016, то период просрочки исполнения обязательств по Договору наступает с 18.01.2016. Таким образом, период просрочки с

18.01.2016   по   06.06.2017   составил   505   дней,   следовательно,   пеня   за указанный период составляет 201 140, 23 руб.

В адрес ответчика была направлена претензия от 07.06.2017 № КЭС/116/653 о необходимости оплаты пени в указанном размере в связи с несвоевременным исполнением обязательств по заключенному договору с указанием на пункт 8.7., содержащийся в нем, о том, что уплата пеней и Штрафов не освобождает Ответчика от исполнения своих обязательств по договору;

- по договору подряда на строительно-монтажные, пусконаладочные работы от 01.07.2016 № 583 Ответчик должен был приступить к выполнению работ не позднее 08.11.2016. Срок завершения выполнения работ - 20.12.2016. Однако указанное обязательство им не выполнено.

В адрес Ответчика была направлена претензия от 10.05.2017 № КЭС/116/456 об исполнении обязательств по указанному договору, ответа на претензию не последовало, работы ответчиком не выполнены.

- по договору подряда на строительно-монтажные, пусконаладочные работы от 28.03.2016 № 183 Ответчик должен был приступить к выполнению работ не позднее 29.04.2016. Срок завершения выполнения работ - не позднее 10.05.2016. Однако указанное обязательство им не выполнено.

Письмом от 09.06.2017 № КЭС/116/677 Ответчик уведомлен о расторжении Договора на основании п. 10.2. Договора, а так же ст. 450.1 ГК РФ с указанием на необходимость возврата материалов и оборудования, переданных ему в целях выполнения работ. Указанное требование Ответчиком так же не выполнено;                                    /,

- по договору подряда на строительно-монтажные, пусконаладочные работы от 03.06.2016 № 436 Ответчик должен был приступить к выполнению работ | по объекту «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КУЗ-821 для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом) гр. ФИО2, расположенного по адресу: 

<

...>» не позднее 14.07.2016. Срок окончания выполнения работ - не позднее 25.08.2016. Однако работы по указанному объекту не выполнены, соответственно, обязательства по договору Ответчиком не выполнены.

Письмом от 15.06.2017 № КЭС/116/703 Ответчик уведомлен о расторжении Договора на основании п.10.2.заключенного договора, а так же ст. 450.1 ГК РФ с указанием на необходимость возврата материалови   оборудования,   переданных   Ответчику   в   целях   выполнения   работ. Указанное требование Ответчиком не выполнено;

- по договору подряда на строительно-монтажные, пусконаладочные работы от 03.06.2016 № 437 Ответчик должен был приступить к выполнению работ не позднее 14.07.2016. Срок завершения выполнения работ - не позднее 25.08.2016. Однако указанное обязательство им не выполнено.

В адрес Ответчика была направлена претензия от 10.05.2017 № КЭС/116/456 об исполнении обязательств по указанному договору. Однако ответа на претензию не последовало, работы Ответчиком не выполнены.

Претензия от 10.05.2017 № КЭС/116/459, направленная в адрес Ответчика, содержит требование о необходимости исполнения обязательств по всем вышеуказанным договорам, однако ответа на претензию не последовало.

Истцом произведен расчет неустойки, за просрочку в выполнении работ.

В порядке досудебного урегулирования спора, истцом в адрес ответчика направлялась претензия с требованием об оплате неустойки и возврате материала.

Неисполнение данного требования послужило истцу основанием для обращения в суд с иском по настоящему делу.

Из материалов дела следует, что сложившиеся между сторонами правоотношения по своей правовой природе и содержанию обязательств относятся к категории договоров подряда, правовое регулирование которых осуществляется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Работы не выполнены ответчиком, данное обстоятельство им не опровергнуто.

Работы по Договорам не выполнены, денежные средства, в размере предъявленной для оплаты пени, на расчетный счет Истца не поступали, в связи с чем, Истец, руководствуясь пунктом 10.2. Договоров, а так же статьей 450.1 ГК РФ, в одностороннем порядке отказался от Договоров (исполнения договоров), направив Ответчику соответствующее уведомление от 03.10.2017 № КЭС/116/1186, указав в нем так же на необходимость возврата ранее выданных Ответчику материалов и оборудования.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору от 10.11.2015 г. № 993 в размере 201 140 руб. 23 коп., неустойки по договору от 10.11.2015 г. № 987 в размере 230 605 руб. 75 коп.

Согласно статье 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 8.2. Договоров за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ заказчику подрядчик уплачивает заказчику пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Расчет задолженности по пене судом проверен и признан арифметически верным.

Доказательств оплаты ответчиком пени суду не представлено (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), следовательно, требования истца в части пени обоснованы.

Таким образом, исковые требования о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору от 10.11.2015 г. № 993 в размере 201 140 руб. 23 коп., неустойки по договору от 10.11.2015 г. № 987 в размере 230 605 руб. 75 коп. подлежат удовлетворению на основании ст. 330 ГК РФ.

Кроме того, истцом заявлено требование об обязании ответчика возвратить материалы и оборудование по договорам от 10.11.2015 г. № 993, от 10.11.2015 г. № 987 согласно накладным от 03.12.2015 №395,396,398; от 04.12.2015 № 400, от 14.12.2015 № 470, 472, от 15.12.2015 №484, от 26.04.2016 № 380, от 11.07.2016 № 615, 624, 625, 626, 627,от 05.11.2016№ 998, 999.

Материалами дела подтверждается факт передачи истцом ответчику давальческих материалов.

                                                                             Договор №183 от 28.03.2016

Трансформатор ТМГ СЭЩ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4, 009852903  

1 Штука

                                                                             Договор №436 от 03.06.2016

Комплектная трансформаторная подстанция КТП (ВВ) 630/10/0,4 кВА БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА, 009853756  

1 Штука

Трансформатор ТМГ 21-630/10/0,4 Д/Yн-11, 009853729  

1 Штука

БЛОК ФБС 12-6-6, И5043951   

8,000 Штук

БЛОК ФБС 9-3-6Т, И5043940   

2,000 Штук

БУГЕЛЬ NB20 , И5131351   

128,000 Штук

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ. ВА 04-35 ПРО 3Р 250А , И8752036   

1,000 Штук

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА 25*100, И5136384   

20,000 Штук

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА-1500 , И5136429   

4,000 Штук

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА-2000, И5136389   

20,000 Штук

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА-2200, И5136386   

14,000 Штук

ЗАЖИМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ZVZ 481, И5136710   

24,000 Штук

ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗПВ, И5136702   

75,000 Штук

ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОР645 М, И5136700   

56,000 Штук

ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОР95 М, И5136701   

8,000 Штук

ЗАЖИМ ПА-2-2, М5135910   

3,000 Штук

ЗАЖИМ ПС-1-1А, И5135981   

48,000 Штук

ЗАЖИМ ПС-2-1А, И5135989   

3,000 Штук

ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ MJPB 6-16, И5136665   

20,000 Штук

ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ MJPT95, И5138660   

12,000 Штук

КОЛПАЧОК CI 25-150 ИЗОЛИРУЮЩИЙ, И5023597   

16,000 Штук

КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ  ES 54-14, И5133524   

22,000 Штук

КРЕПЛЕНИЕ KZP-1, И5136722   

31,000 Штук

КРЕПЛЕНИЕ KZP-2, И5136723   

22,000 Штук

КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У-4, И5139160   

5,000 Штук

КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У-52, И5139169   

1,000 Штук

КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 2000, И5133548   

31,000 Штук

КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 25, И5136543   

32,000 Штук

ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ F20 (50М), И5017010   

3,000Упаковок 

НАКОНЕЧНИК ИЗОЛИРОВАННЫЙ CPTAU 95, И5078466   

7,000 Упаковок

НАКОНЕЧНИК ИЗОЛИРОВАННЫЙ СPTAU 50, И5078468   

6,000 Упаковок

ПРОВОД СИП 2 3*70+1*70-0,6/1, И5061507   

87,000 Метров

ПРОВОД СИП 2 3*95+1*95, И5061504   

907,000 Метров

ПРОВОД СИП 3 1*70-20, И5061472   

21,000 Метров

ПРОВОД СИП 4 2х16-0,6/1, И5061515   

200,000 Метров

ПРОВОДНИК ЗП-1, И5043309   

22,000 Штук

ПРОВОДНИК ЗП-2 (3 М), И5043220   

18,000 Штук

РЕМЕШОК КАБЕЛЬНЫЙ KR 1 (100шт в уп.), И5043351   

1,820 Упаковок

СТОЙКА  ВИБРИРОВАННАЯ СВ 95-3 ТУ5863-007-00113557-94, И5043387   

5,000 Штук

СТОЙКА ВИБРИРОВАННАЯ СВ 110-5 ТУ 5863-007-00113557-94, И5043383   

1,000 Штук

                                                                  Договор №437 от 03.06.2016

АРМАТУРА 12  А3  А500С, М5018229   

0,037 Тонн

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА 25*100, И5136384   

12,000 Штук

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА-1500 , И5136429   

12,000 Штук

ЗАЖИМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ZVZ 481, И5136710   

8,000 Штук

ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОР645 М, И5136700   

50,000 Штук

ЗАЖИМ ПС-1-1А, И5135981   

27,000 Штук

ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ MJPT95, И5138660   

4,000 Штук

КОЛПАЧОК CI 25-150 ИЗОЛИРУЮЩИЙ, И5023597   

4,000 Штук

КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ  ES 54-14, И5133524   

10,000 Штук

КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 1500 ВК, И5133551   

16,000 Штук

КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 25, И5136543   

6,000 Штук

ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ F20 (50М), И5017010   

1,000  Упаковок

ПРОВОД СИП 2 3*70+1*54,6-0,6/1, И5061514   

450,000 Метров

ПРОВОД СИП 4 2х16-0,6/1, И5061515   

150,000 Метров

РЕМЕШОК КАБЕЛЬНЫЙ KR 1 (100шт в уп.), И5043351   

0,830 Упаковок

СКРЕПА С 20, И5139142   

0,350 Упаковок

СТОЙКА  ВИБРИРОВАННАЯ СВ 95-3 ТУ5863-007-00113557-94, И5043387   

24,000 Штук

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ У-1, И5139401   

8,000 Штук

                                                                  Договор №583 от 01.07.2016

Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-ВВт (КТП)  -250/10/0,4 кВА БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА, 009853862  

1 Штука

Трансформатор  ТМГ 11-250/10-У1, 10/0,4 кВ  Y/Zн-11, 009854073  

1 Штука

БЛОК ФБС 9-4-6, И5043941   

5,000 Штук

БУГЕЛЬ В 200, И5131353   

69,000 Штук

ГИЛЬЗА MJPB 16-6 CG, И5133503   

10,000 Штук

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА 25*100, И5136384   

10,000 Штук

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА-1500 , И5136429   

16,000 Штук

ЗАЖИМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ZVZ 481, И5136710   

8,000 Штук

ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗПВ-М, И5136708   

35,000 Штук

ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОР645 М, И5136700   

10,000 Штук

ЗАЖИМ ПА-2-2, И5135912   

3,000 Штук

ЗАЖИМ ПС-2-1А, И5135989   

30,000 Штук

ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ MJPT 70, И5138669   

12,000 Штук

КОЛПАЧОК CI 25-150 ИЗОЛИРУЮЩИЙ, И5023597   

4,000 Штук

КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ  ES 54-14, И5133524   

17,000 Штук

КРЕПЛЕНИЕ KZP-1, И5136722   

21,000 Штук

КРЕПЛЕНИЕ KZP-2, И5136723   

13,000 Штук

КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У-4, И5139160   

4,000 Штук

КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 2000, И5133548   

15,000 Штук

КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 25, И5136543   

9,000 Штук

ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ F 20.7, И5017021   

50,000 Метров

НАКОНЕЧНИК ИЗОЛИРОВАННЫЙ CPTAU 70, И5078423   

4,000 Штук

ПРОВОД СИП 2 3*70+1*70-0,6/1, И5061507   

674,000 Метров

ПРОВОД СИП 3 1*70-20, И5061472   

21,000 Метров

ПРОВОД СИП 4 2х16-0,6/1, И5061515   

48,000 Штук

ПРОВОДНИК ЗП-1, И5043302   

13,000 Штук

ПРОВОДНИК ЗП-2 (3 М), И5043220   

14,000 Штук

РЕМЕШОК КАБЕЛЬНЫЙ KR 1, И5043357   

60,000 Штук

СТОЙКА  ВИБРИРОВАННАЯ СВ 95-3 ТУ5863-007-00113557-94, И5043387   

9,000 Штук

                                                                    Договор №987 от 10.11.2015

Комплектная трансформаторная подстанция КТП (ВВ) 100/10/0,4 кВА БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА, 009853493  

1 Штука

Трансформатор силовой ТМГ-25/10-11 УХЛ1 10,00/0,4 Y/Zн-11, 009853527  

1 Штука

БУГЕЛЬ В 200, И5131352   

0,040 Штук

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА-1000 , И5136427   

4,000 Штук

ЗАЖИМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ZVZ 481, И5136710   

8,000 Штук

ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА KZP-1, И5136720   

2,000 Штук

ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗПВ, И5136702   

2,000 Штук

ЗАЖИМ ПС-1-1А, И5135981   

2,000 Штук

ЗАЖИМ ПС-2-1, И5136000   

3,000 Штук

КОЛПАЧОК СЕ16-150, И5023612   

4,000 Штук

КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 2000, И5133548   

2,000 Штук

НАКОНЕЧНИК ИЗОЛИРОВАННЫЙ CPTAU 16, И5078424   

4,000 Штук

ПРОВОД СИП 3 1*70-20, И5061472   

99,000 Метров

ПРОВОД СИП 4 2х16-0,6/1, И5061515   

76,000 Метров

РЕМЕШОК КАБЕЛЬНЫЙ KR 1 (100шт в уп.), И5043351   

0,070 Упаковок

СТОЙКА  ВИБРИРОВАННАЯ СВ 95-3 ТУ5863-007-00113557-94, И5043387   

2,000 Штук

                                                                 Договор №992 от 10.11.2015

Комплектная трансформаторная подстанция КТП (ВВ) 160/10/0,4 кВА БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА, 009853490  

1 Штука

Трансформатор ТМГ СЭЩ-63/10-11 УХЛ1 10/0,4, 009853205  

1 Штука

АРМАТУРА 12  А1 , И5018228   

0,022 Штук

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА-1500 , И5136429   

8,000 Штук

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА-2000 ВК, И5136383   

18,000 Штук

ЗАЖИМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ZVZ 481, И5136710   

8,000 Штук

ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА KZP-1, И5136720   

17,000 Штук

ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА KZP-2, И5136721   

13,000 Штук

ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗПВ, И5136702   

26,000 Штук

ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОР645 М, И5136700   

8,000 Штук

ЗАЖИМ ПС-1-1А, И5135981   

18,000 Штук

ЗАЖИМ Р 2-95 + ЗАЖИМ Д/НАЛОЖЕНИЯ ЗАЩИТ.ЗАЗЕМЛЕНИЯ СМСС, И5136259   

8,000 Штук

КОЛПАЧОК СЕ16-150, И5023612   

16,000 Штук

КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ  ES 54-14, И5133524   

10,000 Штук

КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES 1500E, И5133523   

3,000 Штук

КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 2000, И5133548   

4,000 Штук

КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 2000.1, И5133547   

12,000 Штук

КРОНШТЕЙН У-4, И5136540   

4,000 Штук

ЛЕНТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ F20.7  (19х50 КАРТОН), И5017020   

2,000 Упаковок

НАКОНЕЧНИК ИЗОЛИРОВАННЫЙ CPTAU 70, И5078423   

4,000 Штук

ПРОВОД СИП 2 3*70+1*70-0,6/1, И5061507   

433,000 Метров

ПРОВОД СИП 3 1*70-20, И5061472   

18,000 Метров

ПРОВОДНИК ЗП-1, И5043309   

10,000 Штук

ПРОВОДНИК ЗП-2, И5043304   

4,000 Штук

РЕМЕШОК КАБЕЛЬНЫЙ KR 1 (100шт в уп.), И5043351   

0,460 Упаковок

СКОБА С 200, И5139143   

32,000 Штук

СКРЕПА С 20, И5139142   

0,320 Штук

СТОЙКА  ВИБРИРОВАННАЯ СВ 95-3 ТУ5863-007-00113557-94, И5043387   

25,000 Штук

СТОЙКА ВИБРИРОВАННАЯ СВ 110-5 ТУ 5863-007-00113557-94, И5043383   

5,000 Штук

ЭЛЕКТРОДЫ АНО-21 3ММ, И5024193   

8,000 Штук

                                                                 Договор №993 от 10.11.2015

АРМАТУРА 12  А1 , И5018228   

0,018 Тонн

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ РА-1500 Е, И5136428   

11,000 Штук

ЗАЖИМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ZVZ 481, И5136710   

8,000 Штук

ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА KZP-1, И5136720   

8,000 Штук

ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА KZP-2, И5136721   

18,000 Штук

ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗПВ, И5136702   

23,000 Штук

ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОР95 М, И5136701   

12,000 Штук

ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПС-1-1А, И5135835   

14,000 Штук

ЗАЖИМ ПС-1-1А, И5135981   

14,000 Штук 

КОЛПАЧОК СЕ16-150, И5023612   

8,000 Штук

КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ  ES 54-14, И5133524   

18,000 Штук

КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 2000, И5133548   

8,000 Штук

КРОНШТЕЙН У-4, И5136540   

3,000 Штук

ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ F207 50м, И5017019   

1,000 Упаковок

ЛЕНТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ F20.7  (19х50 КАРТОН), И5017020   

1,000 Упаковок

ПРОВОД СИП 2 3*70+1*70-0,6/1, И5061507   

691,000 Метров

ПРОВОДНИК ЗП-2, М5043301   

7,000 Штук

РЕМЕШОК КАБЕЛЬНЫЙ KR 2 (100шт в уп.), И5043354   

0,870 Штук

СКРЕПА С 20, И5139142   

0,560Упаковок

СТОЙКА  ВИБРИРОВАННАЯ СВ 95-3 ТУ5863-007-00113557-94, И5043387   

28,000 Штук

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ У-1, М5139420   

1,000 Штук

В соответствии с пунктом 1 статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

С учетом положения данной нормы закона, обязанность подрядчика по возврату остатков неиспользованных им при производстве материалов, полученных от заказчика, презюмируется законом.

Доказательств того, ответчик отчитался перед заказчиком об использовании давальческого материала, последний не предоставил.

Таким образом, требование об обязании ответчика возвратить материалы и оборудование по договорам от 10.11.2015 г. № 993, от 10.11.2015 г. № 987 согласно накладным от 03.12.2015 №395,396,398; от 04.12.2015 № 400, от 14.12.2015 № 470, 472, от 15.12.2015 №484, от 26.04.2016 № 380, от 11.07.2016 № 615, 624, 625, 626, 627,от 05.11.2016№ 998, 999 подлежит удовлетворению.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.  

При таких обстоятельствах, с учетом ст.ст. 333.17, 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает необходимым оплату госпошлины отнести на ответчика.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд  

решил:

Взыскать с ООО "Южстройкомплект" в пользу ПАО "Кубаньэнерго" неустойку в размере 431745 руб. 98 коп.,  расходы по оплате государственной пошлины в размере                17635 руб.

 Обязать ООО "Южстройкомплект" возвратить ПАО "Кубаньэнерго" материалы и оборудование по договорам от 10.11.2015 г. № 993, от 10.11.2015 г. № 987, переданные  согласно накладным от 03.12.2015 № 395,396,398; от 04.12.2015 № 400, от 14.12.2015                  № 470, 472, от 15.12.2015 №484, от 26.04.2016 № 380, от 11.07.2016 № 615, 624, 625, 626, 627,от 05.11.2016 № 998,999. 

Возвратить ПАО "Кубаньэнерго" из федерального бюджета госпошлину в сумме  65 руб.

   Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.

   Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                             О.А. Гречко