АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е     Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А23-5744/2019

05 октября 2020 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения объявлена 29 сентября 2020 года. 

Полный текст решения изготовлен 05 октября 2020 года. 

 

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Ивановой Е.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно Строительная Компания», 214525, Смоленская область, Смоленский район, дер. Старые Батеки, Телятник, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги», 248000, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания «Трансснабстрой», 119048, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> и общества с ограниченной ответственностью «Новые Строительные Технологии», 248000, 

<

...>/47, пом. 5, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

о взыскании 1 184 868 руб.,

вопрос о принятии дополнительного решения,  

 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно Строительная Компания» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» (далее – ответчик) о взыскании 1 184 868 руб., в т.ч. задолженность по муниципальному контракту № 0137300043317000036-0347921-01 от 30.03.2017 в сумме 1 060 000 руб. и пени за период с 30.01.2018 по 30.04.2019 в размере 124 868 руб.

Определением суда от 27.02.2020 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания «Трансснабстрой» и общество с ограниченной ответственностью «Новые Строительные Технологии».

В судебном заседании от 18.08.2020 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнении исковых требований, в соответствии с котором истец просил взыскать с ответчика задолженность по муниципальному контракту № 0137300043317000036-0347921-01 от 30.03.2017 в сумме 645 338 руб. 56 коп., а также пени за период с 30.01.2018 по 18.08.2020 в сумме 138 398 руб. 22 коп., с продолжением начисления пени по дату фактического исполнения решения суда.

Решением Арбитражного суда Калужской области  02.09.2020 муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Калуги» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно Строительная Компания» взыскана задолженность в размере 645 338 руб. 56 коп., пени в размере 85 206 руб. 21 коп. (период с 30.01.2018 по 18.08.2020) и расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 407 руб. 50 коп. В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано.  

В связи с тем, что при принятии решения от 02.09.2019 не было рассмотрено требование о взыскании неустойки за период, начиная с 19.08.2020 по день фактического исполнения обязательств, суд назначил судебное заседание для рассмотрения данного требования и вынесения дополнительного решения.

На основании ст. ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей сторон и третьих, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Согласно ст. 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе  вправе принять дополнительное решение в случае, если судом по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение. 

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании пункта 7.4. контракта при нарушении сроков оплаты выполненных работ по вине заказчика подрядчик вправе потребовать оплату пени в размере 1/300 действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от не перечисленных в срок сумм, начиная со дня, следующего после дня истечения срока выполнения данного обязательства. 

Пунктом 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» предусмотрено, что по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства.

Учитывая вышеизложенное и на основании пункта 1 части 1 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает необходимым принять по настоящему делу дополнительное решение  о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки, начисленной на сумму 645 338 руб. 56 коп., начиная с 19.08.2020 по день фактической оплаты задолженности, рассчитанной за каждый день просрочки от суммы долга, исходя из размера неустойки 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты.

Руководствуясь статьями 167-171, 174, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Калуги», г. Калуга в пользу общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно Строительная Компания», дер. Старые Батеки Смоленского района Смоленской области, неустойку, начисленную на сумму 645 338 руб. 56 коп., начиная с 19.08.2020 по день фактической оплаты задолженности, рассчитанной за каждый день просрочки от суммы долга, исходя из размера неустойки 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

 

 

Судья                                                                                                  Е.В. Иванова